АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-119441/2023-52-972

г. Москва

09 января 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 декабря 2023 года. Решение в полном объеме изготовлено 09 января 2024 года. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «СК «АТМОСФЕРА» (119048,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ,  УСАЧЁВА УЛ., Д. 29, К. 2, ПОМЕЩ. 1Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 16.04.2019, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ДСК-ПРОИЗВОДСТВО»  (123007, 

<

...>, ЭТ 2 ПОМ I КОМ  4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2018, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности в размере 1 630 067,16 руб., 

при участии: от истца – ФИО2 (удост., дов. от 04.05.2023), 

от ответчика – ФИО3 (паспорт, диплом, дов. от 02.03.2023).  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СК «АТМОСФЕРА» (далее –  истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «ДСК-ПРОИЗВОДСТВО» (далее –  ответчик) о взыскании задолженности в размере 1 630 067,16 руб.  

Истец заявленные требования поддержал. Ответчик по исковым требованиям возражал. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие  обстоятельства.  

Между Подрядчиком (ответчик) и Субподрядчиком (истец) заключен  рамочный договор строительного подряда № ДСК-СП/394-22 от 16.08.2022 на  выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте капитального  строительства, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский  

муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца, корпус 6 в составе объекта  капитального строительства: «Третий этап строительства многоэтажной жилой  застройки: Многоэтажное жилое здание № 6 со встроенными нежилыми помещениями  с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка № 24 с сетями  инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский  муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца».  

28.10.2022 уполномоченными представителями сторон согласован и подписан  Акт о разграничении объема работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.  

С учетом Акта о разграничении объема работ был скорректирован срок  выполнения работ до 28.12.2022.  

Субподрядчиком весь объем работ указанный в Акте о разграничении объема  работ выполнен в срок до 28.12.2022.  

15.03.2023 Подрядчик, в целях конкретизации части Рамочного Договора  направил в адрес Субподрядчика договоры подряда № ДСК-СП/868-22 от 16.08.2022,   № ДСК-СП/828-22 от 01.06.2022.  

21.03.2023 Субподрядчик направил в адрес Подрядчика Акты о выполнении  работ по договорам подряда № ДСК-СП/868-22 от 16.08.2022, № ДСК-СП/828-22 от  01.06.2022. Данные акты получены Подрядчиком 27.03.2023, что подтверждает  информация с сайта Почты России об отслеживании почтовых отправлений по  почтовому идентификатору № 10900481004191, № 10900481004207.  

Из содержания искового заявления усматривается, что в установленные  законом и договором сроки от Подрядчика не поступило в адрес Субподрядчика  мотивированного отказа в подписании данных документов. Таким образом, у  Субподрядчика имеется односторонние акты о выполнении работ по Договору № ДСК- СП /868-22 от 16.08.2022 на сумму 1 851 323 руб., гарантийное удержание 46 283 руб.,  к оплате 1 805 040 руб.; по Договору № ДСК-СП /828-22 от 01.06.2022 на сумму 142  000 руб., гарантийное удержание 3 550 руб., к оплате 138 450 руб.  

Таким образом, у Подрядчика перед Субподрядчиком имеется задолженность  1 943 490 руб.  

Субподрядчик 23.03.2023 направил в адрес Подрядчика дополнительное  Соглашение № 1 к Рамочному Договору подряда № ДСК-СП/394-22 от 16.08.2022 с  целью конкретизации остальной части выполненных объемов работ по данному  договору, а также документы подтверждающие выполнение работ по Рамочному  Договору подряда № ДСК-СП/394-22 от 16.08.2022. Данные акты получены  Подрядчиком 27.03.2023, что подтверждает информация с сайта Почты России об  отслеживании почтовых отправлений по почтовому идентификатору №  10900481007871.  

В установленные законом и договором сроки от Подрядчика в адрес  Субподрядчика не поступило обоснованного и мотивированного отказа в подписании  данных документов. Доводы изложенные в письме от 07.04.2023 № 01-02-862 не  связаны с оспариванием факта выполнения и /или качества выполненных работ.  

Таким образом, как указывает истец, у Субподрядчика имеются односторонние  акты о выполнении работ по Рамочному Договору подряда №№ ДСК-СП/394-22 от  16.08.2022: Акт о приемке выполненных работ № 1 (по форме КС-2), Справка о  стоимости выполненных работ и затрат № 1 (по форме КС-3) от 28.12.2022 на сумму 9  185 427 руб., гарантийное удержание 229 636 руб., материал заказчика на сумму 1 518  925 руб., к оплате 7 436 866 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 2 (по форме  КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (по форме КС-3) от  28.12.2022 на сумму 7 825 742,88 руб. (гарантийное удержание отсутствует), к оплате 7  825 742, 88 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 (по форме КС-2), Справка о  стоимости выполненных работ и затрат № 3 (по форме КС-3) от 28.12.2022 на сумму 4  537 403,72 руб., гарантийное удержание 113 435,09 руб., к оплате 4 423 969 руб.  

Между сторонами заключен договор подряда № ДСК-СП/868 от 16.08.2022  по выполнению полного комплекса работ на Объекте строительства по  укомплектованию СТК модулей Modulbau. Стоимость работ по Договору-868  составляет 1 851 322 руб.  

21.03.2023 Субподрядчик направил в адрес Подрядчика Акты о выполнении  работ по договору подряда № ДСК-СП/868-22 от 16.08.2022. Данные акты  получены Подрядчиком 27.03.2023, что подтверждает информация с сайта Почты  России об отслеживании почтовых отправлений по почтовому идентификатору №  10900481004207.  

Между сторонами заключен договор подряда № ДСК-СП/394 от 16.08.2022  по выполнению полного комплекса работ на Объекте строительства по внутренней  отделке помещений в квартирах и МОП. Стоимость работ по Договору-394  составляет 15 475 837,46 руб. Также подписано Дополнительное соглашение № 1  от 16.08.2022 на выполнение дополнительных работ по устройству СТК в  построечных условиях, пропущенных при монтаже по технологи МодельБау.  Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 4 512 075,56 руб.  Итоговая стоимость работ по Договору-394 составляет 19 987 913,02 руб.  

23.03.2023 Субподрядчик направил в адрес Подрядчика Акты о выполнении  работ по договору подряда № ДСК-СП/394-22. Также направлено уведомление об  одностороннем зачете на сумму 313 422,28 руб. Данные документы получены  Подрядчиком 27.03.2023 , что подтверждает информация с сайта Почты России  об отслеживании почтовых отправлений по почтовому идентификатору №  10900481007871.  

В установленные законом и договором сроки от Подрядчика не поступило  в адрес Субподрядчика мотивированного отказа в подписании данных документов.  Таким образом, у Субподрядчика имеются односторонние акты о выполнении работ по  Договорам:  

- № ДСК-СП/828-22 от 01.06.2022 на сумму 142 000 руб., гарантийное  удержание 3 550 руб., к оплате 138 450 руб.  

- № ДСК -СП/868-22 от 16.08.2022 на сумму 1 851 322, 50 руб., гарантийное  удержание 46 283,06 руб., к оплате 1 805 039,44 руб.  

- № ДСК-СП/394-22 от 16.08.2022 на сумму 19 686 577,72 руб.: Акт о  приемке выполненных работ № 1 (по форме КС-2) от 28.12.2022 на сумму 9 185  426,88 руб., гарантийное удержание 229 635,67 руб., к оплате 8 955 791,21 руб.,  использован материал заказчика - 1 518 925 руб., к итоговой оплате 7 436 866,21  руб.; Акт о приемке выполненных работ № 2 (по форме КС-2) от 28.12.2022 на  сумму 7 825 742,88 руб. (гарантийное удержание отсутствует), к оплате 7 825 742, 88  руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 (по форме КС-2) от 28.12.2022 на  сумму 4 537 403,72 руб., гарантийное удержание 113 435,09 руб., к оплате 4 423 968,63  руб.  

В период с 24.08.2022 по 19.12.2022 от Подрядчика в адрес Субподрядчика  поступило авансовых платежей Договору подряда № ДСК-СП/ 394-22 денежных  средств 20 000 000 руб.  

Уведомление об одностороннем зачете от 22.03.2023 на сумму 313 422, 28  руб. (20 000 000 – 19 686 577, 72 = 313 422,28) получено ответчиком 27.03.2023, что  подтверждается почтовым отправлением трек номер 10900481007871. В результате  данного зачета обязательство должника (ответчика) по договору № ДСК-СП /868-22  частично прекращено исполнением на сумму 313 422, 28 руб. и составляет 1 491  617,16 руб.  

Таким образом, у Подрядчика перед Субподрядчиком имеется  задолженность по договору № ДСК-СП /828-22 от 01.06.2022 в размере 138 450 руб.,  

по договору № ДСК-СП /868-22 от 16.08.2022 - 1 491 617, 16 руб. (1 805 039, 44 – 313  422,28)  

Общая сумма задолженности по двум договорам составляет 1 491 617,16 +  138 450 = 1 630 067,16 руб.  

18.04.2023 в адрес ответчика в целях досудебного урегулирования спора была  направлена претензия с требованием выплаты задолженности. Данная претензия была  получена ответчиком 27.04.2023, что подтверждает информация с сайта Почты России  об отслеживании почтовых отправлений по почтовому идентификатору №  80299982115710. Ответ на указанную претензию от ответчика не поступил.  

Возражая по исковым требованиям ответчик в своем отзыве ссылается на  следующие обстоятельства.  

При оформлении Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2),  Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Субподрядчик  учитывает Классификацию объектов строительства, а также кодовые обозначения,  присвоенные отдельным объектам строительства. По каждому отдельному виду работ,  указанных в первичных документах Субподрядчиком, отражается цифровой/буквенный  код, в соответствии с Классификацией. Информация для оформления первичных  документов в соответствии с указанными требованиями, направляется Подрядчиком  Субподрядчику в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора. В случае,  если такая Классификация Подрядчиком не предоставлена, объекты строительства  указываются с применением обозначения, примененного в Проектной документации.  

В полученных от Истца Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от  30.11.2022 и Справки о стоимости выполненных Работ и Затрат № 1 от 30.11.2022 за  отчетный период с 01.11.2022 по 30.11.2022 имелись следующие замечания:  

- Акты и Справки представлены за не соответствующий период; 

- к Актам и Справкам не приложен комплект исполнительной документацией  (включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ,  результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и сертификаты на  оборудование и материалы) на выполненный в отчетном периоде объем Работ;  

- в Акты и Справки не оформлены надлежащим образом, т.е. отсутствуют  подписи руководителя проекта, заказчика, сотрудников отдела качества и других  уполномоченных лиц на приемку выполненных работ.  

21.04.2023 был подготовлен и направлен в адрес Истца мотивированный отказ  от приемки работ по договору.  

На основании вышеизложенного, ООО «ДСК-Производство» не согласно с  позицией о сдаче работ по договору № ДСК-СП/394-22 от 16.08.2022.  

Также ответчик указывает, что в материалы дела не представлено  доказательств выполнения работ на сумму аванса (20 млн. руб.), Истец по  собственному усмотрению суммирует исполнение по договорам № ДСК-СП/828-22,  ДСК-СП/868-22, ДСК-СП/394-22 и самостоятельно зачитывает с суммой аванса по  договору № ДСК-СП/394-22. Заявления о зачете, в рамках ст. 410 Гражданского  кодекса Российской Федерации, в адрес ООО «ДСК-Производство» не поступало.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, оценив  представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении требований в  полном объеме на основании нижеследующего.  

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы  или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену  после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,  предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или  договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе  или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего  Кодекса.  

В соответствии со ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Материалами дела установлено, что требование о взыскании задолженности  предъявлено по договорам №№ ДСК-СП/828-22, ДСК-СП/868-22, которые сторонами  не расторгнуты.  

Так по договору № ДСК-СП/828-22 истцом выполнено работ на сумму 142 000  руб., ответчиком авансирование работ не производилось.  

21.03.2023 Субподрядчик направил в адрес Подрядчика Акты о выполнении  работ по договорам подряда № ДСК-СП/868-22 от 16.08.2022, № ДСК-СП/828-22 от  01.06.2022. Данные акты получены Подрядчиком 27.03.2023, что подтверждает  информация с сайта Почты России об отслеживании почтовых отправлений по  почтовому идентификатору № 10900481004191, № 10900481004207.  

Из содержания искового заявления усматривается, что в установленные  законом и договором сроки от Подрядчика не поступило в адрес Субподрядчика  мотивированного отказа в подписании данных документов. Таким образом, у  Субподрядчика имеется односторонние акты о выполнении работ по Договору № ДСК- СП/868-22 от 16.08.2022 на сумму 1 851 323 руб., гарантийное удержание 46 283 руб., к  оплате 1 805 040 руб.; по Договору № ДСК-СП /828-22 от 01.06.2022 на сумму 142 000  руб., гарантийное удержание 3 550 руб., к оплате 138 450 руб.  

По договору № ДСК-СП/868-22 истцом выполнено работ на сумму  1 851 332,50 руб., ответчиком авансирование работ не производилось.  

21.03.2023 Субподрядчик направил в адрес Подрядчика Акты о выполнении  работ по договору подряда № ДСК-СП/868-22 от 16.08.2022. Данные акты  получены Подрядчиком 27.03.2023, что подтверждает информация с сайта Почты  России об отслеживании почтовых отправлений по почтовому идентификатору №  10900481004207.  

Уведомление об одностороннем зачете от 22.03.2023 на сумму 313 422, 28  руб. (20 000 000 – 19 686 577, 72 = 313 422,28) получено ответчиком 27.03.2023, что  подтверждается почтовым отправлением трек номер 10900481007871. В результате  данного зачета обязательство должника (ответчика) по договору № ДСК-СП /868-22  частично прекращено исполнением на сумму 313 422, 28 руб. и составляет 1 491  617,16 руб.  

Таким образом, у Подрядчика перед Субподрядчиком имеется  задолженность по договору № ДСК-СП /828-22 от 01.06.2022 в размере 138 450 руб.,  по договору № ДСК-СП /868-22 от 16.08.2022 - 1 491 617, 16 руб. (1 805 039, 44 – 313  422,28)  

Ответчиком представлено письмо исх. № 01-02-986 от 21.04.2023 об отказе в  подписании актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).  

Данное письмо не имеет отношения к рассматриваемому спору, так как  данным письмом ответчик отказывает в подписании актов о выполнении  принятых работ от 30.11.2022 (отчетный период с 01.11.2022 по 30.11.2022),  которые он получал от ООО «СК «Атмосфера» в рамках исполнения обязательств  по договорам № ДСК -СП/230-22 от 29.04.2022, № ДСК-СП/311-22 от 30.05.2022,   № ДСК-СП /315-22 от 30.05.2022, что также видно из текста письма в котором  говорится о расторжении договоров письмом исх. № 01-02-131 от 18.01.2023.  

Уведомление об одностороннем зачете от 22.03.2023 на сумму 313 422, 28  руб. получено ответчиком 27.03.2023, что подтверждается почтовым отправлением  трек номер 10900481007871. В результате данного зачета обязательство должника  (ответчика) по договору № ДСК-СП /868-22 от 16.08.2022 частично прекращено  исполнением на сумму 313 422, 28 руб. и составляет 1 491 617,16 руб.  

Общая сумма задолженности по двум договорам составляет 1 491 617,16 +  138 450 = 1 630 067,16 руб.  

Доводы ответчика, изложенные в отзыве не исключают правомерности  требований истца, опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами,  сделаны при не правильном и не верном применении норм материального и  процессуального права, регулирующих спорные правоотношения.  

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения  обязательств, что в соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации не допускается, следовательно, требование истца о взыскании 1 630 067,16  руб. задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном  порядке.  

В силу п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца правомерными и  подлежащими удовлетворению в полном объеме.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК- ПРОИЗВОДСТВО» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СК «АТМОСФЕРА» (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 1  630 067,16 руб. по договорам №№ ДСК-СП/828-22, ДСК-СП/868-22, госпошлину в  размере 29 301 руб.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месяца с момента его принятия.  

Судья Р.Е. Галиева