Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Ульяновск                                                                             Дело № А72-9011/2019

20.01.2020  

 

Резолютивная часть решения объявлена 13.01.2020

В полном объеме решение изготовлено 20.01.2020

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи О.А.Слепенковой, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ю.И.Кольник, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Груз-Гарант» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Курган, 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Ульяновск,

о взыскании 3 553 711 руб. 13 коп.,

 

при участии в судебном заседании после перерыва:

от истца – Аксельрод М.В., доверенность в деле;

от ответчика – не явились, уведомлены; 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Груз-Гарант» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство», просит взыскать с ответчика задолженность по договору субподряда № 28/КУ от 23.05.2018 в размере 3 553 711 руб. 13 коп., из которых 3 448 270  руб. 69 коп. - основной долг, 105 440 руб. 44 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами в  соответствии со ст. 395 ГК РФ, которое принято к производству в рамках дела № А72-9011/2019.

Истец представил ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просит взыскать 3 749 960,11 руб., в том числе 3 448 270 руб. 69 коп. основного долга, 257 444 руб. 42 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.09.2018 по 09.01.2020, 44 245 руб. 40 коп. процентов за несвоевременную выплату гарантийного удержания в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 08.10.2018 по 09.01.2020, 40 000 рублей расходов на оплату услуг представителя.

На основании ст. 49 АПК РФ суд удовлетворил данное ходатайство.

Ответчик с требованиями истца не согласен, представил дополнительные пояснения. 

Так как ответчик уведомлен о времени и месте судебного заседания, суд рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования  подлежащими частичному удовлетворению.

При этом  суд  исходит  из  следующего:

Как усматривается из материалов дела, между ООО "ДАРС-Строительство" (Генподрядчик) и ООО "Груз-Гарант" (Субподрядчик) был заключен договор субподряда N 28/КУ от 23.05.2018 по которому Субподрядчик обязался выполнить, в соответствии со Сметой и Техническим заданием, комплекс работ по устройству пристрой зоны в осях А14-16 на объекте: реконструкция ТРЦ «Гиперсити», по адресу: 

<

...>, а Генподрядчик в свою очередь, принять и оплатить качественно выполненные работы, в соответствии с условиями договора.

Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее по тексту - «РФ»), в том числе требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, обычно предъявляемыми к работам и объектам аналогичного рода, а также обоснованными требованиями Генподрядчика и органов государственного надзора.

Субподрядчик подтверждает, что на дату подписания Договора им получена от Генподрядчика необходимая для выполнения Работ проектная (рабочая) документация, а также строительная площадка для производства работ.

Генподрядчик в любой момент, с письменным уведомлением Субподрядчика, вправе вносить изменения в объем Работ, порученных Субподрядчику по Договору, в том числе путем внесения изменений в Техническое задание (Приложение №2) и Проектную/Рабочую документацию, увеличивая или сокращая объем любого из видов Работы, изменяя характер или качество, или вид любой части Работ, включая дополнительные работы любого характера, необходимые для завершения Работ. При этом, если стоимость вышеуказанных работ, а также (работ, которые не могли быть предусмотрены Сторонами при заключении Договора не превышает 3 % от обшей стоимости Работ по Договору при его заключении, такие работы выполняются Субподрядчиком без увеличения стоимости и Генподрядчиком не оплачиваются. В части превышения 3 % от общей стоимости Работ Генподрядчик оплачивает такие работы по себестоимости. При этом, в любом из указанных случаев Субподрядчик обязан представить Генподрядчику на рассмотрение подробную позиционную смету вносимых изменений и только после получения письменного одобрения Генподрядчика и подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, Субподрядчик может приступить к производству Работ в части внесенных изменений, в противном случае данные работы Генподрядчиком не оплачиваются. В случае, если данные работы, на момент внесения изменений Субподрядчик начал в соответствии с Проектной документацией и графиком производства работ (Приложение № 3) выполнять исключаемые Генподрядчиком работы или произвел оплату материалов для их выполнения. Субподрядчик обязан представить Генподрядчику на рассмотрение подробную позиционную смету и накладные на материал для принятия Сторонами решения о подписании Дополнительного соглашения к Договору о компенсации выполненных работ и закупленных материалов.

Пунктом 2.13 стороны согласовали, что в качестве обеспечения (гарантии) исполнения субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков работ генподрядчик удерживает денежные средства в размере 5% от стоимости выполненных субподрядчиком работ в отчетном периоде (гарантийное удержание). Сумму Гарантийного удержания Генподрядчик вправе использовать для покрытия своих расходов на устранение своими силами и/или силами третьих лиц недостатков (дефектов, недоделок) в Работах, выполненных Субподрядчиком по Договору, путем удержания в одностороннем порядке с обязательным (письменным уведомлением Субподрядчика о произведенном удержании, в случае, если недостатки (дефекты, недоделки) не устранены Субподрядчиком в установленный Генподрядчиком разумный срок. Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по Договору. 

В силу пункта 2.14 договора сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику только при наличии следующих условий:

-если в течение срока гарантийного удержания не выявлено скрытых недостатков работ, произведенных Субподрядчиком, а также предоставленных им материалов, оборудования (при монтаже оборудования); - если  в  течение  срока  гарантийного  удержания   выявлены  скрытые  недостатки  работ,  материалов, оборудования, но они качественно и своевременно устранены Субподрядчиком:

- если в течение срока гарантийного удержания выявлены скрытые недостатки работ, материалов, оборудования, и затраты по их устранению силами третьих лиц добровольно возмещены Субподрядчиком в установленном Договором порядке. В случае отказа Генподрядчика от исполнения Договора по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик выплачивает Субподрядчику сумму Гарантийного обеспечения с учетом возможных удержаний, предусмотренных Договором, по истечении 36 (тридцати шести) месяцев от даты расторжения Договора и передачи Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем работ на основании выставленного Субподрядчиком счета.

24.05.2018 стороны согласовали протокол разногласий к договору субподряда № 28 КУ, которым пункты 2.13 и 2.14 договора приняты в редакции ООО «Груз-Гарант», а именно:

«В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ в отчетном периоде (Гарантийное удержание). Сумму Гарантийного удержания Генподрядчик вправе использовать для покрытия своих расходов на устранение своими силами и/или силами третьих лиц недостатков (дефектов, недоделок) в Работах, выполненных Субподрядчиком по Договору, путем удержания в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Субподрядчика о произведенном удержании, в случае, если недостатки (дефекты, недоделки) неустранены Субподрядчиком в установленный Генподрядчиком разумный срок. Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) согласно фактически выполненному объему работ.

В случае отказа Генподрядчика от исполнения Договора по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик выплачивает Субподрядчику сумму Гарантийного обеспечения с учетом возможных удержаний, предусмотренных Договором, по истечении 1 (одного) месяца от даты расторжения Договора и передачи Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем работ на основании выставленного Субподрядчиком счета».

Согласно п. 2.1.1 изменение договорной стоимости, объемов и состава работ сопровождается обязательным подписанием между сторонами Дополнительного соглашения к договору.

В рамках вышеуказанного договора субподряда N 28/КУ от 23.05.2018 был подписан ряд дополнительных соглашений.

Дополнительным соглашением № 1 от 08.06.2018 стороны согласовали дополнительные работы, стоимость работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 3 117 514 (Три миллиона сто семнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 68 копеек, в т. ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десяти) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Дополнительному соглашению (Гарантийное удержание). Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по Дополнительному соглашению. В остальном порядок удержания, использования и возврата суммы Гарантийного удержания установлен Договором. Оплата Работ производится в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 30 (тридцати) %, в т.ч. НДС 18 %, выплачивается Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения и предоставления счета на оплату. Целевое назначение аванса: на приобретение необходимых для выполнения Работ строительных материалов и оборудования, аренду техники и механизмов, оплату заработной платы. Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за выполненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ.

Дополнительным соглашением от 30.07.2018 № 1.1 в связи с изменением объёмов Работ по Дополнительному соглашению № 1 от 08.06.2018 стороны пришли к соглашению внести изменение в пункт 2 Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2018 и изложить его в следующей редакции «Стоимость Работ согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению), является твёрдой и составляет 2 956 064 (Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 31 копейка, в т.ч. НДС 18 %.»

Дополнительным соглашением от 30.07.2018 № 2 стороны согласовали внести следующие изменения в Договор: в пункте 2.1 Договора слова «1 612 384 (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 37 коп.» заменить словами «1 095 777 (Один миллион девяносто пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 19 копеек». Приложение № 1 к Договору принято в редакции Приложения  № 1 к Дополнительному соглашению.

Дополнительным соглашением от 31.08.2018 № 3 стороны согласовали выполнение дополнительных работ, стоимость Работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 366 026 (Триста шестьдесят шесть тысяч двадцать шесть) рублей 60 копеек, в т. ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ (Гарантийное удержание). Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по Договору. Оплата Работ производится в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 30 (тридцати) %, в т. ч. НДС 18 %, выплачивается Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения и предоставления счета на оплату. Целевое назначение аванса: на приобретение необходимых для выполнения Работ строительных материалов и оборудования. Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за выполненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ. Срок начала выполнения Работ: 02.09.2018. Работы должны быть выполнены в срок до 17.09.2018. Сроки выполнения этапов Работ установлены Графиком производства работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению). В случае задержки Генподрядчиком оплаты авансового платежа срок окончания работ может быть перенесен по соглашению сторон пропорционально  времени задержки оплаты.

Дополнительным соглашением от 31.08.2018 № 4 стороны согласовали выполнение дополнительных работ, Стоимость Работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 423 984 (Четыреста двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля, в т. ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ (Гарантийное удержание). Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по Договору. Оплата Работ производится в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 30 (тридцати) %, в т. ч. НДС 18 %, выплачивается Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения и предоставления счета на оплату. Целевое назначение аванса: на приобретение необходимых для выполнения Работ строительных материалов и оборудования. Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за выполненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ. Срок начала выполнения Работ: 02.09.2018. Срок окончания выполнения Работ: 17.09.2018, включая исполнение обязательств по исправлению всех недостатков и/или замечаний и окончательной сдаче результатов работ Генподрядчику в соответствии с Дополнительным соглашением. Сроки выполнения этапов Работ установлены Графиком производства работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению). В случае задержки Генподрядчиком оплаты авансового платежа срок окончания работ может быть перенесен по соглашению сторон пропорционально   времени задержки оплаты.

Дополнительным соглашением от 30.07.2018 № 5 стороны согласовали выполнение дополнительных работ, стоимость Работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 1 907 356 (Один миллион девятьсот семь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей, в т, ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ по Дополнительному соглашению (Гарантийное удержание). Порядок удержания, использования и возврата суммы Гарантийного удержания установлен Договором. 

Оплата Работ производится в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % от стоимости Работ в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), в т. ч. НДС 18 %, выплачивается Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения и предоставления счета на оплату. Целевое назначение аванса: на приобретение необходимых для выполнения Работ строительных материалов и оборудования. Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за выполненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в Соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ. Срок начала выполнения: 31.08.2018. Срок окончания выполнения работ: 10.09.2018, включая исполнение обязательств по сдаче результатов работ Генподрядчику в соответствии с Дополнительным соглашением и подписание Сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ по Дополнительному соглашению. Сроки выполнения этапов Работ установлены Графиком производства работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

Протоколом разногласий от 30.07.2018 к дополнительному соглашению № 5 стороны приняли редакцию ООО «Груз-Гарант» пункта 3, согласно которому в качестве обеспечения (гарантии) исполнения субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков работ генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10% от стоимости выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ по дополнительному соглашению (гарантийное удержание). Сумму гарантийного удержания генподрядчик вправе использовать для покрытия своих расходов на устранение своими силами и/или силами третьих лиц недостатков (дефектов, недоделок) в работах, выполненных субподрядчиком по договору, путем удержания в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомление субподрядчика о произведенном удержании, в случае, если недостатки (дефекты, недоделки) не устранены субподрядчиком в установленный генподрядчиком разумный срок. Указанная сумма гарантийного удержания выплачивается субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания сторонами акта завершения полного комплекса работ по дополнительному соглашению № 5 к договору субподряда № 28 КУ от 23 мая 2018 года.

Дополнительным соглашением от 05.09.2018 № 6 стороны согласовали выполнение дополнительных работ, Стоимость Работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 735 756 (Семьсот тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 59 копеек, в т. ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ (Гарантийное удержание). Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по Договору.

Оплата Работ производится в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % от стоимости Работ в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), в т. ч. НДС 18 %, выплачивается Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения и предоставления счета на оплату. Целевое Назначение аванса: на приобретение необходимых для выполнения Работ строительных материалов и оборудования. Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за выполненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ. Срок начала выполнения: 05.09.2018. Срок окончания выполнения работ: 25.09.2018, включая исполнение обязательств по сдаче результатов работ Генподрядчику и подписание Сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ по Дополнительному соглашению. Сроки выполнения этапов Работ установлены Графиком производства работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

Дополнительным соглашением от 05.09.2018 № 7 стороны согласовали выполнение дополнительных работ, стоимость Работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 600 997 (Шестьсот тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 57 копеек, в т. ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ (Гарантийное удержание). Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по Договору. 

Оплата Работ производится в следующем порядке: Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за выполненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ. Срок начала выполнения: 05.09.2018. Срок окончания выполнения работ: 01.10.2018, включая исполнение обязательств по сдаче результатов работ Генподрядчику и подписание Сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ по Дополнительному соглашению. Сроки выполнения этапов Работ установлены Графиком производства работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

Дополнительным соглашением от 08.10.2018 № 8 стороны согласовали выполнение дополнительных работ, стоимость Работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 450 468 (Четыреста пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ по Дополнительному соглашению (Гарантийное удержание). Сумму Гарантийного удержания Генподрядчик вправе использовать для покрытия своих расходов на устранение своими силами и/или силами третьих лиц недостатков (дефектов, недоделок) в Работах, выполненных Субподрядчиком по Договору, путем удержания в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Субподрядчика о произведенном удержании, в случае, если недостатки (дефекты, недоделки) не устранены Субподрядчиком в установленный Генподрядчиком разумный срок. Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по настоящему Дополнительному соглашению. Оплата Работ производится в следующем порядке: Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за вьшолненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ. Срок начала выполнения: 08.10.2018. Срок окончания выполнения работ: 26.10.2018, включая исполнение обязательств по сдаче результатов работ Генподрядчику и подписание Сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ по Дополнительному соглашению.

Дополнительным соглашением от 09.10.2018 № 9 стороны согласовали выполнение дополнительных работ, стоимость Работ по Дополнительному соглашению согласована Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), является твердой и составляет 80 703 (Восемьдесят тысяч семьсот три) рубля 81 копейка, в т. ч. НДС 18 %. В качестве обеспечения (гарантии) исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению возникших недостатков Работ, Генподрядчик удерживает денежные средства в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ по Дополнительному соглашению (Гарантийное удержание). Сумму Гарантийного удержания Генподрядчик вправе использовать для покрытия своих расходов на устранение своими силами и/или силами третьих лиц недостатков (дефектов, недоделок) в Работах, выполненных Субподрядчиком по Договору, путем удержания в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Субподрядчика о произведенном удержании, в случае, если недостатки (дефекты, недоделки) не устранены Субподрядчиком в установленный Генподрядчиком разумный срок. Указанная сумма Гарантийного удержания выплачивается Субподрядчику по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта завершения полного комплекса Работ по настоящему Дополнительному соглашению. 

Оплата Работ производится в следующем порядке: Окончательный расчет по Дополнительному соглашению за выполненные Работы, за вычетом суммы гарантийного удержания, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от позднейших из следующих дат: (а) даты подписания Генподрядчиком Акта завершения полного комплекса работ по Дополнительному соглашению, (б) предоставления Субподрядчиком оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета и счета-фактуры, (в) предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной документации на выполненный объем Работ. Срок начала выполнения: 09.10.2018. Срок окончания выполнения работ: 23.10.2018, включая исполнение обязательств по сдаче результатов работ Генподрядчику и подписание Сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ по Дополнительному соглашению.

Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что стоимость работ по каждому дополнительному соглашению была установлена в твердой форме,  однако  материал на выполнение  порученных работ предоставлялся генподрядчиком (являлся давальческим), в связи с чем объем изменялся,   расчет   по   каждому   конкретному   дополнительному   соглашению корректировался в соответствии с выполненным объемом работ, что отражено в актах выполненных работ по каждому дополнительному соглашению. Окончательный размер стоимости работ не превышал установленные договором и соглашениями суммы.

Генподрядчиком подписаны Акты о приеме выполненных работ по всем соглашениям, что свидетельствует о надлежащем качестве выполненных Субподрядчиком работ и отсутствием недостатков и дефектов в них. Как пояснили стороны, объект введен в эксплуатацию в декабре 2018.

В настоящий момент все строительные объекты, выполненные истцом по договору субподряда и дополнительным соглашениям, введены в эксплуатацию, что свидетельствует об их потребительской ценности.

Истец указывает, что Субподрядчик  выполнил предусмотренные договором и дополнительными соглашениями работы на сумму, а Генподрядчик их принял в полном объеме, но оплатил не полностью (с учетом гарантийных удержаний и того, что с момента подписания последнего акта приема выполненных работ прошёл 1 месяц, а недостатки и дефекты работ не выявлены).

Размер основного долга ответчика составляет 3 448 270 руб. 69 коп.

Согласно пункту 12.1 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Истец направил ответчику претензию об уплате задолженности, однако  денежные средства не поступили, что послужило основанием к обращению в арбитражный суд.

Ответчик обоснованными требования истца полагает не в полном объеме, указывает, что согласно п. 12.11 Договора Генподрядчик вправе удержать с Субподрядчика компенсацию ущерба и/или платежа, произведенного третьим лицам, а также  пени и иные выплаты/расходы по Договору, из любого ближайшего платежа. Причитающегося Субподрядчику по Договору, в сумме начисленной и удержанной неустойки путем зачета в соответствии со статьями 407 и 410 ГК РФ. Также п.12.13 Договора Стороны определили, что размер штрафных санкций, установленных Договором в качестве мер ответственности, не является завышенным, и определен исходя из взаимных интересов Сторон по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по Договору.

Кроме того, согласно п. 1.3 Договора «Субподрядчик подтверждает, что на дату подписания Договора им получена от Генподрядчика необходимая для выполнения Работ проектная (рабочая) документация, а также строительная площадка для производства работ». 

Исходя из пояснений ответчика, ООО «Груз-Гарант» выполняло комплекс работ по устройству пристрой зоны загрузки в осях А14-16 на объекте: Реконструкция ТРЦ «Гиперсити» (далее-Работы). Первоначально планировалось две зоны загрузки. В июне 2018 года Заказчиком было принято решение уменьшить зону загрузки с двух до одной. В этом же месяце была утверждена измененная проектная документация (Приложение №1). Не передавать Субподрядчику проектную документацию у Генподрядчика оснований не было. Наоборот, Генподрядчик заинтересован в передаче измененной проектной документации. За передачу проектной документации отвечал руководитель проекта. Информации о том, каким образом была передана проектная документация, не имеется, поскольку объект введен в эксплуатацию в декабре 2018 года и руководитель проекта уволился.

В силу п. 12.5 Договора Субподрядчик уплачивает по требованию Генподрядчика за нарушение сроков сдачи Субподрядчиком Генподрядчику Работ, неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки. В случае отказа субподрядчика добровольно оплатить сумму пени генподрядчик имеет право списать соответствующие денежные средства с любого платежа, подлежащего перечислению генподрядчиком субподрядчику, в одностороннем внесудебном порядке.

Ответчик поясняет следующее:

- по дополнительному соглашению № 1.1 от 08.06.2018: срок выполнения работ установлен п.5 дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2018 – 20 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения; поскольку работы сданы по актам КС-2, КС-3 от 31.08.2018,  за период с 11.07.2018 по 31.08.2018 начислена неустойка. Письмо ООО «Груз-Гарант» от 10.07.2018 направлено после того, как истек срок сдачи работ.  В соответствии с п.4.8 Договора Субподрядчик обязан уведомить письменно Генподрядчика о таком нарушении обязательств со стороны Генподрядчика в течение 2 дней с даты наступления соответствующих обстоятельств. При неуведомлении Субподрядчиком Генерального подрядчика в указанные сроки, Субподрядчик лишается права требовать переноса срока по такому основанию.»;

- по дополнительному соглашению № 2 от 30.06.2018 уменьшились объемы работ, срок выполнения работ установлен п.4.2 Договора: 45 рабочих дней с даты подписания договора, работы сданы по актам КС-2, КС-3 – 01.09.2018, начислена неустойка;

- по дополнительному соглашению № 3 от 31.08.2018: стоимость работ 366 026 руб. 60 коп., сроки выполнения работ установлены п.5 указанного соглашения, срок начала выполнения работ 02.09.2018, работы должны были быть выполнены до 17.09.2018, но   сданы по актам КС-2, КС-3 – 30.09.2018, начислены пени;

- по дополнительному соглашению № 4 от 31.08.2018: стоимость работ 423 984руб., срок выполнения работ установлен п.5 указанного соглашения, срок начала выполнения работ 02.09.2018, работы должны были быть выполнены до 17.09.2018, но  сданы по актам КС-2, КС-3 – 30.09.2018 и  05.12.2018, начислены пени;

- по дополнительному соглашению № 5 от 30.07.2018: стоимость работ 1 907 356 руб., срок выполнения работ установлен п.5 указанного соглашения, срок начала выполнения работ 02.09.2018, работы должны были быть выполнены до 11.09.2018, фактически работы сданы по актам КС-2, КС-3 – 30.09.2018, начислены пени;

- по дополнительному соглашению № 6 от 05.09.2018: срок выполнения работ установлен п.5 указанного соглашения, срок начала выполнения работ 05.09.2018, работы должны были быть выполнены до 25.09.2018, но фактически сданы по актам от 31.10.2018, от 30.11.2018, от 31.12.2018, поэтому начислены пени;

- по дополнительному соглашению № 7 от 05.09.2018: стоимость работ 600 997,57руб., срок выполнения работ установлен п.5 указанного соглашения, срок начала выполнения работ 05.09.2018, работы должны были быть выполнены до 01.10.2018, фактически работы сданы по актам КС-2, КС-3 – 31.10.2018, поэтому начислены пени;

- по дополнительному соглашению № 8 от 08.10.2018: срок выполнения работ установлен п.5 указанного соглашения, срок начала выполнения работ 08.10.2018, работы должны были быть выполнены до 27.10.2018, фактически работы сданы по актам КС-2, КС-3 – 31.10.2018, поэтому начислены пени.

Таким образом, считает ответчик, в силу пунктов 12.4 и 12.11 Договора сумма основного долга подлежит снижению на сумму пени 185 412,98 руб. согласно представленному расчету (т.3, л.д.88-89). Данную сумму ответчик подтвердил и в судебных заседаниях.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств - выполнение работ и передача их результата заказчику. В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Сторонами подписаны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), объект сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Суд исходит из того обстоятельства, что стороны согласовали срок выполнения работ и их цену. При этом обычно при установлении подрядных отношений стороны исходят из того, что потребность заказчика в наиболее быстром выполнении работ повышает цену этих работ. Таким образом, при вступлении в договор общество не имело разумных ожиданий относительно того, что цена сделки осталась бы неизменной и в том случае, если бы заказчика устроил более продолжительный срок выполнения работ.

Более того, в соответствии со статьями 702, 708, 709 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора (далее - основные обязательства): обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 Гражданского кодекса).

Из встречного характера указанных основных обязательств и положений пунктов 1 и 2 статьи 328, а также статьи 393 Гражданского кодекса, согласно которым при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должник обязан возместить причиненные кредитору убытки, следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом.

Следовательно, просрочка подрядчика в выполнении работ не позволяет признать его лицом, которому действительно причитаются денежные средства в размере всей договорной цены.

Поскольку согласованные в договоре подряда предоставления сторон презюмируются как равные (эквивалентные), просрочка подрядчика в выполнении работ порождает необходимость перерасчета итогового платежа заказчика путем уменьшения цены договора на сумму убытков заказчика, возникших вследствие просрочки. Подобное сальдирование происходит в силу встречного характера основных обязательств заказчика и подрядчика. Соответствующая правовая позиция содержится в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075 по делу № А40-151644/2016.

Таким образом, суд соглашается с доводом ответчика о наличии установленного договором права на одностороннее внесудебное удержание суммы неустойки.

Исходя из этого, с учетом уточненного расчета ответчика, сумма основного долга подлежит уменьшению на 185 412 руб. 98 коп.

Истец не согласен с доводом ответчика о нарушении сроков сдачи работ со стороны субподрядчика и наличии права на неустойку, поскольку материал предоставлялся генподрядчиком, объем работ и срок их выполнения изменялся в зависимости от строительной готовности объекта и срока предоставления строительных материалов.

Суду не представлены доказательства в подтверждение того, что заказчик уклонялся от приемки работ, а также писем о приостановлении работ исключительно в связи с отсутствием материалов для производства работ или отсутствием необходимой технической документации. Из представленных в материалы дела писем (т. 3 л.д. 22-24) не усматривается наличие объективных обстоятельств, препятствующих производству работ, и не подтверждается вина ответчика, нет также доказательств приостановки работ истцом в связи с невыплатой аванса ответчиком.

Истец пояснил, что соответствующих локальных документов не издавалось.

В соответствии с абзацами 4 и 5 пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Истец, ссылаясь на просрочку исполнения своих обязательств по вине ответчика, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств в обусловленный договором срок, и доказательств, свидетельствующих об освобождении его от ответственности за просрочку выполнения работ, равно как и доказательств того, что нарушение срока выполнения работ по договору имело место именно по вине ответчика.

Довод истца о том, что выполнение работ в сроки, отличные от условий контракта, произошло по вине ответчика в связи с просрочкой им предварительной оплаты, судом отклоняется.

В силу пункта 2 статьи 487 ГК РФ в случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 ГК РФ.

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению (абзац второй пункта 2 статьи 328 ГК РФ).

Продавец может приостановить передачу товара вследствие неисполнения встречного обязательства в полном объеме, только если он потребовал его исполнить и направил в адрес покупателя уведомление о приостановлении исполнения договора, сославшись в его обоснование на неисполнение условий договора.

Истец в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ не представил в материалы дела документов, свидетельствующих о выставлении в адрес ответчика требования об исполнении договора и уведомления о приостановлении исполнения договора до исполнения встречного исполнения ответчиком договора в полном объеме.

Таким образом, невнесение истцом предоплаты по договору не могло явиться причиной неисполнения ответчиком своих обязательств, поскольку последний не требовал исполнения встречного обеспечения и не уведомлял истца о приостановлении исполнения договора.

Каких-либо дополнений или изменений по переносу сроков передачи товара сторонами также не принималось. 

Данные выводы основаны на судебной практике (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.08.2019 N Ф06-50803/2019 по делу N А65-34175/2018).

Поскольку ответчик выполненные истцом работы в полном объеме не оплатил,  исковые требования следует удовлетворить частично с учетом подлежащей удержанию в одностороннем порядке неустойки.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч.1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет пени в общем размере 185 412 руб. 98 коп. судом проверен и признан не нарушающим прав истца. Истец контррасчет суммы пени не представил, расчет ответчика не оспорил, ходатайства о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ не заявил.

В то же время суд считает расчет неустойки, представленный ответчиком, неверным в части, поскольку в данном случае расчет неустойки от предварительной сметной стоимости по объекту, а не от стоимости фактически согласованных и выполненных работ не соответствует условиям договора и целям начисления неустойки, так как не учитывает фактический размер нарушенного обязательства (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.02.2019 N Ф04-6699/2018 по делу N А70-8391/2018).

Кроме того, начисление неустойки по дополнительному соглашению от 31.08.2018 № 3 исходя из сдачи работ 30.09.2018 неправомерно, поскольку в материалах дела содержатся акт КС-2 по данному соглашению от более ранней даты (04.09.2018), который никем не оспорен. Ответчик не смог пояснить наличие двух КС-2 по данному соглашению от двух различных дат.

Исходя из этого, суд приходит к выводу об отсутствии просрочки сдачи работ по данному дополнительному соглашению.

По дополнительным соглашениям № 4, №7 ответчиком рассчитана неустойка исходя из согласованной сторонами  стоимости работ, тогда как фактически работы выполнены на меньшую сумму, что сторонами не оспаривается. Поскольку работы выполнены истцом на меньшую сумму, чем согласовано сторонами в договоре, и на день рассмотрения спора работы истцом завершены (объект сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года), выполнение каких-либо еще работ по договору не планируется, оснований для начисления неустойки на сумму, указанную в дополнительном соглашении, не имеется. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.08.2019 N Ф04-2603/2019 по делу N А45-34929/2018.

Возражая против удовлетворения исковых требований в части выплаты гарантийного удержания, ответчик указывает на отсутствие подписанного акта завершения полного комплекса работ по договору.

Вместе с тем, из представленных в материалы дела документов следует, что работы выполнены в полном объеме, что подтверждено актами по форме КС-2, КС-№, подписанными сторонами без замечаний. Истец является субподрядчиком, который выполнил строительно-монтажные работы в соответствии с условиями договора субподряда. Документами для расчетов между генподрядчиком и субподрядчиком являются акты по форме КС-2, КС-3.

Следовательно выполненные работы подлежат оплате со стороны генподрядчика -ответчика по настоящему делу.

В статьях 711 и 746 ГК РФ установлено, что основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики N 2 (2017), условие договора субподряда о том, что срок оплаты выполненных субподрядчиком строительных работ исчисляется с момента сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику по договору или с момента получения генеральным подрядчиком оплаты от заказчика само по себе не противоречит положениям статьи 190, пункта 1 статьи 314, статей 327.1, 711, 746 Кодекса.

При этом следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 23 Постановления N 54 о защите прав стороны обязательства, начало течения срока исполнения которого обусловлено наступлением определенных обстоятельств, предусмотренных договором.

Согласно пункту 23 указанного постановления по смыслу пункта 1 статьи 314, статьи 327.1 Кодекса срок исполнения обязательства может исчисляться, в том числе, с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 Кодекса). Если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой наступление или не наступление этого обстоятельства невыгодно, то по требованию добросовестной стороны это обстоятельство может быть признано соответственно наступившим или не наступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 Кодекса).

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательства, подтверждающие, что генподрядчиком в рамках рассматриваемых подрядных отношений предпринимались меры по сдаче работ заказчику, а также, что заказчик отказался от принятия выполненных работ.

Кроме того, суд учитывает, что акты выполненных работ по договору подписаны ответчиком до 31.12.2018, то есть, более чем за 12 месяцев до рассмотрения настоящего иска. Исходя из этого, истец имеет право и на выплату гарантийного удержания. 

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитывая их отдельно для основного долга за вычетом гарантийного удержания и для гарантийного удержания. 

Согласно ч.1 ст.395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Суд, ознакомившись с расчетом процентов, представленным истцом, полагает, что в этой части исковое требований также подлежит частичному удовлетворению с учетом необходимости вычитания при расчете процентов из суммы основного долга неустойки за просрочку сдачи выполненных работ с учетом указанных выше ошибок, допущенных ответчиком при расчете пени по дополнительным соглашениям №№3, 4, 7.

Суд, самостоятельно осуществив расчет, определил общую сумму подлежащих взысканию процентов в 287 904 руб. 30 коп.

При таких обстоятельствах исковое заявление следует удовлетворить частично.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ следует отнести на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Кроме того, истец просит взыскать 40 000 рублей судебных расходов, уплаченных за подачу искового заявления. В материалы дела представлены договор на оказание юридических услуг от 04.02.2019 и расписка ФИО1 от 04.02.2019 на сумму 40000 рублей, расходный кассовый ордер от 04.02.2019 № 17 на указанную сумму.

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы по оплате услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в суде.

Пунктом 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу ч. 2 ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, не разрешенному при рассмотрении дела, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

Согласно ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Ответчик заявил о чрезмерности взыскиваемых судебных расходов.

Оценив объем оказанных юридических услуг и их стоимость с точки зрения разумности по указанным выше критериям, суд считает, что предъявленная сумма судебных расходов не соответствует средним расценкам в регионе, разумна и обоснованна в размере 15 000 рублей, но учитывая частичное удовлетворение иска расходы подлежат взысканию в размере 14 203,50 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДАРС – СТРОИТЕЛЬСТВО» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗ-ГАРАНТ» 3 262 857 руб. 71 коп.- основной долг, 287 904 руб. 30 коп.- проценты, 14 203 руб. 50 коп.- расходы на оплату услуг представителя.».;

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДАРС – СТРОИТЕЛЬСТВО» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 39533 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗ-ГАРАНТ» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 2217 руб.».

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения путем подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                       О.А. Слепенкова