Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-12857/2022

05 августа 2022 г.

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения вынесена 04 августа 2022 г.

Решение в полном объеме изготовлено 05 августа 2022 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Малыхина В.В., при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: 

<

...>, каб. 613, дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрогресс», ОГРН 

<

***>,  г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «УралПромСервис», ОГРН 

<

***>, г. Магнитогорск, о взыскании 1 246 236 руб. 74 коп.,

при участии в предварительном судебном заседании:

от истца: представитель ФИО2, паспорт, диплом о высшем юридическом образовании, доверенность от 21.09.2021,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрогресс» (далее – истец, ООО «ЭнергоПрогресс»), 22.04.2022 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «УралПромСервис» (далее – ответчик, ООО «УПС»), о взыскании основного долга по договорам подряда № 46/20/1-СВ от 15.01.2021, № 48/20/1-СВ от 15.01.2021, № 49/20-СВ от 09.07.2020 в размере 1 178 062 руб. 11 коп., неустойки в размере 25 412 руб. 86 коп., процентов за период с 12.05.2021 по 21.03.2022 в размере 42 761 руб. 77 коп., процентов за период с 22.03.2022 по день фактического исполнения обязательства по оплате суммы основного долга.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на статьи 309, 310, 702, 395, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и на то обстоятельство, что ответчик, оплату выполненных работ по договорам подряда № 46/20/1-СВ от 15.01.2021, № 48/20/1-СВ от 15.01.2021, № 49/20-СВ от 09.07.2020 не исполнил надлежащим образом. 

Определением суда от 29.04.2022 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 09.06.2022 (л.д. 101-102).

Определением суда от 09.06.2022 судебное разбирательство отложено до 02.08.2022 (л.д. 109-110).

В судебном заседании 02.08.2022, в соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), объявлялся перерыв до 09 час. 25 мин. 04.08.2022. Сведения об объявленном перерыве были размещены на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

Ответчик об арбитражном процессе по делу извещен надлежащим образом в соответствии с ч. 4 ст. 123 АПК РФ (л.д. 103-104, л.д.106).

В силу пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лицо считается извещенным надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

В силу части 4 статьи 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого филиала или представительства. Адрес юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 09.06.2022, имеющейся в материалах дела, местом нахождения ООО «УПС» является адрес: 455021, 

<

...>, что соответствует адресу ответчика, указанному в исковом заявлении и в договоре. 

Суд направлял ответчику копии определений о рассмотрении заявления в порядке упрощенного производства от 29.04.2022, определения об отложении судебного разбирательства от 09.06.2022, по адресу: 455021, 

<

...>.

С указанного адреса органом почтовой связи возращены почтовые конверты с отметкой «истек срок хранения» (л.д. 104, л.д. 106).

Процедура доставки почтовых отправлений (включая заказные письма разряда «Судебное») прописана в Правилах оказания услуг почтовой связи, утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 (далее - Правила), а также в Порядке приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений (редакция № 2), утв. Приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п (далее - Порядок).

Почтовые отправления разряда «Судебное» при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней (п. 11.1 № 98-Постановлением).

При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда «судебное» день поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством РФ, не учитываются (п. 34 Правил, абз. 5 п. 11.1 Порядка).

Помимо сведений о направлении ответчику извещений на почтовом конверте, арбитражный суд принимает во внимание аналогичную информацию, размещенную на официальном сайте ФГУП «Почта России» (https://www.pochta.ru/).

В рассматриваемом случае порядок вручения почтовых отправлений был соблюден (л.д. 105).

Добросовестность организации почтовой связи по принятию всех неоднократных мер, необходимых для вручения судебного акта, предполагается, пока заинтересованным адресатом не доказано иное. Как следует из отчета об отслеживании отправлений в адрес ответчика (л.д. 105), почтовое отправление с определением об отложении судебного разбирательства от 09.06.2022 прибыло к месту вручения 02.07.2022, отправителю выслано отправление 12.07.2022, (7 дней письма находились в почтовом отделении), то есть с соблюдением сроков, указанных в Правилах. 

Таким образом, если участник дела в течение срока хранения заказной корреспонденции, не явился без уважительных причин за получением копии судебного акта по приглашению органа почтовой связи, то арбитражный суд вправе признать такое лицо извещенным надлежащим образом о месте и времени судебного заседания на основании пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ.

Кроме того, арбитражный суд отмечает, что согласно пункту 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) либо по адресу, указанному самим юридическим лицом, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя; сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу. Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения (пункт 67 постановления № 25). Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.). В данном случае ответчик не обеспечил получение почтовой корреспонденции по своему адресу в установленном законом порядке.

Сведениями о нахождении (месте жительства) ответчика по иным адресам, арбитражный суд не располагает.

Кроме того, определения суда от 29.04.2022, от 09.06.2022 размещены на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 30.04.2022, 10.06.2022, то есть за пятнадцать рабочих дней до момента проведения судебного заседания, что соответствует абзацу второму ч. 1 ст. 121 АПК РФ.

На основании изложенного, при рассмотрении вопроса о надлежащем извещении ответчика, суд пришел к выводу о надлежащем извещение ООО «УПС» о судебном разбирательстве по настоящему делу.

Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчиком не представлен. В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в нем доказательствам без каких-либо возражений ответчика. 

При этом в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, по основаниям, указанным в исковом заявлении, ответчик представителя в судебное заседание не направил, о дате месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьями 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 09.07.2020 между обществом с ограниченной ответственностью «УралПромСервис» (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрогресс» (далее - подрядчик) подписан договор подряда №  49/20-СВ (далее – договор, л.д. 9-12), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ (далее - работы) на объекте: «Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ» входящей в состав внутренних сетей электроснабжения, расположенной по адресу: 

<

...> примерно в 4385м по направлению на восток от ориентира, включающих в себя следующие виды работ:

- демонтаж существующей линии;

- установка железобетонных анкерных опор;

- установка железобетонных промежуточных опор;

- подвеска проводов по опорам;

- монтаж контура заземления опор;

- монтаж светильников с кронштейнами на опорах;

- подземная прокладка кабеля;

- монтаж шкафов с оборудованием;

- пуско-наладочные работы.

Согласно п. 1.2 договора, работы по настоящему договору выполняются на основании локальных сметных расчетов, которые определяют объем, характер и стоимость работ, выполненных по договору. Подрядчик обязуется сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результаты работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, выполняются силами подрядчика в соответствии с рабочей документацией на вышеуказанные объекты, выполненной ООО «ЭнергоПрогресс» (далее - «рабочая документация»). Состав и содержание проектной документации на выполнение работ: шифр 17-05.20-ЭС (п. 1.3 договора).

Рабочая документация, указанная в п. 1.2 договора, определяет объём, характер выполнения работ (п. 1.4 договора).

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы согласно условиям настоящего договора (п. 1.5 договора)

Согласно п. 2.1 договора, работы по договору выполняются в следующие сроки:

- дата начала работ: с момента подписания настоящего договора;

- дата окончания работ: «31» декабря 2020 г.

Ориентировочная стоимость всех работ по настоящему Договору, включая используемые материалы и оборудование, составляет 1 600 000 руб., в том числе НДС 20%.

Указанная стоимость включает в себя все расходы подрядчика, необходимые для надлежащего выполнения обязательств, в том числе стоимость налогов, материалов, оборудования, доставки на объект, погрузо-разгрузочных работ, инфляцию, непредвиденные расходы, любые иные затраты (п. 3.1 договора).

Цена выполнения отдельных видов работ определяется сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору и в согласованных сторонами локальных сметных расчётах, являющихся приложениями к указанным дополнительным соглашениям (п. 1.2 Договора). Стоимость материалов и оборудования выносится в смете в конце в текущих ценах, без НДС с предоставлением документов, подтверждающих их стоимость (п. 3.2 договора).

Согласно п. 3.3 договора, стоимость материалов включена в стоимость работ по договору. По инициативе заказчика материалы, предоставленные подрядчиком, могут быть заменены на давальческие материалы. В случае применения подрядчиком давальческих материалов сторонами заключаются дополнительные соглашения. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Количество, цена, качество, упаковка, ассортимент и условия их упаковки и хранения должны быть согласованы с заказчиком. Стоимость материалов, используемых на условиях, не согласованных с заказчиком, в актах выполненных работ не учитывается и заказчиком не оплачивается.

Подрядчик согласовывает все необходимые замены материалов и оборудования с заказчиком. Согласование оформляется протоколом (п. 3.4 договора).

При возникновении дополнительных объемов работ или работ, не учтенных в проектно-сметной документации, работы оплачиваются по дополнительным сметам, согласованным обеими сторонами путём оформления дополнительных соглашений (п. 3.5 договора).

Согласно п. 4.1 договора, оплата по настоящему договору производиться в следующем порядке:

- в течение 35 рабочих дней со дня вступления договора в силу Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ, что составляет 480 000  рублей 00 коп., в том числе НДС (20%). Погашение авансовых платежей производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся подрядчику за фактически выполненные работы пропорционально объему выполненных работ;

- последующая ежемесячная оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и принятия заказчиком счета-фактуры на выполненные работы. Основанием для производства расчетов являются подписанный обеими сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц, справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Полный окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) банковских дней после окончания выполнения работы со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и принятия заказчиком счёта-фактуры на выполненные работы.

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг, выполняемых подрядчиком и 3% от стоимости материалов, используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором с учетом НДС, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п. 4.2 договора).

Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный подрядчиком расчетный счет (п. 4.3 договора).

Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика (п. 4.4 договора).

Согласно п. 4.6 договора, заказчик вправе удержать оплату выполненных подрядчиком работ при следующих условиях:

-  не устранение выявленных ранее дефектов в работе, предъявленной к оплате или уже оплаченной;

-  несоблюдение срока выполнения работ.

Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования (п. 6.1 договора).

О дате сдачи-приемки скрытых работ подрядчик уведомляет заказчика не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней письмом, направляемым по электронной почте. Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны подрядчика, то по требованию заказчика подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки заказчика в указанный в уведомлении срок подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производится за счет заказчика (п. 6.2 договора).

Согласно п. 6.3 договора, по завершении работ по сборке и монтажу металлоконструкций подрядчик представляет заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также отчет об использовании давальческих материалов. В течение 10 (десяти) рабочих дней заказчик принимает предъявленные работы и при отсутствии замечаний подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо дает мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ и подписания акта, справки, а также возражения к отчету об использовании давальческих материалов.

Недостатки, обнаруженные заказчиком при приемке работ, должны быть отражены в письменной форме. Недостатки устраняются подрядчиком за свой счет в срок, согласованный сторонами (п. 6.4 договора).

В случае если недостатки не будут устранены в согласованные сроки (или в случае не достижения договоренности о сроке устранения недостатков подрядчиком), заказчик вправе привлечь третьих лиц для их устранения. Расходы заказчика по устранению недостатков возмещаются подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предъявления заказчиком соответствующих требований (п. 6.5 договора).

Риск случайной гибели результата выполненных подрядчиком работ по сборке и монтажу металлоконструкций до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) несет подрядчик (п. 6.6 договора).

Подрядчик предоставляет заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), акты освидетельствования скрытых работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также отчет об использовании давальческих материалов (п. 6.7 договора).

За нарушение сроков оплаты подрядчик вправе требовать с заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы подлежащей оплате (п. 9.2 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2020 к вышеуказанному договору (л.д. 18), стороны во исполнение пунктов 1.2 и 3.2 договора пришли к соглашению включить в договор следующие локально-сметные расчеты:

- № ВК01.Р/1_ЭП;

- № ВК01.Р/2_ЭП;

- № ВК01.Р/2.1_ЭП;

- № ВК01 .Р/3_ЭП, в редакции приложений №1 - 4 к настоящему дополнительному соглашению (п.1. дополнительного соглашения).

Согласно п. 2 дополнительного соглашения, общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору в соответствии с локальными сметными расчетами (приложения № 1-4), составляет 1 771 978 рублей 58 коп, в том числе НДС 20% - 295 329 рублей 76 коп.

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг выполняемых подрядчиком - 21 089 рублей 24 коп. с учетом НДС 20%, и 3% от стоимости материалов используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором - 40 505  рублей 81 коп. с учетом НДС 20%, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п.3. дополнительного соглашения).

Согласно п.3. дополнительного соглашения, стороны пришли к соглашению п. 2.1 изложить в следующей редакции: «- дата начала выполнения работ-09.07.2020, дата окончания выполнения работ до 15 апреля 2021».

Условия настоящего договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать в прежней редакции (п. 5. дополнительного соглашения).

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору (п. 6. дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 2 от 14.04.2021 к вышеуказанному договору (л.д. 33), стороны во исполнение пунктов 1.2 и 3.2 договора пришли к соглашению включить в договор дополнительно локально-сметный расчет:

- №ВК01.Р/2.1/1_ЭП, в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению (п.1. дополнительного соглашения).

Согласно п. 2 дополнительного соглашения, стоимость работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению № 2 в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1), составляет 113 074 рубля 13 коп, в том числе НДС 20% - 18 845 рублей 69 коп.

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг выполняемых подрядчиком - 1 593  рубля 00 коп. с учетом НДС 20%, и 3% от стоимости материалов используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором - 2 436 рублей 43 коп. с учетом НДС 20%, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п.3 дополнительного соглашения).

Пунктом 4 дополнительного соглашения, стороны пришли к соглашению п. 2.1 изложить в следующей редакции: «- дата начала выполнения работ- 14.04.2021, дата окончания выполнения работ до 02.06.2021 г.».

Условия настоящего договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать в прежней редакции (п.5. дополнительного соглашения).

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору (п.6. дополнительного соглашения).

Объем и перечень работ подтверждают локальные сметные расчеты № ВК01.Р/1_ЭП на демонтаж ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ инв. № 00-000145. ЛЭП-0,4 кВ на сумму 21 223 руб. 51 коп., № ВК01.Р/2_ЭП на электромонтажные работы по выносу трассы (реконструкция) ЛЭП-0,4 кВ. Перенос видеонаблюдения с заменой щита. Система охранного видеонаблюдения ВДСК 96. Инв. № 00-000096 м. на сумму 1 108 543 руб. 84 коп., № ВК01.Р/3_ЭП на ПНР по реконструкции воздушной линии электропередач 0,4 кВ. Перенос видеонаблюдения с заменой щита. Система охранного видеонаблюдения ВДСК 96. Инв. № 00-000096. на сумму 21 478 руб. 69 коп., № ВК01.Р/2.1_ЭП на дополнительные электромонтажные работы по выносу трассы (реконструкция). ЛЭП-0,4 кВ. на сумму 620 732 руб. 54 коп., № ВК01.Р/2.1/1_ЭП на дополнительные электромонтажные работы по выносу трассы (реконструкция). ЛЭП-0,4 кВ. на сумму 113 074 руб. 13 коп. (л.д. 18 оборот-32, 33 оборот-35).

Работы, предусмотренные договором подряда № 49/20-СВ от 09.07.2020, выполнены истцом в полном объёме и с надлежащим качеством, о чем свидетельствуют:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 165-1 от 31.03.2021, в т.ч. НДС, на сумму 817 508 руб. 60 коп. и акт КС-2 № 165-1 о приёмке выполненных работ от 31.03.2021 в т.ч. НДС, на сумму 817 508 руб. 60 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 165.1-1 от 31.03.2021, в т.ч. НДС, на сумму 79 265 руб. 73 коп. и акт КС-2 № 165.1-1 о приёмке выполненных работ от 31.03.2021 в т.ч. НДС, на сумму 79 265 руб. 73 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 197-1 от 31.03.2021, в т.ч. НДС, на сумму 13 490 руб. 54коп. и акт КС-2 № 197-1 о приёмке выполненных работ от 31.03.2021 в т.ч. НДС, на сумму 13 490 руб. 54 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 197.1-1 от 31.03.2021, в т.ч. НДС, на сумму 1 060 руб. 60 коп. и акт КС-2 № 197.1-1 о приёмке выполненных работ от 31.03.2021 в т.ч. НДС, на сумму 1 060 руб. 60 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 040-21.04 от 30.04.2021, в т.ч. НДС, на сумму 113 074 руб. 13 коп. и акт КС-2 № 040-21.04 о приёмке выполненных работ от 30.04.2021 в т.ч. НДС, на сумму 113 074 руб. 13 коп. 

Всего 1 024 399 руб. 60 коп.

По факту оказания услуг генподряда по договору № 49/20-СВ сторонами подписаны соответствующие счет-фактуры для оплаты № 765 от 31.03.2021 на сумму 28 168 руб. 08 коп., № 766 от 31.03.2021 на сумму 3 217 руб. 36 коп., № 769 от 31.03.2021 на сумму 674 руб. 53 коп., № 770 от 31.03.2021 на сумму 53 руб. 03 коп., № 858 от 30.04.2021 на сумму 4 029 руб. 43 коп., всего на общую сумму 36 142 руб. 43 коп. (л.д. 48-50), по которым происходит генподрядное удержание 3% от стоимости материалов и 5 % от стоимости работ.

Указанные документы подписаны сторонами без замечаний.

ООО «УТС» оплатило выполненные работы в сумме 480 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 1555 от 27.07.2020 на сумму 480 000 руб. 00 коп. (л.д. 97).

Таким образом, заказчиком не оплачены работы по договор подряда № 49/20-СВ от 09.07.2020 в размере 508 257 руб. 17 коп. (1 024 399,60 – 36 142,43 – 480 000).

Как следует из материалов дела, 15.01.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «УралПромСервис» (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрогресс» (далее - подрядчик) подписан договор подряда №  46/20/1-СВ (далее – договор, л.д. 51-53), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: «Линия по производству комовой извести. Инфраструктура. Общежитие», расположенном по адресу: 

<

...> примерно в 4385м по направлению на восток от ориентира, включающих в себя следующие виды:

- внутренние инженерные сети (электромонтажные работы, электроосвещение);

- наружные сети и сооружения (электроснабжение и освещение, временное электроснабжение) (п. 1.1 договора).

Уточненный перечень видов работ, стоимость и сроки выполнения отдельных видов работ определяются Сторонами в дополнительных соглашениях и локальных-сметных расчетах, являющихся приложениями к настоящему Договору. Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, в том числе принять результаты Работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену (п. 1.2 договора).

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы согласно условиям настоящего договора (п. 1.3 договора)

Подрядчик подтверждает, что он располагает всеми необходимыми юридическими действительными правами и полномочиями, разрешениями и документами для выполнения функций подрядчика по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ (п. 1.4 договора).

Согласно п. 2.1 договора, работы по договору выполняются в следующие сроки:

- дата начала работ: 15 января 2021;

- дата окончания работ: 28 февраля 2021 г.

Подрядчик вправе с письменного разрешения заказчика досрочно выполнить работы по настоящему договору, а заказчик обязан принять их и оплатить в порядке, установленном условиями настоящего договора (п. 2.2 договора).

Ориентировочная стоимость всех работ по настоящем)' Договору, включая используемые материалы и оборудование составляет 3 200 000 рублей, в том числе НДС 20%.

Указанная стоимость включает в себя все расходы подрядчика, необходимые для надлежащего выполнения обязательств, в том числе стоимость налогов, материалов, оборудования, доставки на объект, погрузо-разгрузочных работ, инфляцию, непредвиденные расходы, любые иные затраты (п. 3.1 договора).

При возникновении дополнительных объемов работ, работы оплачиваются по дополнительным сметам, согласованным обеими сторонами путем оформления дополнительных соглашений (п. 3.2 договора).

Согласно п. 4.1 договора, оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 25 банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и принятия заказчиком счета-фактуры на выполненные работы, с учетом погашения суммы выплаченного аванса. Основанием для производства расчетов являются подписанный обеими сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц, справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также отчет подрядчика об использовании давальческих материалов.

Стороны вправе предусмотреть авансирование на основании предоставленных подрядчиком счетов на оплату. Погашение авансовых платежей производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся подрядчику за фактически выполненные работы (п. 4.2 договора).

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг, выполняемых подрядчиком и 3% от стоимости материалов, используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором с учетом НДС, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п. 4.3 договора).

Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный подрядчиком расчетный счет (п. 4.4 договора).

Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика (п. 4.5 договора).

Согласно п. 4.6 договора, заказчик вправе удержать оплату выполненных подрядчиком работ при следующих условиях:

-  не устранение выявленных ранее дефектов в работе, предъявленной к оплате или уже оплаченной;

-  несоблюдение срока выполнения работ.

Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования (п. 6.1 договора).

О дате сдачи-приемки скрытых работ подрядчик уведомляет заказчика не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней письмом, направляемым по электронной почте. Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны подрядчика, то по требованию заказчика подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки заказчика в указанный в уведомлении срок подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производится за счет заказчика (п. 6.2 договора).

Согласно п. 6.3 договора, по завершении работ по сборке и монтажу металлоконструкций подрядчик представляет заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также отчет об использовании давальческих материалов. В течение 10 (десяти) рабочих дней заказчик принимает предъявленные работы и при отсутствии замечаний подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо дает мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ и подписания акта, справки, а также возражения к отчету об использовании давальческих материалов.

Недостатки, обнаруженные заказчиком при приемке работ, должны быть отражены в письменной форме. Недостатки устраняются подрядчиком за свой счет в срок, согласованный сторонами (п. 6.4 договора).

Протоколом разногласий от 19.01.2021 к договору подряда № 46/20/1-СВ от 15.01.2021 (л.д. 59 оборот) стороны согласовали:

- п. 4.2 договора, стороны вправе предусмотреть авансирование на основании предоставленных подрядчиком счетов на оплату погашение авансовых платежей производится пропорционально стоимости выполненных Подрядчиком работ путем вычетов из сумм платежей, причитающихся подрядчику за фактически выполненные работы;

- п. 9.1 договора, за нарушение сроков выполнения работ заказчик вправе требовать с подрядчика уплаты неустойки в размере 0,2% от цены работ, выполняемых по настоящему договору, за каждый день просрочки;

- п. 9.7 договора, за нарушение сроков оплаты подрядчик вправе требовать с заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.02.2021 к вышеуказанному договору (л.д. 60), стороны во исполнение пунктов 1.2 и 3.2 договора пришли к соглашению включить в договор следующий локально-сметный расчет:

- ВК01.3.ЛИ.О/ЗМЗЭП в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору в соответствии с локальными сметным расчетом (приложение №1), составляет 63 686  рублей 22 коп, в том числе НДС 20% - 10 614 рублей 37 коп. (п. 2. дополнительного соглашения).

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг выполняемых подрядчиком - 1 088 (одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 76 коп. с учетом НДС 20%, и 3% от стоимости материалов используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором - 1 257 (одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 33 коп. с учетом НДС 20%, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п.3. дополнительного соглашения).

Согласно п. 4. дополнительного соглашения, стороны пришли к соглашению п. 2.1 изложить в следующей редакции: «- дата начала выполнения работ-15.01.2021 г.

- дата окончания выполнения работ до 15 апреля 2021 г.».

Условия настоящего договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать в прежней редакции (п. 5. дополнительного соглашения).

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору (п. 6. дополнительного соглашения).

Объем и перечень работ по договору № 46/20/1-СВ от 15.01.2021 подтверждает локальный сметный расчет № ВК01.3.ЛИ.О/ЗМЗ_ЭП на заземление здания. Общежитие. Инфраструктура. Линия по производству комовой извести на сумму 63 686 руб. 22 коп. (л.д. 60 оборот-61 оборот).

Работы, предусмотренные договором подряда №  46/20/1-СВ от 15.01.2021, выполнены истцом в полном объёме и с надлежащим качеством, о чем свидетельствуют:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 196-1 от 31.03.2021, в т.ч. НДС, на сумму 63 686 руб. 22 коп. и акт КС-2 № 196-1 о приёмке выполненных работ от 31.03.2021 в т.ч. НДС, на сумму 63 686 руб. 22 коп. (л.д. 62-63). 

Указанные документы подписаны сторонами без замечаний.

По факту оказания услуг генподряда по договору № 46/20/1-СВ сторонами подписана соответствующая счет-фактура для оплаты № 768 от 31.03.2021 на сумму 2 346 руб. 09 коп. (л.д. 64), по которым происходит генподрядное удержание 3% от стоимости материалов и 5 % от стоимости работ.

В расчетах по договору № 46/20/1-СВ от 15.01.2021 г. учтена сумма за услуги генподряда в размере 2 346 руб. 09 руб., удержанная заказчиком в соответствии с п. 4.3. договора.

Таким образом, ответчиком не оплачены работы по договору подряда № 46/20/1-СВ от 15.01.2021 в размере 61 340 руб. 13 коп.

Как следует из материалов дела, 15.01.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «УралПромСервис» (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрогресс» (далее - подрядчик) подписан договор подряда №  48/20/1-СВ (далее – договор, л.д. 65-67), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: «Линия по производству комовой извести. Инфраструктура. Административное здание», расположенном по адресу: 

<

...> примерно в 4385м по направлению на восток от ориентира, включающих в себя следующие виды:

- внутренние инженерные сети (электромонтажные работы, электроосвещение);

- наружные сети и сооружения (электроснабжение и освещение, временное электроснабжение).) (п. 1.1 договора).

Уточненный перечень видов работ, стоимость и сроки выполнения отдельных видов работ определяются сторонами в дополнительных соглашениях и локальных-сметных расчетах, являющихся приложениями к настоящему договору. Подрядчик обязуется сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результаты работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену (п. 1.2 договора).

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы согласно условиям настоящего договора (п. 1.3 договора)

Подрядчик подтверждает, что он располагает всеми необходимыми юридическими действительными правами и полномочиями, разрешениями и документами для выполнения функций подрядчика по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ (п. 1.4 договора).

Согласно п. 2.1 договора, работы по договору выполняются в следующие сроки:

- дата начала работ: 15 января 2021;

- дата окончания работ: 28 февраля 2021 г.

Подрядчик вправе с письменного разрешения заказчика досрочно выполнить работы по настоящему договору, а заказчик обязан принять их и оплатить в порядке, установленном условиями настоящего договора (п. 2.2 договора).

Ориентировочная стоимость всех работ по настоящем)' Договору, включая используемые материалы и оборудование составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Указанная стоимость включает в себя все расходы подрядчика, необходимые для надлежащего выполнения обязательств, в том числе стоимость налогов, материалов, оборудования, доставки на объект, погрузо-разгрузочных работ, инфляцию, непредвиденные расходы, любые иные затраты (п. 3.1 договора).

При возникновении дополнительных объемов работ, работы оплачиваются по дополнительным сметам, согласованным обеими сторонами путем оформления дополнительных соглашений (п. 3.2 договора).

Согласно п. 4.1 договора, оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 25 (Двадцати пяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и принятия заказчиком счета-фактуры на выполненные работы, с учетом погашения суммы выплаченного аванса. Основанием для производства расчетов являются подписанный обеими сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц, справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также отчет подрядчика об использовании давальческих материалов.

Стороны вправе предусмотреть авансирование на основании предоставленных подрядчиком счетов на оплату. Погашение авансовых платежей производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся подрядчику за фактически выполненные работы (п. 4.2 договора).

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг, выполняемых подрядчиком и 3% от стоимости материалов, используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором с учетом НДС, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п. 4.3 договора).

Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный подрядчиком расчетный счет (п. 4.4 договора).

Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика (п. 4.5 договора).

Согласно п. 4.6 договора, заказчик вправе удержать оплату выполненных подрядчиком работ при следующих условиях:

-  не устранение выявленных ранее дефектов в работе, предъявленной к оплате или уже оплаченной;

-  несоблюдение срока выполнения работ.

Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования (п. 6.1 договора).

О дате сдачи-приемки скрытых работ подрядчик уведомляет заказчика не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней письмом, направляемым по электронной почте. Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны подрядчика, то по требованию заказчика подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки заказчика в указанный в уведомлении срок подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производится за счет заказчика (п. 6.2 договора).

Согласно п. 6.3 договора, по завершении работ по сборке и монтажу металлоконструкций подрядчик представляет заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также отчет об использовании давальческих материалов. В течение 10 (десяти) рабочих дней заказчик принимает предъявленные работы и при отсутствии замечаний подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо дает мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ и подписания акта, справки, а также возражения к отчету об использовании давальческих материалов.

Недостатки, обнаруженные заказчиком при приемке работ, должны быть отражены в письменной форме. Недостатки устраняются подрядчиком за свой счет в срок, согласованный сторонами (п. 6.4 договора).

В случае если недостатки не будут устранены в согласованные сроки (или в случае не достижения договоренности о сроке устранения недостатков подрядчиком), заказчик вправе привлечь третьих лиц для их устранения. Расходы заказчика по устранению недостатков возмещаются подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предъявления заказчиком соответствующих требований (п. 6.5 договора).

Риск случайной гибели результата выполненных подрядчиком работ по сборке и монтажу металлоконструкций до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) несет подрядчик (п. 6.6 договора).

Протоколом разногласий от 19.01.2021 к договору подряда № 48/20/1-СВ от 15.01.2021 (л.д. 73 оборот) стороны согласовали:

- п. 4.2 договора, стороны вправе предусмотреть авансирование на основании предоставленных подрядчиком счетов на оплату. погашение авансовых платежей производится пропорционально стоимости выполненных Подрядчиком работ путем вычетов из сумм платежей, причитающихся подрядчику за фактически выполненные работы;

- п. 9.1 договора, за нарушение сроков выполнения работ заказчик вправе требовать с подрядчика уплаты неустойки в размере 0,2% от цены работ, выполняемых по настоящему договору, за каждый день просрочки;

- п. 9.7 договора, за нарушение сроков оплаты подрядчик вправе требовать с заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.02.2021 к вышеуказанному договору (л.д. 74), стороны во исполнение пунктов 1.2 и 3.2 договора пришли к соглашению включить в договор следующий локально-сметный расчет:

- ВК01.2.ЛИ.АЗ/2МЗ_ЭП в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Согласно п. 2 дополнительного соглашения, общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору в соответствии с локальными сметным расчетом (приложение №1), составляет 37 119 рублей 79 коп, в том числе НДС 20% - 6 186 (шесть тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 63 коп.

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг выполняемых подрядчиком - 684 рубля 75 коп. с учетом НДС 20%, и 3% от стоимости материалов используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором - 702 (семьсот два) рубля 74 коп. с учетом НДС 20%, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п. 3 дополнительного соглашения).

Согласно п. 4. дополнительного соглашения, стороны пришли к соглашению п. 2.1 изложить в следующей редакции: «- дата начала выполнения работ-15.01.2021, дата окончания выполнения работ до 15 апреля 2021 г.».

Условия настоящего договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать в прежней редакции (п. 5. дополнительного соглашения).

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору (п. 6. дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 2 от 14.04.2021 к вышеуказанному договору (л.д. 76), стороны во исполнение пунктов 1.2 и 3.2 договора пришли к соглашению включить в договор следующие локально-сметные расчеты:

- ВК01.2.ЛИ.АЗ/5_ЭП;

- ВК01.2.ЛИ.АЗ/5.1_ЭП в редакции приложений № 1, 2 к настоящему дополнительному соглашению (п. 1 дополнительного соглашения).

Согласно п. 2 дополнительного соглашения, общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору в соответствии с локальными сметными расчетами (приложения №1,2), составляет 1 852 895 рублей 30 коп, в том числе НДС 20% - 308 815 рублей 88 коп.

Стоимость оказываемых заказчиком услуг связанных с организацией производства работ по настоящему договору составляет 5% от стоимости работ и услуг выполняемых подрядчиком — 17 492 рубля 86 коп. с учетом НДС 20%, и 3% от стоимости материалов используемых подрядчиком в соответствии с настоящим договором - 45 091 рубль 14 коп. с учетом НДС 20%, и удерживается при оплате заказчиком стоимости выполненных подрядчиком работ (п. 3 дополнительного соглашения).

Согласно п. 4. дополнительного соглашения, стороны пришли к соглашению п. 2.1 изложить в следующей редакции: «- дата начала выполнения работ-14.04.2021, дата окончания выполнения работ до 02.06.2021 г.».

Условия настоящего договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать в прежней редакции (п. 5. дополнительного соглашения).

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору (п. 6. дополнительного соглашения).

Объем и перечень работ по договору № 48/20/1-СВ от 15.01.2021 подтверждают локальные сметные расчеты № ВК01.2.ЛИ.АЗ/5_ЭП на монтаж силового оборудования. Электроосвещение. Административное здание. Инфраструктура. Линия по производству комовой извести на сумму 1 809 944 руб. 30 коп., № ВК01.2.ЛИ.АЗ/5.1_ЭП на пусконаладочные работы по внутреннему электроснабжению. Электроосвещение. Административное здание. Инфраструктура. Линия по производству комовой извести на сумму 42 951 руб. 00 коп. (л.д. 76 оборот-84 оборот).

Работы, предусмотренные договором подряда № 48/20/1-СВ от 15.01.2021, выполнены истцом в полном объёме и с надлежащим качеством, о чем свидетельствуют:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 195-1 от 31.03.2021, в т.ч. НДС, на сумму 37 119 руб. 79 коп. и акт КС-2 № 195-1 о приёмке выполненных работ от 31.03.2021 в т.ч. НДС, на сумму 37 119 руб. 79 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 032-21.04 от 30.04.2021, в т.ч. НДС, на сумму 1 809 944 руб. 30 коп. и акт КС-2 № 032-21.04 о приёмке выполненных работ от 30.04.2021.2021 в т.ч. НДС, на сумму 1 809 944 руб. 30 коп.;

 - справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 039-21.04 от 30.04.2021, в т.ч. НДС, на сумму 42 951 руб. 00 коп. и акт КС-2 № 039-21.04 о приёмке выполненных работ от 30.04.2021.2021 в т.ч. НДС, на сумму 42 951 руб. 00 коп. (л.д. 85-94). 

Указанные документы подписаны сторонами без замечаний.

По факту оказания услуг генподряда по договору № 48/20/1-СВ сторонами подписаны соответствующие счет-фактуры для оплаты № 767 от 31.03.2021 на сумму 1 387 руб. 49 коп., № 857 от 30.04.2021 на сумму 2 147 руб. 55 коп.,  № 856 от 30.04.2021 на сумму 60 436 руб. 45 коп., на общую сумму  63 971 руб. 49 коп.  (л.д. 95-96), по которым происходит генподрядное удержание 3% от стоимости материалов и 5 % от стоимости работ.

В расчетах по договору № 48/20/1-СВ от 15.01.2021 г. учтена сумма за услуги генподряда в размере 63 971 руб. 49 руб., удержанная заказчиком в соответствии с п. 4.3. договора.

Ответчик произвел частичную оплату задолженности по договору подряда № 48/20/1-СВ платежными поручениями № 148 от 25.01.2021 на сумму 600 000 руб., № 330 от 18.02.2021 на сумму 617 578 руб. 79 коп., всего на общую сумму 1 217 578 руб. 79 коп. (л.д. 97 оборот-98).

Таким образом, ответчиком не оплачены работы по договор подряда № 48/20/1-СВ от 15.01.2021 в размере 608 464 руб. 81 коп.

Действительность и заключенность указанных договоров сторонами не оспариваются (часть 3.1. статьи 70 АПК РФ).

Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2021 г., согласно которому задолженность ответчика перед истцом по договорам составила 1 178 062 руб. 11 коп.

Общая сумма выполненных работ по договорам с учетом частичной оплаты составила 1 178 062 руб. 11 коп. (508 257,17+61 340+608 464, 81).

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Истцом в адрес ответчика 03.11.2021 направлена претензия № 1026 от 27.10.2021с требованием погасить образовавшуюся задолженность в полном объеме (л.д. 6), которая оставлена последним без ответа и удовлетворения.

Отсутствие полной оплаты выполненных работ по договорам подряда послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с п.1 ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Между сторонами сложились подрядные отношения, которые регулируются нормами гл. 37 ГК РФ.

В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении (пункты 1, 2 статьи 720 ГК РФ).

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 статьи 753 ГК РФ специально предусмотрены основания, по которым заказчик вправе уклониться от приемки: если обнаруженные недостатки исключают возможность использовать результат работы для цели, которая указана в договоре, и к тому же ни подрядчик, ни сам заказчик не могут устранить недостатки. При этом под невозможностью устранить недостатки заказчиком подразумеваются случаи, когда не только он сам или подрядчик не могут произвести соответствующие работы, но и те, при которых ему не удается найти третью сторону, готовую принять на себя устранение недостатков.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта выполнения работ по договорам подряда  истец представил в материалы дела подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Данное обстоятельство ответчиком не оспорено.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства оплаты выполненной работы в полном объеме, суд приходит к выводу об удовлетворении требований в части взыскания с ответчика основного долга по договору в размере 1 178 062 руб. 11 коп.

Истцом по договору № 49/20-СВ от 09.07.2020 заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков платежей в размере 25 412 руб. 86 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах заказчик вправе требовать с подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% от цены работ, выполняемых по настоящему договору, за каждый день просрочки (п. 9.2 договора).

Согласно расчету истца, с учетом произведенных частичных оплат, неустойка по договору подряда № 49/20-СВ от 09.07.2020 составила 25 412 руб. 86 коп. (508 257,17*5% = 25 412,86 (л.д. 2 оборот-3).

Судом расчет истца проверен и признан арифметически верным.

Арифметическая правильность расчета ответчиком, как в части алгоритма расчета, так и в части суммы начисления, надлежащим образом не оспорена (статьи 8, 9 АПК РФ).

Поскольку несвоевременное исполнение обязательств по внесению оплаты по договорам подряда № № 49/20-СВ от 09.07.2020 подтверждено материалами дела и не оспаривается ответчиком, требование о взыскании финансовой санкции является обоснованным.

Ответчик расчет истца арифметически не оспаривал, о применении ст. 333 ГК РФ не просил, в связи с чем данный вопрос судом не рассматривается.

За нарушение ответчиком сроков оплаты истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 46/20/1-СВ от 15.01.2021, рассчитанных за период с 12.05.2021 по 21.03.2021 в размере 4 145 руб. 08 коп., по договору подряда № 48/20/1-СВ от 15.01.2021, рассчитанных за период с 11.06.2021 по 21.03.2021 в размере 38 616 руб. 69 коп., всего в размере 42 761 руб. 77 коп.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

При этом Протоколом разногласий от 19.01.2021 к договору подряда № 48/20/1-СВ от 15.01.2021 (л.д. 73 оборот) стороны согласовали пункт 9.7 договора в следующей редакции: «за нарушение сроков оплаты подрядчик вправе требовать с заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате». 

Протоколом разногласий от 19.01.2021 к договору подряда № 46/20/1-СВ от 15.01.2021 (л.д. 59 оборот) стороны согласовали пункт 9.7 договора в следующей редакции: «за нарушение сроков оплаты подрядчик вправе требовать с заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате». 

Согласно правовой позиции, содержащейся в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого п. 1 ст. 394 ГК РФ, то положения п. 1 ст. 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ (п. 4 ст. 395 ГК РФ).

Если размер процентов, рассчитанных на основании ст. 395 ГК РФ, превышает размер неустойки, суд при установлении факта нарушения денежного обязательства удовлетворяет исковые требования частично в пределах размера суммы неустойки, подлежащей взысканию.

Само по себе то обстоятельство, что истец обосновывает свое требование о применении меры ответственности в виде взыскания денежной суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или соглашением сторон на случай этого нарушения предусмотрена соответствующая неустойка и денежные средства необходимо взыскать с ответчика в пользу истца на основании п. 1 ст. 330 или п. 1 ст. 332 ГК РФ, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

По расчету истца размер процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 46/20/1-СВ от 15.01.2021 рассчитанные на сумму долга 61 340 руб. 13 коп. за период с 12.05.2021 по 21.03.2022 составил 4 145 руб. 08 коп. Вместе с тем с учетом пункта 9.7 договора в редакции протокола разногласий размер неустойки не должен превышать 5% от суммы подлежащей оплате, то есть 3 067 руб. (61340,13*5%).

По расчету истца размер процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 48/20/1-СВ от 15.01.2021 рассчитанные на сумму долга 608 464 руб. 81 коп. за период с 11.06.2021 по 21.03.2022 составил 38 616 руб. 69 коп. Вместе с тем с учетом пункта 9.7 договора в редакции протокола разногласий размер неустойки не должен превышать 5% от суммы подлежащей оплате, то есть 30 423 руб. 24 коп. (608464,81*5%).

Таким образом, требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению частично в сумме 33 490 руб. 24 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, по договорам № 46/20/1-СВ от 15.01.2021, № 48/20/1-СВ от 15.01.2021 за период с 22.03.2022 по день фактического исполнения обязательства по оплате суммы основного долга. 

Учитывая, что договорами предусмотрено взыскание неустойки за нарушение сроков оплаты, размер неустойки ограничен пятью процентами, то требование о взыскании процентов за пользование денежных средств за период с 22.03.2022 по день фактического исполнения обязательства по оплате основного долга не подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

При обращении в Арбитражный суд Челябинской области истец оплатил государственную пошлину в размере 25 463 руб. 00 коп. что подтверждается платежным поручением № 1600 от 19.04.2022, и при цене иска 1 246 236 руб. 74 коп., соответствует пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены частично (99,25%), с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 271 руб. 03 коп. (25462*99,25%).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УралПромСервис» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрогресс» задолженность в размере 1 178 062 руб. 11 коп., пени в размере 25 412 руб. 86 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 33 490 руб. 24 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины  в размере 25 271 руб. 03 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья      В.В. Малыхина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.