АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-282890/22-68-1944

г. Москва

08 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 08 августа 2023 года 

Судья Абрамова Е.А.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРОЗВУД" (105037, 

<

...>, ЭТАЖ 3 КВАРТИРА 6,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2019, ИНН: 

<

***>, КПП:  771901001) к ответчику: ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "БИЗНЕСИНВЕСТПРОМ" (101000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 15.06.2010, ИНН: 

<

***>, КПП: 770901001)  

о взыскании 2 991 712,83 рублей, при участии: 

от истца – ФИО2 на основании доверенности от 15.10.2022, ФИО3  генеральный директор,  

от ответчика – ФИО4 на основании доверенности № 1 от 22.09.2022 и  удостоверения адвоката   

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании задолженности в сумме 2.922.043 руб. 81 коп.,  неустойки в сумме 68.668 руб. 02 коп.  

 В судебном заседании представитель истца требования поддержал,  представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по доводам отзыва.  

 Непосредственно исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон,  суд пришёл к следующим выводам.  

  Как следует из материалов дела, 05.04.2021 между ООО «МорозВуд»  (подрядчик, истец) и ООО «Бизнес-Инвестпром» (заказчик, ответчик) был заключен  договор подряда № 05-0421/СУБ-ПИР, по условиям которого ответчик поручил, а  истец принял на себя обязательства по выполнению изыскательских работ, работ по  разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектной  документации в соответствии с условиями договора и заключаемыми на его основе  

дополнительными соглашениями на отдельные виды работ (п.п. 1.1. - 1.3. договора).  

К договору сторонами были заключены следующие дополнительные  соглашения:  

1) Дополнительное соглашение № 152-2020/Ю-С от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС № 447 «Пущине», 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО,  Серпуховской р-н, в р-не д. Агарино Ю8-20-302-22498(895604)», по адресу: МО,  Серпуховский р-н, в р-не д. Агарино.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 11.09.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.09.2021 г. к дополнительному  соглашению № 152-2020/Ю-С. Стоимость работ по дополнительному соглашению №  152-2020/Ю-С составила 189 912 руб. 43 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 152-2020/Ю-С  от 03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат выполненных работ  (проектная документация) передан ответчику, о чем сторонами был подписан Акт  приема-передачи проектной документации № 1 от 04.02.2022 г.  

2) Дополнительное соглашение № 1.76-2020/Ю-С от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВИЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ф. «На Съяново-2 с ТП-335», ПС № 702 «Гришенки», ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, в  т.ч. ПИР, МО, Серпуховским р-н, Верхние Велеми д Ю8-20-302-26029(132260)»,  

по адресу: МО, Серпуховский р-н, Верхние Велеми. 

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 16.10.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 15.10.2021 г. к дополнительному  соглашению № 176-2020/Ю-С. Стоимость работ по Дополнительному соглашению №  176-2020/Ю-С составила 67 898 руб. 99 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 176-2020/Ю-С  от 03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат работ передан  ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 2 от 04.02.2022 г.  

3) Дополнительное соглашение № 168-2020/Ю-С от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство 2КЛ-10 кВ от ф. Балковский  направлением РП-ЮкВ № 5, ПС № 447 «Пущино», 2СП-10 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч.  ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Балковод, д. Зыбинка ИА-20-302-2597(863901)»,  по адресу: МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Балковод, д. Зыбинка.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 26.12.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 24.12.2021 г. к дополнительному  соглашению № 168-2020/Ю-С. Стоимость работ по дополнительному соглашению №  168-2020/Ю-С составила 195 170 руб. 64 кои.  

Все работы, предусмотренные дополнительным № 168-2020/Ю-С от 03.08.2021  г. к договору, были выполнены истцом, результат передан ответчику, о чем сторонами  был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 3 от 04.02.2022 г.  

4) Дополнительное соглашение JV» 17-2021/Ю-С от 03.08.2021 г. к на  выполнение комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ- 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «Балковский с РП-5», ПС № 447 «Пущино» 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4кВ  в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Алфертищево 108-20-302-32271(217175)»,  по адресу: МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Алфертищево.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению - к 23.12.2021 г., был  продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем заключения дополнительного соглашения №  1 от 22.12.2021 г. к дополнительному соглашению № 17-2021/Ю-С. Стоимость работ по  

дополнительному соглашению № 17-2021/Ю-С составила 64 965 руб. 36 коп.;  

Все работы, предусмотренные дополнительным № 17-2021/Ю-С от 03.08.2021 г.  к договору, были выполнены истцом, результат передан ответчику, о чем сторонами  был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 4 от 04.02.2022 г.  

5) Дополнительное соглашение № 28-2021/Ю-С от 03.08.2021. г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-1.0 кВ от  ВЛ-10 кВ ф. «Балковский с РП-5», ПС № 447 «Пущино» ВЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР, МО,  Серпуховский р-н, д. Зыбинка Ю8-21-302-33546(234444)», по адресу: МО,  Серпуховский р-н, д. Зыбинка.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 18.07.2022 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 16,07.2021 г. к дополнительному  соглашению № 28-2021/Ю-С. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 282021/Ю-С составила 10 632 руб. 00 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 28-2021/Ю-С  от 03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат передан ответчику, о  чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 5 от  04.02.2022 г.  

6) Дополнительное соглашение № 40-2020/Ю-С от 03.06.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство СШ-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от  РУ-10 кВ КТП-1013, ПС № 400 «Ока», в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д.  Верхнее Шахлово Ю8-20-302-15368(811536)», по адресу: МО, Серпуховский р-н, в  районе д Верхнее Шахлово. Срок выполнения работ по указанному соглашению,  первоначально определенный как 15.06.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г.  путем заключения дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2021 г. к  дополнительному соглашению № 40-2020/Ю-С. Стоимость работ по дополнительному  соглашению № 40-2020/Ю-С составила 217 466 руб. 85 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 40-2020/Ю-С от  03.06.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат передан ответчику, о чем  сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 6 от  04.02.2022 г.  

7) Дополнительное соглашение № 136-2020/Ю-С от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе ВЛ-10  кВ ф. 18 (от оп. № 1 до он. № 49), ПС № 400 «Ока», в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н,  Калиново д 108-19-303-6731(732983)», по адресу: МО, Серпуховский р-н, Калиново.  Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально определенный как  07.09.2021 г. был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем заключения  дополнительного соглашения № 1 от 06.09.2021 г. к дополнительному соглашению №  136-2020/Ю-С. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 136-2020/Ю-С  составила 347 790 руб. 45 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 136-2020/Ю-С  от 03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат передан ответчику, о  чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 7 от  04.02.2022 г.  

8) Дополнительное соглашение № 40-2021/Ю-С от 03.07.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.  «Подмолковский с ТП-207», ПС № 447 «Пущино», ГНБ, ПРВТ-ЮКв, ЛР-ЮКв, опора, в  т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, аУд М-2 «Крым» км 104+461(справа) Ю8-21-302- 35181(253194)», по адресу: МО, р-н Серпуховский, а/д М-2 «Крым» км 104+461  (справа).  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 06.08.2021г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  

заключения дополнительного соглашения № 1 от 06.08.2021 г. к дополнительному  соглашению № 40-2021/Ю-С. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 402021/Ю-С составила 270 548 руб. 82 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 40-2021/Ю-С от  03.07.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат работ передан ответчику,  о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 8 от  04.02.2022 г.  

9) Дополнительное соглашение № 101ЮЭС/21 от 03.09.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа),  2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру Т11 № Ю8-18-302-19832(913921)),  ПС № 748 «Лазарево», ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский,  Ю8-21-302-33679(235556), по адресу: МО, р-н Серпуховский.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 25.12.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2021 г. к дополнительному  соглашению № 101ЮЭС/21. Стоимость работ по дополнительному соглашению №  101ЮЭС/21 составила 181 798 руб. 99 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 101ЮЭС/21 от  03.09.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат работ передан им  ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 9 от 04.02.2022 г.  

10) Дополнительное соглашение № 295ЮЭС/20 от 03.08.2021 г. на  выполнение комплекса работ по ПИР но титулу: «Строительство СШ-16-10/0,4 кВ,  ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «Балковский» с РП-5, ПС № 447 «Пущино» узел учета, в т.ч.  ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Алфертищево 108-20-302-24617(112981)», по  адресу: МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Алфертищево.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 05.10.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 04.10.2021 г. к дополнительному  соглашению № 295ЮЭС/20. Стоимость работ по дополнительному соглашению №  295ЮЭС/20 составила 24 045 руб. 29 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 295ЮЭС/20 от  03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат работ передан им  ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 10 от 04.02.2022 г.  

11) Дополнительное соглашение № 93ЮЭС/21 от 03.08.2021 г. на  выполнение комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4  кВ проект. КТП до оп. № 1 ВЛ-0.4кВ, ПС № 400 «Ока», в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р- н, в р-не д С крылья Ю8-21-302-39306(305245)», по адресу: МО, Серпуховский р-н, в р- не д. Скрылья.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 24.09.2023. г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 23.09.2021 г. к дополнительному  соглашению № 93ЮЭС/21. Стоимость работ по дополнительному соглашению №  93ЮЭС/21 составила 1 756 руб. 13 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 93ЮЭС/21 от  03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом в полном объеме и с соблюдением  установленных сроков, результат выполненных работ передан ответчику, о чем  сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 11 от  04,02.2022 г.  

12) Дополнительное соглашение № 122ЮЭС/21 от 01.12.2021. г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ № 815 с заменой  

на КТПК-400-6/0,4 кВ, ПС № 567 «Полиграф», в т.ч. ПИР, МО, го ФИО5, д. Красные  Холмы», по адресу: МО, го ФИО5, д. Красные Холмы.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 10.01.2022 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.01.2022 г. к дополнительному  соглашению № 122ЮЭС/21. Стоимость работ по дополнительному соглашению №  122ЮЭС/21 составила 68 020 руб. 33 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 122ЮЭС/21 от  01.12.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат работ передан ответчику,  о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 12 от  04.02.2022 г.  

13) Дополнительное соглашение № 127ЮЭС/21 от 01.09.2021 г, на  выполнение комплекса работ по ПИР по титулу: «Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ   № 1134 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС № 478 «Талеж», в т.ч. ПИР, МО, го ФИО5, в  р-не д. Баренцево», по адресу: МО, го ФИО5, в р-не д. Баранцево.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 10.01.2022 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.01.2022 г. к дополнительному  соглашению № 127ЮЭС/21. Стоимость работ по дополнительному соглашению №  127ЮЭС/21 составила 68 020 руб. 33 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 127ЮЭС/21 от  01.09.2021 г. к договору, были выполнены истцом в полном объеме и с соблюдением  установленных сроков, результат выполненных работ - проектная документация - был  передан им ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 13 от 04.02.2022 г.  

14) Дополнительное соглашение № 3627-ЮФ от 03.07.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Реконструкция ВЛ-1 ОкВ ф. «Семеновский» с РП- 5, ПС № 447 «Пущино» в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Болыпое Грызло во - д. Б.  Городня (населенная местность) (10 км)», по адресу: МО, г.о. Серпухов, д. Болыпое  Грызлово - д. Б. Городня.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 31.07.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 30.07.2021 г. к дополнительному  соглашению № 3627-ЮФ. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3627- ЮФ составила 1 252 538 руб. 94 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 3627-ЮФ от  03.07.2021 г. к договору, были выполнены истцом в полном объеме и с соблюдением  установленных сроков, результат выполненных работ - проектная документация - был  передан им ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 14 от 04.02.2022 г.  

15) Дополнительное соглашение № 3664-ЮФ от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Реконструкция. КТП-1.60-6/0,4 кВ № 991 с  заменой па КТП-400-6/0,4кВ (прох. типа), ПС № 400 «Ока», в т.ч. ПИР, МО,  Серпуховский р-н, в р-не д Скрылья Ю8-21 -302-39306(305245)», по адресу: МО,  Серпуховский р-н, в р-не д Скрылья.  

 Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 24.09.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 23.09.2021 г, к дополнительному  соглашению № 3664-ЮФ. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3664- ЮФ составила 62 710 руб. 23 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 3664-ЮФ от  03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом в полном объеме и с соблюдением  

установленных сроков, результат выполненных работ - проектная документация - был  передан им ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 15 от 04,02.2022 г.  

16) Дополнительное соглашение № 3652-ЮФ от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 на  ТП-225 с ПС № 658 «Заповедник», ЛР-10 кВ, узел учета в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский  р-н, Борисовское ш., д.1 Ю8-21-302-44233(360691) по адресу: МО, Серпуховский р-н,  Борисовское ш., д.1.  

Срок выполнения работ но указанному соглашению - 18.05.2022 г. Стоимость  работ по дополнительному соглашению № 3652-ЮФ составила 17 822 руб. 23 кон.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 3652-ЮФ от  03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом в полном объеме и с соблюдением  установленных сроков, результат выполненных работ был передан ответчику, о чем  сторонами подписан Акт приема-передачи проектной документации № 16 от 04.02.2022  г.  

17) Дополнительное соглашение № 3563-ЮФ от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ но ПИР по титулу: «Строительство КЛ-0,4 Кв от РУ-04кВ проект. ТП  (по до-ру ТП № 108-21-302-33679(235556)), ПС № 748 «Лазарево», РЩ-0,4кВ, в т.ч.  ПИР, МО, р-н Серпуховский, 108-21-302-41283(334615), по адресу: МО, р-н  Серпуховский.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 05.05.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2022 г. к дополнительному  соглашению № 3563-ЮФ. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3563- ЮФ 14 399 руб. 19 коп.  

Все работы, предусмотренные ДС № 3563-ЮФ от 03.08.2021 г. к договору, были  выполнены истцом, результат передан ответчику, о чем сторонам подписан Акт  приема-передачи проектной документации № 17 от 04.02.2022 г.  

18) Дополнительное соглашение № 3706-ЮФ от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство КВЛ-10 кВ от проект, ячейки в  РУ-10 кВ ПС № 807 «Калугино», 2ГНБ, КЛ-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2опоры, в  т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. «Квартал А», з/у 106 Ю8-21-302- 45246(354243)», по адресу: МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. «Квартал А», з/у 106.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 27.11.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 26.11.2021 г. к дополнительному  соглашению № 3706-ЮФ. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3706- ЮФ составила 223 194 руб. 70 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 3706-ЮФ от  03.08.2021 г. к договору, были выполнены истцом в полном объеме и с соблюдением  установленных сроков, результат выполненных работ - проектная документация - был  передан им ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 1.8 от 04.02.2022 г.  

19) Дополнительное соглашение № 3703-ЮФ от 03.08.2021. г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ШР-0,4 кВ с ТП- 1145, БМК.ТП-11.2, ПС № 400 «Ока», 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский,  д. Пущино Ю8- 21-302-46898(393730)», по адресу: МО, р-н Серпуховский, д. Пущино.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 08.12.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 07.12.2021 г, к дополнительному  соглашению № 3703-ЮФ. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3703- ЮФ составила 40 281 руб. 09 коп.  

Все работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 3703-ЮФ от  03,08.2021 г. к договору, были выполнены истцом, результат выполненных работ  передан ответчику, о чем сторонами был подписан Акт приема-передачи проектной  документации № 19 от 04,02.2022 г.  

20) Дополнительное соглашение № 3705-ЮФ от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ по ПИР по титулу: «Реконструкция ВЛИ-0,38 от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с  заменой вводов), ПС № 748 «Лазарево» в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Манишки д,  д. 35 Ю8-21-30348239(405421)», по адресу: МО, Серпуховский р-н, Манишки д, д. 35.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как 08.12.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 г. путем  заключения дополнительного соглашения № 1 от 07.12.2021 г. к дополнительному  соглашению № 3705-ЮФ. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3705- ЮФ составила 53 244 руб. 03 кои.  

Все работы, предусмотренные ДС № 3705-ЮФ от 03.08.2021 г. к договору, были  выполнены истцом, результат передан ответчику, о чем сторонами был подписан Акт  приема-передачи проектной документации № 20 от 04.02.2022 г.  

21) Дополнительное соглашение № 3666-ЮФ от 03.08.2021 г. на выполнение  комплекса работ но ПИР по титулу: «Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ № 1013 с  заменой на КТП-400-6/0,4кВ (прох. типа), реконструкция ВЛИ-0,38 7 кВ с ТП-1013 до  оп. № 4 с подвесом провода, ПС № 400 «Ока», в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н,  Скрылья д 108-21-302-39339(306951)», по адресу: МО, Серпуховский р-н, Скрылья д.  

Срок выполнения работ по указанному соглашению, первоначально  определенный как  

28.09.2021 г., был продлен сторонами до 31.12.2022 путем заключения  дополнительного соглашения № 1 от 27.09.2021 г. к дополнительному соглашению №  3666-ЮФ. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3666-ЮФ составила  49 826 руб. 99 коп.  

Все работы, предусмотренные ДС № 3666-ЮФ от 03.08.2021 г. к договору, были  выполнены истцом, результат выполненных работ передан ответчику, о чем сторонами  был подписан Акт приема-передачи проектной документации № 21 от 04.02.2022 г.  

Общая стоимость работ, выполненных истцом по договору подряда № 050421/СУБ-ПИР от 05.04.2021. г. и вышеуказанным дополнительным, соглашениям к  нему, составила 3.422.043 руб. 81 коп.  

Согласно п. 3.3 договора, приемка работы заказчиком осуществляется в течение  10 рабочих дней с момента получения изыскательской и проектно-сметной  документации. В указанный срок заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки  выполненных работ или направить подрядчику мотивированный отказ от приемки  работ.  

Все работы по дополнительным соглашениям к договору, выполненные истцом,  были приняты ответчиком без замечаний, претензий по выполненным работам ООО  «Бизнес-Инвестпром» не предъявляло, Акты сдачи-приемки проектной документации   №№ 1-21 были подписаны ответчиком 04.02.2022 г.  

Согласно п. 2.4 договора, оплата выполненных проектно-изыскательских работ  производится в срок не позднее 45 рабочих дней с момента сдачи результата работ.  Таким образом, оплата должна была быть произведена ответчиком не позднее 11  апреля 2022 г.  

Ответчик работы оплатил частично в сумме 500.000 руб.: 200.000 руб. по  платежному поручению № 1955 от 28.05.2021 г. и 300.000 руб. по платежному  поручению № 2754 от 03.08.2021 г.). Задолженность в оставшемся размере 2.922.043  руб. 81 коп. не погашена до настоящего времени.  

Претензия о погашении задолженности оставлена без удовлетворения, что  послужило основанием заявленного иска.  

Возражая против удовлетворения иска, ответчик сослался на то, что работы по 11  (одиннадцати) дополнительным соглашениям, в том числе дополнительным  соглашениям № 152-2020/Ю-С от 3 августа 2021 г., № 176-2020/Ю-С от 3 августа 2021  г., № 168-2020/Ю-С от 3 августа 2021 г., № 17-2021/Ю-С от 3 августа 2021 г., № 40- 2020/Ю-С от 3 июня 2021 г., № 136-2020/Ю-С от 3 августа 2021 г., № 40-2021/Ю-С от 3  июля 2021 г., № 122ЮЭС/21 от 1 декабря 2021 г., № 127ЮЭС/21 от 1 сентября 2021 г.,   № 3627-ЮФ от 3 июля 2021 г., № 3706-ЮФ от 3 августа 2021 г., имеют существенные  недостатки, препятствующие использованию их результата по назначению, ввиду чего  оплате не подлежат. В отзыве ответчик ссылается на отсутствие согласования с  уполномоченным органом на размещение объектов строительства (реконструкции) на  землях или части земельного участка, а также согласования документации со всеми  землепользователями и другими заинтересованными организациями, отсутствие  разрешение на размещение линейного объекта на землях, государственная  собственность на которые не разграничена; согласование размещения проектируемой  ВЛЗ с правообладателем земельного участка.  

 Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в срок  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом.  Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов,  заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи  результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его  заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из  сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой  стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными. Указанная норма права, предусматривает возможность  составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ. Названная норма  защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от  надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.  

Согласно ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).  

 Работы по договору истцом выполнены, результат работ передан ответчику,  Акты сдачи-приемки проектной документации №№ 1-21 были подписаны ответчиком  04.02.2022 г.  

Однако работы не оплачены, задолженность в общем размере 2.922.043 руб. 81  коп. не погашена до настоящего времени.  

 Ответчик ссылается на Уведомления от 29.11.2022 г. за №№ : 1053БИП/22,  1060БИП/22, 1063БИП/22, 1062БИП/2.2, 1061БИП/22, 1059БИП/22, 1058БИП/22,  1055БИП/22, 1057БИП/22, 1056БИП/22, 1.054БИП/2.2, в которых сообщает о том, что  им выявлены недостатки в проектной документации, явившейся результатом работ,  выполненных истцом по следующим дополнительным соглашениям к Договору: №  152-2020/Ю-С от 03,08.2021 г., № 176-2020/Ю-С от 03.08.2021 г„ № 17-2021/Ю-С от  03.08.2021 г., № 127ЮЭС/21 от 01.09.2021 г., № 40-2020/Ю-С от 03.06,2021 г., № 168- 2020/Ю-С от 03,08.2021 г., № 122ЮЭС/21 от 01.12.2021 г,, № 3627-ЮФ от 03.07.2021 г„  

 № 3706-ЮФ от 03,08.2021 г„ № 136-2020/Ю-С от 03.08.2021 г, 40-2021/Ю-С от  03.07.2021 г.  

Между тем, стороны при заключении договора подряда № 05-0421/СУБ-ПИР  согласовали срок, в течение которого заказчик может направить подрядчику  мотивированный отказ от приемки работ - 10 рабочих дней с момента получения  заказчиком проектной документации (п. 3.3). В случае направления заказчиком  мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляется в течение 2 рабочих  дней с двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  

Однако все работы, выполненные истцом по договору, ответчик принял без  замечаний.  

С даты подписании сторонами Актов сдачи-приемки до дни направлении  ответчиком вышеуказанных уведомлений прошло более 9 месяцев.  

 Ответчик, при наличии выявленных недостатков не вернул проектную  документацию для доработки.  

 Согласно п.3.5.1. договора, заказчик, обнаруживший после приемки результата  работ в целом/либо по отдельному этапу работ недостатки, обязан известить об этом  Подрядчика в разумный срок, направив официальное письменное уведомление,  содержащее перечень недостатков принятых работ/этапа, потребовав от Подрядчика по  своему выбору: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;  соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов  на устранение недостатков.  

Однако ответчик полностью отказывается от оплаты выполненных работ. 

 Ответчик, в своих консолидированных возражениях сообщает, что часть  документов, заявленных в суд и приобщенных к материалами дела, касающиеся  наличия разрешений и согласований, ранее ответчику не передавались, что не  соответствует действительности, т.к. данные согласования являются частью ПИР.  

 Претензии по ПИР были заявлены ответчиком только после получения им  досудебной претензии в ноябре 2022г., спустя 9 месяцев, что выходит за рамки как  срока, предусмотренного договором, так и разумного срока. При этом все работы,  выполненные истцом по договору, ответчик принял без замечаний.  

 При этом, все предусмотренные договором согласовательные процедуры были  пройдены истцом. Результат работ принят ответчиком. Те согласования и разрешения,  на которые ссылается ответчик в отзыве, являются дополнительными, Техническое  задание их не содержит. Предъявляемые претензии со ссылкой на требования третьих  лиц, в том числе ПАО «Россети Московский регион» ООО «ФАБИ», не могут  свидетельствовать о том, что работы истцом по договору с ответчиком не выполнены,  поскольку они выходят за рамки согласованных сторонами спора условий  заключенного ими договора.  

 Ответчик ссылается на тот факт, что направление документов через систему  электронного документооборота не является надлежащим способом обмена  документами, однако согласно п. 15.4. договора подряда, прямо указано, что при  заключении, исполнении и расторжении договора стороны могут использовать  документооборот с применением электронной подписи в соответствии с  законодательством РФ.  

При указанных обстоятельствах доводы ответчика подлежат отклонению, а  требование истца о взыскании задолженности – удовлетворению в заявленном размере  как обоснованное и документально подтвержденное.  

 В соответствии с условиями договора (п. 7.4) подрядчик за нарушение  заказчиком сроков платежей, установленных договором, имеет право начислить и  взыскать с заказчика неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной  суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены работ, определяемой  соответствующим дополнительным соглашением.  

За период с 12.04.2022 г. по 02.12.2022 г. истец начислил неустойку в сумме 68  668 руб. 02 коп.  

Расчет судом проверен и признан верным. 

Поскольку ответчиком допущено нарушение сроков оплаты работ, требование  истца о взыскании неустойки правомерно и также подлежит удовлетворению в  заявленном размере. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ, исходя из размера  договорной неустойки, судом не установлено, а ответчиком не доказано.  

 Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со  ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.  

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 309, 310, 330, 702, 711,  753 ГК РФ, ст. ст. 41, 65, 67, 71, 110, 167 - 171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "БИЗНЕСИНВЕСТПРОМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу ООО "МОРОЗВУД" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  задолженность в сумме 2.922.043 руб. 81 коп., неустойку в сумме 68.668 руб. 02 коп. и  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 37.954 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятом  арбитражном апелляционном суде.  

 Судья Е.А. Абрамова