Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 114024/23-3-885

г. Москва

21 июля 2023 г.

Резолютивная часть объявлена 14 июля 2023 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 21 июля 2023 г.

 

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" (392028, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТАМБОВ Г.О., ТАМБОВ Г., ИППОДРОМНЫЙ ПР-Д, Д. 26, ОФИС 1, КОМ. 16, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.04.2021, ИНН: 

<

***>, КПП: 682901001) к ООО "КМ-СТРОЙ" (121087, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, НОВОЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 8, К. 4, ПОМЕЩ. 8/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.03.2010, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001) о взыскании 11 534 544, 24 руб., процентов в размере 988 688, 35 руб.

При участии:

От истца: ФИО2 дов. от 10.01.2023 г. диплом

От ответчика: ФИО3 дов. от 09.01.2023 г. диплом, 

 

У С Т А Н О В И Л :

ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ"  (далее – истец) обратилось в суд исковым заявлением к ООО "КМ-СТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере 11 534 544, 24 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 988 688, 35 руб.

От сторон возражений против рассмотрения спора по существу в непосредственно после завершения предварительного судебного заседания в материалы дела не поступало и в судебном заседании не заявлено.

Согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Учитывая изложенное, принимая во внимание также необходимость экономии процессуального времени, суд, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ, с учетом позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 27 Постановления от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», считает возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме по доводам заявления.

Ответчик, в нарушение ст. 131 АПК РФ, отзыва на исковое заявление не представил, в судебном заседании возражал против удовлетворения требований, устно пояснил позицию по спору, указал, что работы выполнены, но также указал, что не может представить доказательства их оплаты.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, 21 июля 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью «КМ-Строй» (далее по тексту - Ответчик - Генподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект» (далее по тексту - Истец - Субподрядчик) заключен Договор № РТС236А210065-СУБ на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее по тексту - Договор).

В соответствии с условиями Договора (п. 1.1.) Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - работы) в соответствии с перечнем, видами и стоимостью работ согласно Приложения № 1 к настоящему договору, с условиями настоящего договора, утвержденной и согласованной в установленном законодательством порядке проектной документацией, локально-сметным расчетом, техническими регламентами и иными нормативными документами, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненный надлежащим образом объем работ в порядке, установленным настоящим Договором и законодательством.

Приложением № 1 к Договору предусмотрено:

1.         

<

...>, ремонт фасада на сумму 2 066 578,92 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 2 066 578,92      руб.

2.         

<

...> ремонт крыши на сумму 3 676 433,40 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 3 676 433,40          руб.

3.         

<

...>            ремонт крыши на сумму 3 156 678,00 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого:  3 156 678,00 руб.     

4.         

<

...>, ремонт крыши на сумму 4 368 526,56 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого:    4 368 526,56   руб.

5.         Воронежская область, Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 24, ремонт крыши на сумму 6 268 390,20 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого:  6 268 390,20   руб.

6.         

<

...>, ремонт крыши на сумму 3 819 135,96 руб.          с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 3 819 135,96     руб.

7.         

<

...>, ремонт крыши на сумму 2 771 474,40 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого:          2 771 474,40 руб.      

8.         

<

...> Д. 154, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения на сумму 477 528,48 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г.; установка коллективных приборов учета холодного водоснабжения на сумму 5 722,92 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 483 251,40 руб.

9.         Воронежская область, Подгоренский район, пгт, Подгоренский, ул. Ленина, д. 26, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения на сумму 803 218,68 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого:            803 218,68 руб.

10.       Воронежская область, Подгоренский район, пгт, Подгоренский, ул. Ленина, д. 46,            ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения на сумму 666 976,68 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г.; Ремонт крыши         на сумму 1 682 643,24 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 2 349 619,92 руб.

11.       

<

...>, ремонт фасада на сумму 10 797 643,44 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 10 797 643,44        руб.

12.       

<

...>           ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения на сумму 1 709 949,96 руб. с 15.08.21г. по 30.11.21г. Итого: 1 709 949,96 руб.

13.       

<

...>          ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения на сумму 1 149 142,68 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 1 149 142,68 руб.     

14.       

<

...>, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения на сумму 1 064 851,92 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 1 064 851,92            руб.

15.       

<

...>, ремонт крыши            на сумму 8 065 418,40 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 8 065 418,40 руб.          

16.       

<

...>, ремонт подвального помещения на сумму 965 953,08 руб. с 15.08.21г. по 30.11.21г.; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на сумму 5 137 760,88 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г.; ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения на сумму 1 061 513,64 руб. с 15.08.21г по 30.11.21г. Итого: 7 165 227,60 руб.

17.       

<

...> ремонт фасад на сумму 6 808 709,88 руб. с 15.08.21г. по 30.11.21г. Итого: 6 808 709,88 руб. Всего на сумму 66 524 251,32 руб.

Истец в рамках исполнения взятых на себя обязательств по Договору частично исполнил следящие виды работ, подтверждённые подписанными со стороны Истца и Ответчика документами:

1.         Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>; капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

<

...> - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 1.1 от 15.09.2021 года за период с 21.07.2021 года по 15.09.2021 года (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.09.2021 года в размере 10 267 132,32 рублей (в том числе НДС);

2.         Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>; капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

<

...>; Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: Воронежская область Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 24 - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 2.1 от 04.10.2021 года за период с 16.09.2021 года по 04.10.2021 года (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 04.10.2021 года в размере 5 615 821,80 рублей (в том числе НДС);

3.         Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2021 года за период с 16.09.2021 года по 30.11.2021 года (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.11.2021 года в размере 1 691 434,44 рублей (в том числе НДС);

4.         Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> (ремонт фасада) - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 4 от 17.11.2021 года за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 17.11.2021 года в размере 1 737 752,40 рублей (в том числе НДС).

Указанные выше акты по форме КС-2 и КС-3 подписаны Сторонами в двухстороннем порядке и оплачены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. Договора Генподрядчик обязан в течении 3 (трех) дней с момента получения от Субподрядчика Актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 подписать их, либо представить письменный мотивированный отказ от подписания. Если Генподрядчик письменный мотивированный отказ от подписания Актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 в течении 3 (трех) дней, то работы, отраженные в данных Актах выполненных работ, считаются принятыми Генподрядчиком.

Пунктом 2.5. Договора определено: расчет за выполненные работы осуществляется в валюте Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств поэтапно по видам работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Генподрядчиком Актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Субподрядчиком в рамках исполнения Договора выполнены иные виды работ и в качестве подтверждения исполненных обязательств в адрес Генподрядчика направлены, путем нарочного вручения акты КС-2 и справки КС-3, с приложениями закрывающих документов, а именно:

1. Сопроводительным письмом № 27/11 от 01.12.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 01.12.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 14 от 30.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 776 566,00 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 года по 30.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 14 от 30.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 776 566,00 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 года по 30.11.2021 года; Счет фактура № 16 от 30.11.2021 года;

2.         Сопроводительным письмом № 26/11 от 30.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 01.12.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 15 от 30.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 859 534,80 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 года по 30.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 15 от 30.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 859 534,80 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 года по 30.11.2021 года; Счет фактура № 15 от 30.11.2021 года; Счет№ 15 от 30.11.2021 года;

3.         Сопроводительным письмом № 25/11 от 30.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 01.12.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 11 от 30.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 328 826,40 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 года по 30.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 13 от 30.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 328 826,40 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 года по 30.11.2021 года; Счет фактура № 14 от 30.11.2021 года; Счет№ 14 от 30.11.2021 года;

4.         Сопроводительным письмом № 09/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 6 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 2 580 932,16 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 6 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 2 580 932,16 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Счет фактура № 13 от 17.11.2021 года;

5.         Сопроводительным письмом № 03/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 12 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 789 361,20 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 12 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 789 361,20 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Счет фактура № 12 от 17.11.2021 года; Счет № 12 от 17.11.2021 года;

6.         Сопроводительным письмом № 07/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 8 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 1 607 851,08 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 1 607 851,08 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Счет фактура № 11 от 17.11.2021 года4 Счет№ 11 от 17.11.2021 года;

7.         Сопроводительным письмом № 05/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 10 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 776 585,88 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 776 585,88 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Счет фактура № 9 от 17.11.2021 года;

 8.        Сопроводительным письмом № 08/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 7 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 29 (капитальный ремонт кровли) на сумму 459 572,40 рублей (в том числе НДС) за период с 05.10.2021 года по 17.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 7 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 29 (капитальный ремонт кровли) на сумму 459 572,40 рублей (в том числе НДС) за период с 05.10.2021 года по 17.11.2021 года; Счет фактура № 8 от 17.11.2021 года; Счет№ 8 от 17.11.2021 года;

9.         Сопроводительным письмом № 04/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 11 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 433 391,04 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 7 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 433 391,04 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Счет фактура № 10 от 17.11.2021 года; Счет№ 10 от 17.11.2021 года;

10.       Сопроводительным письмом № 06/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 9 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> д. ПА (капитальный ремонт кровли) на сумму 2 062 368,00 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 16.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 9 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> д. ПА (капитальный ремонт кровли) на сумму 2 062 368,00 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 16.П.2021 года; Счет фактура № 7 от 17.11.2021 года; Счет № 7 от 17.11.2021 года;

11. Сопроводительным письмом № 10/11 от 17.11.2021 года, с отметкой о вручении Ответчику от 17.11.2021 года следующие документы: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 17.11.2021 года на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 859 535,28 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 5 от 17.11.2021 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 859 535,28 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 года по 17.11.2021 года; Счет фактура № 6 от 17.11.2021 года; Счет № 6 от 17.11.2021 года.

Итого выполнено работ и понесено затрат на общую сумму - 11 534 544,24 рублей, в том числе НДС, что подтверждено ответчиком в судебном заседании.

Между тем, до настоящего времени Ответчиком претензий по выполненным работам не представлено, акты о выполненных работах не подписаны и не оплачены, в связи с чем, задолженность ответчика составила 11 534 544, 24 руб.

При этом, довод ответчика относительно оплаты работ в полном объеме не принимается судом, поскольку доказательства оплаты ответчиком не представлены.

В адрес Истца направлена путем нарочного вручения - претензия, исходящий № 15/12 от 15.12.2021 года с требованиями осуществить оплату задолженности в срок 7 (семи) дней. Однако, ответчик сумму задолженности не оплатил, что послужило основанием для обращения истца с требованиями в суд.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий  и  требований  -  в  соответствии с обычаями делового  оборота или  иными  обычно предъявляемыми  требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ - односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

Согласно ст. 708 ГК РФ  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как указано в п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Исходя из представленных доказательств суд усматривает, что сумма задолженности по указанному договору подтверждена документально, каких-либо мотивированных возражений относительно принятых работ в материалы дела не представлено.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными). 

Доводы ответчика отклоняются судом, как несостоятельные и противоречащие представленным в материалы дела доказательствам.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что Ответчик не доказал оплату выполненных истцом работ, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда в размере 11 534 544, 24 руб., правомерны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 988 688 руб. 35 коп. за период, согласно расчету в исковом заявлении. Расчет судом проверен, признан верным.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

В силу действовавшей до 01.08.2016 редакции п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц (п. 1 ст. 395 ГК РФ, в редакции Федерального закона от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с редакцией п. 1 ст. 395 ГК РФ, действующей с 01.08.2016, размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ).

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции настоящего Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что ответчик не доказал оплату работ, суд приходит к выводу, что исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами также подлежат удовлетворению судом в размере 988 688 руб. 35 коп.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В порядке ст. 110 АПК РФ, расходы по госпошлине в размере 67 274 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО "КМ-СТРОЙ" (121087, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, НОВОЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 8, К. 4, ПОМЕЩ. 8/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.03.2010, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001) в пользу ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" (392028, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТАМБОВ Г.О., ТАМБОВ Г., ИППОДРОМНЫЙ ПР-Д, Д. 26, ОФИС 1, КОМ. 16, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.04.2021, ИНН: 

<

***>, КПП: 682901001) задолженность в размере 11 534 544 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот сорок четыре) руб. 24 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 988 688 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. 35 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 84 266 (Восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его  изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд..

 

Судья                                                                                      А.А. Федоточкин