АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-3055/2022

г. Уфа

23 мая 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 16.05.2022

Полный текст решения изготовлен 23.05.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Салишевой Р.Э.,

Общества с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "ТТ-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 7 886 025 руб. 30 коп.

 

при участии в судебном заседании:

От истца – не явились, извещены.

От ответчика – ФИО1 по доверенности от 19.03.2022, представлен диплом рег. номер 55 от 19.06.2009, паспорт гражданина РФ, ФИО2 – директор, представлен паспорт гражданина РФ

Общество с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ТТ-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 7 886 025 руб. 30 коп.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.02.2022 исковое заявление было принято к производству.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на исковое заявление, указав, что ООО «ТТ-Строй» по договору подряда № 2-20 от 30.10.2020 работы выполнены в полном объеме, оплата по ним ООО «ГрадСтройСервис» в сумме 4 007 223,4 руб. произведена в полном объеме. По состоянию на 27.12.2021г. по договору подряда № 3-20 от 30.10.2020 работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 13 493 374, 59 руб. Ранее приведенные расчеты показали, что ООО «ГрадСтройСервис» на расчетный счет ООО «ТТ-Строй» в совокупности по Договору № 2-20 и № 3-20 направлены денежные средства в сумме: 12 683 599,5 руб. Учитывая, что за исполнение работ по договору № 2-20 от 30.10.2020 ООО«ТТ-Строй» принята к зачету сумма в размере 4 007 223, 43 руб., а сумма в размере 8 676 376, 07 руб. принята к зачету по договору № 3-20 от 30.10.2020 (12683599,5руб - 4007223,43 руб. = 8676376,07 руб.), остаток задолженности Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» перед ООО «ТТ-Строй» составляет 4 816 998,43 руб. Просит отказать в удовлетворении исковых требований.

От ответчика в судебном заседании поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Казенное предприятие Республики Башкортостан «Республиканское УправлениеКапитального Строительства» (ИНН 

<

***>, адрес: 450071, РБ, г. Уфа,ул. Лесотехникума, д. 49), Администрацию сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, 452930, РБ Краснокамский муниципальный район, с.п. Николо-Березовский сельсовет,   

<

...>), Администрацию муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, 452080, РБ, 

<

...>).

Исходя из положений статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации привлечение к участию в деле третьего лица осуществляется арбитражным судом по ходатайству стороны спора, по инициативе суда либо на основании заявления третьего лица о вступлении в дело. О вступлении в дело третьего лица  либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.      

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Исходя из смысла и содержания части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для вступления в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является правовая ситуация, при которой судебный акт по рассматриваемому делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон. Иными словами, у данного лица имеются материально-правовые отношения со стороной по делу, на которые может повлиять судебный акт по рассматриваемому делу в будущем (предъявление регрессного иска и т.п.).

Суд не находит правовых оснований для привлечения к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Казенное предприятие Республики Башкортостан «Республиканское Управление Капитального Строительства» (ИНН 

<

***>, адрес: 450071, РБ, 

<

...>), Администрацию сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, 452930, РБ Краснокамский муниципальный район, с.п. Николо-Березовский сельсовет, 

<

...>), Администрацию муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, 452080, РБ, 

<

...>), поскольку судебный акт не влияет и не затрагивает права и законные интересы указанных лиц.

Истец явку на судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом. 

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя ответчика, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 30.10.2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" (генеральный подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ТТ-СТРОЙ" (подрядчик) заключен договор подряда № 2-20, по которому подрядчик обязуется по заданию генподрядчика выполнить полный комплекс работ по созданию Объекта: строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, подключение завершенного строительством Объекта к инженерным сетям, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Объектом в целях настоящего договора является «Строительство детской площадки в парке им. Г. Бухараева в с. Киргиз-Мияки» Миякинский район Республики Башкортостан г. Нефтекамск Республики Башкортостан (далее по тексту - Объект).

Согласно п. 2.2 договора перечень, состав и объем работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего договора, приобретаемых конструкций, материалов и оборудования определяются в проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 3.1 договора подрядчик выполняет весь комплекс работ, являющийся предметом настоящего договора в следующие сроки:

Начало Работ - с даты подписания настоящего договора.

Окончание Работ - 30.07.2021 г.

В силу п. 4.1 договорацена договора определяется ведомостью договорной цены (Приложение №2) и составляет 5 503 124,00 руб. (Пять миллионов пятьсот три тысячи сто двадцать четыре) рублей, в том числе НДС 20% - 917 187,33 руб., Цена Договора включает в себя стоимость всех работ, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, а также расходы Подрядчика на приобретение, поставку и монтаж оборудования, материалов, конструкций в объеме, необходимом для завершения Объекта строительством согласно проектно-сметной документации, включая затраты на подключение Объекта к сетям инженерно- технического обеспечения, с благоустройством прилегающей территории, а также расходы согласно п. 5.29 настоящего договора.

Финансирование работ по настоящему Договору производится Фондом социальных целевых программ (далее - Фонд). В случае изменения Фондом объема финансирования, цена Договора и объем выполняемых работ подлежат корректировке путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В соответствии с п. 4.3 договора оплата осуществляется при условии соблюдения Графика производства работ (Приложение №1) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке (с учетом аванса):

- денежная сумма в размере 95% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ перечисляется Подрядчику в течение 5 (пяти) дней после поступления денежных средств от Фонда на основании подписанных Генподрядчиком актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 с удержанием аванса, пропорционально объему выполненных работ, на основании выставленных Подрядчиком счёта и счёта-фактуры;

- денежная сумма в размере 5% от стоимости выполненных подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ, удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания) и выплачивается после устранения недостатков, выявленных при приемке работ и подписания акта приемки Объекта в течении двух месяцев.

Генподрядчиком может быть предоставлен аванс на приобретение конструкций, материалов и оборудования в размере 30% от цены Договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.

Истец указал, что с учетом договоренности об увеличении стоимости работ он перечислил в адрес ответчика 8 511 105 руб., что является авансом согласно п. 4.3 договора.

Денежные средства перечислены по платежным поручениям № 201 от 04.11.2020 на сумму 275 105,35 руб.; № 246 от 22.12.2020 на сумму 200 000 руб.; № 258 от 29.12.2020 на сумму 700 000 руб.; № 259 от 30.12.2020 на сумму 180 000 руб.; № 9 от 02.02.2021 на сумму 2 500 000 руб.; № 65 от 29.06.2021 на сумму 4 656 000 руб.

Истцом обязательства по договору выполнены в полном объеме, однако ответчик обязательства в полном объеме не выполнил, работы не выполнил.

В связи с тем, что ответчик к выполнению работ на объекте не приступил, истцу работы не сдал, истец 29.11.2021 направил ответчику уведомление об отказе от исполнения договора в порядке ст. 450.1 ГК РФ и претензию с требованием о возврате уплаченных денежных средств в размере 8 511 105,35 руб. Требования претензии ответчиком не исполнены.

30.10.2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" (генеральный подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ТТ-СТРОЙ" (подрядчик) заключен договор подряда № 3-20, по которому генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией в установленный Договором срок работы (далее - Работы) по объекту "Благоустройство велосипедной дорожки в Краснокамском районе Республики Башкортостан" (далее - объект) в соответствии с условиями договора, действующими техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить в установленном Договором порядке.

Согласно п. 2.1 договора календарные сроки выполнения работ по договору: начало работ: с даты заключения настоящего договора окончание работ: 30 июля 2020г.

Сроки завершения отдельных видов Работ определяются совмещенным графиком выполнения работ и финансирования, утвержденным Подрядчиком и Генподрядчиком (Приложение №1) (п. 2.2).

В силу п. 3.1 договора цена договора определяется ведомостью договорной цены (Приложение №2) и установлена сторонами в размере 13 908 313,92 руб. (Тринадцать миллионов девятьсот восемь тысяч триста тринадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20% - 2 318 052,32 руб.

В соответствии с п. 3.3 договора после поступления денежных средств от Фонда Генподрядчик вправе перечислить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены, установленной в пункте 3.1 Договора.

Согласно п. 3.4 договора генподрядчик производит оплату выполненных подрядчиком работ в следующем порядке (с учетом аванса):

- денежная сумма в размере 95% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ перечисляется Подрядчику в течение 5 (пяти) дней после поступления денежных средств от Фонда на основании подписанных Генподрядчиком актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 с удержанием аванса указанного в п. 3.3. настоящего договора, на основании выставленных Подрядчиком счёта и счёта-фактуры;

- денежная сумма в размере 5% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ, удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания) и выплачивается после устранения недостатков, выявленных при приемке работ и подписания акта приемки Объекта в течении двух месяцев.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема Работ и иных условий исполнения Договора (п. 3.5).

Истец указал, что по договору № 3-20 оплатил ответчику аванс в размере 4 172 494,17 руб., что подтверждается платежным поручением № 200 от 04.11.2021.

Ответчик по договору выполнил работы на сумму 4 797 574,22 руб., что подтверждается справкой № 1 от 22.06.2021.

По договору № 3-20 задолженность истца перед ответчиком составляет 625 080,05 руб.

Истец указал, что он оплатил ответчику в совокупности по обоим договорам 12 683 599,52 руб. (8 511 105,35 руб. по договору № 2-20 + 4 172 494,17 руб. по договору № 3-20), ответчик выполнил работы по договору №3-20 на сумму 4 797 574,22 руб.

Таким образом, с учетом зачета задолженности истца перед ответчиком по договору № 3-20 в размере 625 080,05 рублей, ответчик не освоил денежные средства в размере 7 886 025,3 руб.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленных договоров подряда №2-20 от 30.10.2020г., №3-20 от 30.10.2020г., суд приходит к выводу, что сторонами заключены договоры подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договоры подряда №2-20 от 30.10.2020г., №3-20 от 30.10.2020г. содержат все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из материалов дела следует, что 30.10.2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" (генеральный подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ТТ-СТРОЙ" (подрядчик) заключен договор подряда № 2-20, по которому подрядчик обязуется по заданию генподрядчика выполнить полный комплекс работ по созданию Объекта: строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, подключение завершенного строительством Объекта к инженерным сетям, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Объектом в целях настоящего договора является «Строительство детской площадки в парке им. Г. Бухараева в с. Киргиз-Мияки» Миякинский район Республики Башкортостан г. Нефтекамск Республики Башкортостан (далее по тексту - Объект).

Согласно п. 2.2 договора перечень, состав и объем работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего договора, приобретаемых конструкций, материалов и оборудования определяются в проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 3.1 договора подрядчик выполняет весь комплекс работ, являющийся предметом настоящего договора в следующие сроки:

Начало Работ - с даты подписания настоящего договора.

Окончание Работ - 30.07.2021 г.

В силу п. 4.1 договорацена договора определяется ведомостью договорной цены (Приложение №2) и составляет 5 503 124,00 руб. (Пять миллионов пятьсот три тысячи сто двадцать четыре) рублей, в том числе НДС 20% - 917 187,33 руб., Цена Договора включает в себя стоимость всех работ, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, а также расходы Подрядчика на приобретение, поставку и монтаж оборудования, материалов, конструкций в объеме, необходимом для завершения Объекта строительством согласно проектно-сметной документации, включая затраты на подключение Объекта к сетям инженерно- технического обеспечения, с благоустройством прилегающей территории, а также расходы согласно п. 5.29 настоящего договора.

Финансирование работ по настоящему Договору производится Фондом социальных целевых программ (далее - Фонд). В случае изменения Фондом объема финансирования, цена Договора и объем выполняемых работ подлежат корректировке путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В соответствии с п. 4.3 договора оплата осуществляется при условии соблюдения Графика производства работ (Приложение №1) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке (с учетом аванса):

- денежная сумма в размере 95% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ перечисляется Подрядчику в течение 5 (пяти) дней после поступления денежных средств от Фонда на основании подписанных Генподрядчиком актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 с удержанием аванса, пропорционально объему выполненных работ, на основании выставленных Подрядчиком счёта и счёта-фактуры;

- денежная сумма в размере 5% от стоимости выполненных подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ, удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания) и выплачивается после устранения недостатков, выявленных при приемке работ и подписания акта приемки Объекта в течении двух месяцев.

Генподрядчиком может быть предоставлен аванс на приобретение конструкций, материалов и оборудования в размере 30% от цены Договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.

30.10.2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" (генеральный подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ТТ-СТРОЙ" (подрядчик) заключен договор подряда № 3-20, по которому генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией в установленный Договором срок работы (далее - Работы) по объекту "Благоустройство велосипедной дорожки в Краснокамском районе Республики Башкортостан" (далее - объект) в соответствии с условиями договора, действующими техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить в установленном Договором порядке.

Согласно п. 2.1 договора календарные сроки выполнения работ по договору: начало работ: с даты заключения настоящего договора окончание работ: 30 июля 2020г.

Сроки завершения отдельных видов Работ определяются совмещенным графиком выполнения работ и финансирования, утвержденным Подрядчиком и Генподрядчиком (Приложение №1) (п. 2.2).

В силу п. 3.1 договора цена договора определяется ведомостью договорной цены (Приложение №2) и установлена сторонами в размере 13 908 313,92 руб. (Тринадцать миллионов девятьсот восемь тысяч триста тринадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20% - 2 318 052,32 руб.

В соответствии с п. 3.3 договора после поступления денежных средств от Фонда Генподрядчик вправе перечислить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены, установленной в пункте 3.1 Договора.

Согласно п. 3.4 договора генподрядчик производит оплату выполненных подрядчиком работ в следующем порядке (с учетом аванса):

- денежная сумма в размере 95% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ перечисляется Подрядчику в течение 5 (пяти) дней после поступления денежных средств от Фонда на основании подписанных Генподрядчиком актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 с удержанием аванса указанного в п. 3.3. настоящего договора, на основании выставленных Подрядчиком счёта и счёта-фактуры;

- денежная сумма в размере 5% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ, удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания) и выплачивается после устранения недостатков, выявленных при приемке работ и подписания акта приемки Объекта в течении двух месяцев.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема Работ и иных условий исполнения Договора (п. 3.5).

В связи с выполнением ООО «ТТ-Строй» строительных работ по договорам подряда № 2-20 и № 3-20 ООО «ГрадСтройСервис» всего в адрес ООО «ТТ-Строй» выплачены суммы:

Сведения об оплате от ООО «ГрадСтройСервис»

№

оплата (платежное поручение)

сумма

1

Платежное поручение от 04.11.2020 № 201

275 105, 35 руб.

2

Платежное поручение 04.11.2020 № 200 (3-20)

4 172 494,17 руб.

3

Платежное поручение от 22.12.2020 № 246

200 000 руб.

4

Платежное поручение от 29.12.2020 № 258

700 000 руб.

5

Платежное поручение от 30.12.2020 № 259

180 000 руб.

6

Платежное поручение от 02.02.2021 № 9

2 500 000 руб.

7

Платежное поручение от 29.06.2021 № 65

4 656 000 руб.

 

Итого: 12 683 599,5 руб.

 

Суд отмечает, что между сторонами, вопреки утверждениям, изложенным в исковом заявлении ООО «ГрадСтройСервис», ни устных, ни письменных соглашений об увеличении цены договора, не заключались, материалы дела не содержат. 

Работы по договору №2-20 от 30.10.2020, в соответствии с поручениями ООО "ГрадСтройСервис", выполнены ООО "ТТ-Строй" в объемена сумму 4 007 223,4 руб., что подтверждается следующими документами:

№

Унифицированная форма КС-2, КС-3

Отчетный период

Стоимость выполненных работ за период

 Стоимость выполненных работ с начала проведения работ

1

Справка № 1 о стоимости выполненных работ и затрат от 17.12.2021 по договору № 2-20 от 30.10.2020

С 30.10.2020 по 17.12.2020

2 319 642,59 руб.

2 319 642,59 руб.

2

Акт о приемке выполненных работ от 17.12.2021 № 1-1 по договору №2-20 от 30.10.2020

 

3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 14.12.2021 по договору № 2-20 от 30.10.2020

С 18.12.2020 по 14.12.2021

1 687 580,84 руб.

4 007 223,43 руб.

4

Акт о приемке выполненных работ от 14.12.2021 № 2-1 по договору №2-20 от 30.10.2020

 

Итого: 4 007 223,4 руб.

 

Таким образом, по состоянию на 14.12.2021 ООО «ТТ-Строй» по Договору подряда № 2-20 от 30.10.2020 работы выполнены в полном объеме, оплата по ним ООО «ГрадСтройСервис» в сумме 4 007 223,4 руб. произведена в полном объеме по указанными выше платежами.

В части доводов искового заявления, в которых ООО «ГрадСтройСервис» утверждает о направлении в адрес ООО «ТТ-Строй» уведомления (письма) от 29.11.2021 об отказе от исполнения договора № 2-20 от 30.10.2020 необходимо отметить, что согласно приложенному кассовому чеку от 29.11.2021 (трек отслеживания № 45009363042606) письмо, без описи вложения, было направлено в адрес ответчика по адресу: РБ, 

<

...>. Вместе с тем, юридическим адресом местонахождения ООО «ТТ-Строй» является РБ, 

<

...>. 

Работы по договору № 3-20 от 30.10.2020, в соответствии с поручениями ООО «ГрадСтройСервис», выполнены ООО «ТТ-Строй» в полном объеме, что подтверждается следующими документами:

№

Унифицированная форма

КС-2, КС-3

Отчетный период

Стоимость выполненных работ за период

Стоимость выполненных работ с начала проведения работ

1

Справка № 1 о стоимости выполненных работ и затрат от 22.06.2021 по договору № 3-20 от 30.10.2020

с 30.10.2020 по 22.06.2021

4 797 574, 22 руб.

4 797 574, 22 руб.

2

Акт о приемке выполненных работ от 22.06.2021 № 1-1 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

3

Акт о приемке выполненных работ от 22.06.2021 № 1-2 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

4

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 29.10.2021 по договору № 3-20 от 30.10.2020

с 23.06.2021 по 29.10.2021

5 306 589, 55 руб.

10 104 163,77

5

Акт о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 2-1 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

6

Акт о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 2-2 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

7

Акт о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 2-3 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

8

Акт о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 2-4 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

9

Акт о приемке выполненных работ

от 29.10.2021 № 2-5 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

10

Акт о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 2-6 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

11.

Акт о приемке выполненных работ от 29.10.2021 № 2-7 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

12

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 15.11.2021 по договору № 3-20 от 30.10.2020

с 30.10.2021 по 15.11.2021

2 116 570, 18 руб.

12 220 773,95 руб.

13

Акт о приемке выполненных работ от 15.11.2021 № 3-1 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

14

Акт о приемке выполненных работ от 15.11.2021 № 3-2 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

15

Акт о приемке выполненных работ от 15.11.2021 № 3-3 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

16

Акт о приемке выполненных работ от 15.11.2021 № 3-4 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

17

Акт о приемке выполненных работ от 15.11.2021 № 3-5 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

18

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 27.12.2021 по договору № 3-20 от 30.10.2020

с 16.11.2021 по 27.12.2021

1 272 640,64 руб.

13 493 374, 59 руб.

19

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-1 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

20

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-2 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

21

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-3 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

22

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-4 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

23

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-5 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

24

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-6 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

25

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-7 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

26

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-8 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

27

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-9 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

28

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-10 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

29

Акт о приемке выполненных работ от 27.12.2021 № 4-11 по договору №3-20 от 30.10.2020

 

Итого: 13 493 374,59 руб. 

 

Таким образом, по договору подряда № 3-20 от 30.10.2020 работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 13 493 374, 59 руб.

Ранее приведенные расчеты показывают, что общество «ГрадСтройСервис» на расчетный счет ООО «ТТ-Строй» в совокупности по Договору № 2-20 и № 3-20 направлены денежные средства в сумме: 12 683 599,5 руб.

Учитывая, что за исполнение работ по договору № 2-20 от 30.10.2020 ООО«ТТ-Строй» принята к зачету сумма в размере 4 007 223, 43 руб., а сумма в размере 8 676 376, 07 руб. принята к зачету по договору № 3-20 от 30.10.2020 (12683599,5руб - 4007223,43 руб. = 8676376,07 руб.), остаток составляет 4 816 998,43 руб.

В силу статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Из содержания названной нормы следует, что для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух обстоятельств: обогащение одного лица за счет другого и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом, правовым актом или сделкой оснований.

Таким образом, поскольку работы по договорам подряда были выполнены ответчиком, перечисленные истцом денежные средства в размере 7 886 025 руб. 30 коп. являются оплатой за выполненные работы и не подлежат взысканию в качестве неосновательного обогащения.

В  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию в федеральный бюджет ввиду предоставленной отсрочки уплаты госпошлины при подачи иска и отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями   110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Градстройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 62 430 руб.

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П. Кузнецов