ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело №А65-2866/2024

г. Самара

16 августа 2024 года

11АП-10654/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 8 августа 2024 года

Постановление в полном объеме изготовлено 16 августа 2024 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Морозова В.А., 

судей Деминой Е.Г., Котельникова А.Г., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Колесовой М.С.,

с участием:

от истца –  ФИО1, представитель (доверенность от 25.07.2024, диплом №108 от 12.03.2015), ФИО2, представитель (доверенность от 24.05.2024, диплом №8262 от 11.11.2006);

в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства,

рассмотрев в открытом судебном заседании 8 августа 2024 года в зале № 1 помещения суда апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Новгородская транспортная компания «Лидер» на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 мая 2024 года по делу №А65-2866/2024 (судья Харин Р.С.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга,

к обществу с ограниченной ответственностью «Новгородская транспортная компания «Лидер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Новгородская область, г.Великий Новгород,

о взыскании 20500000 руб. – договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 78327208 руб. 29 коп. – убытков,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент» (далее –    ООО «Алабуга Девелопмент», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Новгородская транспортная компания «Лидер» (далее – ООО «НТК «Лидер», ответчик) о взыскании 20500000 руб. – договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 20450000 руб., 150000 руб., 57500 руб., 270000 руб. – штрафов по указанным основаниям, 78327208 руб. 29 коп. – убытков (с учетом принятого судом уменьшения размера исковых требований).

До принятия решения по делу истец заявил отказ от исковых требований в части взыскания штрафов в суммах 20450000 руб., 150000 руб., 57500 руб., 270000 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.05.2024 принят отказ от исковых требований ООО «Алабуга Девелопмент» в части взыскания штрафов в суммах 20450000 руб., 150000 руб., 57500 руб., 270000 руб., производство по делу №А65-2866/2024 в указанной части прекращено. Исковые требования удовлетворены, с ООО «НТК «Лидер» в пользу ООО «Алабуга Девелопмент» взысканы 20500000 руб. – договорной неустойки, 78327208 руб. 29 коп. – заранее оцененных убытков, а также 200000 руб. – судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего 99027208 руб. 29 коп.

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил обжалуемое решение изменить как незаконное и необоснованное и принять по делу новый судебный акт, которым отказать полностью во взыскании 78327208 руб. 29 коп. – заранее оцененных убытков, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела и нарушение судом норм материального и процессуального права.

По мнению ответчика, сумма заранее оцененных убытков направлена на возмещение имущественных потерь истца. В то же время, речь идет именно об убытках, а не об ином виде компенсации потерь истца. В материалах дела отсутствует информация о том, что истец понес имущественные потери или понесет их в будущем в связи с виновными действиями ответчика.

Ответчик считает, что установленная сторонами ответственность в виде заранее оцененных убытков является компенсацией, при этом суд первой инстанции не выяснил, возникли ли условия для выплаты компенсации. Заказчик строительства до настоящего времени не обращался к истцу с требованиями о взыскании неустоек, штрафов или убытков, в связи с чем условия, предусмотренные договором подряда от 22.10.2022, для взыскания заранее определенных убытков не наступили.

Кроме того, ответчик в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции оспаривал факт заключенности договора и факт просрочки выполнения работ на спорном объекте.

В апелляционной жалобе ответчик также сослался на то, что суд первой инстанции, взыскивая заранее определенные убытки одновременно с неустойкой, не изложил мотивы применения двойной меры ответственности за одно и то же нарушение (взыскание неустойки и заранее определенных убытков за просрочку выполнения работ), тогда как по условиям договора неустойка не является штрафной, то есть в силу статьи 330 ГК РФ направлена на компенсацию возникших у истца негативных последствий неисполнения ответчиком принятых на себя обязательств.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещен надлежащим образом.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу и в судебном заседании с доводами жалобы не согласился и просил обжалуемое решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. 

В соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, отзыве истца на апелляционную жалобу, заслушав выступления присутствующих в судебном заседании представителей истца, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 22.10.2022 между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) был заключен договор № 787/2022, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства своими и/или привлеченными силами и средствами, в сроки и на условиях настоящего договора, выполнить работы в соответствии с проектной документацией и графиком выполнения работ (приложение №1) и передать результат выполненных работ подрядчику, а подрядчик обязался принять выполненные работы в установленном порядке и оплатить их результат в порядке, предусмотренном договором. 

Сторонами предусмотрен перечень выполненных работ, в том числе: полный комплекс строительно-монтажных работ, приобретение и поставка строительных материалов и оборудования, монтаж, пуско-наладка оборудования, отделочные работы, благоустройство и озеленение территории, устранение возможных дефектов работ, иные работы (статья 2).

Статьей 3 договора стороны определили дату начала выполнения субподрядчиком работ 01.11.2022 и дату окончания – 27.10.2023. К указанному в настоящем пункте сроку субподрядчик должен завершить выполнение всех работ, предусмотренных графиком выполнения работ, оформить и сдать подрядчику выполнение по формам КС-2, КС-3 по последнему этапу работ, установленному приложением № 1, оформить и передать подрядчику комплект исполнительно документации на выполненные работы, устранить любые выявленные в процессе производства и приемки выполненных работ дефекты. Промежуточные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ. Штрафные санкции, установленные настоящим договоров, начинают исчисляться с дат, определенных настоящим договором и графиком выполнения работ. Субподрядчик обязался незамедлительно информировать подрядчика о событиях или обстоятельствах, которые могут оказать влияние на своевременное выполнение работ. В случае отставания по выполнению работ от сроков, предусмотренных графиком выполнения работ, субподрядчик обязался разработать и предоставить подрядчику план корректирующих мероприятий и пояснительную записку, описывающую предлагаемые субподрядчиком действия, которые возможно предпринять в целях ускорения хода работ так, чтобы выполнить все работы в сроки, установленные договором и предпринять все необходимые меры, направленные на максимальное сокращение отставания.

Цена договора составляет 522 181 388, 61 руб., в том числе НДС (20 %) и согласован сторонами в сводном сметном расчёте стоимости строительства (приложение № 2 к договору), в локальном сметном расчёте № ЛСР-02-01-01 (приложение № 2.1. к договору), локальном сметном расчёте № ЛСР-02-01-01.1 (приложение № 2.2. к договору). Цена договора является твердой и определяется применительно к согласованному сторонами объему работ по договору, в связи с чем уменьшение объема работ влечет соразмерное уменьшение цены договора (статья 4 договора). 

Статьей 6 договора субподрядчик подтвердил, что несет полную ответственность за выполнение работ по договору в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и проектной документацией. До момента подписания договора изучил его текст, всех приложений к нему, проверил проектную документацию по договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые бы могли повлиять на сроки, стоимость и качество работ, принимает на себя все расходы, риски и трудности, возникающие при выполнении работ. 

В том числе, если субподрядчик считает, что для выполнения работ требуется дополнительно разработать детальные проектные решения, то он это делает собственными силами и за свой счет. Сроки разработки детальных проектных решений не влияют на сроки выполнения работ и этапов работ по договору. 

Субподрядчик обязан письменно предупредить подрядчика при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленной подрядчиком проектной и рабочей документации; возможных неблагоприятных для подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и услуг; иных, не зависящих от субподрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество выполняемых работ либо создают невозможность использования подрядчиком результата выполненных работ. 

Субподрядчик несет полную ответственность за некачественное выполнение работ, если не предупредил подрядчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолжил выполнение работ, несмотря на указание подрядчика о её приостановки/прекращении. До момента подписания настоящего договора субподрядчик ознакомлен со строительной площадкой. Субподрядчик подтверждает, что строительная площадка отвечает всем необходимым требованиям для производства работ по договору. Претензий к состоянию, доступу к строительной площадке, а также готовности строительной площадки для выполнения работ, у субподрядчика не имеется. Иные работы, выполняемые субподрядчиком, не являются приоритетными по отношению к работам по договору. 

Подписанием настоящего договора субподрядчик подтверждает знание требований подрядчика к составлению локальных сметных расчетов. Исполнительная документация оформляется согласно ГОСТ Р 51872-2002 и требованиям подрядчика. Все работы, выполнение которых настоящим договором поручено субподрядчику, будут выполнены в полном соответствии с требованиями соответствующих разделов СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ, ТСН и других организационно-правовых норм, действующих на момент выполнения работ. Субподрядчик подтверждает, что он заключил настоящий договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной подрядчиком информации. Субподрядчик подтверждает, что в случае ненадлежащего ознакомления со всеми данными и информацией, предоставленными подрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по настоящему договору.

Статьей 7 стороны предусмотрели порядок и условия платежей, статьей 9 предусмотрен порядок сдачи-приемки выполненных работ. Статьей 15 предусмотрено рассмотрение споров в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

Договор № 787/2022 от 22.10.2022, с учетом приложений к нему, подписаны квалифицированными электронными подписями сторон, что соответствует положениям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об электронной подписи».

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). 

При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. 

В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Дополнительным соглашением № 1 стороны согласовали дополнительные работы и их стоимости, с учетом приложения № 2 к данному соглашению. Кроме того, сторонами договора были подписаны дополнительные соглашения № 2, № 3 к договору. 

По мнению истца, субподрядчик нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные графиком выполнения работ, в связи с чем в его адрес неоднократно направлялись претензии, уведомления об отказе от исполнения обязательств по договору. Учитывая принятый судом частичный отказ от иска, иные претензии истца не рассматриваются. 

В соответствии с п. 3.3 договора, промежуточные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 1 к договору), в отсутствии их выполнения подрядчиком, при непредставлении акта приема-передачи технической документации. 

Подпунктом «г» п. 13.3 договора предусмотрено, что субподрядчик при нарушении договорных обязательств, а именно, за нарушение сроков окончания любого из этапов работ, установленных графиком выполнения работ, уплачивает подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0, 2 % от цены договора за каждый день просрочки.  

Изначально истцом произведен расчет неустойки в размере 96 081 375, 50 руб.

Подпунктом «в» п. 13.3 договора предусмотрено, субподрядчик при нарушении договорных обязательств, а именно, за нарушение сроков начала любого из этапов работ, предусмотренных графиком выполнения работ, уплачивает подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки. Изначально истцом произведен расчет неустойки в размере 4 220 813, 56 руб.

При уточнении заявленных требований истец, в отсутствие каких-либо оплат со стороны ответчика, при поддержании обоснованности ранее представленных расчетов, в целях скорейшего рассмотрения спора по существу, пересчитал вышеуказанные суммы неустоек до 41 774 511, 09 руб. и 1 082 259, 89 руб., снизив их в добровольном порядке до 20 000 000 руб. и 500 000 руб. соответственно. 

Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору субподрядчик возмещает подрядчику непокрытые неустойками убытки подрядчика. Стороны пришли к соглашению установить ответственность субподрядчика за нарушение им обязательств по настоящему договору в виде заранее оцененных убытков подрядчика в размере 15% от цены договора. Установленная сторонами в настоящем пункте ответственность является компенсацией, но не является разновидностью неустойки, а также убытками в понимании ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Субподрядчик обязался выплатить подрядчику сумму в размере заранее оцененных убытков подрядчика в течение 5 банковских дней с момента направления соответствующего требования подрядчиком (п. 13.6 договора).

Указанная сумма 78 327 208, 29 руб. истцом при уточнении не изменялась.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим. 

На основании п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить работы. 

В порядке ст. 711, 746 ГК РФ, п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача подрядчиком результата работ заказчику. 

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. 

Указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков. 

Статьей 715 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

В соответствии со ст. 1 ГК РФ юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора. По общему правилу ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме. 

В силу положений ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащей случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Из представленного в материалы дела договора № 787/2022 от 22.10.2022, с учетом приложений и дополнительных соглашений к нему, протокола разногласий, следует, что они подписаны уполномоченными лицами, в них изложены все существенные условия определенные сторонами при подписании. 

При толковании условий договора в соответствии со ст. 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если эти правила не позволяют определить содержание договора, суд выясняет действительную общую волю сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

При заключении договора, а также подписании приложений и дополнительных соглашений к нему, в том числе учитывая положения статьи 6 договора, ответчик, располагая на преддоговорных стадиях, предшествующих заключению договора и на стадии его заключения полной информацией о предложенных условиях, добровольно принял на себя все права и обязанности, определенные письменной сделкой, исполняемой сторонами, в том числе относительно порядка начисления штрафов и заранее оцененных убытков.

С учетом изложенного суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы ответчика о незаключенности договора как необоснованные.  

Действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель: когда участник спора может лишиться права выдвигать возражения). 

Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно полагалась на них. В силу международного принципа эстоппель, который признается Конституцией Российской Федерации (ст. 15), сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности. 

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Кратко принцип "эстоппель" можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений. 

Таким образом, не подлежат судебной защите права лица, допустившего осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017) указывает, что сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора, не вправе ссылаться на незаключенность этого договора («эстоппель»). Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ).

Судом первой инстанции учтено подписание сторонами договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, получение авансовых платежей по договору, фактическое выполнение работ и проведение совещаний, что свидетельствует о длительном исполнении ответчиком договорных обязательств. 

При подаче искового заявления, в том числе в целях изменения договорной подсудности и попытки уклонения от согласованных условий по начислению неустоек, штрафов и убытков, ответчиком заявлены указанные возражения.

Возможно, такое осуществление процессуальных прав является деловым просчетом ответчика, однако, как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 № 3-П, судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод участников гражданского оборота, а не проверять экономическую целесообразность действий субъектов предпринимательской деятельности, поскольку последние обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса. Следовательно, суды не оценивают экономическую целесообразность подобных решений, так как в силу рискового характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.

Обязанность доказывания возложена на каждое лицо, участвующее в деле (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), при этом в соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Однако такая обязанность не является безграничной. 

Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально неподтвержденной позиции процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (ст. 8, 9 АПК РФ) (Определение Верховного суда Российской Федерации от 18.01.2018 № 305-ЭС17-13822). 

Гражданское законодательство основывается на необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также добросовестности участников гражданских правоотношений при осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей. Закон запрещает кому-либо извлечение преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения (ст. 1 ГК РФ). 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей (по крайней мере, не чинящего препятствий), в том числе в получении необходимой информации. 

При таких обстоятельствах судом первой инстанции обоснованно учтено, что с момента просрочки исполнения обязательств ответчиком прошел длительный период времени, за который ответчик не оплатил суммы начисленных неустоек, с учетом принципов добросовестности, разумности и справедливости, а также запрета извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, как того требуют положения п. 3 и 4 ст. 1, п. 2 ст. 6 и ст. 10 ГК РФ. 

Суд оценивает обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений. 

Как верно отмечено судом первой инстанции, доводы ответчика направлены на избежание исполнения предусмотренных договором обязательств, что противоречит нормам действующего законодательства и является недопустимым.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что выполнение работ ответчиком произведено с нарушением установленных сроков, в отсутствии документального подтверждения, что данные нарушения возникли по вине истца, либо иных субподрядчиков, выполняющих иные работы на данном объекте.

Доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиком не представлено (ст. 65, 68 АПК РФ).

Заключив договор, стороны совершили действия по его исполнению, что подтверждается представленными в материалы дела документами и не оспаривалось при рассмотрении дела. Следовательно, исходя из его условий истец считал возможным рассчитывать на соблюдение согласованных условий, в том числе по расчету неустойки и заранее оцененных убытков. Предпринимательская деятельность осуществляется ответчиком под свою ответственность, а следовательно, риски и убытки от осуществления такой деятельности юридическое лицо несет самостоятельно. Ответчиком не приведено доказательств ненадлежащего исполнения договорных обязательств истцом, следовательно, не доказана невозможность исполнения взятых на себя обязательств по договору. 

В порядке ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Ответчик несет самостоятельные риски предпринимательской деятельности и должен прогнозировать последствия, в том числе связанные с осуществлением определенных действий/бездействий.

По смыслу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Согласно ч. 1 ст. 333 Кодекса, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Поскольку факт нарушения сроков выполнения работ подтвержден материалами дела и ответчиком не опровергнут, с учетом положений статей 309, 310, 330, 331, 401, 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий пунктов 3.3., 13.3. договора суд первой инстанции, проверив представленный истцом расчет неустойки и признав его соответствующим условиям договора с учетом добровольного снижения истцом неустойки, правомерно удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 20500000 руб.

Ответчик отзыв на исковое заявление и контррасчет заявленных требований не представил, ходатайство о снижении договорной неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ не заявил.

Из разъяснений, изложенных в пунктах 69 и 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», следует, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Возражения ответчика относительно исковых требований не могут рассматриваться как заявление о несоразмерности неустойки и ходатайство о ее снижении.

Аналогичная правовая позиция выражена в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.2013 № 801/13 и от 17.06.2014 №1850/14, а также в пункте 29 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.06.2020).

Учитывая, что в суде первой инстанции ответчик не заявил об уменьшении неустойки и не представил доказательств о ее явной несоразмерности последствиям нарушения принятых на себя обязательств, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для снижения неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ.

Требования о снижении размера неустойки, которые не были заявлены в суде первой инстанции, не могут быть приняты и рассмотрены судом апелляционной инстанции в силу части 7 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 12 от 30.06.2020 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции».

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 78 327 208, 29 руб. заранее оцененных убытков. При заключении договора сторонами было определено, что данная сумма не относится к разновидности неустоек, а также не является убытками в силу ст. 15 ГК РФ. 

Договоренность сторон о возмещении заранее оцененных убытков является реализацией принципа свободы договора, не противоречит нормам действующего законодательства. 

Учитывая объективную сложность доказывания убытков участники экономического оборота вправе использовать различные механизмы, в том числе договориться об особенностях привлечения к гражданско-правовой ответственности, например, заранее оценить убытки на случай вероятного нарушения того или иного обязательства одной из сторон, установив своим соглашением способ определения размера убытков. 

Суть института заранее оцененных убытков заключается в том, что стороны при взыскании таких убытков в принудительном порядке не обязаны доказывать их возникновение, размер, причинно-следственную связь и иные необходимые условия для возмещения убытков, предусмотренных ст. 15, 393 ГК РФ. 

Сумма заранее оцененных убытков носит конкретный характер, поскольку отражает дифференцированную оценку последствий неисполнения отдельных условий договора, размер убытков за нарушение которых, как правило, носит неопределенный характер. При этом, содержательно такая оценка представляет не высчитанные с математической точностью убытки, а лишь разумное предположение в отношении размера предвидимых убытков. 

С учетом достигнутых сторонами договоренностей при заключении договора, истец не должен доказывать размер и основания возникновения данных убытков. При этом, данная сумма компенсирует потери истца, связанные с ненадлежащим исполнение договорных обязательств ответчиком, в отсутствии фактических данных о ее достаточности. Данная сумма направлена на возмещение имущественных потерь истца. 

При наличии правовых оснований, с учетом вступления судебного акта по делу №А65-37505/2023 в законную силу, стороны не лишены возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

С учетом рассмотрения конкретного искового заявления (предмет и основания), судом вышеуказанные обстоятельства, в том числе выполнение работ указанными истцом субподрядчиками, не выясняются. 

При рассмотрении данного спора судом не установлено недобросовестности со стороны истца, учитывая условия договора и нормы действующего законодательства. 

Ознакомившись с условиями договора, в том числе учитывая статью 6, ответчик был вправе отказаться от его заключения, оценивая риск наступления негативных последствий, связанных с нарушением обязательств, в т.ч. в виде возможного взыскания с него убытков, не подлежащих доказыванию, в размере 15% от цены договора, начисления штрафов и неустоек. 

Однако, ответчик согласился с данными условиями, заключил договор и приступил к исполнению, в отсутствии оспаривания конкретных пунктов при подписании протокола разногласий. Требования истца связаны с ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования.

Доводы апелляционной жалобе о применении двойной меры ответственности за одно и то же нарушение (взыскание неустойки и заранее определенных убытков за просрочку выполнения работ) являются несостоятельными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

В пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 49 от 25.12.2018 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

Проанализировав условия пунктов 13.3., 13.6. договора с учетом их буквального толкования в соответствии с положениями статей 329, 330, 394, 421, 422, 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, оценив обстоятельства дела и представленные доказательства, существо правоотношений, сложившихся между сторонами, действительную волю сторон с учетом цели договора, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что предусмотренные пунктом 13.3. договора неустойки носят штрафной характер, то есть убытки, предусмотренные пунктом 13.6. договора, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

Таким образом, приведенные в апелляционной жалобе доводы не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут поставить под сомнение правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

По существу доводы жалобы сводятся к несогласию ответчика с оценкой судом представленных в материалы дела доказательств и исследованных обстоятельств, что не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое ответчиком решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены или изменения отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 мая 2024 года по делу №А65-2866/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Новгородская транспортная компания «Лидер» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа. 

Председательствующий судья

Судьи

В.А. Морозов

Е.Г. Демина

А.Г. Котельников