АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дело № А43-20010/2024 

г. Нижний Новгород «15» октября 2024 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

Судьи Левашовой Елены Алексеевны (шифр дела 34-251) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Поляковой О.А.  рассмотрел в судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью "Стекло-Люкс" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании исполнить обязательства, неустойки, при участии представителей: 

от истца: ФИО1 (доверенность от 14.06.2024),  от ответчика: ФИО2 (доверенность от 01.01.2024),  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течении 30 дней с момента вступления в законную  

силу решения суда по настоящему делу выполнить обязательства, предусмотренные  разделом Х технических условий, являющихся приложением к договору № 521055765  от 11.01.2022, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью  "Стекло-Люкс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и публичным акционерным  обществом "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а  именно:  

- запроектировать и выполнить реконструкцию ЛЭП 35 кВ № 3516 «Ситники- Каликино» в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения и замены  промежуточной опоры № 12 на ответвительную. Тип, состав оборудования и объем  работ уточнить при проектировании;  

- Запроектировать и построить ЛЭП 35 кВ от опоры № 12 ЛЭП 35 кВ № 3516 «Ситники- Каликино» до границы земельного участка, проводом марки АС-50 протяженностью  0,050 км. Марку провода, сечение и объем работ уточнить при проектировании;  

- Запроектировать и установить реклоузер в точке присоединения к ЛЭП 35 кВ № 3516  «Ситники-Каликино» в соответствии с заявленной нагрузкой. Тип, марку и объем работ  уточнить при проектировании;  

-Установить на границе балансовой принадлежности трехфазный учет  электроэнергии с применением электросчетчиков косвенного включения с  трансформаторами тока и напряжения соответствующими максимальной мощности  энергопринимающих устройств;  

- Мероприятия по реализации технических условий исполнить до границ участка, на  котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства истца.  

 Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Стекло-Люкс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 16 950,35  руб. пени, пени за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, исчисленные в размере 0,25% от суммы 6 780 138,07 руб. за каждый  день просрочки, начиная с 13.01.2024г. по день фактического исполнения мероприятий,  предусмотренных разделом Х технических условий, являющихся приложением к  договору № 521055765 от 11.01.2022, 8 000 руб. государственной пошлины.  

 Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Стекло-Люкс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в случае  неисполнения решения суда денежные средства в размере 7 000 руб. за каждый день  

неисполнения решения суда, начиная с 31 дня после вступления решения в законную  силу и до момента фактического исполнения.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со  дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.А.Левашова