ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело №А55-33031/2016

г. Самара

8 июня 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 1 июня 2017 года

Постановление в полном объеме изготовлено 8 июня 2017 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Морозова В.А., 

судей Балашевой В.Т., Деминой Е.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием:

от истца – ФИО2, представитель(доверенность № Юр 13/5 от 26.12.2016);

от ответчика – ФИО3, нач. юротдела (доверенность № 20 от 05.10.2016);

в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства,

рассмотрев в открытом судебном заседании 1 июня 2017 года в зале № 2 помещения суда апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Инкон-М» на решение Арбитражного суда Самарской области от 28 марта 2017 года по делу                 №А55-33031/2016 (судья Бибикова Н.Д.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «СК Полюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Самара,

к обществу с ограниченной ответственностью «Инкон-М» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Самара,

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «Промтехстейт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Самара,

о взыскании 1505661 руб. 37 коп.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СК Полюс» (далее – ООО «СК Полюс», истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Инкон-М» (далее – ООО «Инкон-М», ответчик) о взыскании 1505661 руб. 37 коп. – задолженности по договорам субподряда № 08/05/02 от 24.07.2014, № 04/05/03 от 01.12.2014 и № 04/05/04 от 01.12.2014.

Определением суда от 03.02.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Промтехстейт» (далее – ООО «Промтехстейт», третье лицо). 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28.03.2017 исковые требования удовлетворены. 

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить как незаконное и необоснованное и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, и несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу и в судебном заседании с доводами жалобы не согласился и просил обжалуемое решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. 

Третье лицо отзыв на апелляционную жалобу не представило, в судебное заседание не явилось, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещено надлежащим образом.

В соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, отзыве истца на апелляционную жалобу, заслушав выступления присутствующих в судебном заседании представителей сторон, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «СК Полюс» (субподрядчик) и ООО «Инкон-М» (генподрядчик) были заключены договоры субподряда № 08/05/02 от 24.07.2014, № 04/05/03 от 01.12.2014 и № 04/05/04 от 01.12.2014.

По условиям договора № 08/05/02 от 24.07.2014  субподрядчик принял на себя обязательства по заданию генподрядчика выполнить строительно-монтажные работы по утеплению и отделке фасада на объекте: «2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Пятая Просека» с последующей сдачей результата работ генподрядчику, а генподрядчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную договором стоимость работ в соответствии с пунктом 2 договора (т. 1, л.д.10-24).

Согласно пункту 1.2. договора № 08/05/02 от 24.07.2014  субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. договора, собственными силами и силами привлеченных организаций (по письменному согласованию с генподрядчиком) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ. Ответственность за работы, выполненные привлеченными организациями, возлагается на субподрядчика.

Работы, указанные в пункте 1.1. договора, выполняются в несколько этапов (поэтапно), согласно приложению № 2 к настоящему договору «График выполнения работ». Стоимость каждого этапа выполненных работ определяется суммой актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, принятых генподрядчиком.

Стоимость работ и порядок расчетов согласован сторонами в разделе 2 договора №08/05/02 от 24.07.2014: ориентировочная цена договора определена в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора, с указанием единичных расценок, включает в себя выполнение всех необходимых работ на объекте, и составляет 12610161 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18% - 1923583 руб. 96 коп. (приложение № 1 Смета на строительно-монтажные работы по утеплению и отделке фасада).

Пунктом 2.2. договора предусмотрено, что изменение стоимости работ по настоящему договору допускается в случае внесения генподрядчиком изменений в утвержденную проектную документацию, если эти изменения повлекут за собой изменение номенклатуры количества изделий и материалов, а также объемов и (или) сроков выполнения работ, выполняемых субподрядчиком по договору. Изменение цены договора допускается по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к договору, подписанному представителями обеих сторон.

Дополнительным соглашением № 2 от 03.07.2015 к договору № 08/05/02 от 24.07.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 410906 руб. 50 коп. в соответствии со сметой № 2.

Дополнительным соглашением № 3 от 03.07.2015 к договору № 08/05/02 от 24.07.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 355363 руб. в соответствии со сметой № 2.

Дополнительным соглашением № 3 от 14.10.2015 к договору № 08/05/02 от 24.07.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 138107 руб. 11 коп. в соответствии со сметой № 3.

Согласно пункту 2.3. договора окончательная цена договора № 08/05/02 от 24.07.2014 определяется на основании фактически выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ, подтвержденных актами выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, принятых генподрядчиком.

Субподрядчик не позднее 20 числа текущего месяца предоставляет генподрядчику акт выполненных работ по форме и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. В случае предоставления материалов для выполнения работ по договору генподрядчиком - отчет об использовании давальческого материала. В течении 10 рабочих дней с момента получения генподрядчик обязан подписать представленные акты выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 или дать мотивированный отказ от подписания (пункт 2.4. договора).

В соответствии с пунктом 2.5. договора оплата выполненных работ производится генподрядчиком не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного субподрядчиком счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика.

Дополнительным соглашением № 1 от 24.07.2014 к договору № 08/05/02 от 24.07.2014 в соответствии с пунктом 2.7. договора стороны установили, что генподрядчик производит расчеты за выполненные работы на следующих условиях: подрядчик обязуется привлечь физических ли для приобретения объектов недвижимости, расположенных по адресам, в количестве и по ценам, указанным в таблице дополнительного соглашения, с последующим заключением ими договоров приобретения объектов недвижимости. Генподрядчик перечисляет подрядчику денежные средства за выполненные работы по договорам после оформления с физическим лицом договора долевого участи и произведения по нему оплаты. (т. 1, л.д. 65-66).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 3 договора: начало производства работ – 01.09.2014; окончание производства работ – 30.06.2015. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по взаимному соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. Допускается досрочное выполнение работ. Датой окончания работ по договору будет считаться дата подписания генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, в соответствии с пунктом 7.2. договора, предусматривающим, что после выполнения субподрядчиком всех работ по договору субподрядчик письменно уведомляет о готовности работ, и стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, либо составляется мотивированный отказ генподрядчика от приемки работ по договору.

По условиям договора № 04/05/03 от 01.12.2014 субподрядчик принял на себя обязательства по заданию генподрядчика выполнить строительно-монтажные работы по утеплению и отделке фасада на объекте: «3-й этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Пятая Просека» с последующей сдачей результата работ генподрядчику, а генподрядчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость работ в соответствии с пунктом 2 договора (т. 1, л.д. 25-37).

Согласно разделу 2 договора ориентировочная цена договора определена в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора, с указанием единичных расценок, включает в себя выполнение всех необходимых работ на объекте, и составляет 13113661 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18% - 2000389 руб. 04 коп. (приложение № 1: Смета на строительно-монтажные работы по утеплению и отделке фасада).

Пунктом 2.2. договора предусмотрено, что изменение стоимости работ по настоящему договору допускается в случае внесения генподрядчиком изменений в утвержденную проектную документацию, если эти изменения повлекут за собой изменение номенклатуры количества изделий и материалов, а также объемов и (или) сроков выполнения работ, выполняемых субподрядчиком по настоящему договору. Изменение цены настоящего договора допускается по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, подписанному представителями обеих сторон.

Согласно пункту 2.3. договора окончательная цена договора № 04/05/03 от 01.12.2014 определяется на основании фактически выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ, подтвержденных актами выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, принятых генподрядчиком.

Дополнительным соглашением № 2 от 24.11.2015 к договору № 04/05/03 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 330568 руб. 53 коп. в соответствии со сметой № 2 (т. 2, л.д. 100).

Дополнительным соглашением № 3 от 29.04.2016 к договору № 04/05/03 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 350968 руб. 18 коп. в соответствии со сметой № 3 (т. 2, л.д. 102).

Дополнительным соглашением № 4 от 29.04.2016 к договору № 04/05/03 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 14046 руб. 96 коп. в соответствии со сметой № 4 (т. 2, л.д. 104).

Дополнительным соглашением № 5 от 29.04.2016 к договору № 04/05/03 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 43236 руб. 32 коп. в соответствии со сметой № 5 (т. 2, л.д. 106).

Субподрядчик не позднее 20 числа текущего месяца предоставляет генподрядчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. В случае предоставления материалов для выполнения работ по настоящему договору генподрядчиком - отчет об использовании давальческого материала. В течении 10 рабочих дней с момента получения, генподрядчик обязан подписать представленные акты выполненных работ по форме КС-3 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 или дать мотивированный отказ от подписания (пункт 2.4. договора).

В соответствии с пунктом 2.5. договора оплата выполненных работ производится генподрядчиком не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного субподрядчиком счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.12.2014 к договору № 04/05/03 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению, что генподрядчик производит расчеты за выполненные работы на следующих условиях: подрядчик обязуется привлечь физических ли для приобретения объектов недвижимости, расположенных по адресам, в количестве и по ценам, указанным в таблице дополнительного соглашения, с последующим заключением ими договоров приобретения объектов недвижимости. генподрядчик перечисляет подрядчику денежные средства за выполненные работы по договорам после оформления с физическим лицом договора долевого участи и произведения по нему оплаты (т. 1, л.д. 69-70).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 3 договора: начало производства работ – 01.05.2015; окончание производства работ – 30.11.2015. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по взаимному соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. Допускается досрочное выполнение работ. Датой окончания работ по договору будет считаться дата подписания генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, в соответствии с пунктом 7.2. договора, предусматривающим, что после выполнения субподрядчиком всех работ по договору субподрядчик письменно уведомляет о готовности работ, и стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, либо составляется мотивированный отказ генподрядчика от приемки работ по договору.

Дополнительным соглашением № 1 от 12.11.2015 к договору № 04/05/03 от 01.12.2014 стороны установили новый срок окончания производства работ – 31.05.2016 (т. 2, л.д. 98).

По условиям договора № 04/05/04 от 01.12.2014 субподрядчик принял на себя обязательства по заданию генподрядчика выполнить строительно-монтажные работы по утеплению и отделке фасада на объекте: «4-й этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Пятая Просека» с последующей сдачей результата работ генподрядчику, а генподрядчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость работ в соответствии с пунктом 2 договора (т. 1, л.д. 38-50).

В разделе 2 договора стороны согласовали стоимость работ, порядок расчетов, согласно которому ориентировочная цена договора определена в соответствии со сметной документацией, с указанием единичных расценок, включает в себя выполнение всех необходимых работ на объекте, и составляет 13113661 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18% - 2000389 руб. 04 коп. (приложение № 1: Смета па строительно-монтажные работы по утеплению и отделке фасада).

Пунктом 2.2. договора предусмотрено, что изменение стоимости работ по настоящему договору допускается в случае внесения генподрядчиком изменений в утвержденную проектную документацию, если эти изменения повлекут за собой изменение номенклатуры количества изделий и материалов, а также объемов и сроков выполнения работ, выполняемых субподрядчиком по настоящему договору. Изменение цены настоящего договора допускается по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, подписанному представителями обеих сторон.

Согласно пункту 2.3. договора окончательная цена настоящего договора определяется на основании фактически выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ, подтвержденных актами выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, принятых генподрядчиком.

Дополнительным соглашением № 2 от 17.11.2015 к договору № 04/05/04 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 112230 руб. 04 коп. в соответствии со сметой № 2 (т. 2, л.д. 145).

Дополнительным соглашением № 3 от 22.12.2015 к договору № 04/05/04 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 92993 руб. 68 коп. в соответствии со сметой № 3 (т. 2, л.д. 147).

Дополнительным соглашением № 4 от 15.02.2016 к договору № 04/05/04 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 240432 руб. 02 коп. в соответствии со сметой № 2 (т. 2, л.д. 149).

Дополнительным соглашением № 5 от 29.04.2016 к договору № 04/05/04 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 351404 руб. 31 коп. в соответствии со сметой № 2 (т. 2, л.д. 151).

Дополнительным соглашением № 6 от 29.04.2016 к договору № 04/05/04 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению увеличить объем выполнения работ по договору на сумму 14046 руб. 96 коп. в соответствии со сметой № 6 (т. 2, л.д. 153).

Субподрядчик не позднее 20 числа текущего месяца предоставляет генподрядчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. В случае предоставления материалов для выполнения работ по настоящему договору генподрядчиком - отчет об использовании давальческого материала. В течении 10 рабочих дней с момента получения, генподрядчик обязан подписать представленные акты выполненных работ по форме КС-3 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 или дать мотивированный отказ от подписания (пункт 2.4. договора).

Оплата выполненных работ производится генподрядчиком не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного субподрядчиком счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.12.2014 к договору № 04/05/04 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению, что генподрядчик производит расчеты за выполненные работы на следующих условиях: подрядчик обязуется привлечь физических ли для приобретения объектов недвижимости, расположенных по адресам, в количестве и по ценам, указанным в таблице дополнительного соглашения, с последующим заключением ими договоров приобретения объектов недвижимости. Генподрядчик перечисляет подрядчику денежные средства за выполненные работы по договорам после оформления с физическим лицом договора долевого участи и произведения по нему оплаты (т. 1, л.д. 67-68).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 3 договора: начало производства работ – 01.05.2015; окончание производства работ – 30.11.2015. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по взаимному соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. Допускается досрочное выполнение работ. Датой окончания работ по договору будет считаться дата подписания генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, в соответствии с пунктом 7.2. договора, предусматривающим, что после выполнения субподрядчиком всех работ по договору субподрядчик письменно уведомляет о готовности работ, и стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, либо составляется мотивированный отказ генподрядчика от приемки работ по договору.

Дополнительным соглашением № 1 от 12.11.2015 к договору № 04/05/04 от 01.12.2014 стороны установили новый срок окончания производства работ – 31.05.2016 (т. 2, л.д. 143).

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по вышеуказанным договорам субподряда послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Заключенные сторонами договоры подряда по своей правовой природе являются договорами строительного подряда, правовое регулирование которых предусмотрено нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 711, пункту 2 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 51 от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Таким образом, обратившись с требованием о взыскании стоимости выполненных работ по договорам подряда, истец согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен представить документы, подтверждающие факт сдачи результата работ заказчику на спорную сумму.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного надлежащим доказательством, подтверждающим факт выполнения истцом работ на спорную сумму и принятия их результата ответчиком, является акт сдачи-приемки, подписанный сторонами, либо односторонний акт сдачи-приемки с отметкой истца об отказе ответчика от его подписания.

Из материалов дела усматривается, что истцом были выполнены и сданы, а ответчиком приняты результаты работ по договору № 08/05/02 от 24.07.214 на сумму 13100277 руб. 70 коп., по договору № 04/05/03 от 01.12.2014 на сумму 13841320 руб. 58 коп. и по договору № 04/05/04 от 01.12.2014 на сумму 13801456 руб. 02 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, которые подписаны сторонами без замечаний и возражений к качеству, срокам, объему и стоимости выполненных работ.

С учетом частичной оплаты задолженность ответчика по договорам субподряда составила 1505661 руб. 37 коп.

Направленная истцом в адрес ответчика претензия № 36 от 17.11.2016 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность была удовлетворена частично на сумму 250000 руб., в остальной части письмом № 493/11 от 22.11.2016 оставлена без удовлетворения (т.1, л.д. 52-53).

Принимая во внимание, что факт выполнения работ, наличие и размер задолженности по договорам подтверждены документально и ответчиком не опровергнуты, доказательства оплаты задолженности в материалы дела не представлены, суд первой инстанции, на основании статей 309, 310, 702, 711, 720, 740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации правомерно удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика задолженность по оплате выполненных работ по вышеуказанным договорам в размере 1505661 руб. 37 коп.

Доводы апелляционной жалобы о том, что оплата части стоимости выполненных работ в размере 1200000 руб. должна быть произведена путем передачи в собственность истца 2-х машино-мест в паркинге (1 этап строительства): по договору № 08/05/02 от 24.07.2014 1 машино-место за строительным номером № 85 стоимостью 600000 руб.; по договору № 04/05/04 от 01.12.2014 1 машино-место за строительным номером № 86 стоимостью 600000 руб., в соответствии с согласованным сторонами в пункте 2.7. договоров и дополнительных соглашениях к ним способом исполнения обязательств, при котором подрядчик обязался привлечь физических лиц для приобретения объектов недвижимости в возводимых с участием подрядчика многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам, в количестве и по ценам, указанным в соответствующих соглашениях, с последующим заключением ими договоров приобретения объектов недвижимости, не могут быть приняты во внимание.

В пункте 11 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 51 от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» указано, что заказчик должен оплатить результат работ, если им не выполнено обязательство по договору о передаче подрядчику товаров в счет оплаты выполненных работ.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, в том числе переписку сторон, акты выполненных работ, счета-фактуры, проанализировав условия договоров с учетом правил их толкования, установленных статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе принимая во внимание условие пункта 2.7. договоров, предусматривающее проведение расчетов по договорам иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ, учитывая, что статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возмездность договора строительного подряда и устанавливает наличие у заказчика денежного обязательства по оплате выполненных работ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об обоснованности исковых требований о взыскании стоимости выполненных работ денежными средствами.

Таким образом, приведенные в апелляционной жалобе доводы не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут поставить под сомнение правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

По существу доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию ответчика с оценкой судом представленных в материалы дела доказательств и исследованных обстоятельств, что не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое ответчиком решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 марта 2017 года по делу                 №А55-33031/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Инкон-М» – без удовлетворения. 

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе отнести на заявителя жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий судья

Судьи

В.А. Морозов

В.Т. Балашева

Е.Г. Демина