АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А43-39740/2023 

г. Нижний Новгород 11 сентября 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Паутовой Юлии Сергеевны (шифр судьи 31-182), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голубевой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской музей" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "СТП Спецавтоматика" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

при участии в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании ответчика выполнить гарантийные обязательства по контракту, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "СТП Спецавтоматика"  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 31.07.2026 исполнить гарантийные обязательства по контракту на выполнение подрядных работ № 124/08-21-С от 20.08.2021, устранить недостатки и дефекты, возникшие в результате выполнения подрядных работ, выполнив следующие работы:  

 Кровля, S=1134,1 кв.м, в/о 1-4/А-Г 1. Устранение недостатков работ по установке планки конька, плоской, в/о 2-3/А-Г; в/о1-2/В-Г; в/о 3-4/В-Г: - снятие стального конькового элемента; 

- установка конькового элемента с использованием уплотнителя «конькового» "Монтеррей"; (вспененный полиэтилен).  

 2. Монтаж планки конька кровли слухового окна ОС-1, в/о 1-2/Б-В; в/о 3-4/Б-В: - снятие стального конькового элемента;  

- установка конькового элемента с использованием уплотнителя "конькового" "Монтеррей"; (вспененный полиэтилен).  

 3. Установка узла примыкания кровли слухового окна ОС-1 со скатом кровли, в/о 1-2 Б-В; в/о 3-4YB-B: - разборка/сборка покрытия слухового окна Ос-1; - устройство сплошной обрешетки и примыканий с кровлей; 

- установка планки примыкания плоской с использованием уплотнителя "кровельного" и "универсального",  

- герметизация продольных и поперечных швов при монтаже и устройстве примыкания Uniflex PU 3244(3344).  

 4. Монтаж планки примыкания к стене, с герметизацией «профиля встроенного» в/о 1-4/А-Б; в/о 1-4В-Г:  

- расчистка шпаклевочного слоя с герметизацией стыка;  

- установка планки примыкания плоской с использование уплотнителя "универсального" ПДШ. № 74/11-19П-КР;  

-герметизация продольных швов при монтаже и устройстве примыкания к стене Uniflex PU 3244(3344).  

 5. Устройство элементов кровли в сопряжении ендовы, согласно требованиям ПД Ш. № 74/11-19П-КР; в/о1-2/А-Б, в/о 3-4/А-Б:  

- разборка/сборка кровельного покрытия в примыкании ендовы из листов профилированных (металлочерепица) с использованием уплотнителя "листового" "Монтеррей";  

- монтаж отсутствующей верхней планки узла ендовы ПД л. 13 с использованием уплотнителя "конькового" "Монтеррей" и герметизацией.  

 6. Устройство примыкания ската кровли к вентшахтам инженерных систем здания в соответствии ПД Ш. № 74/11-19П-КР, при проходах через кровлю; в/о 1-4/А-Г:  

- разборка/сборка кровельного покрытия и элементов в примыканиях прохода инженерных систем, из листов профилированных (металлочерепица)  

с уплотнителя "листового" "Монтеррей" и герметизацией; 

- установка профиля пристенного, ПД л. 13 с использованием "конькового" "Монтеррей" и герметизацией;  

- монтаж листа "нижнего" оцинкованного в примыканиях; -герметизация продольных швов при монтаже и устройстве примыкания к вентшахтам/каналам Unfflex PU 3244(3344). 

 7. Монтаж кровельного уплотнителя герметизации) мест прохода труб и антенн через кровлю в/о 1-4/А-Г:  

- подготовка, монтаж и герметизация прохода через кровлю с использованием штатного "проходного" элемента "Монтеррей" (Герметик Абрис-С-ЛТф.гофр);  

- герметизация продольных и поперечных швов при монтаже и устройстве Uniflex PU 3244(3344).  

 Утепление чердачного перекрытия в/о 1-2/А-В, в/о 3-4/А-В  

 Монтаж напольного покрытия из ГВЛВ 10 мм при устройстве утепления чердачного перекрытия, в/о 1-2/А-В; в/о 3-4 А-В:  

- устройство стяжек сборных из плит древесноволокнистых или листов гипсоволокнистых, влагостойких из ГЛВЛ толщиной 10 мм.  

 Демонтажные/монтажные работы; кровля, S=1134,1 кв.м, в/о 1-4/А-Г 

- разборка покрытий кровель из профилированных листов (металлочерепица) - 100,9 кв.м.;  

- устройство кровли из профилированных листов (металлочерепица) по готовым прогонам: средней сложности, с заменой 70% материала - 100,9 кв.м.;  

- разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. - 64,8 кв.м;  

- устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. - 64,8 кв.м;  

 Устройство слуховых окон, в/о 1-4/А-Г 

- устройство обрешеток с прозорами, из досок и брусков под кровлю: из черепицы (ПД Ш. № 74/11-19П-КР / СД Ш.74/11-19-СМ) - 9,5 кв.м;  

- облицовка стен декоративно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешётке - 1,0 кв.м.;  

- огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» - 9,5 кв.м.  

 Дополнительное утепление перекрытия, в/о 1-4/А-Г - устройство стяжек: из плит древесноволокнистых ПД Ш. № 74/11-I 19П-КР - 500 кв.м; - листы гипсо-волокнистые влагостойкие 10 мм; СД Ш. № 74/11-19-СМ - 550 кв.м. Вывоз мусора с территории - погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную - 0,637 т; 

- транспортирование отходов с последующим размещением с территории г. Саров - 8 куб.м.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТП Спецавтоматика"  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской музей" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

6000 руб. государственной пошлины, 207000 руб. расходов на оплату судебной экспертизы и 14800 руб. командировочных расходов.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТП Спецавтоматика"  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭКЦ "НижегородСтройтехЭкспертиза" (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 31000 руб. за проведение судебной экспертизы по делу. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу  

в установленном процессуальным законодательством порядке. 

 Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его  

в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.С. Паутова