АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-6534/2015

12 апреля 2017 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 12 апреля 2017 года

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор» к Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», Министерству транспорта Республики Крым, при участии третьих лиц – Министерство финансов Республики Крым, Управление Федерального казначейства по Республике Крым, о взыскании  

при участии представителей:

от истца – ФИО2, представитель, доверенность №01 от 09.01.2017 г.,         

от ответчика Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» -  не явился,

от ответчика Министерства транспорта Республики Крым – ФИО3, представитель по доверенности №ДО/36 от 23.03.2017 г.,

от третьего лица (Министерство финансов Республики Крым) – не явился,

от третьего лица (Управление Федерального казначейства по Республике Крым) – ФИО4, представитель по доверенности 16-19/1 от 09.02.2017 г.,

УСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к Государственному казенному  учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» с требованиями о взыскнии с Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» стоимости выполненных, но неоплаченных работ по договору на эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в АР Крым №38/13 от 27 августа 2013 года в размере 15 401 789,41 руб.  

   Определением Арбитражного суда Республики Крым привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика: Министерство финансов Республики Крым, Управление Федерального казначейства по Республике Крым.

    В ходе судебного заседания 14.03.2016 года от представителя истца поступило ходатайство о назначении бухгалтерской экспертизы. На разрешение эксперта истец просил поставить вопрос: «подтверждается ли первичными документами финансово-хозяйственной деятельности ГП Крымавтодор» дебиторская задолженность по договору №38/13 на эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в АР Крым от 27.08.2013г. в сумме  15 401 789,41 рублей, если нет, то определить размер указанной задолженности». 

     Определением Арбитражного суда Республики Крым от 26.04.2016 года по делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза.  

      В судебном заседании 21.02.2017 г. представитель истца заявил ходатайство об отказе от иска к Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба   автомобильных дорог Республики Крым» в части взыскания суммы долга в размере 2 891,20 руб.  

    Определением Арбитражного суда Республики Крым от 21.02.2017 года  прекращено производство по делу А83-6534/2015 в части взыскания суммы долга в размере 2 891,20 руб.

    В судебном заседании, 11.04.2017 г., истец поддержал исковые требования.

    Ответчики явку уполномоченных представителей в судебное заседание не обеспечили. О дате, месте и времени проведения судебного заседания были уведомлены своевременно и надлежащим образом, в контексте положений ст.123 АПК РФ.

    Представитель Министерства финансов Республики Крым против удовлетворения иска возражал, мотивируя отсутствие правопреемства между сторонами и первичными сторонами, что исключает по его мнению возможность удовлетворения исковых требований.

Представитель третьего лица -  Управления Федерального казначейства по Республике Крым, указала на порядок взыскания денежных средств, в случае удовлетворения исковых требований.

Учитывая надлежащее извещение участников процесса о дате, времени и месте судебного заседания, суд признал возможным рассмотреть дело в отсутствие их представителей. 

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, явившихся в судебное заседание, суд установил следующее: 

    27 августа 2013 г. между  Службой автомобильных дорог в Автономной Республике Крым и Дочерним предприятием «Крымавтодор» открытого акционерного общества «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» был заключен Договор  № 38/13 на эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в АР Крым. 

Пунктом 2.1, договора стороны определили, что заказчик поручает, а Генеральный подрядчик выполняет на свой собственный риск, собственными силами, средствами и способами, определенные техническим заданием заказчика (приложение №6 к договору) виды и объемы услуг: Эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в АР Крым, согласно требованиям действующих нормативно-правовых актов, в частности, Технических правил по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования Украины, Классификации работ по ремонтам автомобильных дорог общего пользования и в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая составлена на основании акта дефектов, а заказчик обязуется  принять и оплатить предоставленные услуги в пределах выделенных финансовых ресурсов, по мере поступления средств от главного распорядителя бюджетных средств. 

       Генеральный подрядчик гарантирует выполнение взятых по данному договору обязательств в объемах, установленных сметной документацией, которая составлена на основании акта дефектов и задания, которое предоставляется заказчиком (пункт 2.3 договора). 

       Согласно пункту 2.4 договора генеральный подрядчик обязан предоставить заказчику услуги, качество которых соответствует условиям ГСН Д. 1.1-1-2000 и ГБН Г. 1-218-182:2011. 

       Договор вступает в силу с 27.08.2013 г. и действует до 31.12.2014 г. (пункт 20.1 договора). Пунктом 3.1 договора определено, что цена этого договора составляет 20 998 508 грн.,   в том числе, налог на добавленную стоимость – 3 499 751 грн.

    При этом, пунктом 3.4 договора установлено, что общая стоимость услуг определяется согласно протоколу согласования договорной цены на предоставление услуг, который составляется на основании согласованной договорной цены.

     Расчеты проводятся путем оплаты заказчиком ежемесячно фактически предоставленных услуг промежуточными платежами, после предъявления подрядчиком счета на оплату услуг, на основании подписанных уполномоченными представителями обеих сторон акта приема выполненных строительных работ (форма №КБ-2 В, утверждена приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 04.12.2009 г. №554) и справки о стоимости выполненных строительных работ и расходов (форма №КБ-3, утверждена приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 04.12.2009 г. №554) (пункт 4.1 договора). 

      Пунктом 4.3 договора определено, что оплата проводится за фактически предоставленные объемы услуг, путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика. 

     Согласно справкам о стоимости выполненных строительных работ и расходов и актам приемки выполненных строительных работ на общую сумму — 5 270 077,31 грн, а именно: 

справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольское ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму 98351,28 грн, акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольское ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 98351,28 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольское ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму 427550,44 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольское ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 427550,44 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольское ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму 252379,13 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольское ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 252379,13 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Советский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в январе 2014г. на сумму 2510 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Советский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в январе 2014 г. на сумму — 2510 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Первомайский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 42763,30 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Первомайский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 42763,30 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 2209,20 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 2209,20 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 96502,80 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 96502,80 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 12647 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 12647 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 209138,06 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 209138,06 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Симферопольский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 164847,37 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 164847,37 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму 63475,20 грн., акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 63475,20 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму 81714 грн., акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 81714 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму 140533,20 грн., акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Симферопольский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 140533,20 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 19955 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 19955 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 16091 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 16091 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 10696 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 10696 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Советский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 22049 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Советский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 22049 грн., справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 23816 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму — 23816 грн; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Нижнегорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» на сумму 24417,08 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Нижнегорский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» на сумму — 24417,08 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» на сумму 160525 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» на сумму — 158723 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» на сумму — 1802 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 109867 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в феврале 2014г. на сумму — 109867 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 35325,26 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в феврале 2014г. на сумму —  35325,26 грн., справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 123515,52 грн., акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в феврале 2014г. на сумму —  123515,52 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 24447,38 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в феврале 2014г. на сумму —  24447,38 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в феврале 2014г. на сумму 9455,21 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в феврале 2014г. на сумму —  9455,21 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму 35700 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 35700 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 46522 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 46522 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 29513 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Раздольненский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 29513 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 115598,21 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в ноябре 2013г. на сумму — 115598,21 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 34426,82 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в ноябре 2013г. на сумму — 34426,82 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму130281,29  грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Судакский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 130281,29 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Нижнегорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 35000,54 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Нижнегорский райавтодор»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 35000,54 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Нижнегорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 50007,02 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Нижнегорский райавтодор»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 50007,02 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Нижжнегорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 22000,79 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Нижнегорский райавтодор»  ДП «Крымавтодор»  в ноябре 2013г. на сумму — 22000,79 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 179868,31 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 93949,56 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 85918,75 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 90153,84 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 59353,10 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 30800,74 грн.;  справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 152765,84 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в ноябре 2013г. на сумму — 34201,86 грн.; акта приемки выполненных строительных работ, выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор»  в ноябре 2013г. на сумму — 118563,98 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Сакский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 74010,78 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Сакский райавтодор»  ДП «Крымавтодор»  в ноябре 2013г. на сумму — 74010,78 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «сакский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 91000,49 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Сакский райавтодор»  ДП «Крымавтодор»  в декабре 2013г. на сумму — 91000,49 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ленинский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 72592,07 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ленинский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 72592,07 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ленинский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 6419,57 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ленинский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 6419,57 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ленинский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 44812,80 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ленинский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 44812,80 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красногвардейский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре  2013г. на сумму 50026 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красногвардейский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 50026 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красногвардейский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 30974 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Кировский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 30974 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Кировский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 88036,80 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Кировский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму —88036,80 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Керченский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму113001,60 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Керченский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 113001,60 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Джанкойский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 72308,06 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Джанкойский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 72308,06 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Джанкойский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 62010 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Джанкойский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 62010 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 43931 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Белогорский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 43931 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Бахчисарайский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 201120 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Бахчисарайский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 201120 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Алуштинский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 327494 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Алуштинский  ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 327494 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 40030 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 40030 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 30022 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 30022 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 53016 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 53016 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 33053 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 33053 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 17074 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 17074 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 18907 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 18907 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 18708 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 18708 грн. ; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский раавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 35327 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Советский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 35327 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Первомайский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 39181,33 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Первомайский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 39181,33 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Первомайский райавтодор» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 95614,72 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Первомайский райавтодор»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 95614,72 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Красноперекопский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 152765,84 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  декабре 2013г. на сумму 274289 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в декабре 2013г. на сумму — 274289 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 150427 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ялтинский  ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 150427 грн.; справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ» ДП «Крымавтодор» в  ноябре 2013г. на сумму 90073 грн.; акта приемки выполненных строительных работ за декабрь 2013г., выполняемых филиалом «Ялтинский ДЭУ»  ДП «Крымавтодор» в ноябре 2013г. на сумму — 90073 грн.

      Работы были приняты заказчиком, претензий по качеству и срокам, а также возражений по факту образовавшейся задолженности им не заявлялось в установленном законом порядке. Доказательств обратного суду не представлено.

      Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, проверив обоснованность доводов, изложенных в иске и  отзыве на исковое заявление ответчика, Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», суд признал заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям. 

      Так, договор № 38/13 был заключен 27.08.2013 г., то есть на момент нахождения Республики Крым в составе государства Украины.

      Федеральным конституционным законом Российской Федерации №6 от 21.03.2014 г. «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения - Севастополя» Республика Крым была принята в состав Российской Федерации. Нормы указанного федерального конституционного закона обратного действия не имеют, а правоотношения, возникшие между сторонами по данному делу из заключенного до 18.03.2014 г. договора, регулируются нормами материального права украинского законодательства, которое применяется в случае отсутствия противоречий с нормами российского законодательства.

       Согласно части 1 статьи 23 Федерального Конституционного закона законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом. 

       Частью 9 статьи 1211 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что если из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела явно вытекает, что договор более тесно связан с правом иной страны, чем та, которая указана в пунктах 1 - 8 настоящей статьи, подлежит применению право страны, с которой договор более тесно связан. 

        Таким образом, учитывая то, что спорные правоотношения, возникшие между сторонами по данному делу, тесно связаны с правом Украины, так как они возникли на момент нахождения Республики Крым в её составе и в соответствии с требованиями её законодательства, то применению к спорным взаимоотношениям подлежат нормы законодательства Украины с учетом отсутствия противоречий российскому законодательству.  

       Указанной позиции придерживается Верховный суд Российской Федерации в определении от 27.10.2014г. по делу №308-ЭС14-1939, в соответствии с которым, ввиду  отсутствия у норм Федерального конституционного закона №6-ФКЗ от 21.03.2014г. обратного действия, то на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров, распространяется законодательство, которое действовало в момент их заключения. При этом, нормы материального права украинского законодательства применяются с учетом отсутствия противоречий их нормам российского законодательства.

         Согласно требованиям статьи 307 Гражданского кодекса РФ, которая корреспондируется со статьями 509 Гражданского кодекса Украины и статьей 173 Хозяйственного кодекса Украины, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

   Статья 309 указанного Кодекса гласит, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, что соответствует требованиям статьи 526 Гражданского кодекса Украины. 

   Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства, как того требует статья 310 Гражданского кодекса РФ. 

   В соответствии со статьей 837 Гражданского кодекса Украины, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

     Как следует из главы 61 Гражданского кодекса Украины, договор подряда является возмездным, в котором обязанности подрядчика выполнить определенную работу соответствует обязанность заказчика принять эту работу и оплатить ее. В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных работ.  

       Суд считает, что использование юридическими лицами при оформлении приема- передачи выполненных работ актов (КБ-2в) не противоречит действующему законодательству ни Украины, ни России, использование иных форм первичных документов по оформлению актов приема-передачи в период их составления не было регламентировано соответствующими актами. Нормативных документов, устанавливающих типовую форму акта приема-передачи выполненных работ, по состоянию на март 2014 г. в Республике Крым не принималось.  

         Согласно подпункту 4 пункта 2 постановления Государственного Совета Республики Крым от 11.04.2014 г. №2003-6/14 «Об особенностях формирования и реализации плана капитального строительства за счет бюджетных средств на территории Республики Крым в переходный период» непогашенная кредиторская и дебиторская задолженности в строительстве, возникшие у распорядителей и получателей бюджетных средств по состоянию на дату опубликования настоящего Постановления, подлежат инвентаризации на основании актов сверки расчетов, составленных в украинской гривне и российских рублях, путем перерасчета итоговой суммы в украинской гривне по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 01.06. 2014 г., который устанавливается равным 29.44 рубля Российской Федерации за 10 украинских гривен. 

      Учитывая характер и объем документов финансово-хозяйственной деятельности отражаемых в бухгалтерском учете Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крывмавтодор» и Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» с целью определения наличия или отсутствия дебиторской задолженности Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» перед Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымавтодор» по договору №38/13 на эксплуатационное содержание автомобильных дорог  государственного значения в АР Крым от 27 августа 2013г., по делу  была назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проведение которой было поручено эксперту Автономной некоммерческой  организации «Институт учета и судебной экспертизы» ФИО5. 

  На разрешение эксперту был поставлен следующий вопрос: «Подтверждается ли первичными документами финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымавтодор» дебиторская задолженность по договору №38/13 на эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в АР Крым от 27.08.2013г. в сумме 15 401 789,41 руб., если нет, то определить размер указанной задолженности». 

   Согласно заключения судебной экспертизы по настоящему делу, всего задолженность на 01.01.2015 года подтверждается  в соответствии с представленными документами Службы автомобильных дорог в АРК на 01.04.2014 года перед ГП «Крымавтодор» в сумме 29 874 969,41 рублей  (57 758 387,35 - 27 883 417,94), указанная задолженность отражена в журнале — ордере по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в журнале — ордере задолженность в разрезе договоров не отображена. В разрезе договора №38/13 от 27.08.2013 года задолженность составила с учетом данных акта сверки на 01.04.2014 года — 15 398 898,21 рублей. За счет чего образовалось расхождение в сумме  2 891,20 рублей  (15 398 898,21 — 15 401 789,41) с данными в иске в сторону  уменьшения определить не представляется возможным, так как в бухгалтерском учете ГП «Крымавтодор» учет в разрезе договоров не отражен (учет в разрезе договоров действующим законодательством Украины, по которому велся учет в 2013 году и в переходный период не предусмотрен).   

       В соответствии разделом «Выводы» заключения эксперта, предоставленными на исследование первичными и другими документами финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымавтодор» дебиторская задолженность по договору №38/13 на эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в АР Крым от 27.08.2013 года подтверждается в сумме  15 398 898,21 рублей.

      Доказательства оплаты долга в материалах дела отсутствуют.

       При этом, суд признает несостоятельными доводы ответчика относительно отсутствия правовых оснований для удовлетворения исковых требований, по причине правопреемства у сторон настоящего процесса от первоначальных сторон обязательства по договору №38/13. 

       Согласно подпункту 6.2 постановления Государственного Совета Республики Крым от 26.03.2014 г. № 1860-6/14 «О Государственном учреждении «Служба автомобильных дорог Республики Крым», Государственное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (правопреемником которой является Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым») является правопреемником Службы автомобильных дорог в Автономной Республике Крым в части заключенных договоров (соглашений) на выполнение дорожных работ по строительству, реконструкции, ремонтам и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

       Согласно пункту 1 распоряжения Совета министров Республики Крым № 1462-р от 23.12.2014 г. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба   автомобильных дорог Республики Крым» создано путем преобразования Государственного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

    Также, пунктом 2.1 указанного распоряжения, установлено, что Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» является правопреемником Государственного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым». 

    Кроме того, пунктом 2.4 определено, что полномочия учредителя ГКУ Республики Крым «Служба Автомобильных дорог Республики Крым» осуществляются Министерством транспорта Республики Крым. 

     Таким образом, Государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым» является надлежащим ответчиком по настоящему делу.

В соответствии с п.5.2 Постановления Государственного совета Республики Крым от 26 марта 2014 г. N 1861-6/14 «О государственном предприятии "Крымавтодор",  Государственное предприятие "Крымавтодор" является правопреемником заключенных Дочерним предприятием "Крымавтодор" договоров на выполнение работ (услуг) по строительству, реконструкции, ремонтам и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования с предприятиями, зарегистрированными по состоянию на 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым.

Распоряжением Совета Министров Республики Крым от 23 декабря 2014 г. N 1454-р О создании государственного унитарного предприятия  Республики Крым «Крымавтодор» создано Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымавтодор" (далее - ГУП РК "Крымавтодор") путем преобразования Государственного предприятия "Крымавтодор".

В соответствии с п.2.1. указанного распоряжения, государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымавтодор" является правопреемником Государственного предприятия "Крымавтодор".

Таким образом истец является надлежащим.

Пунктом 1 статьи 399 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность предъявления кредитором требований не только к должнику, допустившему нарушение обязательства, но и к другому лицу, не являющемуся стороной по этому обязательству (субсидиарная ответственность). 

Статьей 123.21 Гражданского кодекса РФ определено, что учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23 настоящего Кодекса, несет собственник соответствующего имущества. 

Согласно части 4 статьи 123.22 Гражданского кодекса РФ казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. 

Как усматривается из пункта 1.3. Устава Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» учредителем и собственником имущества является субъект Российской федерации - Республика Крым, функции и полномочия которого осуществляет Министерство транспорта Республики Крым. 

Пунктом 1.6 Устава определено, что Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств солидарную ответственность по обязательствам ответчика несет уполномоченный орган. 

Из анализа положений статьи 60 Гражданского кодекса РФ и статьи 322 Гражданского кодекса РФ, усматривается возможность применения в рассматриваемом случае солидарной формы ответственности Министерства транспорта Республики Крым и Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» перед истцом. 

Аналогичная правовая позиция о возможности солидарного взыскания изложена в постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 01.04.2015 г. по делу                         № А14-10027/2014.

Как указывалось выше,   в соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым №1861-6/14 от 26.03.2014г. на базе имущества Дочернего предприятия «Крымавтодор» было создано Государственное предприятие «Крымавтодор».

Постановлением Государственного Совета Республики Крым №2142-6/14 от 21.05.2014  «О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики Крым по вопросам функционирования учреждений, предприятий дорожной отрасли Республики Крым» внесены изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26.03.2014 №1861-6/14 «О создании Государственного предприятия «Крымавтодор», а именно: «5.2 Государственное предприятие «Крымавтодор» является правопреемником заключенных Дочерним предприятием «Крымавтодор» договоров на выполнение работ (услуг) по строительству, реконструкции, ремонтам и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования с предприятиями, зарегистрированными по состоянию на 16 марта 2014г. на территории Республики Крым».  

Как усматривается из пункта 4 Перечня объектов, по которым будет производиться погашение кредиторской задолженности, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Крым от 07.07.2014 №180 «О расходах на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог» объект «Эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в АР Крым», который являлся предметом договора от 27.08.2013 № 38/13, включен как кредиторская задолженность и зарегистрирован как обязательство. 

     На основании вышеизложенного, суд считает требования истца о взыскании основной суммы долга обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

     Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

     В связи с изложенным, суд считает возможным, исходя из положений пункта 1.6 Устава Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», взыскать государственную пошлину в полном объеме с ответчика, Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», а в случае недостаточности денежных средств с Республики Крым в лице Министерства транспорта Республики Крым за счет казны Республики Крым.

     Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, 

РЕШИЛ:

1.         Исковые требования удовлетворить. 

2. Взыскать с Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (295022 

<

...>/1А, ОГРН1159102040680, ИНН/КПП 9102164702/910201001, дата регистрации - 26.01.2015 г.), а в случае недостаточности денежных средств с Республики Крым в лице Министерства транспорта Республики Крым  за счет казны Республики Крым в пользу Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор» (295022 

<

...>/1А, ОГРН1159102034090, ИНН/КПП9102161282/910201001, дата регистрации - 21.01.2015 г.) задолженность по оплате за выполненные работы в размере 15 398 898,21 руб., а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 99 990,23 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad. arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                              А.Н.Гризодубова