Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-163010/19-27-1365

город Москва

21 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 21 октября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛ" (127106, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ГОСТИНИЧНЫЙ, ДОМ 4Б, ПОМЕЩЕНИЕ I 4 ЭТАЖ КОМН №33, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 771501001, Дата регистрации 05.03.1996)

ответчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" (107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЩЕПКИНА, 42, 1; 2, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 770201001, Дата регистрации 07.08.2001)

о взыскании 17 640 362,96 рублей по договору №07/780/18 от 14 августа 2018 года,

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 по дов. От 01.03.2019 года;

от ответчика: ФИО3  по дов. №381/840/ф от 28.12.2018 года 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "САТЕЛ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФГУП "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" (далее – ответчик) о взыскании 17 640 362,96 рублей по договору №07/780/18 от 14 августа 2018 года.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал в части требования о взыскании неустойки по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 14 августа 2018 г. ФГУП «ЦЭНКИ» (Заказчик) и ООО «САТЕЛ» (Исполнитель) заключили Договор № 07/780/18 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (далее - Договор № 07/780/18), в соответствии с которым Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора составную часть опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить СЧ ОКР по теме: «Участие в доработке системы связи 16Ю5 сооружения 858-254-1». Шифр: СЧ ОКР «ЦЭНКИ-С/2018-САТЕЛ».

Согласно п. 2.1. Договора № 07/780/18 СЧ ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (ТЗ на СЧ ОКР, приложение № 1 к Договору).

Содержание этапов СЧ ОКР и сроки выполнения установлены в Ведомости исполнения (п. 2.2. Договора, приложение № 2 к Договору).

В соответствии с Протоколом согласования фиксированной цены от 04.10.2018 фиксированная цена составила 25.077.430 руб., без НДС в соответствии с подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Обязательства по Договору № 07/780/18 выполнены ООО «САТЕЛ» на общую сумму 25.077.430 000 руб., что подтверждается подписанными сторонами: Актом № 1 приемки этапа СЧ ОКР; Актом № 1 приемки СЧ ОКР.

Каких-либо возражений и претензий по объему, качеству выполненных ООО «САТЕЛ» работ, равно как и мотивированного отказа от принятия работ ФГУП «ЦЭНКИ» не заявлено.

Согласно п. 3.3., 3.4. Договора № 07/780/18 оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 30% от цены Договора уплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (п. 3.3. Договора); окончательный платеж уплачивается в течение 30 рабочих дней после получения Заказчиком денежных средств от Генерального Заказчика, но не позднее 90 рабочих дней после утверждения Заказчиком акта приемки СЧ ОКР (акта приемки этапа СЧ ОКР), путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя с учетом ранее выплаченного аванса (п. 3.4. Договора).

Принятые обязательства по оплате ФГУП «ЦЭНКИ» исполнило частично, оплатив авансовый платеж в размере 7.523.229 руб., что подтверждается платежными поручениями № 15119 от 20.09.2018 и № 15592 от 27.09.2018.

Акты приемки утверждены ФГУП «ЦЭНКИ» 30.10.2018, соответственно, срок для оплаты 15 марта 2019 г.

Согласно статье 769 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

В силу п. 1 ст. 774 ГК РФ, заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан принять результаты выполненных работ и оплатить их.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 АПК РФ, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании долга в размере 17 554 201 руб. 90 коп., поскольку материалами дела подтвержден факт выполнения работ на данную сумму.

Истец также просит суд взыскать с ответчика неустойку в размере 86 161 руб. 96 коп. за период с 16.03.2019 по 03.04.2019 включительно.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 8.5. Договора № 07/780/18 в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

Суд считает, что истцом неверно определен порядок начисления неустойки.

При расчете неустойки истцом не учтено, что согласно Информации Банка России от 31.07.2019 ключевая ставка составляет 7,25 %, согласно же условиям договора неустойка рассчитывается, исходя из действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России.

Суд соглашается с расчетом ответчика, согласно которому неустойка составляет 80 603 руб. 04 коп.

При таких обстоятельствах, суд признает подлежащей взысканию с ответчика неустойку в указанном размере, в остальной части требования истца о взыскании неустойки удовлетворению не подлежат.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 770201001, Дата регистрации 07.08.2001) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 771501001, Дата регистрации 05.03.1996) задолженность в размере 17 554 201 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести один) рубль 90 копеек, неустойку в размере 80 603 (восемьдесят тысяч шестьсот три) рубля 04 копейки, расходы по уплате государственной пошлины 111 174 (сто одиннадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

            Судья                   В.И. Крикунова