РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

г.Москва

 04.07.2019                                                                     Дело № А40-280897/18-110-2172  

Резолютивная часть решения объявлена 21.06.2019

Решение в полном объеме изготовлено 04.07.2019

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания помощником Зайченко О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АГРОТИП" (ОГРН 1027739433688, 109431, город Москва, улица Авиаконструктора миля, 8, 1) к обществу с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АПОФЕМА" (ОГРН  1137746900664, 127521, город Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й, дом 4, корпус 1, помещение XVI к 19 оф 1 эт 6), Третье лицо: общества с ограниченной ответственностью "ГРИНХАУС" (ОГРН 1153123019840, 308000, область Белгородская, город Белгород, улица Победы, дом 85, корпус 17) о взыскании 11 725 287,84 руб.,

при участии:

от истца – Шеина Л.А., ордер  №225 ри 11.02.2019, 

от ответчика-Маркелова С.В, по дов.  от  21.12.2018 №23/12, Абсалямов И.Х.  по дов.  от  21.12.2018№24/12, 

от третьего лица-не явился, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АГРОТИП" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АПОФЕМА" 10 756 613 руб. 36 коп. задолженности, 968 674 руб. 48 коп. неустойки.

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве , предъявил встречный иск о взыскании  (с учетом принятых изменений в порядке ст. 49  АПК РФ) 20 903 616,74 руб.  неустойки за нарушение срока выполнения работ.

общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АГРОТИП" встречный иск не признало  по основаниям,  изложенным в отзыве,  заявило о применении ст. 333 ГК РФ.

Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 10 августа 2017 года между ООО «ПКФ АГРОТИП» и ООО «УК АПОФЕМА» был заключен Договор подряда №APCS 21.015.07, согласно которого Истец обязуется выполнить за свой счет собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекса работ по строительству объекта капитального строительства производственного назначения — тепличный комплекс ООО «Гринхаус» (в составе теплицы для выращивания огурца, теплицы для выращивания томата, теплицы для выращивания рассады, блока сортировки и упаковки продукции, котельной, бака-аккумулятора, прудов-накопителей, а также иных объектов в соответствии с условиями Договора) площадью 24,5 га на территории Котовского сельского поселения, Старооскольский район, Белгородская область, в объеме, согласно Приложению №2, в установленный Договором срок, в соответствии с Технической документацией, переданной Ответчиком, в соответствии с Директивным графиком производства работ, в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ и Белгородской области, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, а Ответчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором фактическую цену Работ.

Согласно п. 1.31. Договора Заказчиком является компания ООО «ГРИНХАУС». 

В соответствии с п. 4.2.2., 4.2.3. Договора фактическая цена работ определяется в соответствии с подписанными Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. За выполненные по Договору работы Ответчик оплачивает Истцу фактическую цену работ, определенную в соответствии с пунктом 4.2.2. Договора и по фактически выполненным объемам работ, без превышения цены Договора. При возникновении необходимости в выполнении Истцом дополнительных работ, непредусмотренных в Приложении №2 к Договору, такие работы производятся на основании отдельных соглашений.

Согласно п. 4.3. Договора сумма причитающегося Истцу промежуточного платежа за выполненные работы определяется как фактическая цена работ, указанных в подписанных сторонами Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), за вычетом суммы резервного удержания, суммы удерживаемого аванса пропорционально стоимости выполненных работ согласно условиям Договора, и иных удержаний, которые произведены Ответчиком в соответствии с условиями Договора.

Стороны в п. 4.3.1. Договора определили, что оплата выполненных Истцом работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и при условии предоставления Истцом документов, установленных Договором.

Истцом в адрес Ответчика представлены, а Ответчиком подписаны (приняты) без замечаний работы (этап работ), которые подтверждаются подписанными Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3:

1.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от

31.07.2017;

2.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 31.07.2017;

3.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №2 от 31.07.2017;

4.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №3 от 31.07.2017;

5.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №4 от 31.07.2017;

6.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №5 от 31.07.2017;

7.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №6 от 31.07.2017;

8.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №7 от 31.07.2017;

9.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №8 от 31.07.2017;

10.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №9 от 31.07.2017;

11.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №10 от 31.07.2017;

12.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №11 от 31.07.2017;

13.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №12 от 31.07.2017;

14.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №13 от 31.07.2017;

15.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №14 от 31.07.2017;

16.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №15 от 31.07.2017;

17.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №16 от 31.07.2017;

18.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №17 от 31.07.2017;

19.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №18 от 31.07.2017;

20.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №19 от 31.07.2017;

21.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №20 от 31.07.2017;

На сумму 11 694 692 (Одиннадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля 08 копеек.

22.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №2 от

01.08.2017;

23.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №47 от 01.08.2017;

На сумму 8 730 076 (Восемь миллионов семьсот тридцать тысяч семьдесят шесть) рублей 60 копеек.

24.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №3 от

23.08.2017:

25.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№48 от23.08.2017

26.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№49 от23.08.2017

27.Акт0приемкевыполненныхработпоформеКС--2№50 от23.08.2017

28.Акт0приемкевыполненныхработпоформеКС--2№51 от23.08.2017

29.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№52 от23.08.2017

30.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№53 от23.08.2017

31.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№54 от23.08.2017

32.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№55 от23.08.2017

33.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№56 от23.08.2017

34.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№57 от23.08.2017

35.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№58 от23.08.2017

На сумму 5 907 698 (Пять миллионов девятьсот семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 32 копеек.

67. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №5 от 29.09.2017;

68.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№115от29.09.2017

69.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№116от29.09.2017

70.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№117от29.09.2017

71.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-■2№118от29.09.2017

72.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№119от29.09.2017

73.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№120от29.09.2017

74.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№121от29.09.2017

75.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№122от29.09.2017

76.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№123от29.09.2017

77.Акт0приемкевыполненныхработпоформеКС--2№124от29.09.2017

78.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№125от29.09.2017

79.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№126от29.09.2017

80.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№127от29.09.2017

81.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№128от29.09.2017

82.Акт0приемкевыполненныхработпоформеКС--2№129от29.09.2017

83.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№130от29.09.2017

84.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№131от29.09.2017

85.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС--2№132от29.09.2017

На сумму 11 050 025 (Одиннадцать миллионов пятьдесят тысяч двадцать пять) рублей 04 копеек.

86.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №6 от

23.10.2017;

87.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №170 от 23.10.2017;

На сумму 5 086 554 (Пять миллионов восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 02 копеек.

88.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №7 от

31.10.2017;

89.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №135 от 31.10.2017;

90.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №136 от 31.10.2017;

91.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №137 от 31.10.2017;

92.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №138 от 31.10.2017;

93.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №139 от 31.10.2017;

94.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №140 от 31.10.2017;

95.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №141 от 31.10.2017;

96.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №142 от 31.10.2017;

97.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №143 от 31.10.2017;

98.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №144 от 31.10.2017;

99.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №145 от 31.10.2017;

100.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2 №146от3110.2017

101.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№147от3110.2017

102.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№148от3110.2017

103.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№149от3110.2017

104.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№150от3110.2017

105.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№151от3110.2017

106.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№152от3110.2017

107.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№153от3110.2017

108.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№154от3110.2017

109.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№155от3110.2017

ПО.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№156от3110.2017

111.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№157от3110.2017

112.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№158от3110.2017

ИЗ.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№159от3110.2017

114.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№160от3110.2017

115.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№161от3110.2017

116.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№162от3110.2017

117.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№163от3110.2017

118.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№164от3110.2017

119.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№165от3110.2017

120.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№166от3110.2017

121.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№167от3110.2017

122.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№168от3110.2017

123.АктоприемкевыполненныхработпоформеКС-2№169от3110.2017

На сумму 30 391 971 (Тридцать миллионов триста девяносто одна тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 44 копеек.

124.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №8 от

30.11.2017;

125.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №241 от 30.11.2017;

126.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №242 от 30.11.2017;

127.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №243 от 30.11.2017;

128.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №244 от 30.11.2017;

129.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №245 от 30.11.2017;

130.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №246 от 30.11.2017;

131.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №247 от ЗОЛ 1.2017;

132.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №248 от 30.11.2017;

133.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №249 от 30.11.2017;

134.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №250 от 30.11.2017;

135.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №251 от 30.11.2017;

136.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №252 от 30.11.2017;

137.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №253 от 30.11.2017;

138.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №254 от 30.11.2017;

139.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №255 от 30.11.2017;

140.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №256 от 30.11.2017;

141.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №257 от 30.11.2017;

142.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №258 от 30.11.2017:

143.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №259 от 30.11.2017;

144.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №260 от 30.11.2017;

145.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №261 от 30.11.2017;

146.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №262 от 30.11.2017;

147.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №263 от 30.11.2017;

148.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №264 от 30.11.2017;

149.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №265 от 30.11.2017;

150.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №266 от 30.11.2017;

На сумму 23 659 726 (Двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек.

151.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №9 от

22.12.2017;

152.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №327 от 22.12.2017;

153.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №328 от 22.12.2017;

На сумму 7 964 759 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек.

154.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №10 от 09.01.2018;

155.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №349 от 09.01.2018;

156.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №350 от 09.01.2018;

157.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №351 от 09.01.2018;

158.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №352 от 09.01.2018;

159.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №353 от 09.01.2018;

160.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №354 от 09.01.2018;

161.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №355 от 09.01.2018;

162.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №356 от 09.01.2018;

163.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №357 от 09.01.2018;

164.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №358 от 09.01.2018;

На сумму 16 767 081 (Шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят один) рубль 24 копеек.

165.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №11 от

22.02.2018;

166.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №362 от 22.02.2018;

167.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №363 от 22.02.2018;

168.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №364 от 22.02.2018;

169.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №365 от 22.02.2018;

170.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №366 от 22.02.2018.

На сумму 12 133 595 (Двенадцать миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 44 копеек.

Итого Истцом выполнено, а Ответчиком принято без замечаний работ на сумму 145 041 307 (Сто сорок пять миллионов сорок одна тысяча триста семь) рублей 02 копейки.

Кроме того, Сторонами, Дополнительным соглашением №6 от 13.03.2017, а также подписанной Сметой №229, согласованы дополнительные работы на сумму 4 939 901 (Четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот один) рубль 26 копеек. 17.05.2018 Истцом переданы, а Ответчиком приняты: Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №12 от 15.05.2018, а также Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №544 от 15.05.2018, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №545 от 15.05.2018, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №546 от 15.05.2018, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №547 от 15.05.2018 на сумму 3 954 329 (Три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 86 копеек, о чем свидетельствует подписанный  сторонами реестр  переданной документации  от 17.05.2018.

В соответствии с п. 6.1.2. Договора Ответчик в течение 10 рабочих дней рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. В адрес Истца каких-либо отказов в письменном виде не поступало, равно как и не поступало подписанных экземпляров документов, переданных Ответчику согласно реестра переданной документации от 17.05.2018. Отсутствие обоснованного отказа Ответчика расценивается Истцом как принятие работ и подписание Ответчиком без замечаний Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №12 от 15.05.2018, а также Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №544 от 15.05.2018, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №545 от 15.05.2018, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №546 от 15.05.2018, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №547 от 15.05.2018 указанные документы подписаны Истцом в одностороннем порядке, что порождает обязанность Ответчика по оплате выполненных работ в полном объеме в размере 3 954 329 (Три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 86 копеек.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

П. 1 ст. 740 ГК РФ предусматривает, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы(услуги), а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 настоящего Кодекса.

Ст. 720 ГК РФ установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Таким образом, по действующему законодательству доказательством реального выполненных работ является акт приема-передачи или иной документ, удостоверяющий приемку, который должен отражать отсутствие у заказчика претензий к результату или, напротив, обнаруженные недостатки, обязанность составления которого предусмотрена ст. 720, 753 ГК РФ.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Обязанность заказчика по оплате оказанных услуг возникает после сдачи-приемки надлежащим образом таких услуг.

Согласно п. 4.4.1. Договора Стороны определили порядок расчетов, предусматривающий удержание от подлежащей оплате суммы сумму аванса в пропорциональном размере и резервную сумму в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных в отчетном периоде работ. Выплата резервной суммы Ответчиком Истцу производится в порядке, предусмотренном п. 4.4.2. Договора: в размере 2,5% от стоимости выполненных работ по Договору не позднее 10 банковских дней с даты подписания итогового акта, на основании оформленного Истцом счета на оплату; в размере 2,5% от стоимости выполненных работ по Договору не позднее 12 месяцев с даты подписания итогового акта, на основании оформленного Истцом счета на оплату.

Ответчиком, с учетом установленных резервных сумм оплачена сумма в размере 130 789 241 (Сто тридцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч двести сорок один) рубль 68 копеек, что подтверждается платежными поручениями:

1.№1471 от 06.09.2017 на сумму 11 109 957,48 рублей;

2.№1652 от 14.09.2017 на сумму 7 500 000,00 рублей;

3.№1746 от 25.09.2017 на сумму 8 293 572,77 рублей;

4.№2021 от 06.10.2017 на сумму 5 612 313,40 рублей;

5.№2169 от 16.10.2017 на сумму 11 072 370,35 рублей;

6.№2241 от 25.10.2017 на сумму 10 497 523,79 рублей;

7.№2627 от 17.11.2017 на сумму 4 832 226,32 рублей;

8.№2626 от 17.11.2017 на сумму 26 365 035,22 рублей;

9.№3174 от 25.12.2017 на сумму 14 481 143,12 рублей;

10.№3224 от 26.12.2017 на сумму 5 000 000,00 рублей;

11.№3264 от 28.12.2017 на сумму 2 500 000,00 рублей;

12.№3282 от 29.12.2017 на сумму 500 000,00 рублей;

13.№202 от 06.02.2018 на сумму 10 000 000,00 рублей;

14.№434 от 07.03.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

15.№696 от 21.03.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

16.№1083 от 25.04.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

17.№1974 от 29.06.2018 на сумму 5 611 129,36 рублей.

18.31.03.2018 Сторонами произведен зачет встречных однородных требований №2 на сумму 413 969,87 рублей (оплата по Договору).

Таким образом, сумма задолженности Ответчика перед Истцом составила: (145 041 307,02 + 3 954 329,86) - ((145 041 307,02 + 3 954 329,86) / 100 * 5) - 130 789 241,68 = 10 756 613,36 где:

145 041 307,02 рублей (стоимость принятых Ответчиком работ).

3 954 329,86 рублей (стоимость работ, согласно Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №12 от 15.05.2018, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №544 от 15.05.2018, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №545 от 15.05.2018, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №546 от 15.05.2018, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №547 от 15.05.2018).

130 789 241,68 рублей (оплата Ответчиком стоимости принятых работ).

Таким образом, сумма задолженности Ответчика по Договору составила 10 756 613 (Десять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 36 копеек.

В соответствии с п. 4.3.1. Договора оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

П. 15.3. Договора предусмотрена ответственность Ответчика за нарушение сроков платежей на срок более 2 рабочих дней. Истец вправе взыскать неустойку в размере 0,2% от суммы срок уплаты которой нарушен, за каждый календарный день просрочки.

Договорная неустойка за нарушение сроков платежей по расчету истца, проверенному  судом,  за период  с  20.01.2017 по  18.10.2018 968 674 (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля48 копеек.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит удовлетворению,  а доводы ответчика суд считает несостоятельными,  поскольку они противоречат представленным доказательствам и не подтверждены документально.

Суд также не находит основания для удовлетворения встречного  иска, исходя из следующего.

В обоснование встречного требования общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АПОФЕМА"  сослалось на то,  что подрядчик нарушил сроки выполнения работ по договору,  в связи с чем в силу п.  15.2   должен нести  ответственность   в виде неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки.

Вместе с тем Заказчиком строительства указанного тепличного комплекса является ООО «Гринхаус».

В соответствии с п.4.1. договора в цену договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы подрядчика.

В соответствии с п.3.6. договора в случае не поставки необходимых давальческих материалов и оборудования до начала проведения соответствующих работ, если такая не поставка привела к остановке работ по договору, срок сдачи работ сдвигается на период задержки поставки.

В данном случае 14 видов работ были задержаны по вине самого общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АПОФЕМА"  , что подтверждается письмом № 692 от 01.12.2017 года:

- укладка защитного покрытия, препятствующего росту сорняков отд. 1,7, прокладка перфорированного рукава системы С02, установка культивационных платформ на систему внутреннего транспорта была задержана по причине позднего приезда шеф-монтера системы внутреннего транспорта и наладки данной системы;

-покрасочные работы в зоне 1.8.1., 1.8.2 - по причине устранения локальных недостатков;

-монтаж отопления зоны 1.4, труба роста, труборельсовый обогрев - по причине отсутствия поставки трубы роста на строительную площадку;

-покраска системы отопления зоны 1.4. шатрового, подлоткового обогрева -по причине устранения локальных недостатков покрасочных работ;

-прокладка магистральных трубопроводов систем капельного полиса и С02 и монтаж узлов полива зоны 1,4, монтаж системы ассимиляционного освещения зоны 1,4, монтаж троса системы подвеса лотка и крючка подвеса шпалеры зоны 1,4, устройство бетонных полов зоны 1,4 - по причине отсутствия законченной вертикальной планировки, выполняемой сторонней организацией;

-устройство бетонных полов зоны 1.6.1, 1.6.3 - по причине отсутствия подписанного дополнительного соглашения со стороны Генподрядчика;

-укладка защитного покрытия, препятствующего росту сорняков зоны 1,4, прокатка и установка лотка гидропонной системы выращивания зоны 1,4, монтаж перфорированного шланга с капельницей - срок был перенесен в соответствии с договором (п.3.6).

Кроме того,  в силу п.п. 7.1.3, 7.1.4  генподрядчик обязан передать строительную площадку по акту,  а также техдокументацию. Доказательств того,  что  документация была передана в установленный срок не представлено.

В соответствии с ч. 1 ст.406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовым актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

 На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст. 110,123,156,167-171  АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск  удовлетворить. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АПОФЕМА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АГРОТИП" 10 756 613 руб. 36 коп. задолженности, 968 674 руб. 48 коп. неустойки, 76 783 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АПОФЕМА" в  федеральный бюджет  госпошлину  в размере 33 468 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:               А.В.Мищенко