68/2018-233471(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-31621/2018

г. Новосибирск

05 декабря 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А., 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Универсальная  столичная компания" безвозмездного устранить недостатки работ по  государственному контракту № 0151100004514000172-0003240-01 от  23.09.2014 на выполнение работ по капитальному строительству  объекта «Изолятор временного содержания» ОМВД России по  Тогучинскому району, г. Тогучин, ул. Садовая, 10 Новосибирская  область, а именно:  

- в полном объеме выполнить монтаж системы вентиляции и  сопутствующего оборудования в соответствии с проектно-сметной  документацией;  

 -увеличить ограждение периметра объекта на высоту 4,5 метра; 

- подключить объект к наружным сетям энергоснабжения в  соответствии с проектом, а именно провести следующие работы:  

1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы  экскаваторами с ковшом вместимостью 1(1-1,2) м 3, группа грунтов 3  в количестве 107,04 м 3.  

2.  Разработка грунта в ручную в траншеях глубиной до 2 м. без  креплений с откосами, группа грунтов 2 в количестве 26,76 м 3.  

3.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа  грунтов 1 в количестве 89,2 м 3;  

4.  Устройство постели при одном кабеле в траншее в количестве  352,0 м. кабеля.  

5.  На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142- 01 в количестве 352,0 м. кабеля;  

6.  Песок природный для строительных работ средней в количестве 44,6 м 3. 

7.  Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2  кг в количестве 230,0 м. кабеля.  

8.  Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса  1 кабеля до 2 кг в количестве 150,0 м. кабеля.  

9.  Трубы полиэтиленовые в количестве 150,0 м. 

10.  Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10  кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ А в количестве 1  подстанция.  

11.  Дизель-генератор ПCM-ADV-160 в количестве 1 шт.; 

12.  Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах  в количестве 1 пролета (3 фазы);  

13.  Счетчик, устанавливаемые на готовом основании трехфазные в  количестве 1 шт.  

14.  Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой, или  управлением штангой, устанавливаемый на металлическом  основании, однополюсный на ток до 400 А в количестве 1 шт.  

-установить технологическое оборудование в полном объеме;  

-установить в помещение индивидуального теплового пункта  подогреватель, охладитель (поставляемый в собранном виде,  вертикальный, подвесной, массой 2,3 т. в количестве 0,089 тн.),  установка пластинчатого теплообменника НН 7А ПТО системы ГВС  в количестве 1 шт., подключить имеющийся водонагреватель к  системе энергоснабжения;  

- установить дорожные знаки и нанести разметку, предусмотренные  проектно-сметной документацией, а именно:  

1. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических  стойках в количестве 14 знаков;  

2. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия  на прямом участке дороги без удаления существующей разметки в  количестве 24 м2;  

3. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) в количестве 3 м 2; 

4. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со  световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт,  поверхностная обработка) в количестве 300 м 2;  

5.  Нанесение обозначений движения по полосам со  световозвращающими элементами в количестве 20 м2;  

6.  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного  газона с внесением растительной земли слоев 15 см вручную в  количестве 36,9 м2;  

7.  Уход за газонами обыкновенными в количестве 36,9 м2; 8.  Удобрения аммонийные жидкие в количестве 0,01 тн. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Универсальная столичная компания" (ИНН 771822250) в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина