19/2019-66132(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru 

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-13814/2018

г. Петрозаводск

22 октября 2019 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

Внести изменения в муниципальный контракт № 0806300011818000148-1 от  04.06.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по  объекту «Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Лососинка по  ул. Маршала Мерецкова в г. Петрозаводске», заключенный между  Администрацией Петрозаводского городского округа (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) и Обществом с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС  ГРУПП" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), изложив пункт 2.4, абзац  третий пункта 4.2 и пункт 5.1 контракта в редакции истца, а именно:  

- пункт 2.4: «2.4 Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за счет  средств бюджета Петрозаводского городского округа, в пределах утвержденных  лимитов бюджетных обязательств на 2019 год на указанные цели, и цены  контракта, установленной п. 2.1 Контракта, в течение 30 (тридцати) календарных  дней с даты подписания Заказчиком без замечания документов, указанных в п. 2.3  Контракта при условии своевременного исполнения Подрядчиком своих  обязательств по Контракту.»;  

- абзац третий пункта 4.2: «- окончание выполнения работ – не позднее 06.05.2019  года.»;  

- пункт 5.1: «5.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 28  декабря 2019 года.».  

2. Взыскать с Администрации Петрозаводского городского округа (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "АЛЬЯНС ГРУПП" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  6000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

3. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного  месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд (191015, 

<

...>) через  Арбитражный суд Республики Карелия.  

 Судья Михайлова А.В. Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 24.05.2019 15:27:27

Кому выдана Михайлова Александра Викторовна