Арбитражный суд Московской области

            107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-55726/21

26 ноября 2021 года

г.Москва

 

Резолютивная часть объявлена 16 ноября 2021 года

Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2021 года

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Сергеевой А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело №А41-55726/21 по исковому заявлению ООО "ЛВС-Лифт" к МУП РКЦ "Власиха" о взыскании денежных средств

при участии сторон в судебном заседании согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЛВС-Лифт" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к МУП РКЦ "Власиха" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по Контракту от 29.12.2020 № 2020.554085 за период с мая по октябрь 2021 г. в размере 5 135 744, 91 руб.

В судебном заседании истец поддержал иск в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения иска не возражал. 

Исследовав и оценив в совокупности представленные в материалах дела доказательства, рассмотрев доводы искового заявления, арбитражный суд установил следующее.

Между ООО «ЛВС-Лифт» (далее - Истец) и МУП КРЦ «Власиха» (далее – Ответчик) подписан Контракт от 29.12.2020г. № 2020.554085 на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) в многоквартирных жилых домах пос. Власиха Московской области, находящихся в управлении МУП РКЦ «Власиха» в 2021 г. (далее – Контракт).

В соответствии п. 10. Технического задания срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг): оплата ежемесячной стоимости работ по Договору производится Заказчиком до 25 числа месяца, следующего за расчетным на основании Счета на оплату, составленного Подрядчиком, Акта о приемке выполненных работ с расшифровкой видов работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленных в соответствии с условиями Договора и   указанных в Приложении № 3 к Контракту.

Согласно сведениям Портала Исполнения Контрактов Московской области, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за №4 от 30.04.2021г., а также счет №30 от 30.04.2021г. и счет фактура №31 от 30.04.2021г. на сумму 975 489, 16 руб.,  по утверждению истца, предоставлены 11.05.2021г. и утверждены 12.05.2021г.

Денежные средства подлежали оплате не позднее 25.05.2021г.

По состоянию на 28.07.2021г. Ответчиком, по утверждению истца, частично погашена задолженность по Акту КС-2 №4 от 30.04.2021г. Оставшаяся сумма к оплате по расчету истца составила 475 489, 16 рублей.

Согласно сведениям Портала Исполнения Контрактов Московской области, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за №5 от 31.05.2021г., а также счет №37 от 31 мая 2021 г. и счет фактура №37 от 31 мая 2021 г. на сумму 1 019 876, 27 руб. предоставлены и утверждены 03.06.2021г.

Денежные средства подлежали оплате не позднее 25.06.2021г.

По состоянию на 27.07.2021г., по утверждению истца, задолженность не погашена. 

Согласно сведениям Портала Исполнения Контрактов Московской области, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за №6 от 30.06.2021г., а также счет №46 от 30 июня 2021 г. и счет фактура №37 от 31 мая 2021 г. на сумму 1 028 185, 95 руб. предоставлены 06.07.2021г. и утверждены 08.07.2021г.

Денежные средства подлежали оплате не позднее 25.07.2021г.

По состоянию на 27.07.2021г. задолженность, по утверждению истца, не погашена. 

Таким образом, по состоянию на 27.07.2021г. задолженность Ответчика перед ООО «ЛВС-Лифт» по расчету истца составила 2 523 551, 38 руб. (Два миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят один рубль 38 копеек).

В адрес Ответчика направлялись претензии за исх. №112 от 26.05.2021 (трек номер 10884159021737) и исх. №134 от 13.07.2021г. (трек номер 12159661017928). 

Однако поскольку претензионный порядок урегулирования спора не привел к положительному результату, истец обратился в суд.

В процессе рассмотрения данного спора, в связи с частичной оплатой ответчиком суммы основного долга, а также в связи с увеличением истцом периода взыскания задолженности согласно документам: акты и справки № 7 от 31.07.2021, № 8 от 30.08.2021, № 9 от 30.09.2021, № 10 от 31.10.2021; счета от 31.07.2021 № 50, от 31.08.2021 № 58, от 30.09.2021 № 60, от 31.10.2021 № 69, истцом заявлено ходатайство об увеличении иска в порядке ст. 49 АПК РФ, в результате принятия судом которого к взысканию заявлена сумма задолженности по Контракту от 29.12.2020 № 2020.554085 за период с мая по октябрь 2021 г. в размере 5 135 744, 91 руб. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

В данном случае спорный контракт содержит элементы договора подряда и договора возмездного оказания услуг.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Факт выполнения истцом работ (оказание услуг) подтверждается представленными в материалах дела доказательствами и ответчиком не оспаривается.

Доказательств оплаты задолженности в материалах дела не имеется.

При изложенных обстоятельствах, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с МУП РКЦ "Власиха" в пользу ООО "ЛВС-Лифт" задолженность в размере 5 135 744 руб. 91 коп.

Взыскать с МУП РКЦ "Власиха" в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину по иску в размере 48 679 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия решения в Десятый Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья                                                                                                            А.С. Сергеева