Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-133778/2019

27 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  27 февраля 2020 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "АВРОРА БАУ АГ" 

ответчик: "ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" (Филиал АО  "ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" в г. Санкт-Петербурге)

о взыскании 3 054 886,37 руб. 

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 18.03.2019

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - ООО "АВРОРА БАУ АГ" обратился в суд с иском к ответчику - "ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" о взыскании 3 034 057,53 руб. задолженности, 35 756,57 руб. неустойки, всего 3 069 814,10 руб.

Ответчик в установленном порядке извещен о слушании дела, не явился. В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

В отсутствие возражений сторон и в соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном заседании, и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Заслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что между Акционерной компанией «ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТСАНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в г.Санкт-Петербурге (Ответчик, Заказчик) и ООО «Аврора Бау АГ» (Истец, Подрядчик) были заключены следующие договоры.

Договор подряда №SPIA-M11-CM-WO-ABA-001 заключен 02.11.2018, в соответствии с которым Истец обязался за свой риск, собственными или привлеченными силами и средствами, на своем оборудовании, с использованием своих материалов, а также материалов Ответчика, выполнить Работы по устройству наплавляемой гидроизоляции плит проезжей части на строительной площадке - Мосты и путепроводы на ПК 543-ПК 647 Участка 7 и ПК 648-П684 Участка 8 Проекта (Договор, Работа), а Ответчик обязался принять результат Работ и оплатить его в соответствии с процедурой и условиями, установленными Договором.

В соответствии с Дополнительными соглашениями к Договору в Договор внесены изменения в части объемов, сроков и стоимости Работ.

Стоимость всех Работ (Цена Договора) составляет 7 298 459,04 руб.

Истцом Работы, предусмотренные Договором, выполнены, с комплектом исполнительной документации по Акту приема передачи от 31.07.2019 сданы и без замечаний приняты Ответчиком на сумму 6 603 618,87 руб., что подтверждается подписанными сторонами Актами выполненных работ по форме № КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

Ответчик перечислил Истцу 4 254 308,13 руб., что подтверждается платежными поручениями.

В соответствии с 2.6. Договора Ответчик был обязан произвести окончательный расчет Истцу не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами, акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с вычетом авансовых платежей, а также с вычетом Гарантийного удержания, получения счета-фактуры счета на оплату. Ответчику направлены счет фактуры и счета на оплату.

Согласно расчетам истца задолженность Ответчика по оплате выполненных и принятых работ составляет 2 019 129,80 руб. Срок платежа истек  30.08.2019.

За нарушение сроков оплаты работ Ответчик в соответствии с п. 5.2. Договора несет ответственность в виде неустойки в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от Цены Договора.

В соответствии с расчетом истца размер пени составляет 14 927,73 руб.

Истцом 18.09.2019 направлена претензия. Задолженность было частично погашена 25.09.2019 в сумме 150 000,00 руб.

Между Истцом и Ответчиком 13.02.2019 заключен Договор №SPIA-M11-CM-WO-ABA-002, в соответствии с которым Истец обязался за свой риск, собственными или привлеченными силами и средствами, на своем оборудовании, с использованием своих материалов, а также материалов Ответчика, выполнить Работы по устройству гидроизоляции пешеходного тоннеля на ПВП-16 (ПК 682+637) Участка 8 Проекта (Работы), а Ответчик обязался принять результат Работ и оплатить его в соответствии с процедурой и условиями, установленными Договором.

Ответчик перечислил Истцу авансовый платеж в размере  2 500 044,82 руб., что подтверждается платежным поручением.

Истцом Работы, предусмотренные Договором, выполнены, с комплектом исполнительной документации сданы и без замечаний приняты Ответчиком, что подтверждается подписанными сторонами Актом выполненных работ по форме № КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

В соответствии с 2.6. Договора Ответчик был обязан произвести окончательный расчет Истцу не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами, акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с вычетом авансовых платежей, а также с вычетом Гарантийного удержания, получения счета-фактуры. Счет-фактура №22 от 31.05.2019 направлена Ответчику.

После направления претензии от 18.09.2019 Ответчиком 25.09.2019 осуществлен платеж в размере 844 186,06 руб.

На дату подачи иска окончательный платеж в оплату выполненных и принятых работ Ответчиком в размере 1 000 000,00 руб. не произведен, что является нарушением последним принятых обязательств по Договору. Срок платежа истек 30.06.2019.

За нарушение сроков оплаты работ Заказчик в соответствии с п. 5.2. Договора несет ответственность в виде неустойки в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от Цены Договора.

В соответствии с расчетом истца размер пени составляет 20 828,84 руб.

Ответчику 01.08.2019 направлена Досудебная претензия. Задолженность погашена частично в размере 844 186,06 руб.

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

В соответствии с ч. 31. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, возражений против требований истца и расчета задолженности не заявил.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с "ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" (НЗА 10150007054) в пользу ООО "АВРОРА БАУ АГ" (ОГРН 

<

***>) 3 034 057,53 руб. задолженности, 35 756,57 руб. неустойки, всего 3 069 814,10 руб., а также 38 274,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Виноградова Л.В.