Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город  Волгоград

«09» июля 2024 года

                                    Дело № А12-6200/2024

 

Резолютивная часть решения объявлена «25» июня 2024 года                                                                     

Полный текст решения изготовлен «09» июля 2024 года

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Мицкевич Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи            Сурковой М.А., с использованием средств аудиозаписи до и после перерыва,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400066, 

<

...> зд. 1) к обществу с ограниченной ответственностью «Август» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115419, 

<

...>) о взыскании суммы расходов на устранение недостатков выполненных ООО «Август» работ по контракту № 0329100015821000166 от 29.07.2021 в размере 1 308 588 руб. 68 коп.,

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, доверенность № 23 от 11.04.2024, диплом, паспорт;

от ответчика – не явились, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Август» (далее – ООО «Август», ответчик) о взыскании суммы расходов на устранение недостатков выполненных ООО «Август» работ по контракту № 0329100015821000166 от 29.07.2021 в размере 1 308 588 руб. 68 коп.

            Явку своего представителя в судебное заседание обеспечил только истец, ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о дате и времени его проведения в соответствии со статьей 123 АПК РФ.

            Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

            Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства и оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями норм статьи 71 АПК РФ, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 29.07.2021 по результатам закупки в форме открытого конкурса в электронной форме между ООО «Август» и ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России заключен контракт № 0329100015821000166 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания общежития № 4 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по адресу: 

<

...>» (далее - контракт № 0329100015821000166 от 29.07.2021).

Состав, виды и объем работ определяются в Техническом задании и проектно-сметной документации (приложения № 1 и № 2 к контракту № 0329100015821000166 от 29.07.2021).

В силу положений абзаца 1 пункта 2.1 контракта № 0329100015821000166 от 29.07.2021 цена контракта составляет 69 088 451 (шестьдесят девять миллионов восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 85 (восемьдесят пять) копеек, в том числе НДС и определяется на основании проектно-сметной документации (сводного сметного расчета стоимости строительства) (Приложение 2 к Контракту).

Дополнительным соглашением от 22.12.2021 к контракту № 0329100015821000166 от 29.07.2021            сторонами согласована новая цена в размере 70 510 753 (семьдесят миллионов пятьсот десять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 02 копейки, в том числе НДС и определяется на основании проектно-сметной документации (сводного сметного расчета стоимости строительства) (Приложение 2 к Контракту).

В соответствии с пунктом 3.1.2 контракта № 0329100015821000166 от 29.07.2021 конечный срок выполнения работ: не позднее 30.11.2021.

Дополнительным соглашением № 1 от 22.11.2021 к контракту                                   № 0329100015821000166 от 29.07.2021 конечный срок выполнения работ был определен: не позднее 28.12.2021.

Все работы выполненные ООО «Август» по контракту № 0329100015821000166 от 29.07.2021 были приняты и оплачены ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, что подтверждается соответствующими актами приемки выполненных работ.

По состоянию на 12.12.2022 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России зафиксированы многочисленные дефекты выполненных ООО «Август» работ по контракту № 0329100015821000166 от 29.07.2021, что свидетельствует о ненадлежащем качестве данных работ. В частности:

- в 32 жилых комнатах наличие плесени на стенах;

- наличие течи кровельного покрытия;

- наличия течи гидроизоляционного покрытия в душевых комнатах;

- наличие трещин на фасаде здания.

13.12.2022      в адрес ООО «Август» было направлено уведомление о необходимости устранения недостатков выполненных работ (досудебная претензия от 13.12.2022 № 5139) с указанием перечня вышеназванных недостатков. Ответ на названную досудебную претензию ООО «Август» в адрес ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России не направляло. Недостатки выполненных работ ООО «Август» не устранялись.

30.01.2023 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России повторно направило в адрес ООО   «Август» уведомление о необходимости устранения недостатков выполненных работ (досудебная претензия от 30.01.2023 № 296) с требованием выполнения работ, указанных в досудебной претензии от 13.12.2022 № 5139.

Ответа на досудебную претензию от 30.01.2023 № 296 ООО «Август» в адрес ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России также не направило. Устранение дефектов выполненных работ в рамках гарантийных обязательств осуществлено не было.

15.03.2023 в адрес ООО «Август» было направлено уведомление о необходимости устранения недостатков выполненных работ (досудебная претензия от 15.05.2023 № 1565) с указанием перечня следующих недостатков:

- отсутствие крепления подоконников анкерными пластинами (фактически крепление подоконников произведено на монтажную пену и клей, что привело к их деформации и вздутию при эксплуатации);

- ненадлежащее качество установленных моек из ЛДСП (вздутие поверхности, деформации, отслоение кромки и лакокрасочного покрытия, изменение цвета, наличие пятен плесени).

Ответа на досудебную претензию от 15.05.2023 № 1565 ООО «Август» в адрес ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России не направило. Устранение дефектов выполненных работ в рамках гарантийных обязательств осуществлено не было.

Недостатки выполненных работ, указанные в досудебной претензии от 13.12.2022 № 5139 и досудебной претензии от 15.03.2023 № 1565) могли привести к нарушению норм санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и, как следствие, угрозе здоровью работников и обучающихся ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

Учитывая отсутствие от ООО «Август» ответов на досудебные претензии о необходимости выполнения гарантийных обязательств, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России были заключены следующие договоры:

- договор с ООО «Баспир» от 10.03.2023 № 223/1/89 на выполнение работ по удалению грибковой плесени в жилых помещениях здания общежития №4, расположенного по адресу: 

<

...> на общую сумму 999 562 (девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 40 (сорок) копеек, без НДС;

- договор от 30.06.2023 № 223/1/425 с ИП ФИО2 на проведение работ по текущему ремонту кухонь общежития №4, расположенного по адресу: 

<

...> на общую сумму 309 026 (триста девять тысяч двадцать шесть) рублей 28 (двадцать восемь) копеек, без НДС;

Вышеназванные работы были приняты и оплачены ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России согласно представленным документам.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд.

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статей 65, 66 АПК РФ, лицо, не реализовавшее свои процессуальные  права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий. 

В силу положений статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Такие обстоятельства, в случае принятия их арбитражным судом, не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11).

Обоснованность требований истца подтверждена материалами дела.

Исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

С ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 26 086 руб.

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 66, 70, 101, 110, 112, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Август» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115419, 

<

...>) в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400066, 

<

...> зд. 1) денежные средства в размере 1 308 588 руб. 68 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Август» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115419, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 086 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                                                        Е.С. Мицкевич