АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

20 января 2021 года

 

Дело № А33-31637/2020

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 13 января 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 20 января 2021 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бычковой Л.К., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирьстройнедвижимость» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 19.10.2020, представлен диплом о наличии высшего юридического образования №16/49 от 07.07.2020, личность удостоверена паспортом,

ФИО2, представитель по доверенности от 30.04.2020, представлен диплом о наличии высшего юридического образования №1/621-Ю01 от 25.06.2010, личность удостоверена паспортом.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания    ФИО3, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирьстройнедвижимость» (далее – ответчик) о взыскании 61 825 780,10 руб. задолженности по договору подряда №16 от 28.09.2016.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 02.11.2020 возбуждено производство по делу.

Ответчик в судебное заседание своих представителей не направил, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью СК «Лидер» (далее – подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СибирьСтройНедвижимость» (далее - генподрядчик) заключен договор подряда № 16 от 28.09.2016.

 Согласно пункту 1.1. договора генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, выполнить общестроительные работы на объекте: «Два многоэтажных жилых дома с инженерным обеспечением расположенные по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская, 16г, стр. 6. Кадастровый номер земельного участка: 24:50:01 00 004:0007. Жилой дом № 1. Оси 1-2, 2-3» (далее по тексту - Объект), в соответствии с условиями договора, заданием Генподрядчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для нормальной его эксплуатации, а Генподрядчик принять результат надлежаще выполненных Подрядчиком работ и оплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с пунктом 2.1. договора стоимость подлежащих выполнению работ определяется в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение № 1), где помимо стоимости указываются виды работ. Стоимость работ является фиксированной и изменению не подлежит.

Пунктом 3.1. договора стороны предусмотрели сроки выполнения работ: 28.09.2016 – 30.12.2017 гг.

В соответствии с пунктом 6.1. договора оплата выполненных работ производится денежными средствами на расчетный счет субподрядчика в течение 30 календарных дней, либо другим, не запрещенным законодательством способом, за минусом сумм предоплаты.

Во исполнение условий договора подряда истцом выполнены и приняты ответчиком работы на сумму 61 825 780,10 руб., что подтверждается представленными следующими документами: справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.10.2016 на сумму 38 482 725 руб. 22 коп., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №1 от 31.10.2016 на сумму 5 002 199 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №2 от 31.10.2016 на сумму 8 219 121 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №3 от 31.10.2016 на сумму 241419 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №4 от 31.10.2016 на сумму 143 327 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №5 от 31.10.2016 на сумму 328 087 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №6 от 31.10.2016 на сумму 8 052 140 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №7 от 31.10.2016 на сумму 4 669 874 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №8 от 31.10.2016 на сумму 241 598 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №9 от 31.10.2016 на сумму 298 098 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №10 от 31.10.2016 на сумму 80 901 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №11 от 31.10.2016 на сумму 5 359 506 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №12 от 31.10.2016 на сумму 5 288 597руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №13 от 31.10.2016 на сумму 120 719руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №14 от 31.10.2016 на сумму 215 190 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2016 №15 от 31.10.2016 на сумму 222 140 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.11.2016 на сумму 5 342 563 руб. 28 коп., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 № 16 от 30.11.2016 на сумму  2 621 550 руб.54 коп., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 № 17 от 30.11.2016 на сумму  2 464 091 руб., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 № 18 от 30.11.2016 на сумму   125 059 руб., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 № 19 от 30.11.2016 на сумму  66 323 руб., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 № 20 от 30.11.2016 на сумму  65 538 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.01.2017 на сумму 8 606 684 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2017 № 21 от 31.01.2017 на сумму 3 924 636 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2017 № 22 от 31.01.2017 на сумму 4 270 134 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2017 № 23 от 31.01.2017 на сумму  118 580 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2017 № 23 от 31.01.2017 на сумму  145 347 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2017 № 24 от 31.01.2017 на сумму  147 984 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 31.03.2017 на сумму 4 584 371 руб. 98 коп., актом о приемке выполненных работ за март 2017 № 30 от 31.03.2017 на сумму  2 258 529 руб., актом о приемке выполненных работ за март 2017 № 31 от 31.03.2017 на сумму  2 086 280 руб., актом о приемке выполненных работ за март 2017 № 32 от 31.03.2017 на сумму   12 5 033 руб., актом о приемке выполненных работ за март 2017 № 33 от 31.03.2017 на сумму  57 377 руб., актом о приемке выполненных работ за март 2017 № 34 от 31.03.2017 на сумму  57 150 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.04.2017 на сумму 5 322 002 руб. 96 коп.,  актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 35 от 30.04.2017 на сумму  910 151 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 36 от 30.04.2017 на сумму  1 518 820 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 37 от 30.04.2017 на сумму   890 058 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 38 от 30.04.2017 на сумму   1 528 694 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 39 от 30.04.2017 на сумму  297 832 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 40 от 30.04.2017 на сумму  74 459 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 41 от 30.04.2017 на сумму  50 139 руб. актом о приемке выполненных работ за апрель 2017 № 42 от 30.04.2017 на сумму  51 846 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 31.05.2017 на сумму 5 471 762 руб. 66 коп., актом о приемке выполненных работ за май 2017 № 43 от 31.05.2017 на сумму   2 120 588 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2017 № 44 от 31.05.2017 на сумму   2 130 878 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2017 № 45 от 31.05.2017 на сумму   527 678 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2017 № 46 от 31.05.2017 на сумму   692 617 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 30.06.2017 на сумму 4 874 257 руб. 86 коп., актом о приемке выполненных работ за июнь 2017 № 47 от 30.06.2017 на сумму   2 347 100 руб., актом о приемке выполненных работ за июнь 2017 № 48 от 30.06.2017 на сумму   2 357 893 руб., актом о приемке выполненных работ за июнь 2017 № 49 от 30.06.2017 на сумму   55 412 руб., актом о приемке выполненных работ за июнь 2017 № 50 от 30.06.2017 на сумму   113 851 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 31.082017 на сумму 17 811 607 руб. 94 коп., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 62 от 31.08.2017 на сумму   2 364 207 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 63 от 31.08.2017 на сумму   2 624043 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 64 от 31.08.2017 на сумму 4318113 руб. актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 65 от 31.08.2017 на сумму   2 267 188 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 66 от 31.08.2017 на сумму   2 016 740 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 67 от 31.08.2017 на сумму   3 943 354 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 68 от 31.08.2017 на сумму   184 062 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 69 от 31.08.2017 на сумму   20 509 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 70 от 31.08.2017 на сумму   20 509 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 71 от 31.08.2017 на сумму   40 253 руб., актом о приемке выполненных работ за август 2017 № 72 от 31.08.2017 на сумму   12 624 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 12 от 31.10.2017 на сумму 11987 889 руб. 04 коп., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 86 от 31.10.2017 на сумму 1 340 166 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 87 от 31.10.2017 на сумму 300 374 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 88 от 31.10.2017 на сумму 4 247 249 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 89 от 31.10.2017 на сумму  1 347 477 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 90 от 31.10.2017 на сумму 292 150 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 91 от 31.10.2017 на сумму 4 247 249 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 92 от 31.10.2017 на сумму 106 610 руб., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 № 93 от 31.10.2017 на сумму 106 610 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 13 от 30.11.2017 на сумму 1562 389 руб. 62 коп., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 № 94 от 30.11.2017 на сумму 281 785 руб., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 № 95 от 30.11.2017 на сумму 586 791 руб., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 № 96 от 30.11.2017 на сумму 216 994 руб., акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 № 97 от 30.11.2017 на сумму 476 817 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 14 от 31.122017 на сумму 2 727 603 руб. 04 коп., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2017 № 98 от 31.12.2017 на сумму 70 698 руб., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2017 № 99 от 31.12.2017 на сумму 1 282 819 руб., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2017 № 100 от 31.12.2017 на сумму 147 502 руб., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2017 № 101 от 31.12.2017 на сумму 1 210 353 руб., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2017 № 102 от 31.12.2017 на сумму 7 386 руб., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2017 № 103 от 31.12.2017 на сумму 8 842 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №15 от 31.01.2018 на сумму 3 420 313 руб. 78 коп., актом о приемке выполненных работ за январь 2018 № 104 от 31.01.2018 на сумму  18 580 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2018 № 105 от 31.01.2018 на сумму 568 324 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2018 № 106 от 31.01.2018 на сумму 94 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2018 № 107 от 31.01.2018 на сумму 96 948 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2018 № 108 от 31.01.2018 на сумму 22 853 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2018№ 109 от 31.01.2018 на сумму 2 611 640 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2018 № 110 от 31.01.2018 на сумму 94 руб., актом о приемке выполненных работ за январь 2018 № 111 от 31.01.2018 на сумму  101 777 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №16 от 30.04.2018 на сумму 9 321987,02 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 112 от 30.04.2018 на сумму   1 815 589 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № от 30.04.2018 на сумму   1 356 197 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 114 от 30.04.2018 на сумму  2 952 144 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 115 от 30.04.2018 на сумму   1 329 904 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 116 от 30.04.2018 на сумму   1 599 729 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 117 от 30.04.2018 на сумму  232 061 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018№118от 30.04.2018 на сумму   18 180 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 119 от 30.04.2018 на сумму   18 180 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №17 от 30.042018 на сумму 2 630 654,24 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 120 от 30.04.2018 на сумму 1 609 161 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 121 от 30.04.2018 на сумму  952 886 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 122 от 30.04.2018 на сумму 3 608 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 123 от 30.04.2018 на сумму 1 983 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 124 от 30.04.2018 на сумму   31 507 руб., актом о приемке выполненных работ за апрель 2018 № 125 от 30.04.2018 на сумму  31 507 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат №18 от 15.05.2018 на сумму 8 540 442,34 руб.,  актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 126 от 15.05.2018 на сумму   162 545 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 127 от 15.05.2018 на сумму  3 082 644 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 128 от 15.05.2018 на сумму 162 545 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 129 от 15.05.2018 на сумму  852 937 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 130 от 15.05.2018 на сумму 1 887 644 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 131 от 15.05.2018 на сумму  2 331 206 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 132 от 15.05.2018 на сумму  28 251 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 135 от 15.05.2018 на сумму  333 руб., актом о приемке выполненных работ за май 2018 № 137 от 15.05.2018 на сумму  188 руб.

Объект введён в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 10.09.2018 № 24-308-01/10645-дг-2013.

Согласно актам КС-2, КС-3 в стоимость работ включено гарантийное удержание.

Согласно расчету истца, в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных подрядчиком работ, у последнего перед истцом образовалась задолженность в размере 61 825 780,10 руб.

В связи с неоплатой стоимости выполненных работ в установленном договором размере и сроки истец обратился к ответчику с претензией об оплате задолженности.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 61 825 780,10 руб. задолженности.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представленный в материалы дела договор подряда от №16 от 28.09.2016 по своей правовой природе является договором строительного подряда, который регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Исходя из положений пункта 1 статьи 746, пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» и согласованных сторонами условий договора, суд приходит к выводу о том, что основанием возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является выполнение работ и сдача их результата подрядчиком.

В силу статей 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и договора подряда сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актами, подписанными обеими сторонами.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт выполнения истцом предусмотренных договором работ подтверждается  представленными подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также  справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно расчету истца, в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных подрядчиком работ, у последнего перед истцом образовалась задолженность в размере 61 825 780,10 руб.

Объект введён в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 10.09.2018 № 24-308-01/10645-дг-2013. Согласно актам КС-2, КС-3 в стоимость работ включено гарантийное удержание.

В соответствии с пунктом 6.1. договора оплата выполненных работ производится денежными средствами на расчетный счет субподрядчика в течение 30 календарных дней, либо другим, не запрещенным законодательством способом, за минусом сумм предоплаты.

Ответчик не доказал факт отсутствия задолженности перед истцом в заявленной сумме, равно как и не доказал отсутствие оснований для их оплаты. Доказательства оплаты задолженности в полном объеме в материалы дела не представлены. 

Поскольку судом установлен факт исполнения истцом обязательства по выполнению работ, выполненные истцом работы в полном объеме не оплачены, срок оплаты наступил, суд приходит к выводу об обоснованности требования истца о взыскании задолженности в заявленном размере    61 825 780, 10 руб.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд с настоящим исковым заявлением истцу судом на основании статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до итогового судебного акта, в связи  с чем, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, принимая во внимание результат рассмотрения настоящего спора.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирьстройнедвижимость» г. Красноярск в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер» г. Красноярск 61 825 780 рублей  10 копеек основного долга, в доход федерального бюджета Российской Федерации 200 000 рублей государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Л.К. Бычкова