АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, д. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. 

<

***>; факс 

<

***>

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                              Дело  № А19-13563/2025 

«1» октября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  29.09.2025.

Решение  в полном объеме изготовлено  01.10.2025.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Исаевой Е.А при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Черкасовой К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» (666037, 

<

...> и Монтажников, д. 23, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.06.2020, ИНН: 

<

***>)

к открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» (664033, Иркутская область, Иркутск город, ФИО1 улица, 257, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о понуждении,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 (доверенность от 29.06.2023, документ об образовании, паспорт),

от ответчика – ФИО3 (доверенность от 24.10.2022, документ об образовании, паспорт),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» обратилось с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» с требованиями в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязанности по договору от 10.09.2021 № 5603/21-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за неисполнение в установленный срок решения суда в размере 100 000 рублей за каждый день просрочки.

До рассмотрения дела по существу истец в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил суд обязать ответчика в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязанности по договору от 10.09.2021 № 5603/21-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно:

- оформить «Положение о взаимоотношениях с заявителем»; 

- переоформить акт об осуществлении технологического присоединения от 21.03.2023 № 2252/23-ЮЭС; 

- установить прибор учёта электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» и Общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основныхположений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённыхпостановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, с составлением Акта допуска прибора учёта в эксплуатацию; 

- осуществить мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» (в том числе подачу напряжения) к своим электрическим сетям;

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика неустойку за неисполнение в установленный срок решения суда в размере 100 000 рублей за каждый день просрочки.

Ответчик иск оспорил, ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в целях урегулирования спора миром.

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, поскольку у ответчика было достаточно времени для урегулирования спора миром с учетом даты возбуждения производства по делу.

Обстоятельства дела.

    В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - ФЗ «Об электроэнергетике») технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами.

Между АО «Иркутская электросетевая компания» (сетевая организация) и ООО «ЛидерСтальБетон» (заявитель) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5603/21-ЮЭС от 10.09.2021, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение.

В Приложении № 1 к договору стороны согласовали Технические условия для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя.

Согласно указанным Техническим условиям, со стороны заявителя должны были быть соблюдены следующие условия: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 150 кВт (изменение категории надежности с 111 на 11) (с симметричным распределением нагрузки по фазам); категория надежности: II (вторая), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ; год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022г. Точка присоединения: наконечники кабельных линий 10 кВ от КРУП 10 кВ ПС Светлая яч. 10. яч. II со следующим распределением запрашиваемой максимальной мощности по точкам присоединения: точка присоединения 1 - 75 кВт, точка присоединения 2-75 кВт. Основной источник питания: ПС 220/35/10 кВ Светлая яч. 10. Резервный источник питания: ПС 220/35/10 кВ Светлая яч. 11.

Согласно Техническим условиям сетевая организация обязана осуществить следующие мероприятия: Оформление "Положения о взаимоотношениях с заявителем"; Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенные и / или планируемые к включению в инвестиционную программу ОАО "И'ЭСК": - реконструкция ПС 220 кВ Светлая с ВЛ 35 кВ Светлая – Баклаши; Мероприятия по усилению существующей электрической сети (указывается при наличии): - расширение КРУН 10 кВ с установкой новой ячейки 10 кВ на 11C Светлая; Выполнение мероприятий «последней мили» (от существующей сети до точки присоединения): -разработку проектной документации (раздел 11 постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») для обеспечения строительства объектов электросетевого хозяйства, строительство КЛ 10 кВ от КРУН 10 кВ ПС Светлая до ТП № 6431 (L-L98 км). Марку, сечение и протяженность определить проектом, согласование расчета уставок РЗА и выполнение мероприятий по результатам расчета, переоформление Акта № 8942 от 17.02.2021 г об осуществлении технологического присоединения; установку прибора учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей Сетевой организации и Заявителя либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 с составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию; мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям после выполнения условий настоящего договора.

На основании письма заявителя от 09.09.2021 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5603/21-ЮЭС от 10.09.2021 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 от 02.10.2021, которым мероприятия по строительству линии электропередачи возложены на ООО «ЛидерСтальБетон», а также изменен размер платы за технологическое присоединение.

На основании письма заявителя от 29.09.2021 к данному договору заключено дополнительное соглашение № 2 от 20.10.2021, которым максимальная мощность энергопринимающих устройств увеличена до 4 950 кВт: 150 кВт по второй категории надёжности, 4 800 кВт по третьей категории надёжности, а также изменен размер платы.

Дополнительным соглашением № 3 от 29.04.2022 изменён размер платы за технологическое присоединение и внесены изменения в Технические условия (Приложение № 1 к договору) в части увеличения мощности линии электропередачи.

Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения № 3 размер платы за технологическое присоединение составляет 142 391,87 руб., в том числе НДС 20%.

В соответствии с пунктом 1.3 дополнительного соглашения № 3 пункт 10 Приложения № 1 к Договору (Технические условия № 5603/21-ЮЭС на технологическое присоединение) принят в следующей редакции: Сетевая организация осуществляет:

- Оформление "Положения о взаимоотношениях с заявителем".

- Согласование расчета уставок РЗА и выполнение мероприятий по результатам расчета.

- Переоформление Акта № 8942 от 17.02.2020г об осуществлении технологического присоединения.

- Установку прибора учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей сетевой организации и заявителя либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 с составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

- Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям после выполнения условий настоящего договора.

Согласно пункту 21 договоров, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения.

Истец оплатил стоимость подключения на общую сумму 142 391 руб. 87 коп. 

Пунктом 5 Договора установлен годичный срок для выполнения мероприятий по технологическому присоединению со дня заключения договора.

Согласно пункту 11.10 Технических условий (Приложения № 1 к договору) в редакции дополнительного соглашения № 3, после выполнения строительно-монтажных (монтажных) работ заявитель предоставляет объем работ по п. 11 технических условий в сетевую организацию на проверку путем направления соответствующего уведомления о выполнении технических условий с приложением необходимых документов.

27.07.2022 сторонами подписан акт о выполнении технических условий № 5603/21- ЮЭС. 

В соответствии с пунктом 6.4 договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о получении разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, сетевая организация обязана осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический приём (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Письмом от 07.09.2022 заявитель уведомил сетевую организацию о получении разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию от 25.08.2022 № 22/1297/2022.

Согласно пунктам 10.3, 10.5 Технических условий (Приложения № 1 к договору) в редакции дополнительного соглашения № 3, сетевая организация после выполнения технических условий для присоединения к электрическим сетям осуществляет переоформление акта об осуществлении технологического присоединения № 8942 от 17.02.2020 и осуществляет мероприятия по фактическому присоединению. 

В установленный договором срок акт сетевой организацией не переоформлен, фактическое присоединение не произведено.

Уклонение сетевой организации от исполнения обязательств по договору - осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям послужило основанием для обращения истца в суд с иском о понуждении к исполнению обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать   по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ).

Введение в действие положений статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ, как полагает истец, направлено на закрепление принципа реального исполнения, являющегося мерой защиты прав кредитора (взыскателя), при этом для применения подобной меры не требуется наличие таких условий, как негативные последствия, причинная связь, вина должника, достаточным условием является установление наличия уклонения от исполнения обязательства в натуре, выраженного в неисполнении обязательства в установленный решением суда или законодательством об исполнительном производстве срок, в том числе в форме бездействия.

В этой связи, истец посчитал возможным и соразмерным просить суд об установлении судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Ответчик в представленном отзыве иск оспорил по мотиву отсутствия у сетевой организации технической возможности осуществить техприсоединение заявителя в установленный договором срок ввиду необходимости проведения мероприятий по реконструкции питающих центров в рамках инвестиционной программы  АО «ИЭСК» на период с 2024-2029 годы.

Учитывая величину заявленной максимальной мощности - 4 950 кВт, отсутствие технической возможности присоединения к центру питания - ПС 220/35/10 кВ Светлая, резерв максимальной мощности по которому исчерпан, сетевой организации было необходимо изыскать возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в условиях, когда сроки мероприятий по Договору не соответствуют реальным возможностям сетевой организации.

Кроме того, сроки технологического присоединения, установленные пунктом 16 Правил и предусмотренные в Договоре, противоречат требованиям федерального законодательства. В силу абзаца пятого пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. Тем не менее, АО «ИЭСК» реализовало комплекс мероприятий по снижению нагрузки на питающий центр и изыскало возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, подписав Акт об осуществлении технологического присоединения № 2252/23-09С от 21.03.2023.

Исследовав материалы дела, заслушав сторон, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем).

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - ФЗ «Об электроэнергетике») технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами.

Как видно из материалов дела, между АО «Иркутская электросетевая компания» (сетевая организация) и ООО «ЛидерСтальБетон» (заявитель) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5603/21-ЮЭС от 10.09.2021, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение.

В Приложении № 1 к договору стороны согласовали Технические условия для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя.

Согласно указанным Техническим условиям, со стороны заявителя должны были быть соблюдены следующие условия: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 150 кВт (изменение категории надежности с 111 на 11) (с симметричным распределением нагрузки по фазам); категория надежности: II (вторая), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ; год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022г. Точка присоединения: наконечники кабельных линий 10 кВ от КРУП 10 кВ ПС Светлая яч. 10. яч. II со следующим распределением запрашиваемой максимальной мощности по точкам присоединения: точка присоединения 1 - 75 кВт, точка присоединения 2-75 кВт. Основной источник питания: ПС 220/35/10 кВ Светлая яч. 10. Резервный источник питания: ПС 220/35/10 кВ Светлая яч. 11.

Согласно Техническим условиям сетевая организация обязана осуществить следующие мероприятия: Оформление "Положения о взаимоотношениях с заявителем"; Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенные и / или планируемые к включению в инвестиционную программу ОАО "И'ЭСК": - реконструкция ПС 220 кВ Светлая с ВЛ 35 кВ Светлая – Баклаши; Мероприятия по усилению существующей электрической сети (указывается при наличии): - расширение КРУН 10 кВ с установкой новой ячейки 10 кВ на 11C Светлая; Выполнение мероприятий «последней мили» (от существующей сети до точки присоединения): -разработку проектной документации (раздел 11 постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») для обеспечения строительства объектов электросетевого хозяйства, строительство КЛ 10 кВ от КРУН 10 кВ ПС Светлая до ТП № 6431 (L-L98 км). Марку, сечение и протяженность определить проектом, согласование расчета уставок РЗА и выполнение мероприятий по результатам расчета, переоформление Акта № 8942 от 17.02.2021 г об осуществлении технологического присоединения; установку прибора учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей Сетевой организации и Заявителя либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 с составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию; мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям после выполнения условий настоящего договора.

02.10.2021 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5603/21-ЮЭС от 10.09.2021, которым изменены мероприятия по строительству линии электропередачи возложены на ООО «ЛидерСтальБетон», а также изменен размер платы за технологическое присоединение.

20.10.2021 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 2, которым максимальная мощность энергопринимающих устройств увеличена до 4 950 кВт: 150 кВт по второй категории надёжности, 4 800 кВт по третьей категории надёжности, а также изменен размер платы.

29.04.2022 дополнительным соглашением № 3 сторонами договора № 5603/21-ЮЭС от 10.09.2021 изменён размер платы за технологическое присоединение и внесены изменения в Технические условия (Приложение № 1 к договору) в части увеличения мощности линии электропередачи.

Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения № 3 размер платы за технологическое присоединение составляет 142 391,87 руб., в том числе НДС 20%.

В соответствии с пунктом 1.3 дополнительного соглашения № 3 пункт 10 Приложения № 1 к Договору (Технические условия № 5603/21-ЮЭС на технологическое присоединение) принят в следующей редакции: 

Сетевая организация осуществляет:

- Оформление "Положения о взаимоотношениях с заявителем".

- Согласование расчета уставок РЗА и выполнение мероприятий по результатам расчета.

- Переоформление Акта №8942 от 17.02.2020г об осуществлении технологического присоединения.

- Установку прибора учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей сетевой организации и заявителя либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 с составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

- Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям после выполнения условий настоящего договора.

Согласно пункту 21 договора он считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения.

Истец оплатил стоимость подключения на общую сумму 142 391 руб. 87 коп., что подтверждается платежными поручениями № 601 от 20.10.2021, № 320 от 27.05.2022.

Согласно пункту 11.10 Технических условий (Приложения № 1 к договору) в редакции дополнительного соглашения № 3, после выполнения строительно-монтажных (монтажных) работ заявитель предоставляет объем работ по п. 11 технических условий в сетевую организацию на проверку путем направления соответствующего уведомления о выполнении технических условий с приложением необходимых документов.

Как видно из материалов дела, 27.07.2022 сторонами подписан акт о выполнении технических условий № 5603/21- ЮЭС. 

Как следует из содержания пункта 6 данного акта, по результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 5603/21- ЮЭС от 10.09.2021, выполнены.

В соответствии с пунктом 6.4 договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о получении разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, сетевая организация обязана осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический приём (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Согласно пунктам 10.3, 10.5 Технических условий (Приложения № 1 к договору) в редакции дополнительного соглашения № 3, сетевая организация после выполнения технических условий для присоединения к электрическим сетям осуществляет переоформление акта об осуществлении технологического присоединения № 8942 от 17.02.2020 и осуществляет мероприятия по фактическому присоединению. 

Письмом от 07.09.2022 заявитель уведомил сетевую организацию о получении разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию от 25.08.2022 № 22/1297/2022, однако доказательств осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям и переоформление акта об осуществлении технологического присоединения суду не представлено. 

Ответчик факт неисполнения обязательств по договору в части осуществления технологического присоединения и исполнения иных мероприятий, предусмотренных договором в редакции дополнительного соглашения № 3, не оспорил.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статьи 309, 310 Гражданского кодекса РФ).

Поскольку судом установлен факт необоснованности уклонения сетевой организации от исполнения обязательств по договору, суд находит требование об обязании открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору от 10.09.2021 № 5603/21-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно: оформить «Положение о взаимоотношениях с заявителем»; переоформить акт об осуществлении технологического присоединения от 21.03.2023 № 2252/23-ЮЭС; установить прибор учёта электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» и общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, с составлением Акта допуска прибора учёта в эксплуатацию; осуществить мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» к своим электрическим сетям, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Доводы ответчика об отсутствии со стороны сетевой организации технической возможности по осуществлению присоединения истца к электрически сетям со ссылкой на инвестиционную программу  АО «ИЭСК» на период с 2024-2029 годы, суд находит необоснованными и подлежащими отклонению, поскольку данные обстоятельства не могут служить правовым основанием для неисполнения принятых на себя сетевой организацией обязательств по договору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ).

Введение в действие положений статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ направлено на закрепление принципа реального исполнения, являющегося мерой защиты прав кредитора (взыскателя), при этом для применения подобной меры не требуется наличие таких условий, как негативные последствия, причинная связь, вина должника, достаточным условием является установление наличия уклонения от исполнения обязательства в натуре, выраженного в неисполнении обязательства в установленный решением суда или законодательством об исполнительном производстве срок, в том числе в форме бездействия.

Учитывая приведенную норму права и удовлетворение иска в части обязания ответчика совершить определенные действия, истец обоснованно обратился с требованием о взыскании с ответчика судебной неустойки за каждый календарный день неисполнения судебного акта.

Рассмотрев вопрос о размере судебной неустойки за каждый календарный день неисполнения судебного акта, суд приходит к следующим выводам.

Истцом заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 100 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта со следующего дня после вступления решения суда в законную силу. 

Суд находит размер судебной неустойки в размере 100 000 руб. несоразмерным и не соответствующим принципу справедливости, полагает, что справедливым размером судебной неустойки, которая не приведет к необоснованному обогащению истца и при этом будет стимулировать надлежащее исполнение ответчиком вступившего в законную силу решения суда, является судебная неустойка в размере 3 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта.

Требование о присуждении судебной неустойки за каждый календарный день неисполнения судебного акта со следующего дня после истечения месячного срока с момента вступления решения суда в законную силу подлежит удовлетворению в определенном судом размере.

Расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

исковые требования удовлетворить.          

Обязать акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (664033, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2009, ИНН: 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору от 10.09.2021 № 5603/21-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно: оформить «Положение о взаимоотношениях с заявителем»; переоформить акт об осуществлении технологического присоединения от 21.03.2023 № 2252/23-ЮЭС; установить прибор учёта электрической энергии и мощности (активной и реактивной) на границе раздела электрических сетей Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» и общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, с составлением Акта допуска прибора учёта в эксплуатацию; осуществить мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» к своим электрическим сетям. 

              В случае неисполнения акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» (664033, Иркутская область, Иркутск город, ФИО1 улица, 257, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2009, ИНН: 

<

***>) настоящего решения в срок, установленный судом, взыскать с акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (664033, Иркутская область, Иркутск город, ФИО1 улица, 257, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2009, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» (666037, 

<

...> и Монтажников, д. 23, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.06.2020, ИНН: 

<

***>) судебную неустойку в сумме 3 000 рублей за каждый календарный день неисполнения судебного акта, начиная исчисление данной неустойки со следующего дня после истечения месячного срока с момента вступления настоящего решения в законную силу.

                Взыскать с акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (664033, Иркутская область, Иркутск город, ФИО1 улица, 257, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2009, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтальБетон» (666037, 

<

...> и Монтажников, д. 23, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.06.2020, ИНН: 

<

***>) 50 000 руб.  расходов по госпошлине.

 Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через Арбитражный суд Иркутской области, и по истечении  этого  срока  вступает  в  законную силу.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья                                                                                                         Е.А.Исаева