АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-8170/2023  « 04 » декабря 2023 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном онлайн - заседании дело по исковому  заявлению Управления строительной политики администрации городского  округа город Воронеж, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», г. Белгород  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному  контракту от 10.03.2020 № 40737102  

третье лицо: Муниципальное казенное учреждение городского округа город  Воронеж «Дирекция единого заказчика капитального строительства», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

при участии в судебном заседании: от истца: явка представителя не обеспечена, извещен; 

от ответчика с использованием системы веб-конференции информационной  системы «Картотека арбитражных дел» в режиме онлайн-заседания:  ФИО2, представитель по доверенности от 07.07.2023 № 169;  

от третьего лица: явка представителя не обеспечена, извещен; 

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», г.  Белгород (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца  с момента вступления решения в законную силу устранить недостатки  выполненных по муниципальному контракту № 40737102 от 10.03.2020  работ:  

- устранить протекания по линии примыкания кровли входного тамбура  главного входа к основной части здания множественные протечки по  потолку и стенам тамбура (ось Б), устранить многочисленные протечки но  кабинетам 1-го и 2-го этажа здания ФОКа в осях (1-8. А-В), для чего  необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу профилированного  листа - 12 м2, выполнить работы по герметизации стыков - 19 м.п.;  

- заменить потолочное покрытие «Армстронг» пришедшее в негодность  на площади 25 м2;  

- заменить пришедшие в негодность в результате замыкания  потолочные светильники в количестве 7 шт. (NEWLED.LVG-PRE.TZ.M.FK  или аналог);  

- устранить многочисленные разрушения и сколы плитки входных групп  (основной и запасных) - 18 м2;  

- устранить просадку и разрушение отмостки (ось А. 1-4) в объеме 7 м2  (разборка поврежденного асфальтового и плиточного участка,  восстановление покрытия отмостки);  

- заменить частично разрушенный керамогранит цоколя - 10 м2;  - привести лифт в рабочее состояние;  

- восстановить ригель ограждений для пандуса у центральной входной  группы в объеме 4.4 м.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест»,  г. Белгород (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета РФ 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Е.С. Завидовская