Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-251360/22-102-2282

г. Москва

31 марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 31 марта 2023 г.

Арбитражный суд в составе судьи Козловский В. Э., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривушиной Е.Е., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ОАО "РЖД" к АО "КРЭВРЗ" о взыскании 6 326 728 руб.

при участии представителей 

от истца: ФИО1 по дов. от 13.12.2021 г. №МОСК НЮ-14/Д, диплом регистрационный номер 292, 

от ответчика: ФИО2 по дов. № 69 от 17.05.2021 г. диплом рег номер 61

УСТАНОВИЛ:

ОАО "РЖД" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "КРЭВРЗ"  о взыскании 6 326 728 руб.

Истец на иске настаивает по доводам, приведенным в исковом заявлении, ссылается на представленные доказательства. Ответчик с заявленными требованиями не согласен. 

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД», Истец, Заказчик) и акционерным обществом «Красноярский электровагоноремонтный завод» (далее - АО «КрЭВРЗ», Ответчик, Подрядчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-1, КР-2, модернизации вагонов электропоездов, капитальному и среднему ремонту линейного оборудования электропоездов от 13 апреля 2021 г. № 23/ОКЭ-ЦДМВ/21/1/1 (далее - Договор).

Срок действия Договора установлен с 04 апреля 2021 г. по 19 мая 2022 г. (ст. 14 Договора).

Пунктом 1.1. Договора установлено, что Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту в объеме КР-1, КР-2, модернизации вагонов электропоездов, капитальному и среднему ремонту линейного оборудования электропоездов (далее - Объекты) структурных подразделений Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» (далее — Получатели) и передаче Заказчику их результатов (далее — Работы).

Согласно п. 1.4. Договора, объем и сроки выполнения Работ по каждому объекту указаны в календарном плане выпуска электроподвижного состава из капитального ремонта на 2021 г. (приложение №2 к Договору) (далее — Календарный план).

В соответствии с п. 1.7 Договора срок выполнения капитального ремонта вагона электропоезда, в том числе ремонт электрических машин, не может превышать сроков, установленных в Нормах простоя в капитальном ремонте и коэффициентов приведения моторвагонного подвижного состава, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 20 ноября 2020 г. № 2559/р, рассчитанных с даты подписания акта приемки и предварительного наружного осмотра вагона электропоезда, рельсового автобуса, поступившего в ремонт формы ЗРУ-1 (приложение №4 к Договору) (далее - акт формы ЗРУ-1).

Передача Объектов Подрядчику для выполнения Работ осуществляется в Пункте передачи с подписанием уполномоченными представителями Подрядчика и Получателя акта приемки и предварительного наружного осмотра подвижного состава, поступившего в ремонт по форме ЗРУ-1 (далее -акт формы ЗРУ-1) (п. 3.3 Договора).

Согласно п.3.5 Договора датой начала выполнения Работ по отношению к каждому Объекту является дата подписания Получателем и Подрядчиком акта формы ЗРУ-1.

После выполнения Работ Подрядчик по каждому Объекту передает на подпись представителю Центра технического аудита ОАО «РЖД» (далее -ЦТА) акт приемки из капитального ремонта моторвагонного подвижного состава формы ТУ-31 (приложение № 11 к Договору (далее - акт форма ТУ-31). Подрядчик после подписания представителями ЦТА акта формы ТУ-31 в течение 3 (трех) календарных дней, но не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, оформляет и направляет Получателю акты формы № ФПУ-26 по каждому Объекту (п.п. 3.8,3.10 Договора).

В соответствии с п.п. 4.1.1, 4.1.2 Подрядчик обязан принять от Получателя Объекты по акту формы ЗРУ-1 в сроки, установленные Календарным планом, выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора и передать Получателю их результаты, свободными от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки

В соответствии с Календарным планом в период с 10 апреля 2021 г. по 26 мая 2021 г. был запланирован капитальный ремонт (КР-2) вагона № 10 электропоезда № 0097 серии ЭД9М моторвагонного депо Горький-Московский Горьковской железной дороги.

Ответчиком был нарушен срок выполнения работ по капитальному ремонту вагона № 10 электропоезда № 0097 серии ЭД9М на 105 календарных дней

Нарушение ответчиком договорных обязательств подтверждается актом выполненных работ по форме ФПУ-26 от 08 сентября 2021 г. № 4213, актом формы ТУ-31 от 08 сентября 2021 г., актом формы ЗРУ-1 от 26 марта 2021 г., подписанных сторонами Договора.

В силу ст. 716 ГК РФ, а также п. 4.1.5 заключенного сторонами Договора Подрядчик обязан в течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (п.2 ст. 716 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Информация об объективных обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, а также уведомление Подрядчика о том, что он не приступит к выполнению работ ввиду указанных обстоятельств, Заказчику не поступала.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п.1 ст. 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 10.5 Договора в случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика (Получателя), предъявленного в соответствии с пунктом 3.12 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику (Получателю) пеню в размере 0,5% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком (Получателем) соответствующего требования.

Согласно п. 10.13 Договора для целей расчета неустойки по Договору стороны применяют цену Работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по Договору с учетом НДС.

Пунктом 12.2 Договора предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

Ввиду того, что Ответчиком были нарушены сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, в адрес Ответчика Истцом была направлена претензия от 29 сентября 2021 г. №ИСХ-7680/ЦДМВ с требованием уплатить пени за нарушение сроков выполнения работ по Договору. Согласно ответу на претензию от Ответчика от 27 октября 2021 г. №. 279 не находит оснований для удовлетворения претензии, требования претензии в добровольном порядке не удовлетворены.

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. В соответствии с п. 2 указанной статьи уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. Согласно разъяснениям, данным в п. 69 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016г. №7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ). Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000г. №263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. 

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы 6 неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. 

При этом, суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела. Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер. При этом, задача суда состоит в устранении явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

 В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 13.01.2011г. N11680/10, учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагается выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. 

Назначением института ответственности за нарушение обязательств является восстановление имущественной сферы потерпевшего. Иными словами, при определении подлежащей взысканию суммы неустойки необходимо исходить из задачи выплатить достойную компенсацию кредитору, при том, что это не должно приводить к неосновательному обогащению последнего. 

Оценив доказательства по делу в соответствии со ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что размер пеней 0,5% от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки, в течение 10 календарных дней с даты предъявления заказчиком (получателем) соответствующего требования является чрезмерным, поскольку в 5 раз превышает сложившиеся в деловом обороте хозяйствующих субъектов ставки пени (0,1%), превышает среднюю ставку по коммерческим кредитам, при этом в договоре для сторон предусмотрены разные ставки за нарушения обязательств: для подрядчика (ответчика) - 0,5% (п. 10.5 договора); для заказчика (истца) – 0,1% (п. 10.6 договора). В связи с чем, суд приходит к выводу, что исчисленная договорная неустойка явно несоразмерна последствиям ненадлежащего исполнения обязательств по договору. 

Указанная явная несоразмерность неустойки противоречит устойчивости и стабильности гражданского оборота. 

Рассматривая заявление ответчика о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ принимая во внимание фактические обстоятельства дела, специфику конкретных правоотношений, исходя из оценки соразмерности заявленных истцом к взысканию санкций, с учетом возможных финансовых последствий для каждой из сторон, соблюдая баланс интересов сторон, суд приходит к выводу о возможности применения ст. 333 ГК РФ и уменьшении размера начисленной истцом неустойки до 435 000 руб.

Судебные расходы, согласно ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 309-310, 330, 785 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167 - 171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "КРЭВРЗ" в пользу ОАО "РЖД" 435 000 руб. неустойки, а также взыскать 33 873 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении заявленных требований в остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяВ. ФИО3