АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-5662/2020

21 мая 2021 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Коровкиной А.О.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 

к акционерному обществу «Улан-Удэнский авиационный завод»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

об обязании исполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.2.5 договора  аренды № ЮР 0951 от 20.05.2016,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) выполнить следующие работы, указанные в  Программе планово-предупредительного ремонта ВЛ-110 кВ РМ-161/РМ-162 на 2019 год  (приложение № 2 к дополнительному соглашению № 3 от 25.09.2018 к договору аренды  двухцепной ЛЭП-110 кВ № ЮР 0951 от 20.05.2016), на 2020 год (приложение № 2 к  дополнительному соглашению № 4 от 25.10.2019 к договору аренды двухцепной ЛЭП-110  кВ № ЮР 0951 от 20.05.2016):  

- обход-осмотр линии электропередачи (на всей протяженности ЛЭП-110 кВ) в  срок до 31.10.2021;  

- верховой осмотр линии электропередачи (на всей протяженности ЛЭП-110 кВ) в  срок до 30.06.2021;  

- чистка трассы линии электропередачи от кустарниковой поросли, обновление  

диспетчерских наименований, нумераций опор, знаков безопасности (на всей  

протяженности ЛЭП-110 кВ) в срок до 31.07.2021; 

- текущий ремонт металлических конструкций, уголка, арматуры:  1. опоры №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в срок до 31.07.2021 2021,  

2. опоры №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 в срок до 31.08.2021,  3. опоры №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 в срок 30.09.2021;  

- ремонт монолитного железобетонного фундамента, при необходимости подсыпка  

грунта: 

1. опоры №№ 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в срок до 31.07.2021;  2. опоры №№ 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 в срок до 31.08.2021;  3. опоры №№ 21, 22, 23, 29, 31 в срок до 30.09.2021;  

- проверка и ремонт заземления, с вскрытием грунта, проверкой коррозии: 

1. опоры №№ 1,2, 2а, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в срок до 31.07.2021;  2. опоры №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 в срок до 31.08.2021;  

3. опоры №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 в срок до 30.09.2021;  

- ремонт, замена изоляторов, линейной арматуры, провода, грозотроса, гасителей  

вибрации: 

1. опоры №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в срок до 31.07.2021;  2. опоры №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 в срок до 31.08.2021;  

3. опоры №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 в срок до 30.09.2021;  - ремонт трещин железобетонных опор:  

1. опоры №№ 4, 8 в срок до 31.07.2021; 2. опоры №№ 15, 16 в срок да 31.08.2021; 

3. опоры №№ 24, 25, 26, 27, 28, 30 в срок до 30.09.2021;  

- мелкий ремонт дефектов, выявленных при обходе, при приёмке выполненных  

работ, при верховом осмотре (на всей протяженности ЛЭП-110 кВ) в срок до 30.09.2021; 

- замена части аварийного провода марки АС-150 и грозотроса (на всей  

протяженности ЛЭП-110 кВ) в срок до 31.10.2021; 

- замена проводов, линейной арматуры на опорах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в  

срок до 31.08.2021. Взыскать с акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  

ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

6 000 рублей – расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия через Арбитражный суд Республики Бурятия. 

Судья А.О. Коровкина