АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А01-2965/2019

г. Майкоп

22 октября 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

иск общества с ограниченной ответственностью "А-СтройСервис"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 385002, 

<

...>) к отделу капитального строительства Администрации муниципального  образования город Горячий Ключ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 353290,  

<

...>, каб. 42, 43) об изменении  муниципального контракта от 24.10.2018 г. № 0318300457618000198 удовлетворить.  

Внести изменения в муниципальный контракт от 24.10.2018 г.   № 0318300457618000198, заключенный между обществом с ограниченной  ответственностью «А-СтройСервис» и отделом капитального строительства  Администрации муниципального образования город Горячий Ключ на выполнение работ  по объекту: «Малобюджетный спортивный комплекс в станице Саратовской г. Горячий  Ключ», в части увеличения срока выполнения строительных работ до 24.05.2020г., срока  действия контракта до 31.08.2020г.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу, если это решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции. Жалоба подается  через суд, вынесший решение.  

Судья Р.В. Аутлева