АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А16-829/2024

г. Биробиджан

25 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2024 года.

 

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:

судьи Кручинина А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Князь Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (г. Благовещенск Амурской области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к администрации Волочаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области (п. Волочаевка-2 Смидовичский район Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):

– о расторжении договора на технологическое присоединение к электрическим сетям № ТПр 558/20;

– о взыскании 2 054 403,25 руб.,

при участии от истца ФИО1 (доверенность от 29.12.2023),

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к администрации Волочаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области о расторжении договора на технологическое присоединение к электрическим сетям № ТПр 558/20 и взыскании 2 054 403,25 руб.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, отзыв на иск не представил.

Рассмотрение дела проводится в отсутствие ответчика согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, изучив представленные документы, заслушав представителя истца, установил следующее.

Сторонами 19.06.2020 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТПр 558/20 (далее – Договор), согласно которому Сетевая организация (истец) обязалась осуществить технологическое присоединение электрических установок Заявителя (ответчик) к своим объектам электросетевого хозяйства (котельная Центральная), а последний – надлежащим образом исполнять обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, указанных в технических условиях.

Ответчик, внеся плату за технологическое присоединение в размере 142 381,50 руб., свои обязательства по технологическому присоединению не выполнил.

Соглашение о расторжении договора, направленное истцом в адрес ответчика 25.07.2023, последним не подписано и не возвращено, что и послужило причиной обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд, рассмотрев доводы истца, оценив представленные доказательства, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности, обязательства должны исполняться надлежащим образом, согласно условиям обязательства и требованиям закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, регулируется нормами, содержащимися в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в том числе:

– процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

– правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.

В соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью Договора:

1) Сетевая организация осуществляет:

– строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ от опоры. Поселок-00/1 до проектируемой трансформаторной подстанций. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи определить проектом в соответствии с действующими нормативно техническими документами и требованиями безопасности.

– строительство трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ. Место установки, тин, мощность силового трансформатора, наполнение, комплектацию РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ трансформаторной подстанции определить проектом, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности. В ТП 30/0.4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и перенапряжений.

– строительство линии электропередачи от Проектируемой трансформаторной подстанции до точки, располагаемой у границ земельного участка Заявителя. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи, определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

– фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

2) Заявитель осуществляет:

– выполнение проекта электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами и требованиями безопасности,

– монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующими нормативно – техническими документами и требованиями безопасности,

– электроснабжение потребителей 2 категории по надежности энергоснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание),

– блокировку препятствующую параллельной работе питающих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ,

– устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно- техническими документами и требованиями безопасности,

– установку до прибора учета электрической энергии, защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств,

– возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата,

– организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями, установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии,

– предоставление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий,

– допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии объекта совместно с представителями филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

– предъявление Филиалу АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» электроустановок, присоединяемого объекта заявителя, после выполнения монтажных и пусконаладочных работ проверки выполнения данных ТУ и составления «Акта выполнения технических условий.

Пунктом 15 Договора стороны определили, что договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон но основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объёме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда (п. 16 Договора).

В силу пунктов 1 и 2 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Расходы истца по выполнению обязательств являются убытками, подлежащими возмещению ответчиком в связи с его ненадлежащим поведением при исполнении обязательств по Договору.

Выполнение условий Договора сетевой организацией при помощи подрядной организации подтверждается договором подряда № 2021-14602-34 от 19.02.2021 с приложениями, справками о стоимости работ от 30.07.2021, актами о приемки выполненных работ от 30.07.2021 на сумму 2 130 266 руб.

Возражений со стороны ответчика суду не поступало, следовательно, исковые требования ответчиком признаны, так как согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая, что срок исполнения обязанностей по Договору ответчиком нарушен более, чем на 12 месяцев, суд считает возможным удовлетворить исковые требования о расторжении договора и взыскании 2 054 403,25 руб., согласно представленного расчета с учетом ранее внесенной ответчиком платы,

На основании изложенного суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца следует взыскать 24 472,02 руб. в возмещении расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

реШил:

исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор на технологическое присоединение к электрическим сетям № ТПр 558/20 от 19.06.2020, заключенный акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая компания" и администрацией Волочаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Взыскать с администрации Волочаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области (ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ИНН 

<

***>) задолженность в сумме 2 054 403,25 руб., а также 24 472,02 руб. в возмещение уплаты государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.  

 

Судья 

А.Н. Кручинин