АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-10694/20

г. Уфа

23 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена     16.09.2020

Полный текст решения изготовлен              23.09.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ибрагимовой А.Г., рассмотрев дело по иску

МУЭСП "УФАГОРСВЕТ" (ИНН 0276031020, ОГРН 1020202874064)

к ООО "ФИРМА СУ-10" (ИНН 0274101890, ОГРН 1050203896027)

о взыскании  33 280 руб. 01 коп. сумму пени (по последним уточнениям)

при участии в судебном заседании:     

в  отсутствие  сторон,  извещенных надлежащим образом  о времени и месте судебного разбирательства, 

          МУЭСП "УФАГОРСВЕТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

обратилось в Арбитражный суд  Республики Башкортостан с  иском  к  ООО "ФИРМА СУ-10" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 465 178 руб. 18 коп.  долга, 26 373 руб. 21 коп.  пеней  за период с 16.11.2019г. по 13.05.2020г., 44 087 руб. 78 коп. процентов  за пользование чужими денежными средствами;   пени  в размере 0,01% от суммы задолженности  1 465 178 руб. 18 коп. за каждый день просрочки, начиная с  14.05.2020г. по день его  фактической уплаты;  проценты за пользование  чужими денежными средствами в порядке ст.395 ГК РФ на сумму  основного долга в размере 1 465 178 руб. 18 коп., начиная с  14.05.2020г. по день его  фактической уплаты.

        Истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика       33 280 руб. 01 коп.  пеней. Уточнение иска судом принято в порядке ст.49 АПК РФ. 

        Ответчик  ходатайством  от  16.09.2020г.   признал сумму неустойки  в размере   33 280 руб. 01 коп.    

        Исследовав представленные доказательства, суд 

                                                       УСТАНОВИЛ:

         Предметом    иска   истцом  определено   требование  о взыскании (с учетом уточнения) 33 280 руб. 01 коп.  неустойки.

        В обоснование  иска  истцом  приведены  следующие  обстоятельства.

 Между Общество с ограниченной ответственностью «ФирмаСУ-10» (далее - ООО «Фирма СУ-10», Заказчик)  и Муниципальное унитарное электросетевое предприятие «Уфагорсвет» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МУЭСП «Уфагорсвет», Подрядчик)  05.08.2019г.  был  заключен  договор  подряда №42, по условиям  которого  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика и сдать Заказчику работы по устройству наружного освещения объекта строительства на объект «Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (корректировка)                   1 очередь»,  а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее. Цена договора, оговоренная в п.2.1. договора подряда №42 от 05.08.2019г., составляет - 2 012 112  руб., в том числе НДС (20%).

Дополнительным  соглашением  №1 от 02.09.2019г.  к  договору подряда №42 от 05.08.2019г. стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно-сметной документацией, выданной Заказчиком и составляет на момент подписания договора                           1 750 688 руб. 40 коп., в том числе НДС 20%.

МУЭСП «Уфагорсвет» выполнил работы по договору подряда №42 от05.08.2019г. на сумму 1 665 178 руб. 18 коп.,  что подтверждается:  актом о приемке выполненных работ №1 от 31.10.2019г. по устройствунаружного освещения объекта «Крытый каток в Орджоникидзевском районегородского округа город Уфа Республики Башкортостан (корректировка)            1 очередь» на сумму 276 424 руб. (в ценах 2001г.);

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.10.2019г. на сумму 1 665 178 руб. 18 коп., подписанных обеими сторонами и счет-фактурой  №2157 от 31.10.2019г.

ООО «Фирма СУ-10» были частично оплачены работы по договору подряда №42 от 05.08.2019г. платежными поручениями №18092 от 22.08.2019г. и  №18401 от 26.08.2019г. на общую сумму 200 000  руб.

Учитывая п.п.2.4., 4.4. договора подряда №42 от 05.08.2019г.задолженность ООО «Фирма СУ-10» перед МУЭСП «Уфагорсвет» по состоянию на 13.05.2020г. составляет 1 465 178 руб. 18 коп.

Данная задолженность подтверждается также актом сверки взаимныхрасчетов  на 31.12.2019г. между МУЭСП «Уфагорсвет» и ООО «Фирма СУ-10» о задолженности по договору подряда №42 от 05.08.2019г. в пользу МУЭСП «Уфагорсвет» в размере 1 465 178 руб. 18 коп.

Согласно п.2.4. договора подряда №42 от 05.08.2019г. оплата работосуществляется в следующем порядке:

предоплата в размере 80% стоимости работ на основании выставленныхПодрядчиком счетов в течение 5 дней с момента их получения Заказчиком;

оставшиеся - 20% стоимости работ - в течении 15 дней после подписания Сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации.

Пункт 7.3. договора подряда  №42 от 05.08.2019г. предусматривает, чтопри нарушении Заказчиком сроков оплаты работ, предусмотренных п.2.4настоящего договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

ООО «Фирма СУ-10» начислены пени с 16.11.2019г. по 13.05.2020г. в сумме  26 373 руб. 21 коп. (= 1 465 178 руб.18 коп. * 180дн. * 0,01%)

Во исполнение досудебного порядка урегулирования спора истец МУЭСП «Уфагорсвет» 13.03.2020г. направил в адрес ответчика ООО «Фирма СУ-10» заказным письмом претензию (исх. № 366-01 от 13.03.2020г.), в которой просил погасить сумму задолженности в полном объёме в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Однако, данная претензия ответчиком была проигнорирована.

На момент рассмотрения спора основная задолженность оплачена в полном объеме.

Согласно уточненным исковым требованиям, задолженность ответчика перед истцом составляет  33 280 руб. 01 коп.  пеней за период с 19.06.2020 г. по 04.09.2020 г. 

Согласно ст.ст. 309, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны обязаны исполнять свои обязательства надлежащим образом и в соответствии с заключенным договором. В соответствии со ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения. При этом в силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.         

        Ответчиком  требования истца в сумме 33 280 руб. 01 коп.  неустойки   признаны в полном объеме.

 Статьей 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрены случаи освобождения от доказывания обстоятельств, признанных сторонами.

  В силу ч.3 ст.70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

         При изложенных обстоятельствах, и,  как признанные  ответчиком в полном объеме  исковые требования истца в сумме  33 280 руб. 01 коп.  пеней    подлежат  удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом признания требований ответчиком.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования МУЭСП "УФАГОРСВЕТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО "ФИРМА СУ-10" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу МУЭСП "УФАГОРСВЕТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 33 280 руб. 01 коп. сумму пени, 600 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

МУЭСП "УФАГОРСВЕТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) возвратить из федерального бюджета 27 756 руб. 39 коп. сумму излишне оплаченной платежным поручением №782 от 12.05.2020 г.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

  Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

  Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

     Судья З.Г. Фазлыева