АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-51126/2025

29 декабря 2025 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 декабря 2025 года

Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2025 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Ф. Нестеровой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.Е. Капитоновой, рассмотрел в судебном заседании дело № А60-51126/2025 по иску Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее – Министерство, истец)

к обществу с ограниченной ответственностью "СЫЛВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее – общество "СЫЛВА", ответчик)

об обязании по договору аренды от 29.12.2008 № 420 в течение года с момента вступления решения в законную силу выполнить мероприятия за 2023 год по лесовосстановлению на площади 64,7 га и подготовке почвы под культуры будущего года на площади 36,3 га.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов суду не заявлено, заявлений, ходатайств не поступило.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СЫЛВА" об обязании по договору аренды от 29.12.2008 № 420 в течение года с момента вступления решения в законную силу выполнить мероприятия за 2023 год по лесовосстановлению на площади 64,7 га и подготовке почвы под культуры будущего года на площади 36,3 га.

Ответчиком отзыв не представлен, дело рассмотрено в порядке ч. 1,3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между Министерством и обществом "СЫЛВА" заключен договор аренды лесного участка от 29.12.2008 № 420, в соответствии с которым арендодатель обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок для заготовки древесины, общей площадью 12 809,0 га, расположенный по адресу: Свердловская область, Шалинское ГО, Шалинское лесничество Восточное участковое лесничество урочище СПК «Сылва».

В соответствии с пп. «а» п. 12 договора арендатор обязан использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором.

Согласно пп. «ж» п. 12 договора арендатор обязан осуществлять за счет своих средств санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, указанных в проекте освоения лесов и приложением № 6 к договору.

Арендатором в 2023 году мероприятия по лесовосстановлению не выполнены на площади 64,7 га, по подготовке почвы под культуры будущего года - на площади 36,3 га.

В адрес ответчика направлены претензии от 19.12.2024 № 503, от 20.02.2025 № 73 о необходимости проведения мероприятий. Претензии остались без удовлетворения, что явилось основанием для обращения Министерства в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Лица, которым лесные участки предоставлены в аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со ст. 12 Лесного Кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ). Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (статья 88 ЛК РФ).

В ч. 4 ст. 61 ЛК РФ установлено, что проект освоения лесов определяет объем соответствующих лесовосстановительных мероприятий и утверждается на основании материалов лесоустройства.

В силу ч. 5 ст. 62 ЛК РФ лесовосстановление проводится лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30 и частью 4.1 статьи 32 ЛК РФ.

В соответствии с ч. 7 ст. 62 ЛК РФ Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации Приказом от 29.12.2021 № 1024 утверждены Правила лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления (далее - Правила).

Согласно пп. «а» п. 6 Правил лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30, частью 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 50 Правил в целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве проводятся агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами.

Арендатором в 2023 году мероприятия по лесовосстановлению не выполнены на площади 64,7 га, по подготовке почвы под культуры будущего года - на площади 36,3 га.

Ответчиком доказательств выполнения возложенных на него законом и договором обязательств по лесовосстановлению и иных мероприятий не представлено, возражения по заявленным исковым требованиям не заявлены, какие-либо доказательства, свидетельствующие о невозможности выполнения указанных мероприятий, не представлены.

Из представленного в материалы дела ответа на претензию от 22.05.2025 № 22/05 следует, что общество «Сылва» указало, что невыполнение обязательств в части подготовки почвы под лесные культуры будущего года было невозможно в связи с отсутствием площадей. В то же время ответчик указал, что по итогам сплошных рубок за 2024 год появились площади для выполнения обязательств по договору аренды.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком возложенных на него законом и договором аренды лесного участка обязанностей подтвержден материалами дела, требования истца о понуждении ответчика к выполнению мероприятий подлежат удовлетворению в указанном истцом объеме, суд обязывает ответчика в течение года с даты вступления решения суда в законную силу выполнить по договору аренды от 29.12.2008 № 420 мероприятия по лесовосстановлению за 2023 год на площади 64,7 га, по подготовке почвы под культуры будущего года на площади 36,3 га.

В силу подп. 1 п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины, в связи с чем с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "СЫЛВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение года с даты вступления решения суда в законную силу выполнить по договору аренды от 29.12.2008 № 420 мероприятия по лесовосстановлению за 2023 год на площади 64,7 га, по подготовке почвы под культуры будущего года на площади 36,3 га.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЫЛВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50000 руб.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» https://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда https://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья Е.Ф. Нестерова