АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-9662/2016

г. Чебоксары

14 февраля 2017 года

Резолютивная часть решения оглашена 13 февраля 2017 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Чебоксары , (ИНН 2126002962, ОГРН 1022101144691), Россия 428032, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. К. Маркса, д. 36 ,

к обществу с ограниченной ответственностью "МонСтриТ", (ИНН 2130002980, ОГРН  1062130005849), Россия 428014, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Ашмарина, д. 1 А,

об обязании устранить недостатки,

без участия сторон,

установил:

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (далее – истец) обратилось в суд с иском (с учетом уточнений) к обществу с ограниченной ответственностью "МонСтриТ" (далее – ответчик) об обязании в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда устранить следующие недостатки и дефекты на объекте МБДОУ «Детский сад №16» г.Чебоксары:

1) множественные трещины на стенах и потолках по всему зданию МБДОУ «Детский сад №16» г.Чебоксары;

2) трещины и отслоения штукатурки на стене тамбура главного входа;

3) трещины и сколы штукатурки фасада здания;

4) отклеивание плиток эвакуационного выхода 1 и 2 группы;

5) ржавчина на металлической конструкции эвакуационных выходов;

6) трещины, ямы, провалы на асфальто-бетонном покрытии по всему периметру территории;

7) не демонтирован не запитанный кабель напряжения на здании прачечной;

8) отсутствует горячее водоснабжение в прачечной;

9) провалы грунта в местах прокладки коммуникаций от основного здания к прачечной;

10) деформирование дощатого покрытия теневых навесов;

11) намокание стен тамбуров выходов из основного здания в сторону прачечной;

12) проседание тротуарной плитки подходов к теневым навесам;

13) протекание кровли в местах примыкания стены и потолка выхода группы №2;

14) вздутие линолеума групповых помещений № 2, 4, 5;

15) не сдано в эксплуатацию наружное освещение на баланс МБУ «УЖКХиБ»

осуществив следующие виды работ:

№ п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

1

Перетирка штукатурки внутренних помещений ( устранение трещин на стенах и потолках ) S= (840,7+1657)7100x0,5

100 М2

ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

7,493

2

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%

100 м2

окрашиваемой поверхности

4,971

3

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%

100 м2

окрашиваемой поверхности

2,522

5

Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов

100 М2

ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

0,5

6

Финишная отделка

100 М2

ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

0,5

10

Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"

т

0,009

11

Смесь сухая фактурная для декоративного штукатурного слоя "Инфотерм-Д"

т

0,2249

13

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.

100 плиток

1,5

13,1

Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

м2

12,1

13,2

Строительный мусор

т

0.15

14

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза

100 м2

окрашиваемой поверхности

1

18

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2

100 м2

0,59

18,1

Строительный мусор

т

5,31

19

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 мЗ материала основания(в плотном теле)

14,75

20

Песок природный для строительных работ средний

мЗ

14,75

21

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных

1000 м2 основания

0,059

22

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

100 М2

ОСНОВАНИЯ

0,2

23

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 мЗ материала основания(в плотном теле)

0,02

24

Песок природный для строительных работ средний

мЗ

2

25

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором

100 м2 тротуара

0,2

27

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км( грунт)

1 Т ГРУЗА

5,1

28

Работа на отвале, группа грунтов 2-3

1000 мЗ грунта

0,003

29

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 -2

100 мЗ

уплотненного грунта

0.003

30

Демонтаж кабеля

100 м

0.1

31

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных

100 мЗ

конструкций

0,015

32

Разборка покрытий и оснований щебеночных

100 мЗ

конструкций

0,0375

33

Разборка бортовых камней на бетонном основании

100 м

0,05

34

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов 2

1000 мЗ грунта

0,105

35

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2

100 мЗ грунта

0,105

36

Песок природный для строительных работ средний

м3

10,5

37

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2

1000 мЗ грунта

0,0897

38

Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм

1 км трубопровода

0,04

39

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм

1 км трубопровода

0,04

41

ФИО2 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)

10м

4

42

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных

1000 м2 основания

0,025

43

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03

1000 м2 основания

0,25

44

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 мЗ материала основания(в плотном теле)

0,065

45

Песок природный для строительных работ средний

мЗ

6,5

46

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях

100 м бортового камня

0,05

47

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100 М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ

0,23

48

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком

100 м примыканий

0,23

49

Устройство желобов подвесных

100 М ЖЕЛОБОВ

0,24

50

Перестилка дощатых полов не крашеных

100 м2

1,5

51

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах

100 м2

1,5

52

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

100 М ПЛИНТУСА

0,75

52,1

Строительный мусор

т

0,0825

53

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

100 м2 покрытия

1,143

54

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 поверхности покрытия изоляции

1,143

55

Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2

100 м2 покрытия

1,143

57

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2

100 М ПЛИНТУСА

0,75

В судебном заседании объявлялся перерыв с 06.02.2017 по 13.02.2017.

Стороны с судебное заседание не явились, о месте и времени проведения заседания извещены надлежащим образом.

Ответчик письменных пояснений, отзыв  на иск не представил. Представитель ответчика неоднократно принимал участие в предварительных судебных заседаниях, знал о предъявленных исковых требованиях, однако, возражений по существу не заявил.

 В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Суд, изучив материалы дела, установил.

Между истцом (муниципальный заказчик) и ответчиком (генеральный подрядчик) заключен муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд города Чебоксары №42 от 09.12.2011, по которому муниципальный заказчик поручает, а генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ для муниципальных нужд города Чебоксары по строительству объекта «Переустройство здания вечерней общеобразовательной школы № 2 под детский сад на 75 мест по ул. Фруктовая, 31а г. Чебоксары». (пункт 1.1 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 28746049 руб. Цена является твердой. 

В соответствии с календарным паном выполнения работ ввод объекта в эксплуатацию производиться 07 июня 2012 года.

В соответствии с пунктом 5.1.1 контракта генеральный подрядчик принимает на себя обязанности качественно выполнить все работы по строительству объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями и совместно с муниципальным заказчиком обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Пунктом 10.1 контракта установлено, что генеральный подрядчик гарантирует:

-выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта, 

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет, в срок не позднее 1 месяца с момента их выявления; 

-нормальное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации.

Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта и работ - 5 лег с момента приемки объекта в эксплуатацию. (пункт 10.2 контракта).

Выполнение ответчиком работ подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.01.2012, №2 от 29.02.2012, №3 от 25.03.2012, №4 от 25.04.2012, №5 от 25.05.2012, №6 от 25.06.2012, №7 от 25.07.2012, №8 от 25.08.2012, №9 от 20.09.2012, №10 от 20.09.2012 и актами о приемке выполненных работ №1 от 31.01.2012, №2 от 29.02.2012, № 3 от 25.03.2012, №№4, 5 от 25.04.2012,  №6 от 25.05.2012, №№8, 9, 10, 11 от 25.06.2012, №№7, 12, 13, 14, 15 от 25.07.2012, №№16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 от 25.08.2012, №№28, 29, 31, 32, 34, 35 от 20.09.2012.

07.04.2016 на объекте выявлены недостатки в период гарантийного срока, что подтверждается актом о выявленных недостатках (дефектах) в выполненных работ в пределах гарантийного срока.

Согласно акту от 07.04.2016 в процессе эксплуатации объекта заказчиком выявлены следующие недостатки:

- множественные трещины на стенах и потолках по всему зданию МБДОУ «Детский сад №16» г.Чебоксары;

- трещины и отслоения штукатурки на стене тамбура главного входа;

- трещины и сколы штукатурки фасада здания;

- отклеивание плиток эвакуационного выхода 1 и 2 группы;

- ржавчина на металлической конструкции эвакуационных выходов;

-трещины, ямы, провалы на асфальто-бетонном покрытии по всему периметру территории;

- не демонтирован не запитанный кабель напряжения на здании прачечной;

- отсутствует горячее водоснабжение в прачечной;

- провалы грунта в местах прокладки коммуникаций от основного здания к прачечной;

- деформирование дощатого покрытия теневых навесов;

- намокание стен тамбуров выходов из основного здания в сторону прачечной;

- проседание тротуарной плитки подходов к теневым навесам;

- протекание кровли в местах примыкания стены и потолка выхода группы №2;

- вздутие линолеума групповых помещений № 2, 4, 5;

- не сдано в эксплуатацию наружное освещение на баланс МБУ «УЖКХиБ».

Истец направил в адрес ответчика претензию от 19.04.2016 №332 с требованием об устранении выявленных дефектов.

Ответчик требования не исполнил, работы по устранению дефектов не выполнил.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по устранению недостатков, выявленных в период гарантийного срока, послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве; заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (статьи 722 и 724 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 Кодекса в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно пункту 1 статьи 755 Кодекса подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

В силу пункта 2 статьи 755 Кодекса подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

По смыслу названной правовой нормы, в пределах гарантийного срока устанавливается презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленные в пределах гарантийного срока.

Таким образом, в случае заявления заказчиком о недостатках работы, обнаруженных в пределах срока гарантии, бремя доказывания возникновения недостатков по основаниям, не связанными с действиями подрядчика, возлагается на последнего.

В силу п.3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Факт наличия указанных истцом в уточнениях к иску недостатков не оспаривается ответчиком. Доказательств, что возникновение дефектов связано с действиями заказчика (неправильная эксплуатация) в материалы дела не представлено, ходатайств о назначении по делу судебной экспертизы не заявлено.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что факт обнаружения недостатков в период гарантийной эксплуатации объекта подтвержден материалами дела и не опровергнут ответчиком, вина заказчика в их возникновении не доказана ответчиком, требования об устранении дефектов правомерны.

В связи с чем, суд признает обоснованным требование истца о понуждении ответчика безвозмездно устранить недостатки выполненных работ.

Суд отказывает в требовании истца о сдаче в эксплуатацию наружного освещения на баланс МБУ «УЖКХиБ» поскольку, данное требование не относиться к недостаткам (дефектам) на объекте строительства на который распространяется гарантийный срок. 

Расходы по уплате государственной пошлины суд по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «МонСтриТ» в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда устранить следующие недостатки и дефекты на объекте МБДОУ «Детский сад №16» города Чебоксары:

1) множественные трещины на стенах и потолках по всему зданию МБДОУ «Детский сад №16» г.Чебоксары;

2) трещины и отслоения штукатурки на стене тамбура главного входа;

3) трещины и сколы штукатурки фасада здания;

4) отклеивание плиток эвакуационного выхода 1 и 2 группы;

5) ржавчина на металлической конструкции эвакуационных выходов;

6) трещины, ямы, провалы на асфальто-бетонном покрытии по всему периметру территории;

7) не демонтирован не запитанный кабель напряжения на здании прачечной;

8) отсутствие горячего водоснабжения в прачечной;

9) провалы грунта в местах прокладки коммуникаций от основного здания к прачечной;

10) деформирование дощатого покрытия теневых навесов;

11) намокание стен тамбуров выходов из основного здания в сторону прачечной;

12) проседание тротуарной плитки подходов к теневым навесам;

13) протекание кровли в местах примыкания стены и потолка выхода группы №2;

14) вздутие линолеума групповых помещениях № 2, 4, 5;

выполнив следующие виды работ:

№ п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

1

Перетирка штукатурки внутренних помещений ( устранение трещин на стенах и потолках ) S= (840,7+1657)7100x0,5

100 М2

ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

7,493

2

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%

100 м2

окрашиваемой поверхности

4,971

3

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%

100 м2

окрашиваемой поверхности

2,522

5

Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов

100 М2

ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

0,5

6

Финишная отделка

100 М2

ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

0,5

10

Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"

т

0,009

11

Смесь сухая фактурная для декоративного штукатурного слоя "Инфотерм-Д"

т

0,2249

13

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.

100 плиток

1,5

13,1

Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

м2

12,1

13,2

Строительный мусор

т

0.15

14

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза

100 м2

окрашиваемой поверхности

1

18

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2

100 м2

0,59

18,1

Строительный мусор

т

5,31

19

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 мЗ материала основания(в плотном теле)

14,75

20

Песок природный для строительных работ средний

мЗ

14,75

21

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных

1000 м2 основания

0,059

22

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

100 М2

ОСНОВАНИЯ

0,2

23

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 мЗ материала основания(в плотном теле)

0,02

24

Песок природный для строительных работ средний

мЗ

2

25

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором

100 м2 тротуара

0,2

27

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км( грунт)

1 Т ГРУЗА

5,1

28

Работа на отвале, группа грунтов 2-3

1000 мЗ грунта

0,003

29

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 -2

100 мЗ

уплотненного грунта

0.003

30

Демонтаж кабеля

100 м

0.1

31

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных

100 мЗ

конструкций

0,015

32

Разборка покрытий и оснований щебеночных

100 мЗ

конструкций

0,0375

33

Разборка бортовых камней на бетонном основании

100 м

0,05

34

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов 2

1000 мЗ грунта

0,105

35

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2

100 мЗ грунта

0,105

36

Песок природный для строительных работ средний

м3

10,5

37

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2

1000 мЗ грунта

0,0897

38

Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм

1 км трубопровода

0,04

39

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм

1 км трубопровода

0,04

41

ФИО2 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)

10м

4

42

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных

1000 м2 основания

0,025

43

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03

1000 м2 основания

0,25

44

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 мЗ материала основания(в плотном теле)

0,065

45

Песок природный для строительных работ средний

мЗ

6,5

46

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях

100 м бортового камня

0,05

47

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100 М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ

0,23

48

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком

100 м примыканий

0,23

49

Устройство желобов подвесных

100 М ЖЕЛОБОВ

0,24

50

Перестилка дощатых полов не крашеных

100 м2

1,5

51

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах

100 м2

1,5

52

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

100 М ПЛИНТУСА

0,75

52,1

Строительный мусор

т

0,0825

53

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

100 м2 покрытия

1,143

54

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 поверхности покрытия изоляции

1,143

55

Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2

100 м2 покрытия

1,143

57

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2

100 М ПЛИНТУСА

0,75

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МонСтриТ» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 (Шесть тысяч) руб.00 коп.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова