РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-196011/25-27-1336

г. Москва

19 сентября 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2025года

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2025 года

Арбитражный суд в составе судьи Крикуновой В.И.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" (115193, Г.МОСКВА, УЛ ЮЖНОПОРТОВАЯ, Д. 16, КВ. 58, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001)

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМФИНСТРОЙ" (109429, Г.МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д.20, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001)

о взыскании денежных средств в размере 4 213 298  руб. 35 коп.

при участии: согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД"  (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО "ПРОМФИНСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по Договору субподряда № 29/2021-08 от 20.08.2021 года в размере 4 060 214 рублей 12 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.05.2025 года по 16.09.2025 года в размере 248 507  руб. 36 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам ст.395 ГК РФ с 17.09.2025 года и до полного погашения задолженности. (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ)

Суд, руководствуясь статьей 136, частью 4 статьи 137 АПК РФ, пунктом 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.2024 N 12 "О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде" завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания.

Отзыв на исковое заявление ответчиком не представлен.

В силу ч. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с ч. 3 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации последствия.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 20 августа 2021 года между ООО «Чистый город» (далее - Субподрядчик) и АО «ПРОМФИНСТРОЙ» (далее - Генподрядчик) заключен Договор субподряда № 29/2021-08 на строительно-монтажные работы, (далее - Договор) в соответствии с которым, Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ (далее по тексту - Работы) по строительству объектов МЦК, а/ дороги и благоустройству в рамках строительства Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) (далее по тексту - Объект) на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ» (далее по тексту - Заказчик) расположенных по адресу: РФ, 109429, г. Москва, мкр. Капотня, 2-й квартал, территория АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств (3.1. Договора).

В соответствии с п. 1.2. Договора, перечень и виды, поручаемых Субподрядчику Работ на Объекте определяются утвержденной рабочей и сметной документацией на выполнение Работ, выданной Генподрядчиком и Приложением № 5.1 «Перечень и виды, поручаемых Субподрядчику Работ» к Договору (в случае изменения объемов оформляется Приложение 5.2; 5.3 «Перечень и виды, поручаемых Субподрядчику Работ» и т.д.)

Субподрядчик обязуется сдать результат выполненных Работ, готовый к эксплуатации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором, в сроки, определяемые Договором (п.1.4. Договора).

Из п.2.1. следует, что Стоимость Работ, поручаемых Субподрядчику по Договору, определяется Регламентом определения стоимости работ (Приложение №1 «Регламент определения стоимости работ» к Договору). На стоимость Работ в текущих ценах начисляется НДС-20%.

В соответствии с п. 2.4. Договора, Субподрядчик обязан представить Генподрядчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Генподрядчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата выполненных Работ производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика и/или посредством осуществления зачета взаимных требований сторон (взаимозачет) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных  дней  с  момента  выставления  счета-фактуры  Субподрядчиком,  после получения от Субподрядчика счета-фактуры, при условии погашения Субподрядчиком задолженности перед Генподрядчиком по оплате услуг и иных расходов, предусмотренных Договором, а также выполнения Субподрядчиком требований Генподрядчика по оплате Субподрядчиком штрафов, пеней и иных санкций, за нарушение условий Договора, за вычетом 10% (десяти процентов) от стоимости выполненных Работ для создания гарантийной суммы (Отложенного платежа), которая удерживается Генподрядчиком в целях надлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору (п.2.5. Договора).

Расчеты между Сторонами за выполненные по Договору Работы производятся в порядке и на условиях установленных настоящим Договором, оплата генподрядных и иных услуг, предусмотренных Договором, а также неустойки (штрафов, пеней и т.д.) и иных санкций за нарушение условий Договора, производится Сторонами путем проведения взаимозачета и/или иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ (п. 2.9.Договора).

Согласно п.2.10. Договора, днем исполнения обязательств Генподрядчика по оплате выполненных Работ, а также материалов и оборудования, если между Сторонами Договора согласован порядок обеспечения Работ материалами и оборудованием, является день, в который денежные средства были списаны с расчетного счета Генподрядчика.

В силу п.4.13.Договора, Субподрядчик обязан сдавать Генподрядчику акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на основании сметной документации. Сдавать Генподрядчику акты по форме № КС-2 с подтверждением объемов выполненных работ руководителем проекта Заказчика, не позднее 15 числа отчетного месяца. В случае нарушения сроков (задержки) передачи актов о приёмки выполненных работ по Форме № КС-2 и справки о стоимости работ (Форма КС-3) и других документов, и/или их ненадлежащего оформления данные документы считаются не предоставленными и подлежат рассмотрению в следующем месяце.

Субподрядчик подписывает представленный Генподрядчиком Акт оказанных услуг за отчетный месяц в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения или представляет в указанный срок обоснованный мотивированный отказ от подписания. В случае не предоставления обоснованного мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг за отчетный месяц, он считается принятым Субподрядчиком и ген. услуги подлежат оплате (п. 4.14.Договора).

Генподрядчик обязан организовать приемку выполненных Субподрядчиком Работ в соответствии со строительными нормами и правилами и в установленном у Заказчика порядке и принять на условиях Договора выполненные Субподрядчиком Работы (п.5.1. Договора).

В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по устройству покрытий дорог на объекте, 04 мая 2023 года Стороны заключили Дополнительное соглашение № 4 в соответствии с которым, Генподрядчик поручает, а Субподрядчик дополнительно принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по устройству покрытий дорог (далее по тексту - Работы) на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ», расположенной по адресу: РФ, 109429, г. Москва, мкр. Капотня, 2-й квартал (п.1 Соглашения).

Согласно п.2. Соглашения, Стоимость Работ, поручаемых Субподрядчику по Дополнительному соглашению, определяется «Единичными расценками на выполнение Работ» (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения).

Пунктом 3. Соглашения стороны согласовали сроки выполнения Работ:

3.1. Начало Работ: 04.05.2023 г.

3.2. Окончание Работ 31.05.2024 г.

Кроме того, в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по устройству покрытий дорог на объекте: Строительство объектов МЦК, а/дороги и благоустройство в рамках строительства Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ», 31 мая 2024 года Стороны заключили Дополнительное соглашение № 5 в соответствии с которым, Генподрядчик поручает, а Субподрядчик дополнительно принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по устройству покрытий дорог (далее по тексту - Работы) на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ», расположенной по адресу: РФ, 109429, г. Москва, мкр. Капотня, 2-й квартал (п.1 Соглашения).

Согласно п.2. Соглашения, Стоимость Работ, поручаемых Субподрядчику по Дополнительному соглашению, определяется «Единичными расценками на выполнение Работ» (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения).

Пунктом 3. Соглашения стороны согласовали сроки выполнения Работ:

3.1. Начало Работ: 01.06.2024 г.

3.2. Окончание Работ 31.12.2024 г.

Субподрядчик исполнил свои обязательства по Договору своевременно и в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), а также выставленными счетами.

18.04.2025 года ООО «Чистый город» направило в адрес АО «ПРОМФИНСТРОЙ» на согласование и подпись все документы, предусмотренные Договором (Исх. № 1704/25-1 от 17.04.2025г.), а именно: Акт выполненных работ (КС-2) № 139 от 17.04.2025г. по Договору 29/2021-08 от 20.08.2021г. с учетом Дополнительного соглашения № 4 от 04.05.2023г. и Дополнительного соглашения № 5 от 20.08.2024г. по объекту: Строительство объектов МЦК, а/дороги и благоустройству в рамках строительства Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН); справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 139 от 17.04.2025г. по Договору 29/2021-08 от 20.08.2021г. с учетом Дополнительного соглашения №4 от 04.05.2023г. и Дополнительного соглашения №5 от 20.08.2024г. по объекту: Строительство объектов МЦК, а/дороги и благоустройству в рамках строительства Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) на территории АО " Газпромнефть-МНПЗ", счет-фактуру № 139 от 17.04.2025г.; счет на оплату № 114 от 17.04.2025г., отчет по материалам - отчет благоустройство АД3; исполнительные схемы.

Данный факт подтверждается копией сопроводительного письма от 18.04.2025 года Исх. № 1704/25-1 от 17.04.2025г., а также описью вложения.

Данное письмо получено АО «ПРОМФИНСТРОЙ» 23.04.2025 года нарочно, о чем свидетельствует отчет об отслеживании почтового отправления с трек-номером 11540906519368.

В нарушение п.5.1. Договора, Генподрядчик до настоящего времени не организовал приемку, не принял выполненные и отраженные в Акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) - КС-2, КС-3 № 139 от 17.04.2025 года работы и не оплатил их.

Выполненные ООО «Чистый город» работы на сегодняшний день приняты Заказчиком - АО «Газпромнефть-МНПЗ», у Генподрядчика -АО «ПРОМФИНСТРОЙ» и полностью оплачены.

Кроме того, истец указывает, что выполненные ООО «Чистый город» работы на сегодняшний день приняты Заказчиком у Генподрядчика и полностью оплачены.

В соответствии с условиями Договора субподряда № 29/2021-08 от 20.08.2021 года, Генподрядчик может оказывать Субподрядчику генподрядные услуги.

Так, в силу п. 2.11. Договора, в случаях, когда Генподрядчик оказывает Субподрядчику услуги (аренда и т.д) по предоставлению ему: строительной (крановая техника, экскаваторы, вышки, подъемники и т.д.) и/или иной техники (с экипажем/без экипажа), специальной одежды (обуви), питьевой воды, бытовых блок-контейнеров, проживание в общежитии, туалетных кабинок и обеспечению горюче-смазочными материалами для работы машин и механизмов Субподрядчика, то расчет стоимости таких услуг производится и оплачивается по ценам (тарифам, расценкам и т.д.) Генподрядчика указанным в Приложении № 7 «Расценки на аренду техники, производственные площади, предоставление расходных материалов» к Договору, если иное не согласовано Сторонами. Стоимость этих услуг, может быть изменена Генподрядчиком в одностороннем порядке. Об изменении стоимости Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика за 10 дней после оказания услуг.

Из п.2.8. Договора следует, что Генподрядные услуги (административно- хозяйственные расходы Подрядчика, связанные       с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых Субподрядчиком; приемкой от Субподрядчика и сдачей Заказчику Работ, выполняемых Субподрядчиком и т.д.) составляют 4 (Четыре) %, включая НДС-20% от стоимости выполненных Работ без учета стоимости материалов на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-З). Акты по оказанию генподрядных услуг подписываются одновременно с документами (форма № КС-3).

В силу п. 2.9. Договора, расчеты между Сторонами за выполненные по Договору Работы производятся в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, оплата генподрядных и иных услуг, предусмотренных Договором, а также неустойки (штрафов, пеней и т.д.) и иных санкций за нарушение условий Договора, производится Сторонами путем проведения взаимозачета и/или иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.

Согласно сведениям, предоставленным АО "ПРОМФИНСТРОЙ" 06.08.2025 года через систему электронного документооборота (ЭДО) ДИАДОК, стоимость Генподрядных услуг по Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 139 от 17.04.2025г. составляет 153 084,23 рублей (счет -фактура № 6235 (уточненная).

Сумма задолженности по Договору субподряда № 29/2021-08 от 20.08.2021 года составляет в размере 4 060 214 рублей 12 копеек (КС № 139) (4 213 298,35 руб. (долг) - 153 084,23 руб. (генподрядные услуги)).

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

В соответствии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с ч. 6 ст. 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Доказательств направления ответчиком в адрес истца мотивированного отказа от приёмки выполненных работ не представлено, в связи с чем, акты считаются подписанными в порядке п. 4 ст. 753 ГК РФ, а работы считаются выполненными в соответствии со строительным нормами и правилами, принятыми Генподрядчиком без замечаний. В связи с чем, выполненные и принятые работы подлежат оплате.

Доказательства исполнения обязательства по оплате выполненных работ на сумму 4 060 214 руб. 12 коп. ответчиком в материалы дела не представлено, заявленный размер долга ответчиком документально не опровергнут, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.05.2025 года по 16.09.2025 года.

Согласно статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Пунктом 37 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности  за нарушение обязательств» установлено, что проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

С учетом данной правовой нормы истцом был произведен расчет процентов за пользование чужими средствами, согласно которому общая сумма за период с 24.05.2025 года по 16.09.2025 года составляет 248 507 руб. 36 коп.

Расчет процентов судом проверен и признается правильным.

Требование о взыскании процентов в размере 248 507 руб. 36 коп. подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму задолженности по ст. 395 ГК РФ за период с 17.09.2025 до момента фактического исполнения денежного обязательства.

В соответствии с п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет суммы процентов по ст.395 ГК РФ, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть I статьи 7, статья 8, пункт 16 части I статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

С учетом изложенного, судом также признаются правомерными требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,  начисленными на сумму задолженности по ст. 395 ГК РФ за период с 17.09.2025  до момента фактического исполнения денежного обязательства.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АО "ПРОМФИНСТРОЙ" (109429, Г.МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д.20, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001) в пользу ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" (115193, Г.МОСКВА, УЛ ЮЖНОПОРТОВАЯ, Д. 16, КВ. 58, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001) задолженность в размере 4 060 214 руб. 12 коп., проценты в размере 248 507 руб. 36 коп.

Дальнейшее начисление процентов производить по правилам ст. 395 ГК РФ на сумму 4 060 214 руб. 12 коп., начиная с 17.09.2025 до фактической оплаты долга.

Взыскать с АО "ПРОМФИНСТРОЙ" (109429, Г.МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д.20, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 154 262 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.И. Крикунова