АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

тел./факс. (4242) 460-945, 460-952, сайт http://sakhalin.arbitr.ru

электронная почта - info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

Дело № А59-5977/2022

г. Южно-Сахалинск

14 марта 2023 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремовой Ю.А., рассмотрев дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Идея» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальному контракту от 31.07.2019 № 65/07-2019 на выполнение подрядных работ по объекту «Типовая многофункциональная детская площадка» за период с 30.09.2019 по 20.12.2019 в размере 39 175,45 рублей, 

 

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (далее – истец, Учреждение) обратилось в суд к обществу с ограниченной ответственностью «Идея» (далее – ответчик, ООО «Идея») с указанным иском.

Определением суда от 17.11.2022 исковое заявление оставлено без движения для устранения недостатков на срок до 14.12.2022.

Определением суда от 19.12.2022 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 АПК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 228 АПК РФ лицам, участвующим в деле, предложено в сроки до 16.01.2023 и до 06.02.2023 представить в арбитражный суд, и направить друг другу документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции.

В деле имеется возвращенное письмо от 26.01.2023 с определением суда о принятии искового заявления (заявления) и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства с отметкой «истек срок хранения», направленное по юридическому адресу ответчика, что в соответствии с частью 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) считается надлежащим уведомлением.

Поскольку ответчиком не представлены возражения против заявленных к нему исковых требований, суд, руководствуясь ст.ст. 9, 65 АПК РФ дело рассмотрено по доводам и доказательствам истца.

27.02.2023 судом принята резолютивная часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

 

07.03.2023 в суд от истца в электронном виде поступило (направлено 06.03.2023 через систему Мой арбитр) заявление о составлении мотивированного решения.

В силу пункта 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, имеющиеся в деле, суд приходит к следующему.

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются главой 37 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) о подряде, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон N 44-ФЗ).

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, изменение условий обязательства в одностороннем порядке, как и отказ от исполнения обязательств не допускаются.

Согласно ч. 8 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ государственный (муниципальный) контракт – это договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В силу пункта 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

 

Как следует из материалов дела, 31.07.2019 между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Идея» (далее - Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 65/07-2019 на выполнение подрядных работ по объекту: «Типовая многофункциональная детская площадка» (далее - Контракт).

Согласно дополнительного соглашения от 07.10.2019 № 2 стоимость работ по Контракту составляет 4 424 032 рубля.

Согласно пункту 4.1 Контракта сроки выполнения работ составляют:

начало работ – следующий день после дня заключения Контракта, а именно 01.08.2019;

окончание работ – по истечении 60 календарных дней с даты начала работ, то есть 29.09.2019.

Из пункта 2.4 Контракта следует, что результатом выполненной работы по настоящему контракту является законченный строительством объект.

Из пункта 7.13 Контракта следует, что оформление приемки объекта оформляется по акту формы КС-11(Приложение № 5) в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 7.9 Контракта.

До фактической передачи Объекта Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также обеспечивает охрану и содержание объекта, но не более 30 календарных дней с момента подписания  Акта по форме КС-11.

 

В соответствии со статьями 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с частями 6, 7 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе, Закон № 44-ФЗ) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени).

Пунктом 12.6 Контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (пункт 12.7 Контракта).

 

По смыслу пункта 2.5 Контракта существенными условиями Контракта для Сторон являются: цена Контракта, срок окончания работ, объем и качество выполненных работ.

Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ, Графиком оплаты выполненных работ и Детализированным графиком выполнения работ. Сроки, установленные Графиком выполнения работ, Графиком оплаты выполненных работ и Детализированным графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчитсления периода просрочки (пункт 4.1.1. Контракта).

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на сумму 4 337 290 рублей подписан Сторонами 20.12.2019, в связи с чем Подрядчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по Контракту в части срока окончания работ.

Обязательства в части невыполненных работ на сумму 86 742 рублей Стороны прекратили на основании Соглашения от 26.12.2019 о расторжении Контракта. Этим же Соглашением установлено, что фактически выполненные работы по Контракту приняты Заказчиком на сумму 4 337 290 рублей.

 

Истец осуществлял расчет неустойки следующим образом:

Дата заключения контракта - 31.07.2019;

Цена контракта: 4 424 032 рубля.

Сроки выполнения работ

- начало работ 01.08.2019;

- окончание работ 29.09.2019;

Акт приемки подписан 20.12.2019;

Период просрочки - 82 дня.

На дату исполнения обязательств по Контракту Подрядчиком исполнено обязательств на сумму 0 рублей, следующее выполнение представлено 05.10.2019 (Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 05.10.2019 на сумму 586 458 рублей). Соответственно размер неустойки за 6 дней просрочки (с 30.09.2019 по 05.10.2019) составит:

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

4 424 032,00

30.09.2019

Новая задолженность на 4 424 032,00 руб.

4 424 032,00

30.09.2019

05.10.2019

6

7

4 424 032,00 ? 6 ? 1/300 ? 7%

6 193,64 р.

Сумма основного долга: 4 424 032,00 руб.

Сумма неустойки: 6 193,64 руб.

 

На 06.10.2019 исполнено обязательств на сумму 586 458 рублей. Следующее выполнение представлено 28.10.2019 (Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 28.10.2019 на сумму 2 282 303 рублей). Соответственно, размер неустойки за 23 дня просрочки (с 06.10.2019 по 28.10.2019) составит:

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

3 837 574,00

06.10.2019

Новая задолженность на 3 837 574,00 руб.

3 837 574,00

06.10.2019

28.10.2019

23

6.5

3 837 574,00 ? 23 ? 1/300 ? 6.5%

19 123,91 р.

Сумма основного долга: 3 837 574,00 руб.

Сумма неустойки: 19 123,91 руб.

 

В данной части расчет истца судом проверен и признан верным.

Далее суд производит собственный расчет.

На 29.10.2019 исполнено обязательств на сумму 2 868 761 рублей (586 458 + 2 282 303). Следующее выполнение представлено 03.12.2019 (Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 03.12.2019 на сумму 1 468 529 рублей). Соответственно размер неустойки за 36 дней просрочки (с 29.10.2019 по 03.12.2019) составит:

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 555 271,00

29.10.2019

Новая задолженность на 1 555 271,00 руб.

1 555 271,00

29.10.2019

03.12.2019

36

6.5

1 555 271,00 ? 36 ? 1/300 ? 6.5%

12 131,11 р.

Сумма основного долга: 1 555 271,00 руб.

Сумма неустойки: 12 131,11 руб.

 

На 04.12.2019 исполнено обязательств на сумму 4 337 290 рублей (2 868 761 + 1 468 529). Иных выполнений в адрес Заказчика не поступало, однако, ввиду того, что акт приемки объекта подписан сторонами 20.12.2019 на сумму именно 4 337 290 рублей, неустойка за 17 дней просрочки (с 04.12.2019 по 20.12.2019) составит:

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

86 742,00

04.12.2019

Новая задолженность на 86 742,00 руб.

86 742,00

04.12.2019

20.12.2019

17

6.25

86 742,00 ? 17 ? 1/300 ? 6.25%

307,21 р.

Сумма основного долга: 86 742,00 руб.

Сумма неустойки: 307,21 руб.

В данной части неустойка рассчитана истцом верно.

 

Путем сложения сумма неустойки по расчету суда составит: 6 193,64 + 19 123,91 + 12 131,11 + 307,21 = 37 755,87 рублей.

 

29.03.2021 в адрес Ответчика направлено требование об уплате неустойки № 250, ответа на которое до настоящего времени не поступило, денежных средств в качестве оплаты неустойки также в адрес Истца не поступило, что явилось основанием для обращения истца с иском в суд.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд.

 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения мер договорной ответственности.

Вместе с тем, в соответствии с частью 9.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации) вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Как следует из пункта 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика, в связи с чем суд обязан проверить соблюдение им требований указанной нормы.

Согласно части 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе, начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Постановление Правительства РФ № 783) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 26.04.2020 № 591, от 10.03.2022 № 340) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Согласно подпункту «а» пункта 5 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 для списания неустойки до 5 % от цены контракта необходимо наличие документа об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.

 

Как установлено судом, согласно дополнительного соглашения от 07.10.2019 № 2 к муниципальному контракту, стороны пришли к соглашению установить цену Контракта в размере 4 424 032 рублей (НДС не облагается) в связи с предоставлением ООО «Идея» письма о применении упрощенной системы налогообложения.

Изменение условий Контракта обусловлено необходимостью соблюдением заказчиком требований налогового законодательства (на основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на добавленную стоимость) и не связано с неправомерными действиями подрядчика.

 

Далее суд установил, что 26.12.2019 сторонами по взаимному согласию подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 65/07-2019 от 31.07.2019, в котором отражен факт выполнения работ на сумму 4 337 290 рублей.

Соглашение о расторжении контракта не содержит информации о наличии претензий Заказчика относительно надлежащего исполнения обязательств.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что контракт исполнен обеими сторонами в полном объеме.

 

Поскольку сумма начисленной ответчику неустойки за просрочку исполнения обязательства по контракту (37 755,87 рублей) не превышает 5% от цены контракта (221 201,60 рублей); контракт исполнен обеими сторонами в полном объеме, суд находит основания для списания заявленной истцом суммы неустойки, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 340.

Данная правовая позиция согласуется с правовой позицией, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2022 № 302-ЭС21-25561.

На основании вышеизложенного, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

 

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, а истец в силу закона освобожден от уплаты государственной пошлины, вопрос о распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины судом не разрешается (пункт 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»).

 

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 229 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В иске отказать полностью.

 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sakhalin.arbitr.ru/ либо http://kad.arbitr.ru/).

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

 

Судья                                                                                                Ю.А. Дремова