АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-7429/2019

06 июня 2019 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 04.06.2019, решение в полном объеме изготовлено 06.06.2019.

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Бау групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к филиалу общества с ограниченной ответственностью "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 4 950 720 руб.,

 

В заседании приняли участие:

от истца  -  ФИО2 по доверенности от 30.10.2018;

от  ответчика -  ФИО3 по доверенности от 01.02.2019, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Бау групп" (далее - ООО "Бау групп", истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к филиалу общества с ограниченной ответственностью "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7" (далее - филиал ООО "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7", ответчик) о взыскании 4 860 000 руб. долга, 90 720 руб. 00 коп. неустойки.

29 мая 2019 года от истца поступили письменные уточнения исковых требований, согласно которым ООО "Бау групп" просит суд взыскать с ответчика 4 680 000 руб. долга и 155 520 руб. пени.

Уточнения судом в порядке статьи 49 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты.

Представитель истца исковые требования с учетом уточнений в судебном заседании поддержал.

Представитель ответчика иск не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

08 января 2019 между Филиалом общества с ограниченной ответственностью "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7", в качестве Заказчика и ООО «БАУ групп», в качестве Подрядчика был заключен договор подряда №1 (далее по тексту - Договор подряда).

Согласно пункту 1.1. договора Подрядчик обязуется выполнить за свой риск и своими силами на основании рабочей документации, комплекс работ по: разметке свайных полей и монтажу свайного винтового фундамента и устройству ростверков, с использованием материалов Подрядчика для 4 (четырех) возводимых зданий 2.2, 2.7, 2.8 и 6 согласно Генерального плана (лист 4, 40 СС7 МР-01/2 -01-ГП); (далее по тексту Договора - «Работы») - 2 (вторая очередь строительства) на объекте строительства: Поселок для проживания рабочих Заказчика в пос, Омский, Омского района, Омской области, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: 55:20:160404:610, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, участок находится примерно в 826 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 

<

...> и земельного участка с кадастровым номером: 55:20:160404:774, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир объект недвижимости. Участок находится примерно в 1 560 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

<

...> (далее по тексту Договора - «Объект» или «строительная площадка»), в объемах, в сроки и стоимостью, согласованными Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется передать Подрядчику техническую рабочую документацию на выполнение работ, создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены Подрядчиком в следующие   сроки,   указанные  в   п.2.1.1.-   2.1.4.   настоящего   Договора   и   исчисляются   с   момента поступления первого авансового платежа по настоящему Договору (п.4.2.1 настоящего Договора). Цикл работ и поставки материалов исчисляется следующим образом (в настоящем пункте при указании сроки исчисляются в рабочих днях (здесь и далее «Этапы выполнения работ»):

- с 1-го день - 16-й день с момента поступления авансового платежа (п.4.2.1 настоящего Договора) - производство и поставка материалов (включает в себя поставку свай винтового фундамента, в количестве 1624 (Одна тысяча шестьсот двадцать четыре) штуки. Доставка материалов осуществляется в 4 (четыре) этапа, в сроки определяемые Подрядчиком, но не позднее 19 дня с момента получения первогоавансового платежа (п.4.2.1. настоящего Договора). О доставке партии (части партии) Подрядчик уведомляет Заказчика и стороны производят совместную приемку поставленных материалов;

- с 7-го дня по 16-й день - выполнение геодезических работ (разметка свайных полей);

- с 10-го по 28-й день - выполнение работ по монтажу свайного винтового фундамента;

- с 15-го по 32-й день - выполнение работ по устройству ростверков.

Обязательства по выполнению Подрядчиком каждого из указанных этапов работ (включая поставку материалов) является встречным по отношению к обязательствам Заказчика осуществлять оплату материалов и работ по настоящему договору (п.4.2.1.-4.2.3. настоящего Договора). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты (п,4.2.1.-4.2,3.) сроки выполнения работ (включая сроки поставки) сдвигаются соразмерно срокам задержки платежей, без оформления дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Стоимость настоящего договора составляет 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС оплачивается Заказчиком дополнительно, по ставке налога 20%.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

- Заказчик оплачивает аванс в размере 5 400 000,00 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора. НДС оплачивается Заказчиком дополнительно, в соответствии со ставкой налога 20%;

- Заказчик оплачивает аванс в размере 4 050 000,00 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС оплачивается Заказчиком дополнительно по ставке налога 20% в Указанный в настоящем пункте авансовый платеж Заказчик оплачивает Подрядчику в день поступления материалов на Объект;

- Заказчик оплачивает 4 050 000,00 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС оплачивается Заказчиком дополнительно по ставке налога 20% в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ. О завершении работ Подрядчик письменно сообщает Заказчику.

Также стороны договорились, что в обеспечение исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию.

Банковская гарантия должна быть выдана на сумму первого аванса (п.4.2.1. настоящего договора), на срок до сдачи Заказчику работ по первому этапу.

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  (раздел 4 договора).

Истец выполнил свои обязательства по договору надлежащим образом, что подтверждается подписанными обеими сторонами без замечаний и возражений актами о приемке выполненных работ по возводимому зданию №6 по Договору подряда - 01.02.2019; по возводимому зданию № 2.2. по договору подряда - 24.02.2019; по возводимому зданию № 2.7. по договору подряда - 17.02.2019; по возводимому зданию № 2.8. по Договору подряда -22.02.2019.

Ответчик свои обязательства по договору не исполнил, за ним по расчетам истца числится задолженность в размере 4 860 000 руб., что и явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив материалы дела, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Материалами дела установлено, что к оговоренному сроку согласованные работы не оплачены, доказательств факта невыполнения работ по контракту, либо выполнения части работ, а равно как и некачественного выполнения указанных в контракте работ, исключающих их потребительскую ценность для заказчика, ответчиком не представлено.

Таким образом, требование истца о взыскании 4 860 000 руб. 00 коп. долга является законным, обоснованным, подтвержденным материалами дела и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Между тем, договором подряда (п.6.2.) предусмотрена   ответственность: за нарушение сроков оплаты (4.2.1.-4.2.3. Договора), согласно которому подрядчик вправе требовать с заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с положениями части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно расчету истца (к материалам дела приложен), размер неустойки составил 155 520 руб. 00 коп. по состоянию на 28.05.2019, согласно приложенному к материалам дела расчету.

Расчет судом проверен, признан арифметически верным.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что требования истца являются обоснованными, подтвержденными материалами дела и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Доводы ответчика о том, что по представленному в материалы акту сверки невозможно идентифицировать отношения, по которым взыскивается задолженность ввиду того, что по утверждению ответчика между сторонами заключено несколько договоров, судом не принимаются. Ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства в обоснование своей позиции, равно как и не представлено доказательств полной оплаты по конкретному спорному договору.

В связи с удовлетворением исковых требований расходы по оплате государственной пошлины следует отнести на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Бау групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Бау групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 4 860 000 руб., пени в сумме 155 520 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 47 754 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 324 руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

 

Судья                                                                                                         В.А. Баландин