140/2018-49263(2) 

Пятый арбитражный апелляционный суд 

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001 

тел.: (423) 221-09-01, факс (423) 221-09-98 http://5aas.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А59-2042/2018

г. Владивосток

06 декабря 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2018 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 06 декабря 2018 года.  

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Е.Н. Номоконовой, судей В.В. Верещагиной, Л.Ю. Ротко, при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Манукян, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Форт-1»,  

апелляционное производство № 05АП-7981/2018 на решение от 20.08.2018 судьи С.И. Ким 

по делу № А59-2042/2018 Арбитражного суда Сахалинской области  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Форт-1» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к департаменту муниципального заказа администрации Поронайского  городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании основного долга и пени по муниципальному контракту,  при участии: извещённые надлежащим образом стороны в суд не явились,  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форт-1» (далее – истец,  Общество) обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с иском,  уточнённым в порядке статьи 49 АПК РФ, к Департаменту муниципального  заказа администрации Поронайского городского округа (далее – ответчик,  Департамент) о взыскании 3 655 739 рублей 85 копеек основного долга за  выполненные работы по муниципальному контракту № 35 от 18.08.2014 и  2 440 230 рублей пени.  

В ходе рассмотрения дела истец отказался от иска в части взыскания  основного долга и пени, просил обязать ответчика возвратить в качестве  неосновательного обогащения 1 497 946 рублей ранее удержанной с истца  пени по контракту.  

Решением арбитражного суда от 20.08.2018 производство по делу в  части требований о взыскании основного долга и пени прекращено, в  остальной части в удовлетворении иска отказано.  

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в  апелляционном порядке, ссылаясь в обоснование жалобы на то, что  нарушение сроков выполнения работ произошло по независящим от истца  обстоятельствам, в связи с чем пеня за просрочку выполнения работ  несоразмерна последствиям нарушения обязательства и подлежит снижению  в порядке статьи 333 ГК РФ. В частности, полагает, что удержанная  ответчиком сумма пени (3 655 739 рублей 85 копеек) подлежит снижению до  2 157 794 рублей, а разница между этими суммами в размере 1 497 946  рублей подлежит возвращению истцу.  

От ответчика в суд апелляционной инстанции поступили возражения  на апелляционную жалобу. По его мнению, обжалуемый судебный акт  является законным и обоснованным, размер неустойки определён сторонами  в контракте, доказательства несоответствия удержанной суммы пени  последствиям нарушения истцом не представлено, удержанная сумма  

оставляет всего 2,7% от цены контракта и не может быть признана  чрезмерной.  

Стороны, надлежащим образом извещённые о времени и месте  рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в заседание  арбитражного суда апелляционной инстанции не обеспечили, в связи с чем  судебная коллегия на основании статей 156, 266 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и  рассмотрела апелляционную жалобу по делу в отсутствие представителей  указанных лиц.  

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены  арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном  статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Из материалов дела судебной коллегией установлено следующее. 

18.08.2014 на основании протокола рассмотрения единственной  заявки на участие в электронном аукционе между управлением  муниципального заказа администрации Поронайского городского округа  (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключён муниципальный контракт   № 35, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика  выполнить в соответствии с требованиями и условиями контракта работы по  капитальному ремонту городского парка г. Поронайска и сдать их результат  заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в  порядке и на условиях, предусмотренных контрактом (пункт 1.2 контракта).  

Согласно пункту 2.1 контракта его цена составила 130 187 847 рублей  с учётом налогов.  

Срок выполнения работ установлен в 12 месяцев с даты заключения  контракта.  

Пунктом 9.1 контракта стороны предусмотрели ответственность  подрядчика за просрочку исполнения обязательств по контракту начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока  исполнения обязательства. В случае невыплат подрядчиком штрафов и пеней  

по претензиям, сумма, подлежащая оплате заказчиком, будет уменьшена на  размер просроченных обязательств и ненадлежащих исполнений по  контракту.  

Дополнительным соглашением № 2 от 18.11.2016 к контракту стороны  изменили сроки выполнения работ: начало – 18.08.2014, окончание –  01.01.2017.  

Дополнительным соглашением № 4 к контракту от 12.12.2016 его  сумма увеличена до 134 821 124 рублей.  

Акт приёма-сдачи выполненных работ по контракту стороны  подписали 15.12.2017.  

Заказчик на основании претензии от 15.12.2017 удержал с подрядчика  пеню за просрочку выполнения работ по контракту за период с 01.01.2017 по  15.12.2017 в сумме 3 655 739 рублей 85 копеек.  

Считая, что денежные средства в виде пени ответчиком удержаны  незаконно, истец потребовал от ответчика возвратить их. Претензия истца  оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения  истца в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.  

Исследовав материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном  статьями 268, 270 АПК РФ, правильность применения судом первой  инстанции норм материального и процессуального права, проанализировав  доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе и в возражениях на неё,  судебная коллегия считает решение арбитражного суда первой инстанции  законным и обоснованным, апелляционную жалобу – не подлежащей  удовлетворению в связи со следующим.  

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд  прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят  арбитражным судом, при этом в соответствии со статьей 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации судом отказ от исковых  требований принимается, если он не противоречит закону и не нарушает права  других лиц.  

Из материалов дела следует, что отказ от заявленных требований не  противоречит закону и не нарушает прав и интересов других лиц, в связи с  чем он был правомерно принят судом.  

При таких обстоятельствах производство по делу в части взыскания  основного долга и пени подлежало прекращению в силу пункта 4 статьи 150  АПК РФ.  

Доводов об обратном апелляционная жалоба не содержит. 

Разрешая в остальной части спор по существу, суд первой инстанции  верно квалифицировал отношения сторон как регулируемые общими  нормами Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и  положениями главы 37 данного Кодекса о подряде, а также Федеральным  законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  Закон № 44-ФЗ).  

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ) установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам  договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на  выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для  государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим  параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего  Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).  

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или  муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  

государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом  объектов производственного и непроизводственного характера работы и  передать их государственному или муниципальному заказчику, а  государственный или муниципальный заказчик обязуется принять  выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в  установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик  обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК  РФ).  

Как предусмотрено в пункте 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и  другими способами, предусмотренными законом или договором.  

По правилам пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма,  подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства.  

Согласно пункту 9.1. контракта в случае просрочки исполнения  подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных муниципальным контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств,  предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику об уплате  неустоек (штрафов, пеней). В случае невыплат подрядчиком штрафов и  пеней по претензиям, сумма, подлежащая оплате заказчиком, заказчиком  будет уменьшена на размер просроченных обязательств и ненадлежащих  исполнений по контракту.  

Из материалов дела судом верно установлено, что Обществом работы  по контракту выполнены с просрочкой.  

При этом сторонами в контракте согласовано условие о  предоставлении заказчику права на удержание сумм неустойки, начисленных  подрядчику за нарушение сроков выполнения работ, что не противоречит  требованиям гражданского законодательства.  

Тем самым заказчик имел право на удержание начисленной  подрядчику неустойки из сумм, подлежавших уплате подрядчику за  выполненные им работы.  

В силу статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить  неустойку по ходатайству стороны по контракту. Обязанность заказчика  оплатить за выполненные работы и обязанность исполнителя уплатить  предусмотренную контрактом неустойку за нарушение сроков выполнения  работ являются, по существу, денежными, то есть однородными, и при  наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом по правилам  ст. 410 ГК РФ.  

Сторона, обязанная уплатить неустойку, вправе поставить вопрос о  применении к ее размеру положений статьи 333 ГК РФ, в том числе путем  предъявления самостоятельного иска о возврате неосновательного  обогащения по правилам статьи 1102 ГК РФ.  

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без  установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований  приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица  (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно  приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение),  за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.  

Указанное соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации, выраженной в постановлениях от 19.06.2012   № 1394/12, от 10.07.2012 № 2241/12, а также разъяснениям, приведённым в  

пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым  списание по требованию кредитора неустойки со счёта должника (пункт 2  статьи 847 ГК РФ) не лишает последнего права ставить вопрос о применении  к списанной неустойке положений статьи 333 ГК РФ, например, путём  предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного  (статья 1102 ГК РФ).  

Доводы апеллянта о необходимости снижения неустойки и  удовлетворения требования о взыскании с ответчика излишне взысканного в  качестве неосновательного обогащения аналогичны доводам истца,  получившим надлежащую правовую оценку при рассмотрении дела судом  первой инстанции и правомерно отклонённым исходя из следующего.  

Исходя из положений ГК РФ, законодатель придает неустойке три  значения: как способ защиты гражданских прав, как способ обеспечения  исполнения обязательств, как мера имущественной ответственности за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Право снижения  размера неустойки как имущественной ответственности предоставлено суду  в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения  обязательств.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой  ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям  нарушения обязательства гражданское законодательство предполагает  выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и  соизмерима с нарушенным интересом.  

Вместе с тем, решение суда о снижении неустойки не может быть  произвольным. Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не  должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом  осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1  ГК РФ), а также с принципом состязательности (статья 9 АПК РФ).  

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении  судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации  об ответственности за нарушение обязательств», при обращении в суд с  требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно  закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника  уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве  неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки  последствиям нарушения обязательства предполагается.  

Пунктом 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств» установлено, что при оценке  соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из  своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование  чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для  должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК  РФ).  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в  своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на  основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего  заявления со стороны ответчика.  

При этом ответчик должен представить доказательства явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в  частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли  возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже  начисленной неустойки.  

Такие доказательства суду истцом не представлены. 

Согласно пункту 2 статьи 1 ГК РФ субъекты гражданского права  приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем  интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе  договора и в определении любых не противоречащих законодательству  условий договора. В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица  свободны в заключении договора. Условия договора определяются по  усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего  условия предписано законом или иными правовыми актами.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской  Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 г. N 263-О, при  применении статьи 333 ГК РФ суд обязан установить баланс интересов  между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и  оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате  конкретного правонарушения.  

Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки с экономической  точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за  счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может  стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать  крайне негативные макроэкономические последствия. Неисполнение  должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими  денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения.  

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия находит  правомерным вывод суда первой инстанции о соразмерности удержанной с  истца суммы неустойки последствиям нарушения обязательств истцом как  подрядчиком и недоказанности наличия оснований для её снижения.  

При этом судом приняты во внимание конкретные обстоятельства  рассматриваемого дела, а именно: длительность неисполнения подрядчиком  обязательства (срок окончания работ – 01.01.2017, работы приняты  

15.12.2017), социальную значимость объекта (парк г. Поронайска), сумму  контракта и оплату за выполненные работы по контракту.  

Прочие доводы апеллянта коллегией признаются не влияющими на  правовую квалификацию спорных правоотношений, в связи с чем подлежат  отклонению.  

Таким образом, доводы, приведённые в апелляционной жалобе, не  нашли своего подтверждения при рассмотрении апелляционной жалобы, по  существу сводятся к переоценке законных и обоснованных, по мнению суда  апелляционной инстанции, выводов суда первой инстанции, не содержат  фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного  акта по существу, влияли на обоснованность и законность решения, либо  опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом  апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить  основанием для отмены обжалуемого судебного акта.  

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд апелляционной  инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии  со статьей 71 АПК РФ на основе полного и всестороннего исследования всех  доказательств по делу с правильным применением норм материального  права.  

Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся  безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной  инстанцией не установлено.  

Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционной  жалобы и отмены обжалуемого судебного акта не имеется.  

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате  государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на  апеллянта и взыскиваются с него в доход федерального бюджета в связи с  предоставленной отсрочкой уплаты государственной пошлины.  

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 20.08.2018 по  делу № А59-2042/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форт-1» в  доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины по  апелляционной жалобе.  

Арбитражному суду Сахалинской области выдать исполнительный  лист.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд  Дальневосточного округа через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение двух месяцев.  

Председательствующий Е.Н. Номоконова  

Судьи В.В. Верещагина  

 Л.Ю. Ротко