АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Дело № А27-1158/2023

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

12 октября 2023 года                                                                                    город Кемерово    

Резолютивная часть решения оглашена 5 октября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 12 октября 2023 года. 

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

управления жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> 

к обществу с ограниченной ответственностью «ТС-Строй», Новосибирская область, г. Новосибирск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> 

о взыскании 160 180,82 руб. неустойки и штрафа 

в отсутствие представителей сторон

у с т а н о в и л:

управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТС-Строй» (ответчик) о взыскании 160 180,82 руб. неустойки и штрафа.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела (ст. 123 АПК РФ), явку полномочных представителей не обеспечил, отзыв в суд не направил.

Суд считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие представителя истца и ответчика в порядке статьи 156 АПК РФ по материалам, имеющимся в деле.

Оценив представленные доказательства в отдельности и в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд полагает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

1.12.2020 года между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен Контракт № 01393000197200003300001 на выполнение работ для муниципальных нужд г. Прокопьевска Кемеровской области.

В соответствии с п. 1.1 Контракта Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по текущему ремонту дворовой территории многоквартирного дома ул. Институтская, 5, 7, ул. Яворского, 1, ул. Шишкина, 15, ул. Социалистическая, 7 города Прокопьевска.

Стоимость работ по Контракту составляет 8 835 295,60 рублей.

Согласно п. 3.2.7 контракта обязательство по выполнению работ должны быть исполнены Подрядчиком в срок с 01.04.2021до 15.07.2021 года.

Вместе с тем данное условие контракта было нарушено, окончательно работы по текущему ремонту дворовых территорий многоквартирных домов № 5 по ул. Институтская, № 15 по ул. Шишкина, № 7 по ул. Социалистическая города Прокопьевска подрядчиком выполнены и сданы Заказчику 13.09.2021 года, дома №° 7 по ул. Институтская № 1 по ул. Яворского города Прокопьевска подрядчиком выполнен и сдан Заказчику 14.09.2021 года.

Вследствие чего образовалась просрочка с 16.07.2021г. по 14.09.2021г. на сумму 120 180,92 рублей.

Объем, количественные и технические характеристики работ определены техническим заданием (Приложение №1), сметой на выполнение работ (Приложение № 2), дизайн-проектом (Приложение № 4), которые являются неотъемлемой частью контракта. Способ, последовательность и порядок выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно, исходя из необходимости сохранения и улучшения муниципального имущества, предупреждения причинения вреда здоровью и имуществу третьих лиц. Все работы должны быть выполнены согласно дизайн-проекта, техническому заданию, смете на выполнение работ в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил. Результат работ должен обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта (пункт 1.3 контракта).

В соответствии с пунктом 6.1 контракта, Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями, действующими на территории РФ и условиями настоящего контракта; своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

Однако, предписаниями строительного контроля установлены недостатки выполненных работ, вследствие чего предъявлен штраф в размере 40 000 рублей:

1. Предписание № 041 от 14.07.2023г. по ул. Яворского, 1:

отсутствует бетонное основание толщиной 100 мм и бетонная обойма с двух сторон для бортовых камней (1 м.);

используемый сыпучий материал (щебень) не соответствует требованиям ПСД 104/20-Г13У (не соответствует по величине фракции)

2. Предписание № 030 от 01.07.20231г. по ул. Социалистическая, 7:

не предъявлены к приемке основания дворового проезда, парковки и пешеходных дорожек;

отсутствует бетонное основание толщиной 100 мм и бетонная обойма с двух сторон для бортовых камней (1 м.);

размеры швов между бортовыми камнями превышают 10 мм. Имеются уступы в стыках бортовых камней в плане;

на поверхности бортовых камней имеются недопустимые поверхностные сколы, трещины;

используемый сыпучий материал (щебень) не соответствует требованиям ПСД 92/20-ПЗУ;

отметка установки крышки люков ж/б колодцев не соответствует требованиям ПСД 92/20-ПЗУ;

используемый сыпучий материал (щебень) не соответствует требованиям ПСД 75/20-ПЗУ (не соответствует по величине фракции).

В адрес ООО «ТС-Строй» направлена претензия с требованием исполнить условия Контракта и оплатить санкции (штраф и неустойка), предусмотренные контрактом, однако ответы на претензии в адрес управления не поступили, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

В силу статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации договором либо законом может быть предусмотрена денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.3.1 Контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ составил 120 180,92 рублей за период с 16.07.2021 по 14.09.2021.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (пункт 5.3.2 контракта).

Размер штрафа за ненадлежащие исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет 40 000 руб.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

По правилам части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Не представляя в арбитражный суд доказательства оплаты, собственный расчет неустойки, штрафа, не оспаривая заявленные истцом требования и положенные в их основу обстоятельства, ответчик в соответствии с указанными нормами принял риск вынесения неблагоприятного для себя судебного акта.

Расчет судом проверен, признан арифметически верным, соответствующим условиям контракта. 

Ответчик не представил в суд доказательства уплаты неустойки и штрафа, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца в заявленном размере.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  уплата государственной пошлины за рассмотрение иска относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТС-Строй», ОГРН 

<

***>, в пользу управления жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска, Кемеровская область - Кузбасс, ОГРН 

<

***>, 160 180,82 руб. неустойки и штрафа. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТС-Строй», ОГРН 

<

***> в доход федерального бюджета 5805 рублей расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

 

Судья                                                              К.В. Козина