Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва 

Дело № А40-241424/16-31-2320

Резолютивная часть решения объявлена 04 августа 2017г.

Текст решения изготовлен в полном объеме 10 августа 2017г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Агафоновой Е.Ю. (единолично) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "СК "СПЕЦСТРОЙ-7" (660028,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,,

<

...>,,3.3, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику ФГУП "РЕЗЕРВСТРОЙ" РОСРЕЗЕРВА (142111,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 365 920, 55 руб.

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

Истец – ООО "СК "СПЕЦСТРОЙ-7" обратился в суд с требованиями к ответчику - ФГУП "РЕЗЕРВСТРОЙ" РОСРЕЗЕРВА о взыскании задолженности по договору № 17-УРС1-13 от 11.04.2013  в размере 365 920,55 руб.

Представитель истца в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение истца о времени и месте судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК РФ. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителя истца в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

Выслушав представителя ответчика, рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 01.02.2016 по делу № А33-11193/2015 ООО "СК "СПЕЦСТРОЙ-7" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Как следует из материалов дела, между ООО "СК "СПЕЦСТРОЙ-7" (далее – Истец, Субподрядчик) и ФГУП "РЕЗЕРВСТРОЙ" РОСРЕЗЕРВА (далее – Ответчик, Генподрядчик) был заключен договор № 17-УРС1-13 от 11.04.2013  (далее – Договор), по условиям которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика и в соответствии с Заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору) обязался выполнить работы по монтажу технологических трубопроводов сливо-наливной  железнодорожной эстакады на 28 вагонов-цистерн на ФГКУ комбинат «Гигант» Росрезерва, а Генподрядчик – принять результат работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Выполнение работ производится в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), при этом Субподрядчик обязался приступить к выполнению работ в срок до 22.04.2013 и завершить выполнение работ в срок до 21.10.2013 (п.4.1 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.09.2013).

Общая стоимость работ согласно п.3.1 Договора составляет 12 500 000 руб.

Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: аванс в размере 30% от общей стоимости работ подлежит оплате в течение 10 дней с даты заключения Договора; оплата работ, выполненных за отчетный период производится в течение пяти рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за вычетом ранее уплаченного аванса; окончательный расчет по Договору производится на основании двусторонне подписанных акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течение 10 рабочих дней с даты передачи Субподрядчиком по акту приема-передачи полного комплекта исполнительной документации на работы, включая общий журнал работ (п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 Договора).

В рамках Договора между сторонами было подписано Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2013, по условиям которого Субподрядчик обязался выполнить дополнительные работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 15.09.2013), на сумму 1 948 281,70 руб.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из представленных документов следует, что истец во исполнение обязательств по Договору выполнил для ответчика работы, а ответчиком приняты данные работы, что подтверждается двусторонне подписанными актами о  приемке выполненных работ, а также Справками о стоимости выполненных работ и затрат, копии которых представлены в материалы дела.

В соответствии с указанными документами истец выполнил работы на общую стоимость 14 097 245,92 руб.

Ответчиком была произведена частичная оплата работ в общей сумме 13 731 325,47 руб., однако работы в полном объеме оплачены не были, задолженность ФГУП "РЕЗЕРВСТРОЙ" РОСРЕЗЕРВА составила 365 920,55 руб.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 5.2. Договора № 17-УРС1-13 от 11.04.2013г. оплата выполненных работ осуществляется Генподрядчиком (Ответчиком) при условии предоставления ему Субподрядчиком (Истцом) следующих документов:

1)Счета, выставляемого Субподрядчиком для оплаты работ, фактически выполненных в отчетном периоде;

2)Счета-фактуры;

3)Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в двух экземплярах, подписанных Субподрядчиком (его уполномоченным представителем, подпись которого должна быть скреплена печатью Субподрядчика);

4)Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в двух экземплярах, подписанных Субподрядчиком (его уполномоченным представителем, подпись которого должна быть скреплена печатью Субподрядчика);

5)Исполнительной документации на фактически выполненный в течение отчетного периода объем Работ.

Перечисленные документы Субподрядчик передает Генподрядчику не позднее 20-го числа текущего месяца вместе с сопроводительным письмом, на копии которого представитель Генподрядчика совершает подтверждающую их получение расписку с указанием даты получения документов, должности, фамилии и инициалов лица, совершившего расписку. 

В силу п. 5.1.3 окончательная оплата выполненных работ производится при условии устранения субподрядчиком всех недостатков результатов работ, выявленных при приемке, и подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

При соблюдении указанного условия генподрядчик окончательно оплачивает работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи ему субподрядчиком по акту приема-передачи полного комплекта исполнительной документации на работы, включая общий журнал работ. 

Документы, указанные в п. 5.2, 5.1.3 Договора, Истцом в адрес Ответчика не направлялись. В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие передачу Истцом Ответчику полного комплекта документов по выполненному объему работ с отметкой о вручении уполномоченному Представителю Ответчика, равно как передачу полного комплекта исполнительной документации на работы, в том числе, общий журнал работ. 

Ответчик в судебном заседании заявил о пропуске истцом срока исковой давности в отношении требований о взыскании задолженности по оплате выполненных в рамках договора № 17-УРС1-13 от 11.04.2013  работ в размере 365 920,55 руб.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). Начало течения срока исковой давности совпадает с моментом возникновения у заинтересованной стороны права на иск, то есть возможностью реализовать его в принудительном порядке через суд. 

В силу пункта 2 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судебного решения об отказе в иске.

Акт о приемке выполненных работ октябрь 2013г. № 7 (отчетный период с 01.10.2013 по 25.10.2013) датирован 25.11.2013, поскольку оплата в силу п. 5.2 и 5.1.3 должна быть произведена не ранее, чем 5 (пять) рабочих дней (то есть не ранее 02.12.2013), а иск согласно штампу канцелярии суда предъявлен истцом в электронном виде 02.12.2016, то в отношении оплаты за выполненные в период с 25.05.2013 по 25.10.2013 работы трехлетний срок исковой давности не истек.

Учитывая указанное выше, требования истца о взыскании задолженности по договору № 17-УРС1-13 от 11.04.2013  в размере 365 920,55 руб. не подлежат удовлетворению.

Расходы по госпошлине распределяются судом в соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, на основании статей 8, 11, 12, 195, 196, 199, 200, 309, 310, 314, 328,  702, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями  4, 27, 49, 64-68, 71, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО "СК "СПЕЦСТРОЙ-7" (660028,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,,

<

...>,,3.3, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 318 руб. (Десять тысяч триста восемнадцать рублей). 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

СУДЬЯ

Е.Ю. Агафонова