35/2019-53839(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-2202/2019

г. Новосибирск

18 марта 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Исаковой С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  Скворцовой А.А., рассмотрев открытом судебном заседании дело по иску  федерального казенного учреждения "Федеральное управление  автомобильных дорог "Сибирь" федерального дорожного агентства" (ОГРН  1035401907287), г. Новосибирск, к акционерному обществу "Сибмост"  (ОГРН 1025403206300), г. Новосибирск, о понуждении к исполнению  гарантийных обязательств,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать акционерное общество "Сибмост" (ОГРН 1025403206300) в срок  до 01.06.2019 исполнить гарантийные обязательства по государственному  контракту № 86-11 от 12.04.2011 по выполнению работ по капитальному  ремонту моста через реку Горбуниха на км 82+969 автомобильной дороги  М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,  Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Новосибирской области, а именно:  

1. Выполнить работы по устранению дефекта (деформации  деформационных швов - 54п.м.) в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией;  

2. Выполнить работы по устранению дефекта (скол ж.б диафрагмы  между балкой № 2 и № 3 в пролете 1 - 0,03 кв.м.) в соответствии с  требованиями проекта и нормативно-технической документацией;  

3. Выполнить работы по устранению дефекта (разрушение ж.б цоколей  барьерного ограждения 20 п.м.) в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией;  

4. Выполнить работы по устранению дефекта (протечки по консолям в  местах водоотводных трубок - 3,0 кв.м.) в соответствии с требованиями  проекта и нормативно-технической документацией  

Взыскать с акционерного общества "Сибмост" (ОГРН 1025403206300) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

 Судья С.А. Исакова