Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-41514/2019  «15» сентября 2020 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б. рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "АС-Групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 316344300119781) с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, Комитета благоустройства и  дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский об обязании  устранить недостатки выполненных работ, о взыскании штрафа в размере 149 018 руб. 90  коп., а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 11 471  руб.  

В судебном заседании приняли участие: от истца – ФИО2, доверенность от 01.06.2020 г.; от ответчика – ФИО3, доверенность от 20.01.2020 г.; от третьего лица – ФИО4, доверенность от 19.08.2020 г. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 150. 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 316344300119781) в течение 14 дней с момента вступления  решения Арбитражного суда Волгоградской области в законную силу исполнить  гарантийные обязательства по договору № 2607 на выполнение работ от 26.07.2018, а  именно, устранить дефекты (провалы) укладки тротуарной плитки на площади перед МУ  КМЦ «Юность Волжского», по адресу: бульвар Профсоюзов, 13, г. Волжский  Волгоградской области, а именно:  

1.) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия в пределах круговой укладки  плиточного покрытия перед центральным входом в здание МУ КМЦ «Юность  Волжского»:  

- зона осмотра № 1 в приложению к акту выявленных дефектов от 05.02.2020 г.:  провал тротуарной плитки, глубиной от 1,0 - 2,5 см., площадью просевшего основания  64,0 кв.м;  

- зона осмотра № 2 - провал тротуарной плитки, глубиной от 1,3 - 1,8 см. площадью  просевшего основания 20,0 кв. м.;  

- зона осмотра № 9 - контр-уклон плиточного основания ступеней глубиной 2,0 см-  2,5 см. площадью просевшего основания 20 кв.м.;  

- зона осмотра № 10 - провал плиточного основания глубиной от 1,0 - 2,5 см.  площадью просевшего основания 25 кв.м.;  

2.) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия на площади с правой  стороны от центрального входа в здание МУ КМЦ «Юность Волжского»:  

- зона осмотра № 3 - провал плиточного основания глубиной от 1,5 - 2,5 см.  площадью просевшего снования 38,0 кв.м.  

3.) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия на площади с правой  стороны от центрального входа в здание МУ КМЦ «Юность Волжского»:  

- зона осмотра № 4 - провалы плиточного основания глубиной от 1,4 - 2,0 см.  площадью просевшего основания 51,0 кв.м.  

4.) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия на площади с правой стороны  от центрального входа в здание в здание МУ КМЦ «Юность Волжского» в районе забора  кафе «Цветок граната»:  

- зона осмотра № 5 - провал плиточного основания глубиной от 1,5 - 4,2 см.,  площадью просевшего основания 31,0 кв.м.;  

5.) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия на площади, с правой  стороны от центрального входа в здание в здание МУ КМЦ «Юность Волжского» вдоль  зеленой зоны, отделяющей проезжую часть бульвара Профсоюзов:  

- зона осмотра № 6 - провалы плиточного основания глубиной от 1,7 - 2,1 см.  площадью просевшего основания 5,0 кв.м.  

6.) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия на площади, с правой  стороны от центрального входа в здание в здание МУ КМЦ «Юность Волжского» у  основания клумбы с газоном.  

- зона осмотра № 7 - провалы плиточного основания глубиной 2,0 см. Шириной 2,0  м х 1,0м. площадь просевшего основания 2,0 кв.м.  

ж) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия на площади перед зданием  МУ КМЦ «Юность Волжского», в промежутке между амфитеатром и участком газона,  отделяющего проезжую часть бульвара Профсоюзов от площади перед зданием МУ КМЦ  «Юность Волжского»:  

- зона осмотра № 8 - провалы плиточного основания глубиной от 1,8 - 2,0 см.  Площадь просевшего основания 76 кв.м.  

з) Устранить дефекты укладки плиточного покрытия на пешеходной дорожке,  вдоль площади, с левой стороны от центрального входа в здание в здание МУ КМЦ  «Юность Волжского»:  

- зона осмотра № 11 - множественные провал плиточного основания глубиной от 1,0  - 2,2 см. Площадь просевшего основания 248 м 2.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 316344300119781) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "АС-Групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в размере  149 018 руб. 90 коп., а также 11 471 руб. в счёт возмещения судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

Взыскать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 316344300119781) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "ПРОФОЦЕНКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 000 руб.  за проведение судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова