Именем Российской Федерации

                                                         

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

28.06.2019г.                 Дело № А40-81500/19-151-668

Резолютивная часть решения оглашена 25.06.2019г.

Решение изготовлено в полном  объеме 28.06.2019г.

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Щербаковой И.Э, 

при ведении протокола секретарем судебного  заседания  Кунижевым И.Б.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению иску  -  ООО «ГлавПромСтрой» (ИНН 7703727402)

к ответчику ООО «Информойл» (ИНН 7704807851)

о взыскании 3 738 457  руб. 30 коп. 

при участии: 

от истца  – согласно протокола. 

от ответчика –  неявка,  извещен. 

УСТАНОВИЛ:

Иск предъявлен о взыскании 3 738 457  руб. 30 коп. неустойки по Договору  подряда № МФК-22/09-02 от 26.09.2018г. 

Истец исковые требования поддержал,  представил письменные пояснения. 

Ответчик,  надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела в порядке ст.ст. 121 -123 АПК РФ, в судебное заседание не явился, отзыва не представил. 

Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, обозрев представленные по делу документы, арбитражный суд установил, что  между  истцом (Генподрядчик)  и ответчиком (Подрядчик) заключен договор подряда от 26.09.2018 года № МФК-22/09-02 (далее Договор) по которому Подрядчик обязался выполнить работы по, поставке оборудования, монтажу и пусконаладочным работам в соответствии с Рабочей, проектной документацией, Техническим Заданием Генподрядчика и передать выполненные работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязался принять результат Работ и оплатить их.

Срок выполнения работ согласован Сторонами в пункте 5.1. Договора: срок начала выполнения Работ - 22 октября 2017, срок окончания выполнения Работ -22 декабря 2017г.

Стоимость работ составила 18 692 286,50 рублей (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.02.2018 к Договору).

Кроме того, Подрядчик обязался следующие работы:

-по устройству кровельного покрытия здания сервисного обслуживания пассажиров, автозаправочной станции (АЗС), навесов топливно-раздаточных колонок (ТРК) и летнего кафе стоимостью 1 780 207 рублей, в течение 30 календарных дней с момента передачи давальческих материалов (дополнительное соглашение от 06.02.2018 г. к Договору);

- по устройству полов и перегородок из ГКЛ без устройства финишного покрытия, стоимостью 860 148,60 рублей в течение 20 календарных дней с момента передачи давальческих материалов (дополнительное соглашение № 2 к от 15.02.2018 г Договору).

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Размер ответственности Ответчика установлен приложением № 7 к Договору:

Нарушение Подрядчиком срока окончания Работ (Этапа работ) (срыв Графика выполнения Работ) по вине Подрядчика на срок до 30 дней - 0,05% от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки;

Нарушение Подрядчиком срока окончания Работ (Этапа Работ) (срыв Графика выполнения Работ) по вине Подрядчика на срок свыше 30 дней - 0,1% от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 20% за весь срок просрочки.

Сумма не сданных работ на 16.01.2019 составила 18 692 286,50 рублей с учетом дополнительных соглашений.

Поскольку просрочка выполнения работ составляет более 30 дней, размер неустойки рассчитан исходя из следующих условий:

размер неустойки 0,1 % за каждый день просрочки;

период просрочки с 23.12.2017 по 16.01.2018 (342 дня);

сумма неисполненных обязательств 18 692 286,50 рублей. 18 692 286,50 *(342*0,1)/100=6 392 761,98 рублей.

Учитывая  ограничения,   установленные   приложением   7,   сумма  неустойки, подлежащая выплате, составляет 3 738 457,30 рублей.

Расчет судом проверен  и признан  правильным. 

17.07.2018 г. и 24.01.2019г. года Истцом в адрес Ответчика направлены досудебные претензии, оставленные последним без ответа и удовлетворения. 

На основании  изложенного,  исковые требования  подлежат удовлетворению.

Госпошлина по делу в соответствии со ст. 110 АПК РФ  относится на  ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330,  516,  702, 708,  740, 746, 753  ГК РФ, ст. ст. 65, 69, 102, 110, 121-123, 156, 167-171, 180, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Информойл» (ИНН 7704807851) в  пользу ООО «ГлавПромСтрой» (ИНН 7703727402) 3 738 457 руб. 30 коп. неустойки. 41 692 руб. госпошлины

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            И.Э. Щербакова