Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-54627/2024

03 февраля 2025 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 03 февраля 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Кузнецов М.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ПРОГРЕСС"; ООО "Строй Прогресс" (адрес: Россия 188691, г КУДРОВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, пр-кт ЕВРОПЕЙСКИЙ 14/3/11-Н; Россия 188640, г.Всеволожск, Ленинградская область, Всеволожский пр., д.14а, пом.2, офис 07, ОГРН: 1164704064117);

ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "Климатмаркет" (адрес: Россия 197375, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр. Новоколомяжский 15, лит. А, пом.5-Н, оф.8, ОГРН: );

о взыскании

при участии согласно протоколу

установил:

ООО «Строй Прогресс» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «Климатмаркет» о взыскании 33 303 410,88 руб.

От истца поступили уточнения требований, согласно которым он просит взыскать с ответчика: 

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 6 287 277 руб. 77 коп.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 2 070 296 рублей 39 копеек.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 2 778 289 рублей 52 копейки.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 размере 1 635 382 рубля 62 копейки.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 4 251 994 рублей 81 копейка за период с 01.01.2024 по 16.09.2024.

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 5 374 449 рублей 31 копейка.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 907 418 рублей 82 копейки.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 2 010 596 рублей 64 копейки.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 размере 888 660 рублей 28 копеек.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 2 310 516 рублей 73 копейки за период с 01.01.2024 по 16.09.2024.

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 141 117 рублей 13 копеек.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 61 026 рублей 45 копеек.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 2 048 112 рублей 10 копеек.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 размере 833 038 рублей 10 копеек.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 1 782 701 рубль 53 копейки за период с 16.02.2024 по 16.09.2024.

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 97 260 рублей 88 копеек.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 37 902 рублей 15 копеек.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 2 094 531 рубль 87 копеек.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 2 056 264 рублей 61 копейка.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 4 400 406 рублей 39 копеек за период с 16.02.2024 по 16.09.2024.

- сумму расходов по уплате пошлины в размере 189 517 рублей.

Уточненные требования приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в заседание своих представителей не направили, ввиду чего дело рассмотрено в их отсутствие по правилам статьи 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы сторон и представленные ими доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Строй Прогресс» (Генподрядчик) и ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» (Субподрядчик) был заключен договор № 317/СП-22 от 21.12.2022 (далее - Договор), согласно которому Субподрядчик в сроки и на условиях, определённых настоящим Договором, на строительном объекте «Пристроенный гараж», расположенном по адресу: 

<

...> кадастровый номер 78:34:0004281:45878 (далее - Объект), обязуется выполнить комплекс строительных работ по устройству систем автоматической пожарной защиты и автоматической установки пожаротушения, по проекту шифр 32-1-П/20-АП3.3, 32-1-П/20-АУПТ, разработанному ООО «ЦДС-Проект», и сдать их результат Генподрядчику (далее - Работы).

Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 3 к Договору: Начальный срок выполнения работ - 01.02.2023; Конечный срок выполнения работ - 15.02.2024.

Промежуточные этапы установлены Графиком производства работ (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 3 к Договору).

Согласно п. 3.1 Договора Цена работ по Договору составляет 8 330 380 руб. 98 коп.

В связи с тем, что по состоянию на 01.04.2024 работы в объемах, согласованных Сторонами ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» не выполнены, ООО «Строй Прогресс» уведомило Субподрядчика об отказе от исполнения договора строительного субподряда № 317/СП-22 от 21.12.2022.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» вернуть неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 141 117 руб. 13 коп. Удовлетворения требования не последовало. 

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение начального срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ/этапа работ за каждый день просрочки.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» уплатить 61 026 руб. 45 коп. неустойки. Удовлетворения требования не последовало.

В п. 9.2. Договора указано, что за нарушение промежуточных сроков выполнения этапа работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размер 0,1 % от стоимости этапа Работ за каждый день просрочки.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» уплатить 2 048 112 руб. 10 коп. неустойки. Удовлетворения требования не последовало.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение конечного срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 10% от Цены Договора.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» уплатить 833 038 руб. 10 коп. (8 330 380, 98 х 10%) неустойки. Удовлетворения требования не последовало.

Согласно п. 9.10 Договора при нарушении Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.17 настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать уплаты в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» уплатить 391 527 руб. 91 коп. (8 330 380, 98 х 47 дней х 0,1 %) неустойки. Удовлетворения требования не последовало.

Между ООО «Строй Прогресс» (Генподрядчик) и ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» (Субподрядчик) был заключен договор № 318/СП-22 от 21.12.2022 (далее - Договор), согласно которому Субподрядчик в сроки и на условиях, определённых настоящим Договором, на строительном объекте «Пристроенный гараж, расположенном по адресу 

<

...> кадастровый номер 78:34:0004281:45878, (далее -Объект), обязуется выполнить комплекс строительных работ по устройству системы автоматического пожаротушения, по проекту шифр 32-1-П/20-АПЗ.3, 32-1-П/20-АУПТ, разработанному ООО «ЦДС-Проект», и сдать их результат Генподрядчику (далее - Работы).

Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 3 к Договору: Начальный срок выполнения работ - 09.01.2023. Конечный срок выполнения работ - 15.02.2024.

Согласно п. 3.1 Договора Цена работ по Договору составляет 20 562 646 руб. 69 коп.

По состоянию на 02.04.2024 Субподрядчиком работы не выполнены в полном объеме, в связи с чем ООО «Строй Прогресс» уведомило об отказе от исполнения договора строительного субподряда № 318/СП-22 от 21.12.2022.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» уплатить вернуть неосновательное обогащение в размере 97 260 руб. 88 коп. (неотработанный аванс). Удовлетворения требования не последовало.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение начального срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ/этапа работ за каждый день просрочки.

В связи с тем, что работы в объемах, согласованных Сторонами в соответствующих приложениях ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» не выполнены, ООО «Строй Прогресс» просило уплатить штрафную неустойку в соответствии с п. 9.2. Договора, а именно в размере 0,1% от стоимости Работ/этапа работ за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 37 902 руб. 15 коп.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» уплатить указанную сумму в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

В п. 9.2. Договора указано, что за нарушение промежуточных сроков выполнения этапа работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размер 0,1 % от стоимости этапа Работ за каждый день просрочки.

ООО «Строй Прогресс» просило уплатить штрафную неустойку в соответствии с п. 9.2. Договора, а именно в размере 0,1% от стоимости Работ/этапа работ за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 2 094 531 руб. 87 коп.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение конечного срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

Суммарно неустойка составляет 2 056 264 руб. 61 коп. (20 562 646, 10 х 10%).

Согласно п. 9.10 Договора при нарушении Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.17 настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать уплаты в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 966 444 руб. 37 коп. (20 562 646, 10 х 47 дней х 0,1 %).

Между ООО «Строй Прогресс» (Генподрядчик) и ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» (Субподрядчик) был заключен договор № 108/СП-23 от 14.03.2023 (далее - Договор), согласно которому Субподрядчик в сроки и на условиях, определённых настоящим Договором, на строительном объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, подземными паркингами и надземными автостоянками. Многоквартирный жилой дом. Корпус 5», расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:109022, корпус 5, секции 1-3 (далее - Объект), обязуется выполнить комплекс строительных работ по устройству внутренних сантехнических инженерных сетей отопления, по проекту шифр 10-5-П/17-ОВ1, разработанному ООО «ЦДС-Проект», и сдать их результат Генподрядчику (далее - Работы).

Согласно п. 2.1. Договора : Начальный срок выполнения работ - 17.04.2023 ; Конечный срок выполнения работ - 30.12.2023.

Согласно п. 2 Дополнительного соглашения № 1 к Договору Цена работ по Договору составляет 8 886 602 руб. 81 коп.

По состоянию на 02.04.2024 Субподрядчиком работы не выполнены в полном объеме. ООО «Строй Прогресс» уведомило об отказе от исполнения договора строительного субподряда № 108/СП-23 от 14.03.2023.

ООО «Строй Прогресс» просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» вернуть неотработанный аванс в размере 5 374 449 руб. 31 коп. Удовлетворения требования не последовало.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение начального срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ/этапа работ за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 907 418 руб. 82 коп.

В п. 9.2. Договора указано, что за нарушение промежуточных сроков выполнения этапа работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размер 0,1 % от стоимости этапа Работ за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 2 010 596 руб. 64 коп.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение конечного срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

Суммарно неустойка составляет 888 660 руб. 28 коп. (8 886 602, 81 х 10%).

Согласно п. 9.10 Договора при нарушении Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.17 настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать уплаты в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 835 340 руб. 66 коп. (8 886 602, 81 х 94 дней х 0,1 %).

Между ООО «Строй Прогресс» (Генподрядчик) и ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» (Субподрядчик) был заключен договор № 88/СП-23 от 13.03.2023 (далее - Договор), согласно которому Субподрядчик в сроки и на условиях, определённых настоящим Договором, на строительном объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, подземными паркингами и надземными автостоянками. Многоквартирный жилой дом. Корпус 5», расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:109022, корпус 5, секции 1 -3 (далее - Объект), обязуется выполнить комплекс строительных работ по устройству внутренних сантехнических инженерных сетей отопления, по проекту шифр 10-5-П/17-ВК1.1, 10-5-П/17-ВК2.1 разработанному ООО «ЦДС-Проект», и сдать их результат Генподрядчику (далее - Работы).

Согласно п. 2.1. Договора: Начальный срок выполнения работ - 27.04.2023 ; Конечный срок выполнения работ - 30.12.2023.

Согласно 2 Дополнительного соглашение № 1 к Договору Цена Договора составляет 16 353 826 руб. 18 коп.

По состоянию на 21.03.2024 Субподрядчиком работы не выполнены в полном объеме.

ООО «Строй Прогресс» уведомило об отказе от исполнения договора строительного субподряда № 88/СП-23 от 13.03.2023 и просило ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» вернуть неотработанный аванс в размере 6 287 277 руб. 77 коп.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение начального срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ/этапа работ за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 2 070 296 руб. 39 коп.

В п. 9.2. Договора указано, что за нарушение промежуточных сроков выполнения этапа работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размер 0,1 % от стоимости этапа Работ за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 2 778 289 руб. 52 коп.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение конечного срока выполнения Работ Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

Суммарно неустойка составляет 1 635 382 руб. 62 коп. (16 353 826, 18 х 10%).

Согласно п. 9.10 Договора при нарушении Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.17 настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать уплаты в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Суммарно неустойка составляет 1 537 259 руб. 66 коп. (16 353 826, 18 х 94 дней х 0,1 %).

Ссылаясь на указанные обстоятельства, после досудебного порядка урегулирования спора истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. п. 1,3 ст. 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации поскольку иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: о возврате исполненного по недействительной сделке; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Учитывая вышеизложенную правовую позицию в ее логической взаимосвязи с фактическими обстоятельствами дела следует вывод о том, что в следствие неисполнения субподрядчиком ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» своих обязательств по договорам № 108/СП-23 от 14.03.2023, № 317/СП-22 от 21.12.2022, № 318/СП-22 от 21.12.2022, № 88/СП-23 от 13.03.2023 в пользу ООО «Строй Прогресс» подлежит уплате сумма неосновательного обогащения (неотработанного аванса).

Учитывая, что ответчиком допущено нарушение сроков производства работ, истцом заявлено требование о взыскании неустойки.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным как по праву, так и по размеру, в связи с чем требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в заявленном истцом размере.

В порядке статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. С ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 10 483 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

принять уточнение исковых требований.

 Взыскать с ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «Строй Прогресс» (ИНН 

<

***>):

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 6 287 277 руб. 77 коп.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 2 070 296 рублей 39 копеек.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 2 778 289 рублей 52 копейки.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору № 88/СП-23 от 13.03.2023 размере 1 635 382 рубля 62 копейки.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора № 88/СП-23 от 13.03.2023 в размере 4 251 994 рублей 81 копейка за период с 01.01.2024 по 16.09.2024.

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 5 374 449 рублей 31 копейка.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 907 418 рублей 82 копейки.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 2 010 596 рублей 64 копейки.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору №108/СП-23 от 14.03.2023 размере 888 660 рублей 28 копеек.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора №108/СП-23 от 14.03.2023 в размере 2 310 516 рублей 73 копейки за период с 01.01.2024 по 16.09.2024.

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 141 117 рублей 13 копеек.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 61 026 рублей 45 копеек.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 2 048 112 рублей 10 копеек.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору №317/СП-22 от 21.12.2022 размере 833 038 рублей 10 копеек.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора №317/СП-22 от 21.12.2022 в размере 1 782 701 рубль 53 копейки за период с 16.02.2024 по 16.09.2024.

- сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 97 260 рублей 88 копеек.

- сумму неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 37 902 рублей 15 копеек.

- сумму неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 2 094 531 рубль 87 копеек.

- сумму неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 2 056 264 рублей 61 копейка.

- сумму неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного п. 6.17. договора №318/СП-22 от 21.12.2022 в размере 4 400 406 рублей 39 копеек за период с 16.02.2024 по 16.09.2024.

- сумму расходов по уплате пошлины в размере 189 517 рублей.

Взыскать с ООО «КЛИМАТМАРКЕТ» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета подлежит взысканию 10 483 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.