АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Барнаул Дело № А03-18538/2022 29.08.2023  

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении  протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление Администрации Тальменского района Алтайского края (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 658030, Алтайский Край, Тальменский Район,  ФИО2, ФИО3 Улица, 94) к обществу с ограниченной  ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 656043, 

<

...>) об обязании устранить недостатки в выполненных работах по муниципальному  контракту № 08172000003190058290001 от 15.07.2019 и о взыскании 1320781 руб. 84  коп. штрафа,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора общества с ограниченной  ответственностью «Каскад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 658030,  Алтайский Край, Тальменский Район, ФИО2, Алтайская Улица,  8), общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Строй» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 658084, 

<

...>),  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО4 по доверенности от  08.06.2022, от ответчика – ФИО5 по доверенности от 07.11.2022, ФИО6  по доверенности от 29.12.2022.  

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ 

Уточненные исковые требования Администрации Тальменского района  Алтайского края (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Газпром газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки подрядных работ по контракту от 15.07.2019 удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>) в течение 2 месяцев со дня  вступления решения в законную силу устранить недостатки в выполненных подрядных  работах по муниципальному контракту № 08172000003190058290001 от 15.07.2019,  заключенному между Администрацией Тальменского района Алтайского края (ОГРН  

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>), а именно обязать общество с  ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул»  (ОГРН 

<

***>) устранить следующие недостатки в выполненных работах по  муниципальному контракту, отраженные в акте осмотра от 26.09.2022 по объекту  «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Тальменка  Тальменского района Алтайского края» согласно муниципального контракта от  15.07.2019 № 08172000003190058290001:  

1) протекание воды осадков по стенам и подоконнику в помещении  лаборатории, раздевалки на цокольной части здания, разрушение отливов;  

2) частичное разрушение и проседание отмостки по периметру здания (2 места);  

3) на резервуаре промывной воды № 1,2 отсутствует отмостка, в результате чего  происходит затекание воды;  

4) не выполнены в полном объеме восстановительные работы по выравниванию  опоры освещения и забора (размыв грунта тропы наряда опоры, кабель натянут);  

5) не отгрейдирована подъездная щебеночная дорога с устройством расклинки;  

6) не выполнена планировка грунта территории с созданием поверхностного  водоотвода в сторону водосбросного колодца и водоотводных лотков (имеется 3  размыва);  

7) не восстановлено ограждение колючей проволокой; 8) просадка пола в операционном зале; 

9) не выполнены в полном объеме наладочные работы дизель-генератора,  некорректно работает автомат при переходе на штатный режим работы, (недостаточная  вентиляция);  

10) резонатор выхлопной трубы дизель-генератора имеет следы деформации и  ржавчины (с момента установки);  

11) не работает периметральная охранная сигнализация; 

12) негерметичны все смотровые колодцы сети водопровода, запорная арматура  затоплена;  

13) разрушена отмостка 12 смотровых колодцев сети водопровода;  

14) выявлены неисправные 3 гидранта (водозабор, нефтебаза, поворот на ул.  Громова);  

15) на территории водозабора не проведен посев трав, местами отсутствует  чернение;  

16) отсутствует отмостка на павильонах скважин; 

17) не держит задвижка на РЧВ 1 забора воды на станцию второго подъема –  бежит по фланцу;  

18) смотровой колодец РПВ не герметичен, замыт грунтом на половину  высоты, запорная арматура под массой намытого наружного грунта;  

19) смотровой колодец скважины № 3 не герметичен замыт грунтом до уровня  запорной арматуры;  

20) распределительный коллектор скважин негерметичен, имеется попадание  наружного грунта, замыта запорная арматура;  

21) наклонены и размыто основание 3опор освещения (повышенное натяжение  кабеля);  

22) подтопление павильона первой скважины; 

23) разрушены и не восстановлены в полном объеме тротуары по ул.  Залесовская, Заправочная;  

24) подмыт колодец по ул. Советской. 

25) отсутствует уплотнитель между коньковым элементом и сэндвич панелями,  а также отсутствует клей-герметик по контуру профиля, заполнение между сэндвич  панелями в коньковой части выполнено не плотно, верхние кромки листов сэндвич- панеелей не загнуты вверх (данный недостаток отражен в акте осмотра от 17.05.2023 по  объекту «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п.  Тальменка Тальменского района Алтайского края» согласно муниципального контракта  от 15.07.2019 № 08172000003190058290001).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации  Тальменского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>) 1320781 руб. 84 коп.  штрафа, 60000 руб. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Лаборатория экспертизы и оценки «СтройТехЭкспо» (ОГРН  

<

***>) 25000 руб. за проведение судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета  Российской Федерации 32208 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.  

Судья М.А. Кулик 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.04.2023 7:48:00

 Кому выдана Кулик Максим Алексеевич