АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-18681/2019

г. Ставрополь

12 декабря 2019 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демченко С.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Макоевой М.А., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Неон», г. Малгобек  Республики Ингушетия, ОГРН 1110601000608, ИНН 0601022665,  

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Невинномысска, г. Невинномысск Ставропольского края, ОГРН 1062648012987, ИНН  2631029245,  

об обязании заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от  14.11.2018 № Ф.2018.526888, об обязании ответчика пересчитать оплату выполненных истцом  работ с 01.01.2019 года с учетом изменения ставки НДС 20% (уточненные требования),  

Руководствуясь статьями 49, 51, 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц,  не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Министерства  дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и Министерства финансов  Ставропольского края, отказать.  

 Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Невинномысска, г. Невинномысск Ставропольского края, ОГРН 1062648012987, ИНН  2631029245, заключить с обществом с ограниченной ответственностью строительная компания  «Неон», г. Малгобек Республики Ингушетия, ОГРН 1110601000608, ИНН 0601022665,  дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 14.11.2018 № Ф.2018.526888 на  выполнение работ по строительству объекта «Путепровод через железную дорогу в г.  Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу  

от ул. Степная и ул. Партизанская» на условиях увеличения ставки налога на добавленную  стоимость до 20% с 01.01.2019 года.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Невинномысска, г. Невинномысск Ставропольского края, ОГРН 1062648012987, ИНН  2631029245, в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Неон», г. Малгобек Республики Ингушетия, ОГРН 1110601000608, ИНН 0601022665, в счет  возмещения расходов по уплате государственной пошлины 6 000 руб.  

Решение суда подлежит немедленному исполнению. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Демченко