1245/2017-250620(2) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 24 октября 2017 года 

по делу А33-27519/2016 Красноярск 

24 октября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск), в течение восьми месяцев с момента  вступления решения в законную силу, выполнить следующие работы на объекте по адресу: 

<

...>  

A) в отношении асфальтобетонных покрытий парковок и проездов:  - обработать трещины битумной мастикой;  

- выполнить вырезку асфальтобетонного покрытия в местах образования провалов и  колеи и провести укладку асфальтобетонного покрытия;  

Б) в отношении покрытия тротуаров: 

- выполнить замену асфальтобетонного покрытия тротуара на южной стороне жилого  дома вдоль оси А;  

- локально выполнить замену асфальтобетонного слоя покрытия в местах провалов; 

- восстановить асфальтобетонное покрытие тротуаров со стороны парковки в трех зонах  около второго, третьего и четвертого подъезда жилого дома, а также в местах примыкания к  колодцам (8 шт.- КК-1,2,3,4 путем укладки асфальтобетона общей площадью 123,4 кв.м на  уже имеющееся основание из песчано-гравийной смеси с дополнительной подсыпкой слоя  песчано-гравийной смеси в местах провалов;  

- провести ямочный ремонт имеющихся провалов, просадок, трещин в  асфальтобетонном покрытии по всей площади домовой территории, образовавшейся в  результате усадки грунта, путем укладки асфальтобетона площадью 659 кв.м согласно  проекту.  

B) в отношении отмостки: - разобрать отмостку с южной стороны жилого дома; 

- выполнить устройство отмостки в соответствии с проектом шифр 388-08 ГП лист 1 и  388-08-ГП стадия ПД лист 7;  

- восстановить асфальтовое покрытие отмостки со стороны южного фасада около  второго, третьего, частично первого и четвертого подъездов площадью 143,7 кв.м. путем  укладки асфальтобетона на уже имеющееся основание из песчано-гравийной смеси в том  виде как оно есть с дополнительной подсыпкой слоя песчано-гравийной смеси для  выравнивая уклона основания;  

Г) в отношении подпорных стен: 

на ПС-1  

- связать горизонтальными металлическими пластинами (возможно швеллерами длиной  

1,0 м в количестве 3-4 шт.) разошедшиеся плиты, при помощи анкерных дюбелей; - металлические детали покрыть антикоррозийной краской; - восстановить все деформационные швы ПС-1; - установить маяки на ПС-3, ПС-7, ПС-10 

- расширить сквозные трещины и с последующей герметизацией на всю толщину  

конструкции. Д) в отношении сливного лотка на подпорных стенах:  - выполнить дополнительный водоотвод от места скопления воды на лотке; Е) в отношении козырьков в подъездах: - разобрать гидроизоляцию на входных козырьках подъездов с 1 по 4; 

- выполнить гидроизоляционные работы входных козырьков подъездов с № 1 по № 4 в  

соответствии с проектом; Ж) в отношении лестничных площадок: 

- восстановить частично отсутствующую напольную плитку на лестничных площадках в  

подъездах путем перекладки имеющейся напольной плитки размером 30x30 см серого цвета  

в общем количестве 335 шт. З) в отношении вытяжной вентиляции в квартире № 22: 

- выполнить ревизию вытяжной вентиляционной шахты и восстановить проектное  

сечение шахты; 

- выполнить регулировку сечений приемных вентиляционных отверстий путем  

установки диафрагм. В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «ПодрядЛюкс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, а также 40 000 рублей судебных  

расходов на оплату услуг представителя. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  

Красноярского края. 

Судья А.Н. Мальцева