АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-6790/2020

28 декабря 2020 года

г. Курск

Резолютивная часть решения объявлена 23.12.2020.

Решение в полном объеме изготовлено 28.12.2020.    

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Волковой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3»

к обществу с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой»

о взыскании задолженности по договорам субподряда от 20 июня 2019 года №23/2019, от 20 июня 2019 года №29/2019, от 20 июня 2019 года №30/2019 в размере 3 976 052 руб. 93 коп., неустойки в размере 1 323 243 руб. 50 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: директор ФИО2 (предъявлен паспорт),

от ответчика: не явился  (извещен надлежащим образом)

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3», расположенное по адресу: 307060, Курская обл., Тимский р-н, ул. Садовая, 

<

...>, зарегистрировано в качестве юридического лица 11.08.2016, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

Общество с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой», расположенное по адресу: 305025, 

<

...>, зарегистрировано в качестве юридического лица 03.09.2004, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» обратилось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой» о взыскании задолженности по договорам субподряда от 20 июня 2019 года №23/2019, от 20 июня 2019 года №29/2019, от 20 июня 2019 года №30/2019 в размере 3 976 052 руб. 93 коп., неустойки в размере 1 323 243 руб. 50 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

Неявка лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению спора в его отсутствие по существу по имеющимся в материалах дела документам.

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

20 июня 2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой» (Подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» (Субподрядчик) заключен договор субподряда №30/2019, по условиям которого в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности дорог и дорожных сооружений стороны заключили настоящий договор субподряда, согласно которому Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства: Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Щигровском районе в 2019 г. находящихся в оперативном управлении ОКУ «Комитет автодорог Курской области» (в Курской области) (далее - Объекты) в соответствии с Ведомостями объемов и стоимости работ (Приложения 2 к договору), а Подрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

Сроки выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения договора, окончание работ - до 15 октября 2019 года (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 2.1 данного договора цена настоящего договора составляет 2558418,75 (два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 75 копеек (с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей) и является твердой на весь период действия настоящего договора, за исключением случаев установленных пунктом 11.1 договора.

Сумма, подлежащая уплате подрядчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В соответствии с пунктом 2.5 договора окончательный расчёт но договору производится в срок не более 30 (тридцати) дней с даты принятия выполненных объёмов работ.

В силу пункта 8.3.3 договора в случае нарушения сроков оплаты работ по Договору более 10 (десяти) дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Также 20 июня 2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой» (Подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» (Субподрядчик) заключен договор субподряда №23/2019, по условиям которого в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности дорог и дорожных сооружений стороны заключили настоящий договор субподряда, согласно которому Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства: Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Советском районе в 2019 г. находящихся в оперативном управлении ОКУ «Комитет автодорог Курской области» (в Курской области) (далее - Объекты) в соответствии с Ведомостями объемов и стоимости работ (Приложения 2 к договору), а Подрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

Сроки выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения договора, окончание работ - до 15 октября 2019 года (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 2.1 данного договора цена настоящего договора составляет 2 227 114 руб. 96 коп. (с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей) и является твердой на весь период действия настоящего договора, за исключением случаев установленных пунктом 11.1 договора.

Сумма, подлежащая уплате подрядчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В соответствии с пунктом 2.5 договора окончательный расчёт но договору производится в срок не более 30 (тридцати) дней с даты принятия выполненных объёмов работ.

В силу пункта 8.3.3 договора в случае нарушения сроков оплаты работ по Договору более 10 (десяти) дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Кроме того, 20 июня 2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой» (Подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» (Субподрядчик) заключен договор субподряда №29/2019, по условиям которого в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности дорог и дорожных сооружений стороны заключили настоящий договор субподряда, согласно которому Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства: Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Черемисиновском районе в 2019 г. находящихся в оперативном управлении ОКУ «Комитет автодорог Курской области» (в Курской области) (далее - Объекты) в соответствии с Ведомостями объемов и стоимости работ (Приложения 2 к договору), а Подрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

Сроки выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения договора, окончание работ - до 15 октября 2019 года (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 2.1 данного договора цена настоящего договора составляет 1 185 259 руб. 22 коп. (с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей) и является твердой на весь период действия настоящего договора, за исключением случаев установленных пунктом 11.1 договора.

Сумма, подлежащая уплате подрядчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В соответствии с пунктом 2.5 договора окончательный расчёт но договору производится в срок не более 30 (тридцати) дней с даты принятия выполненных объёмов работ.

В силу пункта 8.3.3 договора в случае нарушения сроков оплаты работ по Договору более 10 (десяти) дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Во исполнение указанных договоров общество с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» выполнило соответствующие работы, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными в двустороннем порядке.

Однако обществом с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрпой» выполненные работы были оплачены не в полном объеме, что привело к образованию задолженности у ответчика перед истцом в сумме 3 976 052 руб. 93 коп.

Ссылаясь на то, что ответчик в добровольном порядке данную задолженность не погасил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В силу пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Исходя из пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Как указано в пункте 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В пункте 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Факт выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» работ по обозначенным договорам подряда подтверждается представленными в материалы дела документами и не оспорен ответчиком.

Доказательств своевременной и полной оплаты выполненных работ в материалы дела не представлено.

Исковые требования ответчиком не оспорены.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Учитывая не исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой»  обязанности по своевременной и полной оплате выполненных работ, суд считает обоснованным требование общества с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» о взыскании с ответчика пени за период с 14.09.2019 по 20.08.2020 в сумме 1 323 243 руб. 50 коп.

Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным.

Оценив представленные документы, суд приходит к выводу о том, что поскольку ответчик не оплатил выполненные работы в полном объеме и в установленный договором срок, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 152, 167-171, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

Р  Е  Ш  И  Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» денежные средства в размере 3 976 052 руб. 93 коп., пени за период с 14.09.2019 по 20.08.2020 в сумме 1 323 243 руб. 50 коп., 49 496 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                                           Е.А. Волкова