ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-22601/2016

город Ростов-на-Дону

04 июля 2017 года

15АП-2363/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 июля 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Ильиной М.В.,

судей Глазуновой И.Н., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии:

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 20.02.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, общества с ограниченной ответственностью «СП-Проект»

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 30.12.2016 по делу № А53-22601/2016,

принятое в составе судьи Меленчук И.С.,

по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СП-Проект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о расторжении муниципальных контрактов, о взыскании задолженности, штрафа, пени, процентов,

УСТАНОВИЛ:

Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога обратилось в арбитражный суд с иском к ответчику ООО "СП-Проект" о расторжении муниципальных контрактов N 455 от 11.12.2012, N 454 от 11.12.2012, N 453 от 11.12.2012, N 452 от 11.12.2012, о взыскании 1 414 392,98 руб. задолженности, 244 180 342,28 руб. штрафа, 4 948 335,72 руб. пени, 367 023,12 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.12.2016 с общества с ограниченной ответственностью "СП-Проект" в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога взыскано 1 414 392,98 руб. задолженности, 367 023,12 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 703 843,45 руб. штрафа. В остальной части иска отказано.

Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, общество с ограниченной ответственностью «СП-Проект» обратились с апелляционными жалобами на решение Арбитражного суда Ростовской области от 30.12.2016, просили отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт. 

В суд апелляционной инстанции поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, а также  ходатайства сторон об его утверждении в отсутствие их представителей. 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 названного Кодекса.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Суд апелляционной инстанции установил, что мировое соглашение от 26.06.2017 подписано сторонами на следующих условиях:

1. После утверждения судом настоящего мирового соглашения Истец отказывается от всех своих первоначальных исковых требований по делу N А53-22601/2016, а именно: о расторжении муниципальных контрактов № 455 от 11.12.2012, № 454 от 11.12.2012, № 453 от 11.12.2012, № 452 от 11.12.2012, о взыскании 250910094,10 руб., в том числе 1 414 392,98 руб. задолженности, 244 180 342,28 руб. штрафа, 4 948 335,72 руб. пени, 367023,12 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на уплату государственной пошлины и иных судебных расходов.

2. В результате утверждения мирового соглашения ответчик исполняет перед истцом обязательства, предусмотренные муниципальными контрактами, в соответствии с нижеизложенными этапами:

2.1.Ответчик обязуется в срок до 15.11.2017г. выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог в г. Таганроге с получением положительного заключения в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и передать результаты выполненных работ Истцу по актам сдачи-приемки проектной продукции по следующим объектам:

-Капитальный ремонт а/д Мариупольское шоссе (ул. Ломоносова-Мариупольское Шоссе, 5/1) стоимостью 983 242,62 руб. (муниципальный контракт № 453 от 11.12.2012г.);

-Капитальный ремонт а/д 2-й Переулок (ул. Карла Либкнехта - ул. Октябрьская) стоимостью 1 072 669,49 руб. (муниципальный контракт № 455 от 11.12.2012г.).

2.2.Ответчик обязуется в срок до 15.03.2018г. выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог в г. Таганроге с получением  положительного  заключения  в  ГАУ РО  «Государственная  экспертиза проектов» и передать результаты выполненных работ Истцу по актам сдачи-приемки проектной продукции по следующим объектам:

- Капитальный ремонт а/д ул. Урицкого (пер. Конвейерный - ул. Морозова) стоимостью 620 487,20 руб. (муниципальный контракт № 452 от 11.12.2012г.);

- Капитальный ремонт а/д Биржевой спуск (пер. Контрольный - ул. Портовая) стоимостью 498 931,20 руб. (муниципальный контракт № 452 от 11.12.2012г.);

- Капитальный ремонт а/д пер. Контрольный (ул. Греческая - Биржевой Спуск) стоимостью 217 960,62 руб. (муниципальный контракт № 454 от 11.12.2012г.).

2.3. Ответчик обязуется в срок до 16.07.2018г. выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог в г. Таганроге с получением положительного заключения в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и передать результаты выполненных работ Истцу по актам сдачи-приемки проектной продукции по следующим объектам:

- Капитальный ремонт а/д 27-й Переулок (ул. Кузнечная - ул. Энергетическая) стоимостью 815 383,20 руб. (муниципальный контракт № 452 от 11.12.2012г.);

- Капитальный ремонт а/

<

...> стоимостью 1 448 897,60 руб. (муниципальный контракт № 454 от 11.12.2012г.).

- Капитальный ремонт а/д ул. Маршала Жукова (пер. 17-й Новый - ул. Бакинская) стоимостью 1 331 351,17 руб. (муниципальный контракт № 453 от 11.12.2012г.);

3. В ходе выполнения ответчиком вышеуказанных работ истец обязуется проводить согласования проектных решений и документации, необходимых для прохождения экспертизы проектной документации, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента их получения от ответчика.

4. В случае необходимости переустройства инженерных сетей истец обязуется в срок не более 1 (одного) месяца после получения исходных данных от ответчика предоставить ответчику Технические условия и другую выданную сетевыми организациями разрешительную документацию. В случае несоблюдения истцом указанного срока срок выполнения ответчиком работ продлевается на количество дней, превышающих 1 (один) месяц.

5. Истец обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объектам, указанным в пунктах 2.1.- 2.3. настоящего мирового соглашения, пообъектно принять по актам сдачи-приемки проектной продукции результаты работ, выполненных ответчиком.

6. Истец обязуется в течении 40 (сорока) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объектам оплатить стоимость выполненных работ, указанную в пунктах 2.1.- 2.3. настоящего мирового соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ответчика. Датой исполнения настоящего обязательства считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ответчика.

7. С момента утверждения настоящего мирового соглашения муниципальные контракты №452, №453, №454, №455 от 11.12.2012г. считаются расторгнутыми по соглашению сторон и обязательства сторон по указанным контрактам полностью прекращаются с момента их выполнения сторонами.

8. Стороны согласовали, что все судебные расходы, связанные с рассмотрением судами дела № А53-22601/2016, сторонами друг другу не возмещаются, а относятся на ту сторону, которая их понесла.

9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по нему.

10. В случае неисполнения какой-либо из сторон условий настоящего мирового соглашения сторона, не исполнившая условие мирового соглашения, обязуется выплатить другой стороне штраф в размере 1/300 действующей на дату уплаты штрафа ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

11. В случае неисполнения какой-либо из сторон условий настоящего мирового соглашения добровольно оно подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству заинтересованной стороны.

12. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны.

13. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр представляется в материалы дела № А53-22601/2016.

В соответствии с частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Согласно пп. 8, 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50 по итогам использования примирительной процедуры стороны могут заключить мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований, которое утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренном статьей 141 Кодекса. Исходя из положений АПК РФ другими самостоятельными результатами примирения сторон, помимо мирового соглашения, могут быть также частичный или полный отказ от иска (часть 2 статьи 49 Кодекса), его частичное или полное признание (часть 3 статьи 49 Кодекса), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела (статья 70 Кодекса). Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.

Изучив представленное на утверждение суда мировое соглашение от 26.06.2017, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что мировое соглашение подписано уполномоченными лицами на согласованных сторонами условиях, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. 

В силу пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, одновременно с прекращением производства по делу подлежит отмене принятый судом первой инстанции по существу спора судебный акт.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчику надлежит вернуть из федерального бюджета половину уплаченной государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 138 – 141, 258, 269–271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 30.12.2016 по делу № А53-22601/2016 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 26.06.2017 по делу № А53-22601/2016, заключенное между Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и обществом с ограниченной ответственностью "СП-Проект" на следующих условиях:

1. После утверждения судом настоящего мирового соглашения истец отказывается от всех своих первоначальных исковых требований по делу N А53-22601/2016, а именно: о расторжении муниципальных контрактов № 455 от 11.12.2012, № 454 от 11.12.2012, № 453 от 11.12.2012, № 452 от 11.12.2012, о взыскании 250910094,10 руб., в том числе 1 414 392,98 руб. задолженности, 244 180 342,28 руб. штрафа, 4 948 335,72 руб. пени, 367023,12 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на уплату государственной пошлины и иных судебных расходов.

2. В результате утверждения мирового соглашения ответчик исполняет перед истцом обязательства, предусмотренные муниципальными контрактами, в соответствии с нижеизложенными этапами:

2.1.Ответчик обязуется в срок до 15.11.2017г. выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог в г. Таганроге с получением положительного заключения в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и передать результаты выполненных работ Истцу по актам сдачи-приемки проектной продукции по следующим объектам:

-Капитальный ремонт а/д Мариупольское шоссе (ул. Ломоносова-Мариупольское Шоссе, 5/1) стоимостью 983 242,62 руб. (муниципальный контракт № 453 от 11.12.2012г.);

-Капитальный ремонт а/д 2-й Переулок (ул. Карла Либкнехта - ул. Октябрьская) стоимостью 1 072 669,49 руб. (муниципальный контракт № 455 от 11.12.2012г.).

2.2.Ответчик обязуется в срок до 15.03.2018г. выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог в г. Таганроге с получением  положительного  заключения  в  ГАУ РО  «Государственная  экспертиза проектов» и передать результаты выполненных работ Истцу по актам сдачи-приемки проектной продукции по следующим объектам:

- Капитальный ремонт а/д ул. Урицкого (пер. Конвейерный - ул. Морозова) стоимостью 620 487,20 руб. (муниципальный контракт № 452 от 11.12.2012г.);

- Капитальный ремонт а/д Биржевой спуск (пер. Контрольный - ул. Портовая) стоимостью 498 931,20 руб. (муниципальный контракт № 452 от 11.12.2012г.);

- Капитальный ремонт а/д пер. Контрольный (ул. Греческая - Биржевой Спуск) стоимостью 217 960,62 руб. (муниципальный контракт № 454 от 11.12.2012г.).

2.3. Ответчик обязуется в срок до 16.07.2018г. выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог в г. Таганроге с получением положительного заключения в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и передать результаты выполненных работ Истцу по актам сдачи-приемки проектной продукции по следующим объектам:

- Капитальный ремонт а/д 27-й Переулок (ул. Кузнечная - ул. Энергетическая) стоимостью 815 383,20 руб. (муниципальный контракт № 452 от 11.12.2012г.);

- Капитальный ремонт а/

<

...> стоимостью 1 448 897,60 руб. (муниципальный контракт № 454 от 11.12.2012г.).

- Капитальный ремонт а/д ул. Маршала Жукова (пер. 17-й Новый - ул. Бакинская) стоимостью 1 331 351,17 руб. (муниципальный контракт № 453 от 11.12.2012г.);

3. В ходе выполнения ответчиком вышеуказанных работ истец обязуется проводить согласования проектных решений и документации, необходимых для прохождения экспертизы проектной документации, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента их получения от ответчика.

4. В случае необходимости переустройства инженерных сетей истец обязуется в срок не более 1 (одного) месяца после получения исходных данных от ответчика предоставить ответчику Технические условия и другую выданную сетевыми организациями разрешительную документацию. В случае несоблюдения истцом указанного срока срок выполнения ответчиком работ продлевается на количество дней, превышающих 1 (один) месяц.

5. Истец обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объектам, указанным в пунктах 2.1.- 2.3. настоящего мирового соглашения, пообъектно принять по актам сдачи-приемки проектной продукции результаты работ, выполненных ответчиком.

6.Истец обязуется в течении 40 (сорока) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объектам оплатить стоимость выполненных работ, указанную в пунктах 2.1.- 2.3. настоящего мирового соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ответчика. Датой исполнения настоящего обязательства считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ответчика.

7. С момента утверждения настоящего мирового соглашения муниципальные контракты №452, №453, №454, №455 от 11.12.2012г. считаются расторгнутыми по соглашению сторон и обязательства сторон по указанным контрактам полностью прекращаются с момента их выполнения сторонами.

8. Стороны согласовали, что все судебные расходы, связанные с рассмотрением судами дела № А53-22601/2016, сторонами друг другу не возмещаются, а относятся на ту сторону, которая их понесла.

9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по нему.

10. В случае неисполнения какой-либо из сторон условий настоящего мирового соглашения сторона, не исполнившая условие мирового соглашения, обязуется выплатить другой стороне штраф в размере 1/300 действующей на дату уплаты штрафа ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

11. В случае неисполнения какой-либо из сторон условий настоящего мирового соглашения добровольно оно подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству заинтересованной стороны.

12. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны.

13. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр представляется в материалы дела № А53-22601/2016.

Производство по делу № А53-22601/2016 прекратить.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью «СП-Проект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1500 рублей. Выдать справку. 

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий М.В. Ильина

СудьиИ.Н. Глазунова

Н.Н. Мисник