АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-5638/2023

10 августа 2023 г.

г. Севастополь

 

 Резолютивная часть решения оглашена 04 июля 2023 года. 

 Решение изготовлено в полном объеме 10 августа 2023 года. 

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи  Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

государственного казенного учреждения города Севастополя «Дирекция  по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь  

к обществу с ограниченной ответственностью «Веста», ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, Краснодар  

о взыскании неустойки, 

при участии в судебном заседании представителей: от истца – ФИО2  по доверенности от 25.04.2023, от ответчика – ФИО3 по доверенности  от 11.01.2023 № 7, установил следующее.  

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Дирекция по развитию  дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» (далее – учреждение)  обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к обществу с ограниченной  ответственностью «Веста» (далее – общество) о взыскании 572702,70 рублей неустойки  по государственному контракта от 11.10.2021 № 24-ЕП-2021.  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования  в полном объеме,  

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указал на наличие  оснований для списания начисленной неустойки  

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле,  и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит  к следующему.  

Код доступа к материалам дела: 

 

Как видно из материалов дела, учреждение (заказчик) и общество (подрядчик)  заключили государственный контракт от 11.10.2021 № 24-ЕП-2021, согласно пункту 1.1  которого подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего  пользования межмуниципального значения 67 Н- 442 ул. Горпищенко» (далее - Объект)  в соответствии с утвержденной проектной документацией (далее - Проект), в сроки  предусмотренные контрактом, и с учетом календарного графика производства подрядных  работ, а заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить  их в соответствии с условиями контракта.  

В силу пункта 4.1 контракта в редакции дополнительного соглашения  от 22.09.2022 № 10 календарные сроки выполнения работ по объекту определяются  календарным графиком производства подрядных работ (приложение № 1 к контракту).  

Окончание работ 20.11.2022. 

Согласно пункту 2.3 контракта его цена является твердой, определена на весь срок  исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов,  других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением  обязательств по контракту, при котором цена контракта составляет: 775 116 061 рубль  97 копеек, в том числе НДС 20%.  

Согласно пункту 10.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих обязательств, установленных контрактом, в том числе конечного, промежуточных  и иных сроков, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

Согласно пункту 10.3.4 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа  исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения  контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если  законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

В том числе пеня начисляется за: 

П. 10.3.4.4. Нарушение сроков выполнения отдельных видов работ по объекту,  указанных в календарном графике производства работ, включая нарушение подрядчиком  

 

срока окончания работ по Объекту в текущем месяце на срок свыше пяти календарных  дней.  

В соответствии с п. 10.12 Контракта пени, штрафы уплачиваются подрядчиком  в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет  по указанным в требовании реквизитам.  

Контракт прекращен исполнением, соглашением о расторжении контракта  от 20.01.2023 прекращены обязательства на сумму 3 276 060 руб. 75 коп.  

Вследствие просрочки исполнения обязательств по контракту, а также просрочки  устранения иных нарушений учреждение начислило обществу неустойки по условиям  контракта на общую сумму 572 702,70 руб.  

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд.  

К возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ о договоре  подряда, а также положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд".  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства  и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость  одностороннего отказа от исполнения обязательства.  

Из материалов дела следует, что обязательства по контракту прекращены  исполнением (статья 408 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 2 утвержденных Постановлением Правительства РФ от  04.07.2018 № 783 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за  исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке  исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы,  услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с  возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств,  

 

повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в  связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,  повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком,  исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине  возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта  обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с  введением политических или экономических санкций иностранными государствами,  совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан  Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с  введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или)  союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных  государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного  характера (далее - меры ограничительного характера).  

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих  случае и порядке:  

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)  не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных  и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев,  предусмотренных подпунктами "в” - ”д" настоящего пункта;  

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)  превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены  контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных  сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев,  предусмотренных подпунктами "в" - ”д” настоящего пункта;  

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в  связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность  исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов,  пеней);  

 

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в  связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,  повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления  предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства  Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые  акты Правительства Российской Федерации" предложения поставщика (подрядчика,  исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным  увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию  при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов,  обосновывающих такое предложение;  

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в  связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность  исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного  характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней).  

Общая сумма неустойки, начисленной истцом, составляет 0,07% от цены  контракта.  

Данное обстоятельство является основанием для списания начисленной неустойки.  

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения  заявленных исковых требований.  

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города  Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня  его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:50:00

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич