АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

      Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-23513/2019 

Дата принятия решения – 15 октября 2019 года 

Дата объявления резолютивной части – 08 октября 2019 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерное общество "Татарское Монтажно-наладочное управление", г.Лениногорск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройэксперт", Муслюмовский район, с. Муслюмово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 4741817.50 рублей. 

при участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 01.01.2019 г., диплом АВБ 0631332,

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 09.04.2019 г., диплом ВБС 0523883.

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Татарское Монтажно-наладочное управление", г.Лениногорск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройэксперт", Муслюмовский район, с. Муслюмово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 4 741 817.50 рублей. 

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, которым пояснил, что требование в части взыскания долга в размере 2 777 535,14 руб. не подлежит удовлетворению, так как данная сумма является гарантийным удержанием.

Истец в судебном заседании 08.10.2019, с учетом отзыва на исковое заявление заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований, просил суд взыскать с ответчика сумму долга в размере 2 354 196,66 руб..

Суд в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принял уточнение исковых требований. 

Истец уточненные исковые требования поддержал по основаниям указанным в исковом заявлении, просил иск удовлетворить.

Ответчик исковые требования признал, полномочия ответчика на признание иска предоставлены доверителем. 

Как следует из искового заявления,  01.04.2016г. г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №128/16 на выполнение Истцом по поручению Ответчика строительно-монтажных работ. За период с 01 марта 2017 по 31.05.2019г. Истцом по Договору выполнены работы и сданы результаты работ Ответчику на общую сумму 13 310 103,38 руб., что подтверждается актами приемки выполненных работ по форме КС-2. Оплата ответчиком произведена частично на сумму 8 168 982,78 руб.. Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные по делу доказательства в их совокупности, заслушав мнение истца, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, по которым пришел к выводу о наличии  оснований для  удовлетворения исковых требований.

Как следует из материалов дела, 01.04.2016  между истцом (подрядчик)  и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда №128/16 по условиям которого Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика, выполнить строительно-монтажные работы на Объекте, указанном в п.1.8. настоящего Договора, в соответствии с Проектно-сметной документацией, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчик необходимые условия для  выполнения Работ, принять их результат и уплатить оговоренную настоящим Договором цену, согласно п.4.1 Договора.

Пунктом 2.1 договора по настоящему Договору Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика, выполнить строительно-монтажные работы на Объекте, указанном в п.1.8. настоящего Договора, в соответствии с Проектно-сметной документацией, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчик необходимые условия для  выполнения Работ, принять их результат и уплатить оговоренную настоящим Договором цену, согласно л.4.1 Договора.

Разделом 3 договора стороны согласовали, что срок начала Работ дата подписания настоящего Договора. Срок завершения работ - 30 нюня   2016   гола.   Подрядчик   в   целях      выполнения   Субподрядчиком   Работ   предоставляет Субподрядчику  в течение  10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящею Договора  График выдачи проектно-сметной документации (ПСД), ПОС, График поставки, оборудования и материалов поставки Подрядчика. Передача Подрядчиком Субподрядчику, указанных в настоящем пункте Договора документов, осуществляется с сопроводительным письмом с отметкой о получении их Субподрядчиком.

Датой завершения Работ по настоящему Договору считается дата подписании Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта формы №КС-11 (Приложение № 11). (пункт 3.3 договора).

Пунктом 4.1 договора стороны согласовали, что ориентировочная стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору составляет 100 356 330.84 рублей (Сто миллионов триста пятьдесят шесть тысяч триста тридцать рублей 84 копейки), с учетом  НДС   18%,  что составляет  15 308  592,84 рублей (пятнадцать миллионов   триста восемь тысяч  пятьсот девяносто два рубля  84  копеек) согласно Расчету стоимости (Приложение № 30).

Окончательной ценой Договора является стоимость фактически выполненного Субподрядчиком объема Работ. Стоимость Работ определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительно-монтажных работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а также в соответствии с действующим законодательством. Увеличение объема Работ и/или Пены Договора Стороны оформляют дополнительным соглашением.

Согласно  пункту 4.10 договора, оплата выполненного и принятого Подрядчиком за месяц объема Pa6oт производится Подрядчиком в размере 100% от их стоимости с учетом ранее выплаченного аванса за выполнение Работ, при условии предоставления Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Договора по согласованию Сторонами форме па общую сумму 5% (пять процентов) от стоимости выполненного месячного объема Работ, без стоимости материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также от стоимости Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика, указанных в п.5, п.7, п. 11  Приложения №2 к настоящему Договору, приобретенных у Подрядчика. Срок действия данных банковских гарантий должен превышать 90 календарных дней срок завершения Работ, указанный в п. 3.1. настоящего договора.

Согласно пункту 4.11 договора, окончательный расчет за выполненные Работы по Объекту производятся Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения его строительстве, включая устранение выявленных Дефектов/Недостатков, недоделок, на основании Акта приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-11, при условии предоставления Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств в Субподрядчика на Гарантийный срок (п. 13.2.Договора) банка-гаранта, предварительно согласованного с Подрядчиком, на сумму в размере 5% от стоимости всех Работ по  договору (без стоимости Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также, без стоимости Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика, приобретенных у Подрядчика и указанных в пунктах 5, 7. 11 Приложения №2 к настоящему Договору), скорректированной с учетом положении п. 4.1 статьи 4 Договора. Срок действия указанной банковской гарантии составляет 24 месяца с даты оформления Акта приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-11. В случае расторжения Договора или дополнительных соглашении к нему, либо в случае исключения (уменьшения) объемов Paбoт по Договору или дополнительным соглашениям к нему Подрядчик обязуется: оплатить оставшуюся часть выполненного и принятого объема Работ, с учетом ранее выданного в соответствии с п.4.2 Договора авансового платежа, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных pa6oт» (КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (КС-3) и Акта приемки объекта незавершенного строительства по форме КС-12 на такие Работы, при условии предоставления Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств Субподрядчика на Гарантийный срок (п. 13.2.Договора) банка-гаранта, предварительно согласованного с Подрядчиком, па сумму в размере 5% от стоимости всех Paбoт по Договору (без стоимости Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также, без стоимости материалов и Оборудования поставки Субподрядчика, приобретенных у Подрядчика и указанных в пунктах 5,7,11 Приложения №2 к настоящему Договору, скорректированной с учетом положений п.4.1 ст.4 договора. Срок действия указанной банковской гарантии составляет 24 мксяца от  оформления Акта приемки объекта незавершенного строительства но форме № КС-12. В случае увеличения  Гарантийного срока в соответствии с  условиями  настоящего договора Субподрядчик к   обязан   предоставить   новые   банковские   гарантии исполнения гарантийных обязательств. 

Дополнительным соглашением №1 от 20.06.2016 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016,  Дополнительным соглашением №2 от 01.10.2016 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016,   Дополнительным соглашением №3 от 01.10.2016 к договору подряда №128/16 от 01.10.2016,  Дополнительным соглашением №4 от 21.12.2016 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016,  Дополнительным соглашением №5 от 09.01.2017 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016,  Дополнительным соглашением №6 от 30.01.2017 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016, Дополнительным соглашением №7 от 31.03.207 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016, Дополнительным соглашением №8 от 29.12.2017 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016, Дополнительным соглашением №9 от 29.12.2018 к договору подряда №128/16 от 01.04.2016 стороны согласовали продление сроков выполнения работ до 31.07.2019, изменили абзац 1 Пункта 4.1 Договора и изложили его в следующей редакции: «Стоимость работ по настоящему договору в 2016 году составила 71 113 113,00 рублей (Семьдесят один миллион сто тринадцать тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) копеек, в том числе НДС (18%) 10 847 763,00 рублей (Десять миллионов восемьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. «Стоимость работ по настоящему договору в 2017 году составила 17 589 036,34 рублей (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать шесть) рубля 34 копейки, в том числе НДС (18%) 2 683 073,34 рублей (Два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи семьдесят три) рубля 34 копейки. Стоимость работ по настоящему договору в 2018 году составила 3 234 207,72 рублей (Три миллиона двести тридцать четыре тысяч двести семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) 493 353,72 рублей (Четыреста девяносто три тысячи триста пятьдесят три) рубля 72 копейки». Общая стоимость работ, выполненных по настоящему Договору за период с 2016 года по 2018 год включительно, составляет 91936 357,06 рублей (Девяносто один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18 % 14 024 190.06 рублей (Четырнадцать миллионов двадцать четыре тысячи сто девяносто) рублей 06 копеек. Общая стоимость работ, выполненных по настоящему Договору в 2109 году, составляет 648 147,60 рублей (Шестьсот сорок восемь тысяч сто сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%) в сумме 108 024,60 рублей (Сто восемь тысяч двадцать четыре) рубля 60 копеек.

Изменены пункты 4.10., 4.10.1 Договора и изложены в следующей редакции: «4.10  Оплата выполненного и принятого Заказчиком за месяц объема Paбот производится Заказчиком в размере 100% от их стоимости с учетом ранее выплаченного аванса за выполнение Работ, при условии предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Договора по согласованной Сторонами форме па общую сумму 3% (три процента) от стоимости выполненного месячного объема Работ, (рок действия данных банковских гарантий должен превышать на 90 календарных дней срок завершения Работ, указанный в п. 3.1 настоящего Договора. 

4.10.1. В случае отсутствия банковской гарантии, указанной в п.4.10. Договора. 3% стоимости выполненного за месяц объема Работ, будут удержаны Заказчиком в качестве обеспечительного платежа согласно ст. 381.1 ГК РФ для формирования гарантийного фонда исполнения Подрядчиком условий Договора до момента предоставления указанной в п.4 банковской гарантии, либо до наступления срока на 90 дней превышающего фактическую дату  завершения Работ.

Ответчик произвел оплату за период с 01 марта 2017 по 31.05.2019г. в размере 8 168 982,78 рублей, что подтверждается платежными поручениями №№ 15, 18 и актами зачета взаимных требований №37 от 31.03.2017г., №39 от 31.03.2017г., №58 от 30.04.2017г., №59 от 30.04.2017г.,№62 от 31.05.2017г., №104 от 30.09.2017г., №125 от 30.11.2017г.,№143 от 31.12.2017г., актами зачета взаимных требований от 30.06.2018г., от 30.09.2018г., от 31.03.2019г.

Истец в подтверждение выполнения работ представил Акт о приемки выполненных работ №6 от 31.05.2019г.,  Акт о приемки выполненных работ №5 от 31.03.2019г., Акт о приемки выполненных работ №7 от 31.03.2019г.,  Акт о приемки выполненных работ №8 от 31.03.2019г., Акт о приемки выполненных работ №14 от 31.03.2019г.,11.2018г., Акт приемки выполненных работ №28 от 30.11.2018г., Акт о приемки выполненных работ №341 от 30.11.2018г., Акт о приемки выполненных работ №353 от 30.11.2018г., Акт о приемки выполненных работ №361 от 30.11.2018г., Акт о приемки выполненных работ №351 от 31.10.2018г., Акт о приемки выполненных работ №340 от 31.10.2018г., Акт о приемки выполненных работ №359 от 31.10.2018г., Акт о приемки выполненных работ №346 от 31.10.2018г., Акт о приемки выполненных работ №285 от 30.09.2018г..Акт о приемки выполненных работ №287 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №304 от 30.09.2018г.,Акт о приемки выполненных работ №305 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №309 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №314 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №315 от 30.09.2018г., .Акт о приемки выполненных работ №316 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №317 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №318 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №319 от 30.09.2018г., Акт о приемки выполненных работ №178 от 31.08.2018г.. Акт о приемки выполненных работ №179 от 31.08.2018г., Акт о приемки выполненных работ №282 от 31.08.2018г., Акт о приемки выполненных работ №283 от 31.08.2018г., Акт о приемки выполненных работ №284 от 31.08.2018г., Акт о приемки выполненных работ №178 от 31.08.2018г., Акт о приемки выполненных работ №162 от 31.07.2018г., Акт о приемки выполненных работ №165 от 31.07.2018г., Акт о приемки выполненных работ №174 от 31.07.2018г., Акт о приемки выполненных работ №175 от 31.07.2018г., Акт о приемки выполненных работ №206 от 31.07.2018г., Акт о приемки выполненных работ №1-114 от 30.04.2018г., Акт о приемки выполненных работ №137 от 30.04.2018г., Акт о приемки выполненных работ №142 от 30.04.2018г., Акт о приемки выполненных работ №148 от 30.04.2018г., Акт о приемки выполненных работ №146 от 31.05.2018г., Акт о приемки выполненных работ №147 от 31.05.2018г., Акт о приемки выполненных работ №160 от 31.05.2018г., Акт о приемки выполненных работ №161 от 31.05.2018г., Акт о приемки выполненных работ №163 от 31.05.2018г., Акт о приемки выполненных работ №1-55 от 31.03.2018г., Акт о приемки выполненных работ №1-112 от 31.03.2018г., Акт о приемки выполненных работ №1-113 от 31.03.2018г.,   Акт о приемки выполненных работ №1-13 от 31.01.2018г., Акт о приемки выполненных работ №1-42 от 31.01.2018г.,   Акт о приемки выполненных работ №1-43 от 31.01.2018г., Акт о приемки выполненных работ №1-369 от 31.01.2018г., Акт о приемки выполненных работ №1-352 от 31.12.2017г.,   Акт о приемки выполненных работ №С-32 от 31.12.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1-360 от 31.12.2017г., Акт о приемки выполненных работ №С-30 от 31.12.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №С-31 от 31.12.2017г.,Акт о приемки выполненных работ №1-359 от 31.12.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1-356 от 31.12.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1-355 от 31.12.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-354 от 31.12.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-353 от 31.12.2017г.,   Акт о приемки выполненных работ №1-320 от 30.11.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1-320 от 30.11.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1-329 от 30.11.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1-328 от 30.11.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-326 от 30.11.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-325 от 30.11.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-324 от 30.11.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-323 от 30.11.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-322 от 30.11.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1-321 от 30.11.2017г., Акт о приемки выполненных работ №793/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1033/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1053/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1048/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1232/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1076/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1042/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1233/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1238/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1237/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1914/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1236/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1990/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1239/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1993/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1774/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1165/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1924/09-17 от 30.09.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1055/09-17 от 30.09.2017г., Акт о приемки выполненных работ №87/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1147/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1101/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1089/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1096/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1098/08-17 от 31.08.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №2475/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1090/08-17 от 31.08.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №2427/08-17 от 31.08.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №2489/08-17 от 31.08.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1119/08-17 от 31.08.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1131/08-17 от 31.08.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1118/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1134/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1142/08-17 от 31.08.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1783/05-17 от 31.05.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1497/05-17 от 31.05.2017г., Акт о приемки выполненных работ №997/05-17 от 31.05.2017г., Акт о приемки выполненных работ №717/05-17 от 31.05.2017г., Акт о приемки выполненных работ №716/05-17 от 31.05.2017г., Акт о приемки выполненных работ №716/05-17 от 31.05.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №675/05-17 от 31.05.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №673/05-17 от 31.05.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1391/04-17 от 30.04.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1405/04-17 от 30.04.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №2063/04-17 от 30.04.2017г., Акт о приемки выполненных работ №17/04-17 от 31.03.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №118/03-17 от 31.03.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1467/03-17 от 31.03.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1706/03-17 от 31.03.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1711/03-17 от 31.03.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1717/03-17 от 31.03.2017г., Акт о приемки выполненных работ №1727/03-17 от 31.03.2017г.,  Акт о приемки выполненных работ №1736/03-17 от 31.03.2017г

Претензией  №291/449 от 25.06.2019 истец потребовал от ответчика  оплаты стоимости выполненных работ. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик от приемки выполненных работ уклонился, обязательства по оплате стоимости выполненных работ не  осуществил, в полном объеме стоимость выполненных работ не оплатил.

Арбитражный суд на основании пункта 1 статьи 133, пункта 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование иска, самостоятельно определяет характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 ноября 2010 года № 8467/10).

Исходя из предмета и условий договор подряда №128/16 от 01.04.2016, арбитражный суд приходит к выводу о его правовой квалификации как договора подряда, подпадающего в сферу правового регулирования главы 37 Гражданского кодекса РФ.

Согласно части  5 статьи 4 Арбитражного процессуального  кодекса  Российской Федерации, спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом, либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.

Истцом в материалы дела представлена претензия №291/449 от 25.06.2019, полученная ответчиком, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления 18.07.2019, ответчиком не оспаривается. 

При таких обстоятельствах суд находит претензионный порядок соблюденным. 

Согласно статье 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену

В соответствии с пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

По существу правовой спор между сторонами возник по поводу не оплаты выполненных  работ, предъявленных истцом ответчику.

В соответствии с п. 4.10. Оплата выполненных и принятых за месяц объема работ производиться в размере 100% от их стоимости с учетом ранее выплаченного аванса за выполнение Работ, при условии предоставления безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Договора по согласованной Сторонами форме на общую сумму 3% от стоимости выполненного месячного объема работ.

В соответствии п.4.10.1 договора, в случае отсутствии банковской гарантии, указанной в п. 4.10. Договора, 3% от стоимости выполненного за месяц объема Работ, будут удержаны в качестве обеспечительного платежа согласно ст. 381.1. ГК РФ для формирования гарантийного фонда исполнения условий Договора до момента предоставления указанной в п. 4.10. банковской гарантии, либо до наступления срока на 90 дней превышающего фактическую дату завершения Работ.

Согласно п. 3.3 договора, датой завершения работ определена Сторонами как дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11.

В порядке, предусмотренном статьями 720, 753  Гражданского кодекса РФ и условиями договора, выполненные по договору № 128/16 от 01.04.2017г.,  работы, отраженные в  актах  о приемке выполненных работ, в справках о стоимости выполненных работ и затрат,   переданы ответчику и приняты им, что подтверждается печатью и подписью представителя ответчика в акте и справке. 

Как следует из пункта 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», в соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 

Истцом представлены унифицированные формы №КС-2, Акт  о приемке выполненных работ за отчетный период.

Ответчик, получив от истца результат выполненных работ, выполненные истцом по договору,  предъявленные последним ответчику к приемке принял, указанные Акты  о приемке выполненных работ (унифицированные формы №КС-2) и подписал их. При этом сведений о наличии недостатков в выполненных истцом работах ответчиком не заявлены.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 ГК РФ содержит положения о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий.

Вместе с тем, ответчик факт оплаты и факт не выполнения работ по договору в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании не оспорил. Напротив, ответчик в судебном заседании  признал  исковые требования. 

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле. 

Для отказа от оплаты выполненных работ у ответчика должны быть обоснованные причины, предусмотренные законом. Между тем, из материалов дела не усматривается наличие оснований, которые позволяли бы ответчику не оплачивать выполненные работы по договору. 

При этом суд учитывает положения ч.3.1 ст.70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Уклонение ответчика от оплаты задолженности нарушает положения ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Ответчик признает долг  в сумме 2 354 196,66 руб., поскольку признание ответчиком иска в рамках настоящего дела соответствует части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, его следует принять судом. 

Из текста  Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 следует, что исходя из положений АПК РФ другими самостоятельными результатами примирения сторон, помимо мирового соглашения, могут быть также частичный или полный отказ от иска (часть 2 статьи 49 Кодекса), его частичное или полное признание (часть 3 статьи 49 Кодекса), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела (статья 70 Кодекса).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Согласно частей 3 и 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном настоящей статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу. 

В соответствии с абзацем 6 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. 

При указанных обстоятельствах с ответчика подлежит взысканию сумма долга в размере 2 354 196,66 руб.. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика, поскольку спор доведен до суда по его вине.

С учетом уточнения исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 34 771 руб., сумма госпошлины в размере  11 938  руб. подлежит возврату  по справке суда,   в соответствии со статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Уточнение исковых требований принять. 

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Энергостройэксперт", юридический адрес: Республика Татарстан, 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 07.04.2011г.) в пользу Акционерного общества "Татарское Монтажно-наладочное управление", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 28.11.2002г.) 2 354 196,66 руб. долга, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 34 771 руб..

Выдать Акционерному обществу "Татарское Монтажно-наладочное управление", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 28.11.2002г.) справку на возврат госпошлины в размере 11 938 руб., уплаченной по платежному поручению № 1353 от 01.08.2019.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

СудьяА.Э. Шарипова