АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-18347/2023

г. Уфа

28 августа 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 15.04.2024

Полный текст решения изготовлен 28.08.2024

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Давлеткуловой Г.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания Сафаровой И.Д. рассмотрел дело по заявлению

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

к Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании осуществить возврат средств

при участии в судебном заседании:

согласно протоколу.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан (далее – Истец, Министерство, Минтранс РБ) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением к Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее – Ответчик, Администрация) об обязании осуществить возврат средств.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев представленные документы, суд установил следующее.

В рамках реализации государственной программы Республики Башкортостан «О государственной программе «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан»», утверждённой постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года № 18 между Министерством и Администрацией заключены соглашения № 23, № 36, № 14 о предоставлении и использовании субсидии из бюджета Республики Башкортостан в 2019-2021, 2020-2022 и 2021-2023 года местному бюджету администрации на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Отношения, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан, регулируются Порядком предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» (далее – Порядок).

Цель предоставления субсидии – софинансирование расходных обязательств муниципального образования по обеспечению развития и стабильного функционирования дорожно-транспортного комплекса Республики Башкортостан.

Так, в рамках Соглашения № 23 о предоставлении в 2019-2021 годах субсидий из бюджета Республики Башкортостан в бюджет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» (далее – Соглашение № 23) перечислена субсидия в размере 45 881 779 руб. 71 коп. в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на:

содержание автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан; 

ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения, включая проектные работы;

строительство и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения, включая проектные работы.

Финансирование из местного бюджета составило 1 500 013 руб. 00 коп.

Истец свои обязательства выполнил в полном объеме, перечислив указанную сумму.

Согласно пункту 2.3.15 Соглашения № 23 Ответчик обязуется обеспечить своевременное достижение целевых показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с приложением № 2. 

Пунктом 3.2 Соглашения № 23 предусмотрена ответственность Ответчика за неисполнение взятых на себя обязательств.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.8 Соглашения № 23 в случае если по состоянию на 31 декабря 2019 года муниципальным районом Хайбуллинский район Республики Башкортостан допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.15 и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, Администрация обязана в срок до 1 мая следующего года осуществить возврат средств из местного бюджета в бюджет Республики Башкортостан в объеме, рассчитанным в соответствии с Порядком.

В ходе анализа отчетности, представленной Ответчиком на предмет достижения плановых значений показателей результативности, установленных приложением № 2 к Соглашению № 23, Истцом выявлено, что по состоянию на 01.01.2020 не достигнуты плановые значения показателей результативности в виде 28.10 %, а фактическое значение – 23,3 %.

В соответствии с пунктом 3.2 Соглашения № 23 и с учетом положений статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) взысканию в бюджет Республики Башкортостан, по мнению Истца, подлежит сумма в размере 391 872 руб. 85 коп.

Соглашением № 36 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» (далее - Соглашение № 36) перечислена субсидия в размере 84 616 079 руб. 82 коп. в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на:

содержание автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан;

ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения, включая проектные работы.

Финансирование из местного бюджета составило 1 712 454 руб. 23 коп.

Истец свои обязательства выполнил в полном объеме, перечислив указанную сумму.

Согласно пункту 2.3.15 Соглашения № 36 Ответчик обязуется обеспечить своевременное достижение целевых показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с приложением № 2. Пунктом 3.2 Соглашения № 36 предусмотрена ответственность Ответчика за неисполнение взятых на себя обязательств.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.8 Соглашения № 36 в случае если по состоянию на 31 декабря 2020 года муниципальным районом Хайбуллинский район Республики Башкортостан допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.15 и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, Администрация обязана в срок до 1 мая следующего года осуществить возврат средств из местного бюджета в бюджет Республики Башкортостан в объеме, рассчитанным в соответствии с Порядком.

В ходе анализа отчетности, предоставленной Ответчиком на предмет достижения плановых значений показателей результативности, установленных приложением № 2 к Соглашению № 36, Истцом выявлено, что по состоянию на 01.01.2021 не достигнуты плановые значения показателей результативности в виде 85,70 %, а фактическое значение – 28,030 %.

В соответствии с пунктом 3.2 Соглашения № 36 и с учетом положений статей 309 и 310 ГК РФ взысканию в бюджет Республики Башкортостан, по мнению Истца, подлежит сумма в размере 2 847 029 руб. 94 коп.

Соглашением № 14 о предоставлении в 2021-2023 годах субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» (далее – Соглашение № 14) перечислена субсидия в размере 52 690 904 руб. 12 коп. в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Истец свои обязательства выполнил в полном объеме, перечислив указанную сумму.

Согласно пункту 4.3.3. Соглашения № 14 Ответчик обязуется обеспечить достижение значений результатов использования субсидии в соответствии с приложением № 4.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.3.12 Соглашения № 14 Администрация обязана возвратить в бюджет Республики Башкортостан не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе анализа отчетности, представленной Ответчиком на предмет достижения плановых значений показателей результативности, установленных приложением № 4 к Соглашению № 14, Истцом выявлено, что по состоянию на 01.01.2022 не достигнуты плановые значения показателей результативности в виде ввода в эксплуатацию объекта «Строительство мостового перехода через р. Малая Уртазымка на подъезде к д. Комсомольск» - 29,1 погонных метра, фактически объект не введен.

В соответствии с пунктом 4.3.12 Соглашения № 14 и с учетом положений статей 309 и 310 ГК РФ взысканию в бюджет Республики Башкортостан, по мнению Истца, подлежит сумма в размере 523 490 руб. 41 коп.

Невыполнение обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии и, соответственно, нарушение условий заключенных Соглашений № 23, № 36, № 14 со стороны Ответчика явилось основанием для применения установленной меры ответственности.

Суммы рассчитаны на основании Методики определения размера субсидий, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (глава 2 Порядка).

В связи с тем, что досудебном порядке денежные средства не возвращены, Истец обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с настоящим исковым заявлением.

Изучив доводы лиц, участвующих в деле, оценив, представленные в материалы дела письменные доказательства в совокупности и взаимосвязи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются в соответствии со статьей 310 ГК РФ.

Согласно статье 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В соответствии со статьей 34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Субсидии на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов предоставляются из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района или городского округа Республики Башкортостан на основании заявления органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Республики Башкортостан по установленной форме с приложением пакета документов (пункт 3.1 Порядка).

Согласно части 3 статьи 139 БК РФ условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Заключая соглашения, Ответчик не мог не осознавать особый характер правоотношений, в которые вступает, и должен был исходить из того, что в данном случае он не только приобретает те или иные права и преимущества, но и принимает на себя определенные обязанности.

Согласно положениям статьи 306.1 БК РФ допущенное муниципальным образованием нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета является бюджетным нарушением (пункт 3 части 1 статьи 306.1 БК РФ).

Эффективность использования бюджетных средств зависит от применения соответствующих их правовой природе мер гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из соглашения.

Установленная БК РФ необходимость возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, направлена на стимулирование добросовестного исполнения получателями субсидий условий предоставления средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также на обеспечение восстановления средств бюджета в размере, эквивалентном выявленному нарушению. Данная мера обеспечивает восстановление прав и соблюдение законных интересов публично-правового образования, предоставившего бюджетные средства получателю субсидии на определенных нормативными правовыми актами и (или) соглашениями (договорами) условиях.

В данном случае предоставление субсидии оформлено Соглашениями, заключенными в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных БК РФ.

Каких-либо изъятий в отношении требований, вытекающих из договоров, предметом которых являются бюджетные средства, ГК РФ не предусмотрено.

Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан (пункт 1.3 Порядка). 

В соответствии с пунктом 3.3 Порядка предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, которое согласно подпункту 4 пункта 3.3 должно содержать плановые значения целевых показателей результата использования субсидии, предполагающие достижение плановых значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Республики Башкортостан, и обязательства муниципального района или городского округа Республики Башкортостан по достижению этих плановых значений.

Указанные плановые значения целевых показателей результата использования субсидии установлены Администрацией самостоятельно, исходя из объема и пообъектного распределения предоставляемых субсидий.

В соответствии с пунктом 3.9 Порядка в случае, если муниципальным районом или городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.3 настоящего Порядка, и в срок до 15 марта года (в предыдущей редакции до 1 марта - изменение внесено редакцией от 30.12.2020 № 841), следующего за годом предоставления субсидии или иного межбюджетиого трансферта, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из муниципального бюджета в бюджет Республики Башкортостан в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле, указанной в Порядке.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из муниципального бюджета в бюджет Республики Башкортостан, в размере субсидии, предоставленной муниципальному бюджету в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Мера ответственности, предусмотренная пунктом 3.9 Порядка, обеспечивает восстановление прав и соблюдение законных интересов публично-правового образования, предоставившего бюджетные средства получателю субсидии на определенных нормативными правовыми актами и (или) соглашениями условиях.

Абзацем 8 пункта 3.14 Порядка в случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 3.9 и 3.12 настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств не позднее 1 мая в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - не позднее 10 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет в орган местного самоуправления требование по возврату объема средств из бюджета муниципального образования в бюджет Республики Башкортостан, рассчитанного в соответствии с пунктами 3.9 и 3.12 настоящего Порядка, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с настоящим Порядком.

Целевым показателем результативности предоставления субсидии является достижение значения технической готовности объекта и (или) иного показателя, установленного соглашением на предоставление субсидии, по состоянию на конец года.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минтрансом РБ путем сравнения плановых и фактически достигнутых муниципальными образованиями Республики Башкортостан в отчетном периоде значений целевых показателей.

Отчетность ответственного исполнителя содержит сведения о достижении показателей государственной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается обоснование причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Как следует из материалов дела, в соответствии с Соглашением № 23 (с изменениями и дополнениями) плановое значение показателя «доля дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям в общей протяженности дорог местного значения, %» за 2019 год установлено Администрацией в размере 28,1 %.

В соответствии с отчетом, представленным по итогам 2019 года, фактическое значение указанного показателя составило 23,3 %, что подтверждается также отчетом 3ДГ(мо), предоставляемым Администрацией в территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации.

Таким образом, показатель за 2019 год не достигнут.

В возражении на исковое заявление за 2019 год Администрация указывает на значение 28,1 %, ссылаясь при этом на отчет 3ДГ(мо) за 2020 год вместо отчета 3ДГ(мо) за 2019 год.

В соответствии с Соглашением № 36 (с изменениями и дополнениями) плановое значение показателя «доля дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям в общей протяженности дорог местного значения, %» за 2020 год установлено Администрацией в размере 85,7 %.

В соответствии с отчетом, представленным по итогам 2020 года, фактическое значение указанного показателя составило 28,03 %, что подтверждается также отчетом 3ДГ(мо), предоставляемым Администрацией в территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации.

Таким образом, показатель за 2020 год не достигнут.

Письмом от 24.05.2021 № 1495, поступившим в адрес Минтранса РБ, Администрация сообщает, что указанное значение показателя было установлено Администрацией некорректно и просит внести изменения в плановое значение показателя.

Учитывая, что срок представления администрациями муниципальных районов годового отчета о достижении целевых показателей в соответствии с Соглашением установлен до 15 числа месяца, следующего за отчетным, т.е. 15 января 2021 года, срок устранения нарушений по достижению целевых показателей - 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, т.е 1 марта 2021 года, Минтранс РБ посчитал, что внесение изменений в Соглашение в мае 2021 года не представлялось возможным.

В соответствии с Соглашением № 14 (с изменениями и дополнениями) за счет субсидий из бюджета Республики Башкортостан в 2021 году планировалось осуществить:

- установку дорожных знаков туристической навигации 14 шт. – целевой показатель, субсидии выделены в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 23.08.2021 № 757-р, соответствующее дополнительное соглашение № 2 к Соглашению подписано 28.09.2021;

- строительство мостового перехода через р. Малая Ургазымка на подъезде к д. Комсомольск с вводом в эксплуатацию в 2021 году 29,1 погонных метров – целевой показатель, субсидии выделены в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 04.03.2021 № 151-р и объект капитального строительства включен в Соглашение № 14.

В соответствии с отчетом о достижении целевых показателей, представленным по итогам 2021 года, оба вышеуказанных целевых показателя не достигнуты.

Пунктом 3.14 Порядка устанавливается основание для освобождения муниципального образования Республики Башкортостан от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.9 Порядка, им является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом республиканского органа исполнительной власти Республики Башкортостан и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом республиканского органа исполнительной власти Республики Башкортостан;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние па исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 3.3 настоящего Порядка.

Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, направляются муниципальным образованием Республики Башкортостан, допустившим нарушение обязательств, в адрес главного распорядителя  бюджетных средств в срок не позднее 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии.

Причины неисполнения обязательств, указаны Администрацией в письме от 28.09.2022 № 3200 и в возражении на исковое заявление, а именно:

- позднее заключение муниципального контракта на установку знаков 25.12.2021, при этом субсидия выделена в сентябре 2021 года;

- выполнение работ и ввод объекта по строительству мостового перехода через р. Малая Уртазымка на подъезде к д. Комсомольск в 2022 году при установленном дополнительным соглашением № 1 от 24.12.2020 к муниципальному контракту от 11.09.2020 № 52 сроке выполнения работ 30.06.2021.

Указанные обстоятельства не входят в перечень обстоятельств, являющихся основанием для освобождения муниципального образования Республики Башкортостан от применения мер ответственности.

Выполнение работ и ввод объектов в эксплуатацию в 2022 году не освобождает от применения мер ответственности за недостижение показателей, установленных Соглашением, так как в соответствии с Соглашением Администрацией приняты обязательства о выполнении работ и вводе объектов в эксплуатацию именно в 2021 году.

Следует отметить, что участие в отборе на предоставление субсидии добровольное, носит исключительно заявительный характер.

Ответчик принял на себя исполнение всех без исключения обязательств по Соглашениям.

Таким образом, Ответчик добровольно участвовал в отборе на предоставление субсидии, подписал соглашения, а также дополнительные соглашения, и принял на себя обязательства, включая обязательства по соблюдению сроков исполнения, и ответственность за недостижение показателей результативности.

Минтранс РБ направил Администрации требования № 05-18/25 от 30.04.2020 о возврате в бюджет Республики Башкортостан части субсидии, предоставленной в 2019 году, в размере 391872 руб. 85 коп., № 05-18/24 от 17.05.2021 о возврате в бюджет Республики Башкортостан части субсидии, предоставленной в 2020 году, в размере 2847029 руб. 94 коп., № М15-2709 от 19.04.2022 о возврате в бюджет Республики Башкортостан части субсидии, предоставленной в 2021 году, в размере 523490 руб. 41 коп., № М15-6641 от 14.09.2022, № М15-6639 от 14.09.2022, № М15-6638 от 14.09.2022.

По мнению Ответчика, течение срока исковой давности по требованию Истца о возврате средств, выделенных согласно Соглашению № 23 в размере 391872 руб. 85 коп., началось с 1 мая 2020 года и, поскольку Истец обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан только 07 июня 2023 года, он пропустил срок исковой давности.

Поскольку никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок, суд с учетом аналогии права исходит из общего срока исковой давности, определенного в статье 196 ГК РФ (3 года).

Между тем Истцом в материалы дела представлено гарантийное письмо от 23.07.2020 № 2320, согласно которому Администрация гарантирует возврат предоставленных субсидий бюджету муниципального района на условиях софинансирования расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в IV квартале 2020 года в размере 1048698,85 руб., в том числе за 2017 год - 656826,00 руб., за 2019 год - 391872,85 руб.

Направление должником кредитору гарантийного письма (писем), в котором должник обязался погасить задолженность, прерывает течение срока исковой давности (Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2015 N 18-КГ15-3, Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2008 N 14056/07 по делу N А58-7078/2006).

На основании изложенного, исковые требования Министерства подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан удовлетворить.

Обязать Администрацию муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан осуществить возврат средств выделенных согласно Соглашению о предоставлении в 2019-2021 годах субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» от 15 марта 2019 года № 23 в размере 391872 руб. 85 коп.

Обязать Администрацию муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан осуществить возврат средств выделенных согласно Соглашению о предоставлении в 2020-2022 годах субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» от 31 марта 2020 № 36 в размере 2847029 руб. 94 коп.

Обязать Администрацию муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан осуществить возврат средств выделенных согласно Соглашению о предоставлении в 2021-2023 годах субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» от 26 марта 2021 № 14 в размере 523490 руб. 41 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Г.А. Давлеткулова