116/2020-25146(3) 

Арбитражный суд Республики Карелия 

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru 

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-12007/2019

г. Петрозаводск

20 мая 2020 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

Внести в муниципальный контракт № 0806300011818000282-1 от 05.10.2018  

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту  

«Строительство районной магистрали от ул. Попова до ул. Университетской в  

г. Петрозаводске», заключенный между администрацией Петрозаводского  

городского округа (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) и обществом с  

ограниченной ответственностью «Альянс Групп» (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>), следующие изменения: 

- пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции: «Окончание выполнения  работ по контракту – не позднее 30.11.2020, в том числе, по этапам  выполнения работ: по первому этапу – не позднее 26.11.2018; по второму  этапу – не позднее 30.11.2020»  

- пункт 6.1 изложить в следующей редакции: «Контракт вступает в силу с  даты его заключения сторонами и действует до 31.12.2020»;  

- в пункте 11 приложения № 2 к муниципальному контракту «Техническое  задание на выполнение работ по разработке проектной документации по  объекту «Строительство районной магистрали от ул. Попова до ул.  Университетской в г. Петрозаводске» слова «Число полос движения – 4»  заменить на «Число полос движения – 2»;  

- в пункте 13 приложения № 2 к муниципальному контракту «Техническое  задание на выполнение работ по разработке проектной документации по  объекту «Строительство районной магистрали от ул. Попова до ул.  Университетской в г. Петрозаводске» срок выполнения работ по второму  этапа указать - не позднее 30.11.2020;  

- в приложении № 3 к муниципальному контракту «График (план)  выполнения работ по разработке проектной документации по объекту  «Строительство районной магистрали от ул. Попова до ул. Университетской  в г. Петрозаводске» дату окончания работ по второму этапу указать – не  позднее 30.11.2020.  

2. Взыскать администрации Петрозаводского городского округа в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «Альянс Групп» 6 000 руб.  

расходов по уплате государственной пошлины. 

3. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного  месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский  проспект, 65) через Арбитражный суд Республики Карелия.  

Судья Ильющенко О.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 25.06.2019 12:35:19

Кому выдана Ильющенко Ольга Владимировна