Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-61111/2017

23 августа 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  15 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  23 августа 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" (адрес:  Россия 195009, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ВАТУТИНА 3, ЛИТЕР А, ОГРН:  1027700004012);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПУТЕЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (адрес:  Россия 690002, г ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ край, ул АЛТАЙСКАЯ 3, ОГРН:  1102538003743);

третье лицо: акционерное общество «Благовещенская ТЭЦ» (адрес:  Россия 675000, г.Благовещенск, ул.Зейская, 225/3 )

о взыскании 38870550.32

при участии

- от истца: ФИО1 дов 31.01.19,

- от ответчика: ФИО2 дов 20.04.17.

установил:

ПАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" обратилось с иском к ООО "Межрегиональное путейское предприятие" и просит взыскать с учетом уточнения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ 27 719 936 руб. 10 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ на основании п.38.1 договора подряда № ТЭЦ» № 201421013/20131013-0898 от 14.04.2014 и 11 150 614 руб. 22 коп. штрафа за нарушение сроков окончания работ на основании п.38.10 указанного договора.

Ответчик предъявил встречный иск о признании п.38.10 дополнительного соглашения № 3 от 10.12.2014 недействительным.

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст.132 АПК РФ.

Определением от 19.12.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено АО «Благовещенская ТЭЦ».

Решением от 15.02.18 с общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональное путейское предприятие" взыскано в пользу публичного акционерного общества "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" 3 529 442 руб. 84 коп., из них: 1 955 840 руб. 59 коп. неустойки по п.38.1 договора и 1 573 602 руб. 55 коп. штрафа по п.38.10 договора, а также 40 647 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. В остальной части первоначального иска отказано. В удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением Тринадцатого Арбитражного суда от 02.08.18 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 12.11.18 решение и постановление Апелляционного суда отменены в части первоначального иска. Дело в данной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальной части судебные акты без изменения.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда на строительство объекта: «Вторая очередь «Благовещенской ТЭЦ» № 201421013/20131013-0898 от 14.04.2014 и дополнительные соглашения к нему.

Перечень работ, их стоимость и сроки указаны в приложениях к договору. ООО "Межрегиональное путейское предприятие" – субподрядчик допустило нарушение сроков выполнения работ.

Согласно п.38.1 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков исполнения любой обязанности, в том числе срока начала, окончания, промежуточного срока, срока поставки и любого др. срока установленного договором, субподрядчик оплатит генподрядчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)ставки рефинансирования ЦБ РФ от договорной цены в день за каждый день просрочки. Неустойка, подлежащая уплате субподрядчиком согласно настоящему пункту, не может превышать 10 (десять) процентов от договорной цены в отношении каждого нарушения. Неустойка не является зачетной.

Согласно п.38.10 дополнительного соглашения № 3 от 10.12.2014 в случае нарушения субподрядчиком сроков окончания выполнения работ, соответствующего этапа работ, предусмотренных приложениями № 1, 1.1, 1.2, субподрядчик оплатит генподрядчику штраф в размере 1 (один) процент от стоимости цены договора за каждый случай нарушения, начиная с одиннадцатого дня просрочки.

На момент заключения договора подряда от 14.04.2014 № 201421013/20131013- 0898 на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» его цена согласно п.32.1 договора составляла 28 085 250 руб. 48 коп.

В ходе исполнения договора изменялась как цена договора, так и другие его положения, в частности, об ответственности.

Всего за период строительства заключено 13 дополнительных соглашений. Дополнительным соглашением № 13 от 20.12.2016 сторонами согласована окончательная цена договора в размере 383 153 876 руб. 79 коп.

Ответчик не оспаривает факт нарушения сроков выполнения работ по п. п. 38.1 и 38.10 договора, однако просит принять во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с сильными проливными дождями (циклонами), которые препятствовали выполнению земляных работ.

Ответчик представил контрсчёт неустойки и штрафа от цены просроченного этапа работ. Согласно контрсчёту ответчика неустойка по п.38.1, рассчитанная от стоимости этапа работ, составляет 4 532 811 руб. 30 коп., штраф по п.38.10 составляет 1 259 436 руб. 10 коп. Расчет ответчика проверен судом и признан правильным.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению в размере 4 532 811 руб. 30 коп. неустойки по п.38.10 и 1 259 436 руб. 10 коп. штрафа по п. 38.10 договора.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональное путейское предприятие" в пользу публичного акционерного общества «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 5 792 247 руб. 40 коп., из них: 4 532 811 руб. 30 коп. неустойки по п.38.1 договора и 1 259 436 руб. 10 коп. штрафа по п.38.10 договора, а также 51 961 руб. 24 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части первоначального иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.