И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

07 июня 2024 года       Дело №А40-43511/24-89-182

Резолютивная часть решения изготовлена 14 мая 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 июня 2024 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи О.А. Акименко

при ведении протокола секретарем судебного заседания Голоскоковой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ" (ИНН: 

<

***>) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>, КПП: 772701001) о взыскании  задолженности в размере 8 823 257,61 руб., государственной пошлины.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 03.05.2023 г., ФИО2 по дов. от 0*9.01.2024 г.; 

от ответчика: ФИО3 по дов. от 24.11.2023 г.

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 8 823 257 руб. 61 коп. 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Протокольным определением от 14.05.2024 в удовлетворении заявления истца об объявлении перерыва в судебном заседании и об истребовании доказательств судом отказано.

Представитель истца требования поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 17.11.2022 между ООО «Нефтегазинжиниринг» (далее - Субподрядчик) и ПАО «Газпром автоматизация» (далее - Подрядчик) был заключен договор подряда №21/130222 на выполнение пусконаладочных работ (Приложение №1) (далее - Договор).

В соответствии с п.2.1. настоящего Договора Подрядчик (ПАО «Газпром автоматизация») поручает, а Субподрядчик (ООО «Нефтегазинжиниринг») принимает на себя обязательство своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить в установленный Договором срок Работы на Объектах.

Перечень Этапов/Объектов и виды выполняемых работ определены в Приложении №1 к Договору.

Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы на основании п.2.2. настоящего Договора.

Цена работ по Договору в соответствии с п.3.1. настоящего Договора включает в себя пусконаладочные работы «под нагрузкой» и «вхолостую» Объектов (Приложение №1):

- Дообустройство сенома-апских залежей Бованенковского НГКМ» Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ, Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап,2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

Инвестиционного    проекта    «Дообустройство    сенома-апских    залежей Бованенковского НГКМ» (код проекта 051-2004674).

В соответствии с п.3.1.1. Цена пусконаладочных работ «под нагрузкой» и «вхолостую» по Объекту Дообустройство сенома-апских залежей Бованенковского НГКМ» Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ, Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап,2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ» составляет 8 615 011,72 руб. с НДС.

На основании п.4.1. срок начала и окончания выполнения Работ по Договору определяется в Календарном плане проведения пусконаладочных работ (Приложение №2 к Договору), с 01.11.2022 по 30.05.2023 г.

08.12.2022 г. заключено дополнительное соглашение №1 к Договору (Приложение №2), в соответствии с п.3.1.1. Цена пусконаладочных работ «под нагрузкой» и «вхолостую» по Объекту Дообустройство сенома-апских залежей Бованенковского НГКМ» Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ, Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап,2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ» составляет 25 992 601,00 руб. с НДС.

Изменен пункт 16.1. Договора: «Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2022 г.»

06.04.2023 г. заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору (Приложение №3), в соответствии с которым п.3.1.1. Цена пусконаладочных работ «под нагрузкой» и «вхолостую» по Объекту Дообустройство сенома-апских залежей Бованенковского НГКМ» Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ, Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап,2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ» составляет 37 008 686,92 руб. с НДС.

Согласно принятым КС-2 №1, №2; КС-3 №1, №2 от 30.11.2022 г. (Приложение №4) за период с 01.08.2022 г. по 30.11.2022 г. выполнены пусконаладочные работы «вхолостую» на объекте Дообустройство сенома-апских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 3 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенского НГКМ. на сумму 12 996 300,90 руб.

Согласно принятым КС-2 №3, №4; КС-3 №3, №4 от 30.11.2022 г. за период с 01.08.2022 г. по 30.11.2022 г. (Приложение №5) выполнены пусконаладочные работы «вхолостую» на объекте Дообустройство сенома-апских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 5 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенского НГКМ. на сумму 12 996 300,90 руб.

Итого работы были полностью выполнены, приняты и оплачены в соответствии с дополнительным соглашением № 1 на сумму 25 992 601,82 руб. (Дата платежа 30.03.2023 г.).

26.09.2023 года письмом исх. №23-1024 (Приложение №6) в адрес Подрядчика были направлены справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 22.09.2023 г. (Приложение №7), реестр актов о приемке выполненных пусконаладочных работ (Приложение №8), акты о приемке выполненных работ №1-3 от 22.09.2023 г. (Приложение №9), счет-фактура №177 от 22.09.2023 г. (Приложение №10) и счет №185 от 22.09.2023 г. (Приложение №11) для приемки выполненных работ и их оплаты на сумму 8 823 257, 61 руб. (Восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 61 коп. с НДС.

Письмом исх. №ВС/45/18830 от 09.10.2023 г. (Приложение №12) Подрядчик для приемки вышеуказанных документов запросил журнал учета выполненных работ.

Субподрядчик письмом исх. №23-1068 от 16.10.2023 г. (Приложение №13) оригинал журнала учета выполненных работ направил в адрес Подрядчика.

Соответствии с п.5.1.3 Подрядчик не позднее 2 (Двух) рабочих дней подписывает полученные в соответствии с Договором документы, скрепляет их печатью, либо дает мотивированный отказ в письменной форме.

Не получив документы от Подрядчика в соответствии с п. 5.1.3 Договора, Истец 10 ноября 2023 г. направил в адрес Ответчика претензию исх. № 23/1130 (Приложение №15) с требованием оплатить выполненные работы, данная претензия вручена Ответчику Почтой России 17 октября 2023 г., но Ответчик оставил указанную претензию без ответа.

На текущую дату подписанные документы о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от их приемки в адрес Субподрядчика не поступили, оплата за выполненные работы не произведена.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении требований, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 709, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также учитывает следующее. 

Согласно п. 2.1 договора: Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить в установленный Договором срок Работы на Объектах. Перечень Этапов/Объектов и виды выполняемых Работ определены в Приложении № 1 к Договору.

Приложением №1 к договору предусмотрен перечень объектов и виды пусконаладочных работ «под ключ»:

№ п/п

Наименование Объектов / подобъектов

Виды выполняемых пусконаладочных работ

1

«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ, Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ»

Пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и автоматических систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения (АСПС, КЗ и ПТ) двух газоперекачивающих агрегатов

Между сторонами заключены также:

1) ДС №1 от 08.12.2022, согласно которому: 

Стороны изменили пункт 3.1.1. Статьи 3 «Цена работ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.1.1. Цена пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по Объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ, Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ» составляет 21 660 501,52 (Двадцать один миллион шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот один) рубль 52 копейки, кроме того НДС (20%) - 4 332 100,30 (Четыре миллиона триста тридцать две тысячи сто) рублей 30 копеек, всего с НДС - 25 992 601,82 (Двадцать пять миллионов девятьсот девяносто две тысячи шестьсот один) рубль 82 копейки и является окончательной (Приложение № 2.1 к Договору)».

2. Изменить пункт 16.1. Статьи 16 «Вступление в силу и срок действия Договора» Договора и изложить его в следующей редакции:

«16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2022».

3. Изменить Приложение №2.1. к Договору «Смета затрат на выполнение пусконаладочных работ» и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

4.Субподрядчик подтверждает, что до момента подписания настоящего Дополнительного соглашения им не выполнялись работы, не предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением. Стоимость таких работ в любом случае не подлежит оплате. Никакие убытки Субподрядчика, связанные с выполнением таких работ, не подлежат возмещению.

5. Настоящее ДС №1 вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора и Приложений к нему.

7. Настоящее ДС №1 подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Неотъемлемой частью настоящего ДС №1 является:

Приложение №1 «Смета затрат на выполнение пусконаладочных работ» (Приложение №2.1. к Договору).

Согласно приложению №1 «Смета затрат на выполнение пусконаладочных работ» (Приложение №2.1. к Договору), стороны определили: 

№ п/п

Наименование разделов, объектов, работ и затрат

«Вхолостую»

«Под нагрузкой»

Итого

1

Выполнение пусконаладочных работ на объекте «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1.ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 3 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ»

1.1

Автоматизированная система управления

7 376 611,21

1 847 120,95

9 223 732,16

1.2

Автоматическая система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения

823 031,61

191 953,25

1 014 984,86

1.3

Затраты на командировочные расходы специалистов пусконаладочных работ

474 784,71

116 749,03

591 533,74

Стоимость работ без НДС, руб.

10 830 250,76

НДС (20%), руб.

2 166 050,15

Стоимость работ с НДС, руб.

12 996 300,91

2

Выполнение пусконаладочных работ на объекте «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 5 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ»

2.1

Автоматизированная система управления

7 376 611,21

1 847 120,95

9 223 732,16

2.2

Автоматическая система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения

823 031,61

191 953,25

1 014 984,86

2.3

Затраты на командировочные расходы специалистов пусконаладочных работ

474 784,71

116 749,03

591 533,74

Стоимость работ без НДС, руб.

10 830 250,76

НДС (20%), руб.

2 166 050,15

Стоимость работ с НДС, руб

12 996 300,91

Стоимость работ по договору без НДС, руб.

21 660 501,52

НДС (20%), руб.

4 332 100,30

Стоимость работ по договору с НДС, руб.

25 92 601,82

2) ДС №2 от 06.04.2023, согласно которому стороны изменили пункт 3.1.1. Статьи 3  «Цена работ» Договора и изложить в следующей редакции: «3.1.1. Цена пуско-наладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах, входящих в состав стройки «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» составляет 30 840 572,44 (Тридцать миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 44 копейки, кроме того НДС (20%) - 6 168 114,48 (Шесть миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 48 копеек, всего с НДС - 37 008 686,92 (Тридцать семь миллионов восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 92 копейки и является окончательной (Приложение № 2.1 к Договору)».

2. Изменить пункт 16.1. Статьи 16 «Вступление в силу и срок действия Договора» Договора и изложить в следующей редакции: «16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношение Сторон, возникших с 01.08.2022».

3. Изменить Приложение №2.1. к Договору «Смета затрат на выполнение пуско-наладочных работ» и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему ДС № 2.

4.Субподрядчик подтверждает, что до момента подписания настоящего ДС № 2 им не выполнялись работы, не предусмотренные настоящим ДС №2. Стоимость таких работ в любом случае не подлежит оплате. Никакие убытки Субподрядчика, связанные с выполнением таких работ, не подлежат возмещению.

5. Настоящее ДС №2 вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим ДС № 2, Стороны руководствуются условиями Договора и Приложений к нему.

7. Настоящее ДС №2 подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Неотъемлемой частью настоящего ДС №2 является: Приложение №1 «Смета затрат на выполнение пуско-наладочных работ» (Приложение №2.1. к Договору).

Из приложения №1 «Смета затрат на выполнение пуско-наладочных работ», следует, что: 

№ п/п

Наименование разделов, объектов, работ и затрат

Вхолостую

Под нагрузкой

Итого

1.

Выполнение пусконаладочных работ на объекте «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 3 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ»

1.1

Автоматизированная система управления

7 376 611,21

1 847 120,95

9 223 732,16

1.2

Автоматическая система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения

823 031,61

191 953,25

1 014 984,86

U

Затраты на командировочные расходы специалистов щ сконаладочных работ

474 784,71

116 749,03

591 533,74

2.

Выполнение пусконаладочных работ на объекте «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 5 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ»

2.1

Автоматизированная система управления

7 376 611,21

1 847 120, 95

9 223 732,16

2.2

Автоматическая система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения

823 031,61

191 953,25

1 014 984,86

2.3

Затраты на командировочные расходы специалистов пуско-наладочных работ

474 784,71

116 749,03

591 533,74

3.

Выполнение пусконаладочных работ на объекте «Этап 4. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ. 1 этап.  лектростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ»

3.1

Автоматизированная система управления

6 258 447,56

1 565 007,64

7 823 455,2

3.2

Автоматическая система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения

695 004,48

162 093,86

857 098,34

33

Затраты на командировочные расходы специалистов пусконаладочных работ

400 929,30

98 588,08

499 517,38

Стоимость работ по договору без НДС, руб.

30 840 572,44

НДС (20%), руб.

6 168 114,48

Стоимость работ по договору с НДС, руб.

37 008 686,92

Иных дополнительных соглашений, заключенных между сторонами в материалы дела, на дату рассмотрения по существу, не представлено. 

Таким образом, договор и дополнительные соглашения, представленные со стороны истца в материалы дела, свидетельствуют о том, что предмет и основание заключенного договора и дополнительных соглашений, заключены в отношении: «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ, Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

Из искового заявления и требований следует, что размер задолженности ответчика составляет 8 823 257 руб. 61 коп. Указанные требования истец основывает на том, что 26.09.2023 года письмом исх. №23-1024 (Приложение №6) в адрес Подрядчика были направлены справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 22.09.2023 г. (Приложение №7), реестр актов о приемке выполненных пусконаладочных работ (Приложение №8), акты о приемке выполненных работ №1-3 от 22.09.2023 г. (Приложение №9), счет-фактура №177 от 22.09.2023 г. (Приложение №10) и счет №185 от 22.09.2023 г. (Приложение №11) для приемки выполненных работ и их оплаты на сумму 8 823 257 руб. 61 коп. с НДС.

Отказывая в принятии данных работ, ответчик, за исх. №ИД/45/КИ-Б/691 от 04.12.2023 указал, что: представленный субподрядчиком журнал производства работ не подтверждает выполнение работ, так как информация о работах, выполнявшихся на объекте в журнале отсутствует. Субподрядчик, в нарушение условий договора, не направил специалистов для проведения ПНР, в связи с чем подрядчик был вынужден выполнить работы собственными силами, а также сообщил, что в одностороннем порядке отказывается от договора в части работ по объекту «Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ. 1 этап. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГМК» (171/07). Договор считается расторгнутым с даты получения субподрядчиком настоящего уведомления о расторжении (п. 11.5 договора).

Суд отмечает следующее. 

По результатам исследования Актов, обосновывающих заявленные истцом требования, судом установлено, что объектом в Актах числится: «Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" на объекте "Этап 4. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ. 1 этап. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ" .Автоматизированная система управления. Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" на объекте "Этап 4. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ. 1 этап. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ" Автоматическая система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения. Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" на объекте "Этап 4. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ. 1 этап. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ" Затраты на командировочные расходы специалистов пусконаладочных работ». 

При этом, работы «вхолостую» по Объекту 1 были выполнены Истцом. Пусконаладочные работы по Объекту 1 «под нагрузкой» были выполнены Истцом лишь частично. Оставшуюся часть данных работ Ответчик был вынужден выполнять самостоятельно, поскольку Истец фактически отказался от их выполнения, о чем свидетельствует переписка сторон:

Письмо (№, дата)

Отправитель

Содержание

1. № 23-0531 от 05.05.2023

Истец

Констатирует завершение работ «вхолостую» на Объекте 1.

2. № ВС\45\9512 от 26.05.2023

Ответчик

Вызов специалистов для проведения ПНР «под нагрузкой» на Объекте 1.

3.№ 23-0740 от 04.07.2023

Истец

Констатирует завершение ПНР «вхолостую» и частично «под нагрузкой» на Объекте 1, а также сообщает об исчерпании лимита средств, предусмотренных Договором     на     командирование     наладочного персонала, и просит определить дополнительный источник финансирования.

4.№ВС\45\12709 от 12.07.2023

Ответчик

Вызов специалистов для дальнейшего проведения ПНР «под нагрузкой» на Объекте 1.

5. №23-0815 от 24.07.2023

Истец

Сообщает об отсутствии возможности направления специалистов в связи с исчерпанием лимита средств, предусмотренных Договором, на командирование персонала.

6.№ВС\45\16412 от 31.08.2023

Ответчик

Вызов специалистов для дальнейшего проведения ПНР «под нагрузкой» на Объекте 1.

7.№ 23-0942 от 04.09.2023

Истец

Сообщает       о       невозможности      направления специалистов в связи с исчерпанием лимита средств, предусмотренных Договором,  на  командирование персонала в сумме 1 682 584, 86 рублей (сумма по Объектам 1 и 2).

8.№ВС\01\17046 от 11.09.2023

Ответчик

Указывает на то, что цена Договора является твердой, в связи с чем не подлежит увеличению. Также указывает на то, что на Объекте 1 отсутствовал персонал Истца, в связи с чем Ответчик, во избежание сроков выполнения работ, был вынужден выполнять Работы собственными силами, в связи с чем отказывается от исполнения договора на основании пунктов 11.2, 11.3, 11.5, 11.6 договора

После получения письма Ответчика об отказе от Договора, Истец инициировал взыскание с Ответчика оплаты Работ «вхолостую» по Объекту 2:

Письмо (№, дата)

Отправитель

Содержание

9.    №    23-1024 от 26.09.2023

Истец

Направил Ответчику акты выполненных работ по Объекту 2.

10. № ВС\45\18830 от 09.10.2023

Ответчик

Затребовал у Истца исполнительную документацию, в том числе журнал производства работ.

11. №23-1068 от 16.10.2023

Истец

Направил Ответчику журнал производства работ по Объекту 1.

12. №231130 от 10.11.2023

Истец

Претензия с требованием оплаты работ.

13.№   ИД\45\КИ-Б\691 от 04.12.2023

Ответчик

Вернул Истцу акты выполненных работ в связи с невыполнением работ Истцом, сообщил об отказе от Договора. Письмо получено Истцом 08.12.2023 (РПО 1194358722331).

Пункт 4.2. Субподрядчик приступает к выполнению Работ по Договору после подписания Акта готовности оборудования для проведения пусконаладочных работ, оформленного Подрядчиком и на основании вызова на Объект, направленного Подрядчиком Субподрядчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства Работ.

Пункт 5.1. Приемка выполненных Работ «вхолостую» осуществляется ежемесячно, сдача-приемка ПНР «под нагрузкой» осуществляется после завершения работ по каждому объекту и подписания Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний - «вхолостую» и Акта рабочей комиссии после комплексного опробования - «под нагрузкой», а также предоставления Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (модернизированная), Акта о приемке выполненных работ (ПН-2), а также полного и исчерпывающего комплекта исполнительной документации, подписанной сторонами, в том числе технических отчетов о проведенных пусконаладочных работах.

Пункт 6.6. Субподрядчик обязан документально подтвердить затраты на командирование наладочного персонала, на перевозку работников к месту работы и обратно и расходуемый резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Пункт 6.12. Субподрядчик обязан своевременно оформлять Исполнительную документацию (журналы производства пусконаладочных работ, промежуточные акты на проведение пусконаладочных работ, программы и протоколы испытаний и др.) в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставлять её Подрядчику за 10 (десять) дней до окончания срока выполнения Работ, установленного в Приложении №2 к Договору.

Пункт 6.13. Субподрядчик обязан вести и еженедельно представлять Ответственному лицу Подрядчика недельно-суточный график и отчет за прошедший период (в произвольной форме), с отражением движения рабочей силы.

Пункт 6.16. Субподрядчик обязан вести табель учета рабочего времени наладочного персонала по форме, установленной в Приложении №5.8 к Договору, занятого в производстве Работ, ежемесячно подтверждать его у Ответственного лица Подрядчика и предъявлять Подрядчику при подписании соответственно Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (модернизированная) или Акта о приемке выполненных работ (форма № ПН-2).

Пункт 8.3.1. С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик должен вести Журнал производства работ, оформленный по форме Приложения В к СТО Газпром 2-1.12-802-2014 «Организация пусконаладочных работ на объектах ОАО «Газпром». Основные положения». Каждая запись в журнале должна быть завизирована Ответственным лицом Субподрядчика с расшифровкой (ФИО, должность).

Пункт 8.3.2. Журнал производства Работ ведется по Объекту с учётом каждого участка Работ. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значения во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика.

Пункт 11.2.Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата всех уплаченных по Договору денежных средств и компенсации убытков в случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных Договором, путем направления Субподрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

Пункт 11.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Субподрядчику убытков, в случае нарушения Субподрядчиком любого срока выполнения Работ.

Пункт 11.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика о расторжении Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении.

Пункт 11.7. Подрядчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, письменно уведомив об этом Субподрядчика.

Из совокупности вышеизложенного, суд приходит к выводу, что истцом не выполнены работы по этапу 2, а акты выполненных работ, на основании которых истец предъявляет требования, работы по данным актам выполнены иные, нежели предмет договора и дополнительных соглашений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования не подлежащими удовлетворению. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 709, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.А. Акименко