АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-1289/2021

г. Южно-Сахалинск

21 апреля 2023 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Очировой Л.П.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  693020, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Форвард-ДВ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693004, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, пр-кт Мира, д. 420, офис 003)  

о взыскании штрафа по государственному контракту № 12/2020 от 17.02.2020,  неустойки, неосвоенного аванса, процентов за пользование чужими денежными  средствами  

встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Форвард-ДВ» 

к государственному казенному учреждению «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области»  

о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 5 189 744  рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами  

третьи лица: ассоциация «Региональное отраслевое объединение  работодателей - саморегулируемая организация в области строительства  «Спецстройреконструкция»  

при участии: от истца: ФИО1 по доверенности № 139 от 21.04.2023; от ответчика: ФИО2 по доверенности от 14.02.2022; 

от третьего лица: ФИО3 по доверенности от 11.01.2021.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования государственного казенного учреждения «Дирекция по  реализации Федеральной программы социально-экономического развития  Курильских островов Сахалинской области» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвард-ДВ» в  пользу государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» штраф в размере 15 000 рублей, пению за  просрочку выполнения работ по прохождению экспертизы в размере 3 650 рублей  01 копейку, пеню за просрочку разработки проектно-сметной документации стадии  «Р» в размере 4 250 рублей, пеню за просрочку выполнения работ по контракту в  размере 283 945 рублей 89 копеек, неосновательное обогащение в размере  3 108 820 рублей 50 копеек, проценты за пользование чужими денежными  средствами за период с 28.05.2021 по 28.06.2021 в размере 14 223 рубля 91  копейку, всего взыскать 3 429 890 (три миллиона четыреста двадцать девять тысяч  восемьсот девяносто) рублей 31 копейку.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвард-ДВ» в  пользу государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» проценты за пользование чужими денежными  средствами, начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере  3 108 820 рублей (три миллиона сто восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей50  копеек, начиная с 29.06.2021 по день фактической оплаты задолженности, за  

исключением период с 01.04.2022 по 31.09.2022, на который Постановлением  Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022 объявлен мораторий.  

Признать решение общества с ограниченной ответственностью «Форвард-ДВ»  от 16.04.2021 № 16-2021/108 об одностороннем отказе от исполнения  государственного контракта № 12/2020 от 17.02.2020 недействительным.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвард-ДВ» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 41 457 (сорок  одна тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей 13 копеек.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Форвард- ДВ» удовлетворить частично.  

Взыскать с государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Форвард-ДВ» задолженность за выполненные работы в размере  5 189 774 рублей, пени за просрочку оплаты за период с 01.06.2021 по 31.03.2022 в  размере 262 948 рублей 55 копеек, возмещение судебных расходов по оплате  государственной пошлины в размере 37 031 рубль 55 копеек, всего взыскать  5 489 754 (пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят  четыре) рубля 10 копеек.  

Взыскать с государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» пользу общества с ограниченной  ответственностью «Форвард-ДВ» неустойку, начисленную на сумму  задолженности в размере 5 189 774 (пять миллионов сто восемьдесят девять тысяч  семьсот семьдесят четыре) рубля, исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального  Банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа, начиная с  01.10.2022 по день фактической оплаты долга.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвард-ДВ» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 196  (тридцать восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей.  

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований. 

Взыскать с государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» пользу общества с ограниченной  ответственностью «Форвард-ДВ» 2 059 863 (два миллиона пятьдесят девять тысяч  восемьсот шестьдесят три) рубля 79 копеек  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном  объеме через арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников